АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-38638/22

г. Уфа

15 июня 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: судьи  Хазиахметовой З.Р., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев исковое заявление федерального казенного учреждения  "Федеральное Управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального  дорожного агентства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее -  учреждение) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 312265124300201; далее -  предприниматель) об обязании обустроить примыкание объекта дорожного сервиса  

Третье лицо: Управление государственного автодорожного надзора по  РБ федеральной службы по надзору в сфере транспорта (450022, 

<

...> д 41, к. А).  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Заявленные Федеральным казенным учреждением "Федеральное управление  автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства требования  удовлетворить.  

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 312265124300201):  

1. В срок до 31.10.2023 года осуществить реконструкцию примыкания  объекта дорожного сервиса (кафе), размещенного на км 1260+896 справа по ходу  километража автомобильной дороги М-5 «Урал» (далее - Объект), в соответствии  с техническими требованиями и условиями, выданными Учреждением 22.12.2022  г., в том числе:  

1) Предусмотреть выполнение кадастровых работ по определению границ и  площадей частей земельных участков полосы отвода автомобильной дороги  общего пользования федерального значения М-5 «Урал», необходимых для  установления сервитута на занимаемые переходно-скоростными полосами,  въездом, выездом, части земельного участка в полосе отвода автомобильной  дороги, определить сроки и стоимость сервитута, не позднее 150 календарных дней  с момента вступления решения в законную силу;  

2) Заключить с Учреждением соглашение об установлении сервитута в  отношении земельного участка (части земельного участка) для размещения  примыкания, переходно-скоростных полос, освещения переходно-скоростных  полос объекта дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги  общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в соответствии с  требованиями Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной  деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (далее -  Закон об автомобильных дорогах) и главы V.3 Земельного кодекса Российской  Федерации не позднее 270 календарных дней с момента вступления решения в  законную силу;  

3) В течение 30 календарных дней после получения согласования проекта  производства работ, получить в ФКУ Упрдор «Приуралье» разрешение на  проведение работ (обустройство переходно-скоростных полос);  

4) Реконструировать примыкание Объекта до 31.08.2023 года, в соответствии  с техническими требованиями и условиями и в соответствии с согласованной  проектной документацией, разработанными согласно действующего  законодательства, а именно: обустроить объект дорожного сервиса переходно-скоростными полосами, соответствующими параметрам 3 категории,  

Технического регламента Таможенного союза TP TC014/2011 п. 5.1.6 ГОСТ 330622014, п. 5.1.11 ГОСТ 33062-2014, п. 3.25 ГОСТ 33475-2015, освещением переходно-скоростных полос, дорожными знаками, горизонтальной дорожной разметкой.  

5) По окончанию работ в срок до 30.09.2023 г. представить в Учреждение  копии исполнительной документации в масштабе 1:500, акты  освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, акт  соответствия выполненных работ выданным техническим условиям, оформленный  при участии Владельца Объекта, представителя организации, осуществившей  реконструкцию Объекта, представителя АО «ДЭП № 103» (обслуживающей  организацией);  

6) По завершению строительно-монтажных работ необходимо подписать  с Учреждением Акт разграничения полномочий по содержанию примыкания,  

переходно-скоростных полос, обочин, откосов насыпи, элементов обустройства, в  том числе наружного освещения, дорожного покрытия и дорожной разметки в срок  до 30.09.2023 г. включительно;  

7) Получить разрешение на ввод в эксплуатацию примыкания и переходно-скоростных полос в срок до 31.10.2023 г. включительно.  

2. До момента обустройства в соответствии с нормативными требованиями  переходно-скоростных полос, ограничить доступ подъезда к объекту  придорожного сервиса - кафе, гостиничный комплекс «Баракат», размещенному  на км 1260+896 справа по ходу километража автомобильной дороги М-5 «Урал».  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 312265124300201) в доход  федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Р. Хазиахметова