62_9726442 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-8882/20

17 июня 2020 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В. Сороченковой, при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев дело по иску АО "ЦДС" к Федеральное агентство воздушного транспорта, при  участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета  спора, ФГУП «АГА (А)» об обязании внести изменения в государственный контракт  

При участии в судебном заседании – представителей сторон, согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Внести изменения в государственный контракт № 0373100090919000003 от  22.02.2019г. в Календарный график производства и стоимости работ (Приложение № 2 к  Контракту), в части сроков выполнения работ на объекте "Реконструкция аэропортового  комплекса "Баландино" (г. Челябинск)", изложив п. 12.1 вышеуказанного контракта в новой  редакции: "Начальный и конечный сроки выполнения работ по контракту, а также  промежуточные сроки выполнения этапов работ определяются Календарным графиком  производства и стоимости работ (Приложение № 2 к контракту в новой редакции). Срок  выполнения работ на объекте установить до 31 декабря 2020 года.».  

 Взыскать с Федерального агентства воздушного транспорта в пользу акционерного  общества "Центрдорстрой" расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000  руб.  

 Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия.  

Судья Т.В. Сороченкова