АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-10502/2021

Нижний Новгород                                                         01 сентября 2021 года

Резолютивная часть объявлена 25.08.2021

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-271) 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 (доверенность от 15.12.2020),

от ответчика: не явились

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>)к обществу с ограниченной ответственностью «Техноэнерго»(ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>)  о расторжении договора, об удержании аванса и взыскании задолженности 

и   у с т а н о в и л: 

иск заявлен о расторжении договора от 30.08.2018  № 68/740ИП/18 о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения, заключенного с ООО «ТехноЭнерго», о возмещении затрат истца в размере 328 018 руб. 38 коп. путем удержания оплаченного аванса, о взыскании задолженности в сумме 327 027  руб.29 коп. по оплате  выполненных работ по договору от 30.08.2018  № 68/740ИП/18 о подключении, с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Требования основаны на статьях 309,310, 450,452, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано ненадлежащим исполнением ответчиком договорной обязанности по оплате оказанных услуг.

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил.

Дело рассмотрено без участия представителя ответчика по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Изучив материалы дела, заслушав истца, суд установил следующее.

Между ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (исполнитель) и ООО «ТехноЭнерго» (заявитель) заключен договор от 30.08.2018 № 68/740ИП/18 о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...>, к сети газораспределения (далее- договор о подключении).

Согласно пункту 10 договора о подключении предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из действующих на момент заключения договора стандартизированных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров проекта газоснабжения и составляет  1 077 050 руб.52 коп., в том числе предварительная стоимость разработки проектной документации и проведения ее экспертизы 328 018 руб. 38 коп.

Размер платы по индивидуальному проекту утверждается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов Региональной службой по тарифам по Нижегородской области. В случае если размер платы при утверждении будет изменен органом исполнительной власти субъекта РФ, стороны с целью корректировки размера платы заключают дополнительное соглашение к договору в течение 30 дней после утверждения размера платы.

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: предоплату в размере 328 018 руб. 38 коп. заявитель оплачивает в течение 14 дней с даты подписания договора, оплату в размере 80 % от утвержденного органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов размера платы за подключение (технологическое присоединение) за вычетом  предоплаты,  заявитель  оплачивает в течение  14 дней после утверждения размера платы за подключение органом исполнительной власти, субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов и подписания дополнительного соглашения к договору.

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в подтверждение принятия всех необходимых и достаточных мер для исполнения договора сослалось на то, что оно направило исходные данные для выполнения проектно-изыскательских работ ООО «СтройТрейд Групп»  по объекту капитального строительства, расположенному по адресу: 

<

...>.

В целях подключения указанного объекта между ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (заказчик) и ООО «СтройТрейд Групп» (подрядчик) заключен договор от 27.12.2018 № Н13961 на выполнение проектных и изыскательских работ.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ №Н13961 от 27.12.2018 подрядчиком ООО «СтройТрейд Групп» были выполнены проектно - изыскательские работы на сумму 786 054  руб. 80 коп., что подтверждается актом приема - передачи выполненных работ №3 от 30.10.2019.

Указанные работы оплачены истцом платежными поручениями: № 27398 от 28.11.2019 и № 2275 от 23.01.2020.

14.11.2019 после разработки проектной документации, согласно пункту 105 Правил подключения, ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» направило в Региональную службу по тарифам Нижегородской области заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

15.11.2019ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» направило ООО «ТехноЭнерго» уведомление о направлении заявления.

Экспертным заключением (№ в-1279 от 25.12.2019), выполненным Региональной службой по тарифам по Нижегородской области, сделан вывод: установить по индивидуальному проекту плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ООО «ТехноЭнерго» к газораспределительным сетям ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в размере 5 350 780,00 руб. 

10.01.2020Региональная служба по тарифам Нижегородской области приняла решение об установлении платы за технологическое присоединение поиндивидуальному проекту объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...> (протокол заседания Правления Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 1 от 10.01.2020).

Окончательный размер платы за технологическое присоединение, утвержденный решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области № 1/2 от 10.01.2020 составляет 5 350 780,00 руб. (без НДС), а расходы на разработку проектной документации - 655 040 руб. (без НДС).

Письмом № 0721/05-02-64 от 03.02.2020 ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»  в адрес ООО «ТехноЭнерго» было направлено решение Региональной службы по тарифам по Нижегородской области и дополнительное соглашение к договору о подключении, которым корректировалась стоимость услуг по подключению (технологическому присоединению).

Поскольку подписанное дополнительное соглашение или официальный отказ от его подписания не поступал, ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»  направило в адрес ООО «ТехноЭнерго» письмо № 0721/05-02-268 от 17.03.2020, в котором просило принять решение о целесообразности дальнейшего исполнения обязательств по договору о подключении и уведомить истца о принятом решении.

Письмом № 211 от 25.03.2020 ООО «ТехноЭнерго» сообщило, что считает подключение (технологическое присоединение) котельной, расположенной по адресу: 

<

...>, нецелесообразным.

04.06.2020 ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»   направило в адрес ООО «ТехноЭнерго» на подписание соглашение о расторжении договора о подключении.

Письмом № 348 от 15.06.2020 ООО «ТехноЭнерго» сообщило, что подписание соглашения о расторжении договора на условиях, указанных в пункте 2 соглашения, не представляется возможным.

Письмом № ВК-0721/05-02/6162 от 10.09.2020 истец повторно направил ООО «ТехноЭнерго» для подписания соглашение о расторжении договора подключении. Указанное письмо получено ООО «ТехноЭнерго» 22.10.2020, что подтверждается уведомлением о вручении.

Соглашение о расторжении договора со стороны ООО «ТехноЭнерго» подписано не было.

В добровольном порядке стороны не достигли соглашения о расторжении договора о подключении, поэтому истец обратился в суд с требованием о расторжении договора  от 30.08.2018 № 68/740ИП/18 о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения объекта капитального строительства

Согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором (пункт 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что ООО «ТехноЭнерго» допущено существенное нарушение договора о подключении (не представлен истцу экземпляр проектной документации, не выполнена подготовка сети газораспределения и газоиспользующего оборудования к подключению в пределах границ земельного участка, не подписано дополнительное соглашение, не выполнены условия об оплате услуг по договору) ,  что является основанием для расторжения договора о подключении № 68/740ИП/18 от 30.08.2018 в судебном порядке.

Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг.

Во исполнение условий договора по подключению истцом разработана проектная документация по созданию сети газораспреления до границ земельного участка ответчика. Проектно-изыскательские работы выполнялись по договору подряда №Н13961 от 27.12.2018 ООО «СтройТрейд Групп», что подтверждается материалами дела (актом выполненных работ) и не оспаривается ответчиком.

Ответчик выполненные истцом работы в полном объеме не оплатил.

Задолженность ООО «ТехноЭнерго» с учетом авансового платежа на день принятия решения, по мнению истца, составляет сумму 327 027 руб. 29 коп.  

К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются, помимо специальных норм, положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (пункт 1 статьи 781 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Ответчик своевременно расчет с истцом в полном объеме в соответствии с условиями договора не произвел.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд посчитал обоснованным и подлежащим удовлетворению исковое требование в части взыскания 327 027 руб. 29 коп. задолженности по компенсации расходов на разработку проектной документации, что составляет разницу между утвержденными решением РСТ Нижегородской области от 0.01.2020 № 1/2 расходами и уплаченным авансом по договору.

Требование о компенсации затрат истца в сумме 328 018 руб. 38 коп., понесенных ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» путем удержания оплаченного аванса удовлетворению не подлежит, поскольку исследование данного вопроса входит в предмет доказывания по требованию о взыскании долга по договору. Данное требование не направлено на восстановление нарушенных прав  истца. В данной части истец выбрал ненадлежащим способ защиты (ст. 12 ГК РФ).

Доводы ответчика рассмотрены и отклонены как не влияющие на обоснованность исковых требований по расторжению договора и взыскании подтвержденных регулятором расходов, связанных разработкой и проведением экспертизы проектной документации, для подключения ответчика.

Расходы по государственной пошлине в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика в размере, пропорциональном удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 49,110, 112, 167 – 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

расторгнуть договор от 30.08.2018 № 68/74ИП/18 о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения, заключенный ООО "ТехноЭнерго" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) и ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>).

Взыскать с ООО "ТехноЭнерго" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) в пользу ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) 327 027 руб. 29 коп. долга, 15 541 руб. расходов по государственной пошлине.

Отказать в удовлевторении остальной части иска.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

На основании данного судебного акта возвратить ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета 560 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 21.04.2021 № 7292.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

Судья                     С.Г. Окутин