АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-5225/2017

г. Южно-Сахалинск

11 октября 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску областного  казенного учреждения «Учреждение обеспечения мероприятий в области  гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  Сахалинской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Стандарт-Сервис» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков  выполненных работ и обязании передать исполнительную документацию,  

при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от 09.01.2019 года, от ответчика – не явился, уведомлен, 

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стандарт- Сервис» в течение 45 календарных дней с момента вступления настоящего  решения суда в законную силу устранить недостатки выполненных работ,  а именно:  

1. В связи с выявленным несоответствием марки бетона  фундаментной плиты, провести лабораторные испытания бетона, в случае  несоответствия его прочности, выполнить усиление фундамента.  

2. Выполнить гидроизоляцию цокольной балки и фундаментной  плиты по периметру здания.  

3. Выполнить утепление цокольной балки 4. Выполнить обратную засыпку фундаментной плиты 

5. Закрыть утеплитель кровельных сэндвич-панелей по оси Г в осях  Н8 фасонным элементом или внутренним профильным уплотненным  элементом.  

6. Выполнить свесы кровли 250 мм от наружной поверхности стены  по осям 1-8 в осях А-Г  

7. Устранить протечки в местах стыковки кровли по осям А, Г, в  осях 1-8.  

8. Устранить протечки в местах стыковки кровельных панелей. 

9. Заменить стеновые панели, имеющие деформации, и/или  повреждения.  

10. Осушить колодцы, выполнить гидроизоляцию, установить  лестницы, установить полимерно-композитный люк, установить пожарный  гидрант.  

11. Установить, выполнить подводку и подключение к внутренним  сетям водоотведения автономное очистное сооружение «Топас».  

12. Засыпку пазух котлованов колодцев водоснабжения и  очистного сооружения выполнить дренирующим песком.  

13. Провести испытание сетей водоснабжения (СП 40-102-2000),  дезинфекцию и промывку трубопровода (МДК 2-02.2001).  

14. Провести опрессовку, подключение и проверку отопительной  системы.  

15. Провести проверку работоспособности установленного  электрооборудования.  

16. Провести проверку пожарной сигнализации.  17. Восстановить поврежденные оконные и дверные блоки.  

18. Заменить перегородки и перекрытия бытовых помещений. 

19. В помещении 5 (раздевалка) выполнить замену стяжки,  облицовку полов керамической плиткой и устройство плинтусов.  

20. Установить щитки осветительные (3 штуки).  

Взыскать с ООО «Стандарт-Сервис» в пользу областного казенного  учреждения «Учреждение обеспечения мероприятий в области  гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  Сахалинской области» судебную неустойку на случай неисполнения  судебного акта в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в день за период  неисполнения судебного акта в первые 30 календарных дней после  истечения срока исполнения судебного акта, 15 000 (пятнадцать тысяч)  рублей в день за период неисполнения судебного акта с 31 по 60  календарный день, 20 000 (двадцать тысяч) рублей в день за период  неисполнения судебного акта с 61 календарного дня до даты фактического  его исполнения.  

Взыскать с ООО «Стандарт-Сервис» в пользу областного казенного  учреждения «Учреждение обеспечения мероприятий в области  гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  Сахалинской области» 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по  оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О. А. Портнова