Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-9166/2024

г. Благовещенск

16 января 2025 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.А. Стовбуна,

протокол вел секретарь судебного заседания Р.В. Галичанина,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Александр" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о расторжении договоров,

при участии в заседании: от истца: ФИО1 – дов. № 102 от 02.02.2024

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Александр" о расторжении договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 8295/22-ТП, №8296/22-ТП и №8297/22-ТП от 30.12.2022 ввиду нарушения ответчиком сроков оплаты оказываемых услуг.

Ответчик отзыв на иск не представил.

Рассмотрев материалы дела, суд установил.

Между АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (сетевая организация) и ООО «Александр» (заявитель) заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям: №№ 8295/22-ТП, 8296/22-ТП, 8297/22-ТП от 30.12.2022 (далее - договоры).

В соответствии с пунктом 1 договоров сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов заявителя:

-  «Многоквартирный жилой дом Литер 6», расположенный по адресу: Амурская обл., Благовещенский р-н, с.Чигири, кадастровый номер земельного участка 28:10:013002:662;

-  «Многоквартирный жилой дом Литер 8», расположенный по адресу: Амурская обл., Благовещенский р-н, с.Чигири, кадастровый номер земельного участка 28:10:013002:662;

-  «Многоквартирный жилой дом Литер 7», расположенный по адресу: Амурская обл., Благовещенский р-н, с.Чигири, кадастровый номер земельного участка 28:10:013002:662.

Заявитель же обязался выполнить мероприятия согласно техническим условиям и оплатить расходы за технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящих договоров.

Стороны определили, что технологическое присоединение осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ, по второй категории надежности электроснабжения, в пределах максимальной мощности 145 кВт.

Обязательства по присоединению объекта заявителя, возложенные на сетевую организацию, определены пунктом 6 договоров, пунктом 10 технических условий № 15-09/845/8295, 15-09/846/8296, 15-09/847/8297 от 30.12.2022.

Обязательства по технологическому присоединению, возложенные на заявителя, предусмотрены пунктом 8 договора и пунктом 11 Технических условий.

Пунктами 10 указанных договоров размер платы за технологическое подключение установлен в размере 4 626 513,64 руб. по каждому договору.

В соответствии с п. 8 договоров заявитель обязуется надлежащим образом исполнять указанные в разделе III Договоров обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно пунктам 12 заявок № 8295, № 8296 и № 8297 на технологическое присоединение порядок расчета и условия рассрочки внесения платы за технологическое присоединение осуществляется по 1 варианту, при котором внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в порядке:

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 5 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

35 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета;

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Для оплаты услуг по договору сетевой организацией выставлены счета  № AS-y 8295/22 от 30.12.2022, № AS-y 8296/22 от 30.12.2022 и №AS-y 8297/22 от 30.12.2022 на сумму 4 626 513,64 руб. каждый. В соответствии с указанными счетами счет  подлежит оплате заявителем в следующем порядке:

1)   В течение 5 рабочих дней с даты выставления счета - 693 977 рублей 05 коп.

2)   В течение 20 дней с даты выставления счета - 1 387 954 рублей 09 коп.

3)   В течение 40 дней с даты выставления счета - 1 619 279 рублей 77 коп.

4)   В течение 10 дней со дня размещения Уведомления об обеспечении возможности присоединения - 925 302 рублей 73 коп.

Первые платежи по договорам внесены заявителем 30.12.2022, что сторонами не оспаривается.

Условия изменения, расторжения договора и ответственность сторон установлены в разделе V договора. Согласно пункту 14 настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 15 договора).

В соответствии с пунктом 16 договора заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объёме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В связи с неисполнением ответчиком обязательства по внесению вторых и третьих платежей истец направил письмо № 15-14/64/146 от 17.03.2023 «О неисполнении обязательств по договору».

Поскольку оплата ответчиком не была внесена, истец приостановил выполнение мероприятий по вышеуказанным Договорам и предложил расторгнуть договоры, о чем сообщил ответчику письмом № 15-18/1900 от 05.04.2024. Ответа на указанное письмо не последовало.

Письмом №15-18/3897 от 15.07.2024 истец повторно направил предложение о расторжении договоров  № 8295/22-ТП, № 8296/22-ТП и 8297/22-ТП от 30.12.2022, с приложением проектов соглашений о расторжении договоров.

Ответчиком соглашения о расторжении не подписаны.

В соответствии с пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее Правила №861), сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил № 681).

Согласно положениям пункта 16 Правил № 861 договор о технологическом присоединении должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать установленной данным пунктом продолжительности.

Согласно пунктам 4, 5 спорных договоров срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора, срок выполнения мероприятий – 6 месяцев со дня заключения договора.

Следовательно, стороны обязаны были выполнить свои обязательства по договору таким образом, чтобы осуществить фактическое технологическое присоединение в установленный срок. Договор об осуществлении технологического присоединения может быть реализован только путем выполнения сторонами обязательств по осуществлению комплекса мероприятий, предусмотренных техническими условиями для заказчика и для сетевой организации.

В силу пункта 16(5) Правил № 861 нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Аналогичное право на расторжение договора по инициативе сетевой организации согласовано сторонами в пункте 16 договора.

Перечень обстоятельств, при которых срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем, приведен в пункте 16(6) Правил № 681.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.  Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 450 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

По смыслу указанных положений Кодекса установленное сторонами иное условие о прекращении действия договора должно быть выражено в нем сторонами однозначно и определенно. В спорном договоре подобное условие отсутствует.

Предметом данного публичного договора, в котором в силу его публичности у сетевой организации ограничены права на односторонний внесудебный отказ от договора, является технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к сетям сетевой организации. Моментом окончания исполнения сторонами обязательств по нему является фактическое присоединение названных устройств к сети с оформлением соответствующих документов и расчетом по договору.

В соответствии с  положениями пунктов 5 и 21 договоров и датой внесения первых платежей (30.12.2022), технологическое присоединение объектов ответчика должно быть осуществлено не позднее 30.06.2023.

Как следует из материалов дела, истцом выполнены необходимые мероприятия для осуществления подключения, при этом в согласованный сторонами срок (6 месяцев с момента заключения договоров – до 30.06.2023) присоединение устройств ответчика осуществлено не было, ответчиком нарушены сроки внесения вторых и третьих платежей по договорам.

Доказательств опровергающих указанные обстоятельства ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ суду не представлено.

При таких обстоятельствах, требование истца о расторжении договоров № 8295/22-ТП от 30.12.2022, № 8296/22-ТП от 30.12.2022 и 8297/22-ТП от 30.12.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Госпошлина по иску в силу п. 2 ч. 1 ст. 333.21 и п.1 ч. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 150 000 руб., которая уплачена истцом по платежным поручениям № 2372 от 25.10.2024 на сумму 100 000 руб. и № 2163 от 26.09.2024 на сумму 50 000 руб.

На основании статьи 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца следует взыскать расходы по уплате госпошлине в размере 150 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

решил:

Расторгнуть договоры № 8295/22-ТП от 30.12.2022, № 8296/22-ТП от 30.12.2022 и №8297/22-ТП от 30.12.2022, заключенные между акционерным обществом "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью "Александр" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Александр" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) – 150 000 руб. – расходы по госпошлине.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья                                                                                                  А.А. Стовбун