Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Пермь         

«05» ноября 2024 года                                             Дело № А50-20355/2024

Резолютивная часть решения принята 25.10.2024. 

Полный текст решения изготовлен 05.11.2024.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., рассмотрев исковое заявление и приложенные к нему документы общества с ограниченной ответственностью «Комтес» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>; 617472, 

<

...>)  

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 614010, 

<

...>)

о взыскании неустойки.

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Комтес» (далее – истец, подрядчик, ООО «Комтес») обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее – ответчик, заказчик, Фонд) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по договору № КР-000034/2023/ЭА от 12.05.2023 в размере 101 323 руб. 55 коп.  (с учетом уменьшения исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ).

Определением суда от 03.09.2024 исковое заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены надлежащим образом, в том числе, публично, путем размещения информации на сайте Арбитражного суда Пермского края. 

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

22.10.2024 от истца поступило ходатайство об уменьшении исковых требований в части взыскания основного долга,  судом в порядке ст. 49 АПК РФ данное уточнение исковых требований принято.

25.10.2024 судом принята и размещена на официальном сайте Арбитражного суда Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" резолютивная часть решения по делу №А50-20355/2024.

01.11.2024 в суд поступило ходатайство от истца о составлении мотивированного решения.

Исследовав и оценив в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные доказательства, пояснения истца арбитражный суд приходит к следующим выводам.

12.05.2023 между ООО «Комтес» (Подрядчик) и НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (Заказчик) заключен договор № КР-000034/2023/ЭА на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края (далее – Договор), согласно которому по настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием и проектной документацией, своими силами и средствами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества МКД в соответствии с Графиком производства работ, по адресу(ам), указанным в приложении № 11 – Перечень Объектов, включая выполнение строительно-монтажных работ на Объекте(-ах), сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций и оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по виду капитального ремонта МКД по Акту приемки выполненных работ по виду капитального ремонта, сдачу Объекта по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, после приемки выполненных работ на Объекте(-ах) комиссией по приемке выполненных работ.

Согласно п. 3.1. договора  цена Договора определяется на основании расчетов стоимости работ с приложением локальных смет по объектам/системам (приложение № 6 к настоящему Договору) с учетом процента снижения, установленного по результатам электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол № 205670000012300066) составляет 6 343 516 руб. 77 коп., НДС не облагается, и включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса работ на Объекте.

Сроки выполнения работ установлены Приложением № 1 к Договору и составляют 150 календарных дней.

В соответствии с п. 3.5. договора с целью осуществления расчетов по настоящему Договору Подрядчик направляет Организации Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее, чем в 4 (четырех) экземплярах.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.

Организация в течение 5 (пяти) дней с момента получения документов (формы КС-2, КС-3) рассматривает представленные документы, визирует и уведомляет Заказчика, Подрядчика о готовности Объекта к приемке выполненных работ в соответствии с п. 7.6 настоящего Договора либо направляет Подрядчику обоснованный отказ с указанием замечаний и сроков их устранения. Неполучение Подрядчиком отказа Организации в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми.

При непредставлении Подрядчиком оформленных с учетом замечаний Организации первичных документов (формы КС-2, КС-3) в срок, установленный соответствующим документом и (или) в случае повторного предоставления Подрядчиком первичных документов (формы КС-2, КС-3) без устранения выявленных замечаний, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора.

Далее Подрядчик с сопроводительным письмом предоставляет Заказчику завизированные Организацией Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также счета, счета-фактуры (в случае применения Подрядчиком общей системы налогообложения). В сопроводительном письме Подрядчик указывает реквизиты договора, адрес Объекта, вид работ, наименование приложений, а также иные сведения имеющие значения для оплаты работ по настоящему договору. Период и количество дней, подлежащий, по мнению Подрядчика и Организации, исключению из периода для начисления неустойки, подтвержденный соответствующими документами (письмами об обоснованных приостановках, записями в журнале производства работ и прочее). Сопроводительное письмо визируется Организацией.

Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней проверяет указанные в настоящем пункте документы. При отсутствии замечаний согласовывает и подписывает их.

Согласно п. 3.6. договора окончательная оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком с зачетом ранее перечисленного аванса пропорционально стоимости выполненных Работ в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленных документов согласно п. 1.6. п. 3.5 настоящего Договора.

04.12.2023 письмом № 177 Подрядчик уведомил Заказчика о завершении работ на объекте.

10.12.2023 Заказчиком совместно с Подрядчиком, организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом и организацией, осуществляющей строительный контроль, произведены итоговые обмеры фактически выполненных работ, которые зафиксированы в акте рабочей комиссии и ведомости объемов работ (часть исполнительной документации). Согласно акту, последний является основанием для заключения дополнительного соглашения к договору.

В соответствии с пунктом 7.6 договора выполненные в полном объеме работы на Объекте (-ах) подлежат приемке в следующем порядке:

При завершении выполнения работ последнего вида капитального ремонта по зданию согласно Графику производства работ Подрядчик в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты начала приемки письменно уведомляет Организацию и Заказчика о необходимости проведения приемки выполнения работ на Объекте в целом и передает Организации следующую документацию: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), документы в соответствии с п. 6.1.32 настоящего Договора. Организация проверяет документацию в течение 5 (пяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) и направляет Заказчику уведомление о положительном результате проверки либо направляет замечания Подрядчику. В случае возникновения разногласий между Подрядчиком и Организацией, Подрядчик вправе обратиться к Заказчику с целью урегулирования таких разногласий.

  При положительном результате проверки Организацией Подрядчик с сопроводительным письмом предоставляет Заказчику завизированные Организацией Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также счета, счета-фактуры (в случае применения Подрядчиком общей системы налогообложения) и документы в соответствии с п. 6.1.32 настоящего Договора. В сопроводительном письме Подрядчик указывает реквизиты договора, адрес Объекта, вид работ, наименование приложений, а также иные сведения имеющие значения для оплаты работ по настоящему договору, период (количество дней) подлежащий, по мнению Подрядчика и Организации, исключению из периода для начисления неустойки, подтвержденный соответствующими документами (письмами об обоснованных приостановках, записями в журнале производства работ и прочее). Сопроводительное письмо визируется Организацией.

  Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней рассматривает представленные документы и при отсутствии замечаний, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты приемки, в установленном порядке уведомляет членов комиссии по приемке выполненных работ о готовности Объекта к приемке выполненных работ, о времени, дате и месте работы комиссии. При наличии замечаний к представленным документам Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней направляет Подрядчику замечания со сроком их устранения.

  По результатам приемки работ комиссией оформляется Акт приемки выполненных работ по Объекту в количестве, необходимом для каждого члена комиссии.

Документы, необходимые для приемки и оплаты выполненных работ были представлены Подрядчиком в соответствии с условиями договора.

В установленный договором срок замечания к представленным документам не было направлено, Фондом назначена дата приемки.

21.12.2023 подписан акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту и ввода в эксплуатацию элементов многоквартирного дома, законченных капитальным ремонтом по договору № КР-000034/2023/ЭА от 12.05.2023. Работы были приняты без замечаний.

Стоимость фактически выполненных работ составила 2 652 412 руб. 58коп., что подтверждается актом КС-2, заключение достоверности сметной стоимости. Подрядчику был выплачен аванс в размере 1 088 988  руб. 43 коп., согласно платежному поручению № 109551 от 21.09.2023.

Поскольку все необходимые документы для оплаты выполненных работ были представлены Подрядчиком до приемки, срок для оплаты начинает течь с 21.12.2023.

Таким образом, оплата выполненных работ должна была быть произведена до 04.03.2024, начиная с 05.03.2024, у Подрядчика возникает право начислить и требовать уплаты неустойки.

Денежные средства в размере 1 563 424 руб. 15 коп. оплачены подрядчиком 30.07.2024, что подтверждается платежным поручение №98654 от 30.07.2024.

08.08.2024 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием об оплате пени за несвоевременную оплату выполненных работ, претензия осталась ответчиком без исполнения, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Исследовав и оценив в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, представленные доказательства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором.

В соответствии с пунктом 12.5. договора в случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по оплате выполненных работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере, определяемом согласно ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки.

Расчет неустойки судом арифметически проверен, признан верным.

Ответчик арифметическую составляющую расчета неустойки не оспорил.

На основании изложенного, исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки подлежат удовлетворению.

Суд обращает внимание на то, что исковое заявление принято к производству определением суда от 03.09.2024. Согласно почтовому уведомлению с почтовым идентификатором 61491197253422 определение получено ответчиком 21.09.2024.

Таким образом, ответчик был надлежащим образом извещен о принятии искового заявления к производству.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в размере 23 959 руб. 00 коп.

В связи с уменьшением исковых требований истцом государственная пошлина в размере 61 руб. подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Принять уменьшение исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Комтес» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Комтес» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Комтес» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ по договору № КР-000034/2023/ЭА от 12.05.2023 за период с 05.03.2024 по 30.07.2024 в размере 101 323 (сто одна тысяча триста двадцать три) руб. 55 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 040 (четыре тысячи сорок) руб. 00 коп. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Комтес» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 61 (шестьдесят один) руб. 00 коп., уплаченную по платежному поручению №114 от 19.08.2024

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                      Ю.А. Лавров