12/2020-47841(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-15289/2019

г. Астрахань

12 августа 2020 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Морозовой Т.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Дорснаб" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Федерального казенного учреждения   "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного  агентства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за ненадлежащее  исполнение обязательств по государственному контракту № 10/17/КРАД от 07.11.2017г. в  сумме 1094982руб.84коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины  в сумме 13844 руб.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Дорснаб» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную  силу произвести гарантийный ремонт автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильная  дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань км 1145+000 - км 1158+000 в  Астраханской области, а именно устранить следующие дефекты:  

 1)На водопропускной трубе км 1152+386 по тех.паспорту (ПК73+39 - км 1152+370)  - просадка укрепления откосной части земляного полотна из армированного бетона на  входном и выходном оголовках трубы, разрушение штукатурки защитного слоя тела  трубы- открыта арматура, нарушена грунтовая планировка на руслах трубы и открыта  геосетка укрепления откосов земляного полотна основной дороги;  

 2) На водопропускной трубе км 1150+293 по тех.паспорту (ПК52+62 - км 1150+157,7) -  разрушение заполнения шва между стенками блоков экрана и блоком фундамента на  выходном оголовке, нарушена укладка геосетки откосной части у оголовков трубы (открыта  геосетка), не обеспечено сопряжение с бетонным укреплением;  

3) На водопропускной трубе км 1147+404 по тех.паспорту (ПК43+65 - км  1149+258,2) - просадка укрепления из армированного бетона укрепленной части русел трубы  и откосов земляного полотна на входном и выходном оголовках трубы, разрушение  штукатурки защитного слоя тела трубы - открыта арматура, нарушена грунтовая планировка  в т.ч. сползание грунта (раскрытие геосетки);  

4) На водопропускной трубе км 1148+738 (ПК38+32 - справа на съезде) - на  входном оголовке просадка укрепления из армированного бетона;  

5) На водопропускной трубе км 1147+194 по тех.паспорту (ПК36+78 - км  1148+584,1) - просадка укрепления русел трубы и откосной части земляного полотна из  армированного бетона на входном и выходном оголовках трубы, разрушение штукатурки  защитного слоя тела трубы- открыта арматура, нарушена грунтовая планировка на руслах  трубы;  

6) На водопропускной трубе км 1148+710 по тех.паспорту (ПК31+65 - км  1148+070,5) - разрушение заполнения шва между стенками блоков экрана и блоком  фундамента на выходном и выходном оголовках, повреждена гофра трубы;  

7) На водопропускной трубе км 1147+737 (ПК28+10 - справа на съезде) - промоины под укрепленной частью откоса земляного полотна из армированного бетона (в  т.ч. просадка) на входном оголовке;  

8) На водопропускной трубе км 1147+488 по тех.паспорту (ПК24+62,5 - км  1147+386,4) - разрушение заполнения шва между стенками блоков экрана и блоком  фундамента на выходном и выходном оголовках, повреждена гофра трубы, сползание  откосов земляного полотна на оголовках трубы;  

9) На водопропускной трубе км 1146+216 по тех.паспорту (ПК 11+92 - км  1146+053,8) - на выходном оголовке просадка и разрушение укрепления откосной части  земляного полотна из армированного бетона, на входном оголовке просадка укрепленной  части русла трубы, разрушение штукатурки защитного слоя тела трубы;  

10) На водопропускной трубе км 1145+365,4 по тех.паспорту (ПКЗ+65) -  замятие секции гофры трубы (изнутри), на входном и выходном оголовках трубы  нарушена грунтовая планировка откосов земляного полотна в т.ч. сползание грунта с  оголением геосетки.  

11) Км 1145+000 - км 1158+000 на всем протяжении участка нарушена  геометрия обочины, укрепленной ЩПС С-5 (в т.ч. прибровочная часть в пределах  населенного пункта Соленое Займище) - расползается, разуплотнена, нарушен  поперечный уклон (по факту от 10 до 70 промилле - должно быть 40 промилле),  занижена относительна кромки покрытия, как по основному ходу, так и на примыканиях;  

12) Нарушена высота установки барьерного ограждения по факту до 0,80 м  (Должно быть 0,75 м);  

13) На всем протяжении участка нарушена грунтовая планировка откосов  

земляного полотна основной дороги (нет единого заложения откоса, сползание грунта с  

образованием валов, нарушена бровка, промоины по откосам до 0,5 м с открытием  

геосетки); 

14) Изношена (разрушение, отслоение) горизонтальная дорожная разметка 1.2 (как  

по основному ходу, так и на примыканиях) с км 1145+000 - км 1156+000, изношена  

разметка 1.4 (желтая) в местах расположения газопровода, на всех примыканиях  

изношена разметка 1.7, на участке км 1151+000 - км 1152+000 шелушение и  

растрескивание разметки 1.11, шелушение 1.16.1-1.16.3;  15) На пешеходном переходе отслоение и шелушение разметки 1.16.1 - 1.16.3; 

16) Изношены шумовые полосы перед пешеходным переходом в н.п. Соленое  Займище;  

17) В н.п. Соленое Займище на тротуарах и посадочных площадках-просадки  дорожной одежды, поперечная и продольная неровность, возвышение покрытия  относительно бортовых камней, наблюдается застой воды;  

18) Раскрытие шва между покрытием тротуара и бортовыми камнями; 

19) На автопавильонах раскрытие шва между отделочными плитками (разрушен  цементно - песчаный заполнитель);  

20) Км 1147+600 (ПК 26+60 слева) - сломан дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный  переход»;  

21) Изношен материал для демаркировки временной дорожной разметки,  нанесенной на период производства работ.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Дорснаб" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 16106 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Судья Т.Ю. Морозова