28/2018-109265(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-14303/2018

г.Чита

11 декабря 2018 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая  организация ФИО1.» провести работы по ремонту нежилого помещения № 67,  расположенного по адресу: 

<

...>, необходимые для  устранения последствий затопления в соответствии с экспертным исследованием №  52/2 от 03.08.2018 г., а именно:  

- снять отделочный слой с пострадавших от намокания мест стен и потолков;  

- выполнить противогрибковую обработку пострадавших от намокания участков  стен и потолков;  

- выполнить сплошное выравнивание стен и потолков в местах снятия  отделочного слоя;  

- выполнить окраску стен и потолков водоэмульсионной краской в помещениях  пострадавших от затопления.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая  организация ФИО1.» провести текущий ремонт кровли одноэтажной, встроено- пристроенной части здания, расположенного по адресу: 

<

...>,  в соответствии с экспертным исследованием № 52/2 от 03.08.2018 г., а именно:  

- разборка покрытий кровель из рулонных материалов возле водоприемной  воронки;  

- разборка стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм вокруг водоприемной  воронки;  

- устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  вокруг водоприемной воронки;  

- огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  кровельный ковер готовой эмульсией битумной;  

- устройство дополнительного двухслойного ковра из рулонных наплавляемых  материалов вокруг водоприемной воронки;  

- устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя; 

- устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая  организация ФИО1.» выполнить работы по текущему ремонту кровли и  устранению последствий затопления во внутренних помещениях в срок до 01.05.2019 г.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая  организация Кальянова А.Г.» в пользу Управления Федеральной службы по надзору в  сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по  Забайкальскому краю издержки на проведение экспертизы по оценке причиненного  ущерба в размере 25000,00 руб., расходы по оплате государственной пошлины в  размере 6000,00 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья А.А. Галицкая