АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Барнаул                                                                                               Дело № А03–13390/2023                   

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 апреля 2024 года  

 

Решение в полном объеме изготовлено 18 апреля 2024 года  

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении протокола секретарем Осокиной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества общество с ограниченной ответственностью  «Сибирский научно-технический центр промышленной экспертизы и аудита», г. Новокузнецк, к акционерному обществу «Сибирь-Полиметаллы», п. Потеряевка, 

о взыскании 18 200 000  руб. 00 коп. долга за выполненные работы,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора - Сибирского Управления Ростехнадзора,г. Кемерово, общества с ограниченной ответственностью «Сибирская каменноугольная компания», г. Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истца: ФИО1, по доверенности от 01.12.2023, удостоверение № 1209,

от ответчика: ФИО2, по доверенности № 5 от 09.01.2024, диплом № 3 от 08.02.2021, паспорт (в режиме онлайн), 

от ООО «Сибирская каменноугольная компания»: ФИО1, по доверенности от 08.11.2022, удостоверение № 1209, 

от Сибирского Управления Ростехнадзора: не явился, извещен,  

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская каменноугольная компания» обратилось в арбитражный суд к акционерному обществу «Сибирь-Полиметаллы» о взыскании 18 200 000  руб. 00 коп. долга за выполненные работы.

Определением от 18 декабря 2023 года суд произвел процессуальную истца по делу с  общества с ограниченной ответственностью «Сибирская каменноугольная компания», г. Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), на общество с ограниченной ответственностью  «Сибирский научно-технический центр промышленной экспертизы и аудита», г. Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), привлек общество с ограниченной ответственностью «Сибирская каменноугольная компания», г. Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

От истца в суд поступило уточненное исковое заявление, в котором истец просит взыскать 18 200 000 руб. долга за выполненные работы, признать заключенным договор №167-РОБ/ЭШБ/2022 на выполнение работ от 08.11.2023.

Судом отказано в принятии уточнения исковых требований, поскольку истом заявлено новое требование, которое истцом в первоначальном исковом заявлении не заявлялось.

Представители лиц, участвующих в деле, привели пояснения.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к заключению о том, что иск не может быть удовлетворен по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований истец указал, что в августе 2022 года ООО «Сибирская Каменноугольная компания» (далее ООО «СКК») от ответчика АО «Сибирь Полиметаллы» получило коммерческое предложение на выполнение проектных работ по разработке проектной документации и обосновании безопасности опасного производственного объекта для организации добычных работ в отметках -12/-264 с достижением производственной мощности 125 тыс. тонн в месяц к 01.07.2023.

В наименование работ согласно «дорожной карты» входила разработка проектной документации Технического перевооружения ОПО Рудник ФИО3 «Сибирь - Полиметаллы» в части изменения технологических решений при ведении горных работ в отм. -12/-264м., срок выполнения 50 календарных дней; обоснование безопасности опасного производственного объекта Рудник ФИО3 «Сибирь- Полиметаллы» в части отступления от требований п.20 (отклонение от проектной документации) ФНиП «Правила безопасности при ведений горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», срок выполнение 40 календарных дней; обоснование безопасности опасного производственного объекта Рудник ФИО3 «Сибирь -  Полиметаллы» в части эксплуатации Скипо-клетевого ствола, Транспортного вентиляционного наклонных съездов, на период до получения положительного заключения ГГЭ на проектную документацию, срок 40 календарных дней.

г

ООО «СКК» письмом от 19.09.2022 приняло предложение ответчика АО «Сибирь-Полиметаллы», указав стоимость работ: выполнение экспертизы промышленной безопасности проектной документации «Техническое перевооружение ОПО Рудник Корбалихинский (А63-01955-0023)АО «Сибирь-Полиметаллы» в части изменения технологических решений при ведении горных работ в отм.-12/-264м.» с регистрацией заключений ЭПБ в реестре Ростехнадзора, стоимость работ 200 000 (двести тыс.) руб.; разработка документации «Обоснование безопасности опасного производственного объекта Рудник Корбалихинский (А63-01955-0023)АО «Сибирь-Полиметаллы» в части отступления от требований п.20 ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» с организацией проведения экспертизы промышленной безопасности указанного обоснования и регистрацией заключения ЭПБ в реестре Ростехнадзора, стоимость выполнения работ 9 000 000 руб., срок выполнения 30 рабочих дней;

-                      разработка документации «обоснование безопасности опасного производственного объекта Рудник Корбалихинский (А63-01955-0023) АО «Сибирь - Плиметаллы» в части эксплуатации Скипо-клетевого ствола, Транспортного и Вентиляционного наклонных съездов, на период до получения положительного заключения ГГЭ на проектную документацию, с организацией проведения экспертизы промышленной безопасности указанного обоснования и регистрацией заключения ЭПБ в реестре Ростехнадзора. Стоимость выполнения работ 9 000 000 руб., срок выполнения 30 рабочих дней. Общая стоимость выполнения работ составила 18 200 000 (восемнадцать миллионов двести тыс.) руб.

Во исполнение принятого обязательства ООО «СКК» письмом от 22.08.2023 запросило у  АО «Сибирь-Полиметаллы» документы.

ООО «СКК» прошло тендерную процедуру, организованную АО «Сибирь- Полиметаллы», где ООО «СКК» было выбрано в виде исполнителя. ООО «СКК» была направлена типовая форма договора по проектно изыскательским работам 30.09.2022 г. для разработки и заключения договора на выполнение проектных работ.

ООО «СКК» исполнило принятое обязательство, изготовило проектно-техническую документацию.

Факт получения проектных работ подтвержден накладными на передачу документов технической документации, подписанные комиссионно стороной ответчика.

          09.12.2022 с сопроводительным письмом ООО «СКК» №09/5-12.22 АО «Сибирь  Полиметаллы» направлен подписанный со стороны ООО «СКК» договор №167- РОБ/ЭЩБ/2022 для подписания заказчиком.

АО «Сибирь-Полиметаллы» отказалось от подписи, направило предложение о снижении стоимости работ.

Истец полагая, что между ООО «СКК» и АО «Сибирь-Полиметаллы» 08.11.2022 был заключен договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на сумму 18 200 000 руб., предмет договора был согласован сторонами, работы были выполнены ООО «СКК» и без замечаний приняты заказчиком АО «Сибирь-Полиметаллы», ответчиком оплата не произведена, обратился в суд с настоящим иском.

07.12.2023 между ООО «Сибирская каменноугольная компания» (цедент) и ООО «Сибирский научно-технический центр промышленной экспертизы и аудита» (цессионарий) заключен Договор уступки прав (цессии), в соответствии с условиями которого цедент передает, а цессионарий принимает право требования к акционерному обществу «Сибирь-Полиметаллы», возникшие из договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ на сумму 18 200 000 руб.: разработка проектной документации, обоснование безопасности опасного производственного объекта для организации добычных работ в отметках -12/-264 с достижением производственной мощности 125 тыс. тонн в месяц, обоснование безопасности опасного производственного объекта Рудник ФИО3 «Сибирь - Плиметаллы» в части отступления от требований п.20 (отклонение от проектной документации) ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», обоснование безопасности опасного производственного объекта Рудник ФИО3 «Сибирь - Полиметаллы» в части эксплуатации Скипо-клетевого ствола, Транспортного вентиляционного наклонных съездов, заключенного меду ООО «СКК» (подрядчик) и АО ««Сибирь Полиметаллы» (заказчик), на сумму 18 200 000 (восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей.

Ответчик представил в суд пояснения, в которых указал, что признает полностью исковые требования.

По платежному поручению №8069 от 15.12.2023 с назначением платежа «Оплата за оказанные услуги и выполненные изыскательные работы по делу №А0313390-/2023» ответчик перечислил истцу денежные средства в размере 18 200 000 руб.

Таким образом, суд приходит к выводу, что данные денежные средства перечислены ответчиком истцу за оказанные услуги и выполненные изыскательные работы по коммерческому предложению на выполнение проектных работ по разработке проектной документации и обосновании безопасности опасного производственного объекта для организации добычных работ в отметках -12/-264 с достижением производственной мощности 125 тыс. тонн в месяц к 01.07.2023.

Доказательств обратного истцом суду и в материалы дела не представлено (ст. 65 АПК РФ).

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий и последствий несоблюдения установленных судом процессуальных сроков (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела полно и всесторонне, исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, разрешая настоящий спор, установил, что истцом в нарушение положений ст. 65 АПК РФ не доказаны обстоятельства, положенные им в основание иска, в связи с чем, в удовлетворении исковых требований надлежит отказать.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская каменноугольная компания», г. Новокузнецк (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), справку на возврат государственной пошлины в сумме 114 000 руб. 00 коп., уплаченной по платежному поручению от 21.08.2023 №599.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения. 

 

Судья                                                                                                        С.В. Янушкевич