Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-3012/2023

г. Благовещенск

30 мая 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи И.А. Москаленко, 

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного  заседания А.А. Шутовой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания Рассвет» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к государственному казенному учреждению Амурской области «Строитель»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 42168926,96 рублей, встречный иск  о взыскании 1847757,26 рублей пеней;  

третьи лица: ГАУЗ Амурской области «Тамбовская больница» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>); ООО «Амурский проектный институт «Колизей» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>); ООО «КАДИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>); ООО «Амуртехпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>);  министерство строительства и архитектуры Амурской области (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>); правительство Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>); прокуратура Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>);  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с государственного казенного  учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Рассвет»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 12716161,19 рублей долга за фактически  выполненные работы по государственному контракту от 15.12.2020 № 193, 293077,81  рублей расходов за проведение судебной экспертизы.  

Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания Рассвет» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Амурской области  «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1245755,78 рублей пеней по  государственному контракту от 15.12.2020 № 193 за период с 17.11.2021 по 31.03.2022 за  просрочку выполнения проектных работ и с 02.10.2022 по 22.11.2022 за просрочку  выполнения строительно-монтажных работ.  

Произвести зачет. 

В результате зачета взыскать с государственного казенного учреждения Амурской  области «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  

ограниченной ответственностью «Строительная компания Рассвет» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 11470405,41 рублей долга за фактически выполненные работы по  государственному контракту от 15.12.2020 № 193, 293077,81 рублей расходов за  проведение судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Рассвет» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 138299 рублей.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход  бюджета ходатайство взыскателя не требуется.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья И.А. Москаленко