АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-3094/2025 

именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

09 июня 2025 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тимохина В.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием представителей истца по доверенности от 24.02.2025 г. – ФИО1,  

ответчика по доверенности от 28.12.2024 г. – ФИО2, дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «ПромРесурс», ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>  

к администрации города Кемерово, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> 

об изменении условий контракта от 25.03.2024 № Ф.2024.0018  

Руководствуясь статьями 450, 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Изменить условия Муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд № Ф.2024.0018 от 25.03.2024 г., а именно:  

изложить пункт 3.2 Муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд № Ф.2024.0018 от 25.03.2024 г. в новой редакции: "3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы с даты передачи Подрядчику по акту приема-передачи строительной площадки и земельного участка для выполнения строительно-монтажных работ до 30.06.2025 г. (включительно) в соответствии с графиком выполнения работ, установленным приложением № 5 к Контракту.";  

Приложение № 5 к Муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд № Ф.2024.0018 от 25.03.2024 г. изложить в новой редакции:  

Приложение № 5 

к муниципальному контракту от 25.03.2024 г. № Ф.2024.0018 

График выполнения работ по объекту капитального строительства: 

«Просп. Ленинградский от бокового проезда по ул. Марковцева до границы микрорайона № 72 Ленинского района города Кемерово»  

Наименование работ  

ед. изм  

объем 

объем на 2025  

июнь 

2024  

июль 2024  

август 

2024 

сентябрь 2024 

октябрь 2024 

 Автомобильная дорога 

1 

Вынос и закрепление трассы автомобильной дороги IV категории на местности II категории  

км 

0,62 

2 

Срезка растительного грунта с погрузкой и перевозкой  

м3  

14163,6 

3 

Валка деревьев с корчевкой пней и расчистка площадей от кустарников в городских условиях, погрузка и перевозка  

шт  

12 

4 

Разработка грунта с перемещением до 200 м в насыпь  

м3  

9344,91 

5 

Устройство дорожных насыпей из ЩПС 0-20  

м3  

1375,2 

6 

Тип 1. Устройство дорожной одежды основной проезжей части  

м2  

4558,5 

7 

Тип 1 Устройство примыканий  

м2  

1429 

394,5  

8 

Тип 1 Устройство дорожной одежды остановочных полос автобусных остановок  

м2  

200 

9 

Тип 3. Устройство сгонов на грунтовую дорогу  

м2  

1200 

1200,0  

10  

Тип 2 .Устройство пешеходного тротуара  

м2  

7475,6 

2603,6  

11  

Тип 2 Устройство технического тротуара  

м2  

1051,2 

1051,2  

12  

Тип 2. Устройство посадочных площадок  

м2  

143,4 

13  

Установка дорожных знаков  

шт  

68 

14  

Установка светофоров. Сигнализация автоматическая безопасности движения  

шт  

4 

со светофорами: трехочковыми  

15  

Установка светофора сигнального двухлинзового  

шт  

2 

16  

Разметка проезжей части термопластиком 

км  

3,181 

17  

Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на  

дорожное покрытие 

м2  

22 

18  

Устройство металлических пешеходных ограждений  

м 

198 

198,0  

19  

Установка автопавильонов 

шт  

2 

Сети связи 

20  

Сети связи 

ком

пл 

1 

1 

Монтаж трубопроводов  

21  

Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм  

м 

197 

22  

Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм  

м 

165 

23  

Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм  

м 

388 

24  

Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм  

м 

300,5 

25  

Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм  

м 

23 

26  

Монтаж смотровых колодцев  

шт  

54 

27  

Устройство отмостки смотровых колодцев  

м2  

45,72 

45,72  

 Устройство фундаментной плиты ФМ-1  

28  

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских  

м3  

250,92 

29  

Монтаж резервуара технической воды ПОЛИПЛАСТИК РТВ 2800 SN6-33010- 

шт  

2 

200 

30  

Монтаж аккумулирующего резервуара с насосной группой ПОЛИПЛАСТИК АКР-НГ 2800 SN6 – 33010 – 200-10  

шт  

2 

31  

Установка насосов погружных с электродвигателем  

производительностью: до 25 м3/час  

шт  

2 

Устройство фундаментов ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4 

32  

Разработка грунта 

м3  

120,6 

Фундамент ФМ-2 

33  

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских  

м3  

11,88 

Фундамент ФМ-3 

34  

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских  

м3  

2,12 

Фундамент ФМ-4 

35  

Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских  

м3  

0,63 

Монтаж оборудования на фундаменты ФМ-2,ФМ-3,ФМ-4  

36  

Монтаж очистных сооружений поверхностного стока  

шт  

1 

37  

Установка ультрафиолетового обеззараживания  

шт  

1 

38  

Установка УФ обеззараживания сточных  

вод ОДВ-40С в комплекте с датчиком потока, шкафом управления и блоком промывки  

шт  

1 

39  

Установка насосов погружных с электродвигателем  

производительностью: до 25 м3/час  

шт  

1 

40  

Монтаж колодца отбора проб сварной  

шт  

1 

Монтаж трубопроводов 

41  

Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм  

м 

18,4 

42  

Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм  

м 

2,08 

 Ограждение ЛОС 

43  

Устройство ограждения ЛОС. Устройство основания из ЩПС 0/31,5,  

установкой столбов-45 шт., устройство панелей -46 шт.)  

шт  

45 

45 

44  

Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на  

кронштейнах 

м 

133,5 

133,5 

 Озеленение* 

45  

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  

м2  

14562 

14562 

46  

Посадка деревьев и кустарников  

шт  

248 

248 

47  

Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений  

шт  

195 

195 

Устройство временной дороги 

48  

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с  

ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2  

м3  

2332 

49  

Разработка скальной вскрыши фр 150-500 с перемещением до 10 м  

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) с последующим уплотнением до 8 проходов  

м3  

150 

 Пусконаладочные работы 

50  

Пусконаладочные работы Локальные очистные сооружения.  

Электроснабжение 

ком

пл 

1 

51  

Пусконаладочные работы Наружное освещение  

ком

пл 

1 

Взыскать с Администрации города Кемерово (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПромРесурс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 50 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.  

Судья В.В. Тимохин