Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №

А26-10980/2022

г. Петрозаводск

22 февраля 2023 года

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Шалапаева И.В.,

рассмотрев материалы дела по иску  общества с ограниченной ответственностью «Промышленное проектирование» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 162610, 

<

...>) к Фонду капитального ремонта Республики Карелия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 185011, 

<

...> этаж) о взыскании 245 267 руб. 51 коп.,

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путём исследования письменных доказательств без вызова сторон. Стороны надлежащим образом извещены о рассмотрении дела по упрощенной процедуре; почтовые уведомления в материалах дела имеются.

 

установила: общество с ограниченной ответственностью «Промышленное проектирование» (далее - истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к Фонду капитального ремонта Республики Карелия (далее - ответчик, Фонд) о взыскании 245 267,51 руб., из них 242 479 руб. - задолженность по оплате работ, выполненных на основании договора №75/2019-п от 18.03.2019 по объекту: 

<

...> (2 этап), и 2788,51 руб. - договорная неустойка за период с 31 октября по 15 декабря 2022 года.

Истец просит взыскать неустойку с 16 декабря 2022 года по день вынесения решения суда.

15.02.2023 в суд поступило ходатайство истца об уменьшении размера иска до 6061,98 руб. договорной неустойки за период с 31 октября 2022 по 07 февраля 2023 года, мотивированное оплатой основного долга 08 февраля 2023 года.

Уменьшение размера иска до 6061,98 руб. судом принимается.

В ходе рассмотрения дела Фондом заявлены следующие возражения против удовлетворения иска: результат работ поступил в Фонд 29.08.2022, то есть с нарушением срока исполнения обязательств по договору 3 года и 2 месяца. Поскольку в силу пункта 2.10 договора расчёт за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком и согласования представителями собственников помещений в многоквартирном доме и органом местного самоуправления актов сдачи-приёмки (ч. 2 ст. 190 ЖК РФ), то без такого согласования Фонд не вправе производить оплату работ, выполненных подрядной организацией. Ввиду существенного нарушения сроков выполнения работ (3 года 2 месяца) Фондом в настоящее время производится тщательная проверка проектно-сметной документации, которая впоследствии будет направлена на согласование в администрацию Петрозаводского городского округа и  представителю собственников.

Исследовав материалы дела, суд считает установленными следующие обстоятельства.

Между Фондом (заказчик) и ООО «Промышленное проектирование» (подрядчик) на основании результатов проведения электронного аукциона заключён договор №75/2019-п от 18.03.2019 на выполнение работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Республики Карелия согласно адресному перечню (приложение №1), в том числе, в отношении многоквартирного дома по адресу: 

<

...> (л.д 8-15).

Сроки выполнения работ определены в разделе 3 договора: начало работ - с момента заключения договора (п. 3.1.1.); окончание, в частности, второго этапа работ, включая выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости - не позднее 80 календарных дней с даты заключения договора.

Согласно пункту 4.1 договора по мере выполнения работы по каждому многоквартирному дому подрядчик представляет заказчику результат работ по каждому из этапов, предусмотренных техническим заданием.

Результатом второго этапа является разработанная проектно-сметная документация, в отношении которой имеется положительное заключение организации по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.

Передача результата работ осуществляется подрядчиком на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ.

В соответствии с пунктом 4.2 договора датой надлежащего исполнения обязанности по выполнению работ (этапа работ) со стороны подрядчика считается (при принятии в последующем данных работ (этапа работ) без замечаний) дата получения заказчиком результата работ (этапа работ) с приложением акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Датой приёмки работ (этапа работ) по настоящему договору считается дата подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ последним из вышеперечисленных лиц: подрядчик, заказчик, орган местного самоуправления, лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В силу пункта 2.5 договора оплата по договору осуществляется в пределах стоимости, указанного в пункте 2.1 договора, на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ и выставленного счёта (счёта-фактуры) по каждому многоквартирному дому при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный договором.

Письмом №24/08-2022 от 24.08.2022 (л.д. 33) Общество направило в Фонд результат работ по второму этапу, содержание которого определено в пункте 4.1 договора, в отношении многоквартирного дома по адресу: 

<

...>. Результат работ поступил в Фонд 29 августа 2022 года, о чём имеется отметка входящей корреспонденции, проставленной ответчиком.

Акт выполненных работ №102 от 18.08.2022 (л.д. 34) и счёт на оплату от 18.08.2022 (оборотная сторона л.д. 34), направленные посредством организации почтовой связи, поступили в Фонд 07 сентября 2022 года, что подтверждается почтовым уведомлением (л.д. 35).

Согласно пункту 2.10 договора расчёт за выполненную подрядчиком работу заказчик производит по мере выполнения работ по каждому многоквартирному дому, указанному в адресном перечне многоквартирных домов, в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком и согласования представителями собственников помещений в многоквартирном доме и органом местного самоуправления актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому многоквартирному дому (в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)).

Как указывает истец, работы в размере 242 479 руб.  оплачены Фондом 08 февраля 2023 года. Данное утверждение ответчиком не оспорено.

Довод ответчика относительного того, что у него отсутствовала возможность оплаты выполненных работ по договору №75/2019-п от 18.03.2019, поскольку акт выполненных работ не согласован уполномоченными лицами, в том числе,  органом местного самоуправления, судом отклоняется, так как пунктом 5.1.2 договора обязанность по согласованию акта выполненных работ возложена именно на заказчика.

В соответствии с пунктом 8.1 договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днём истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Руководствуясь указанным пунктом, Общество начислило Фонду пени в размере 6061,98 руб. за период с 31 октября 2022 года по 07 февраля 2023 года.

Каких-либо возражений по указанному требованию Фондом не заявлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Ввиду допущенной ответчиком просрочки по оплате выполненных работ суд удовлетворяет требование истца о взыскании 6061,98 руб.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации госпошлина относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1.      Удовлетворить заявление общества с ограниченной ответственностью «Промышленное проектирование» об уменьшении размера иска до 6061,98 руб.

2.      Иск удовлетворить.

Взыскать с Фонда капитального ремонта Республики Карелия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Промышленное проектирование» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6061,98 руб. договорной неустойки за период с 31 октября 2022 по 07 февраля 2023 года;

- в бюджет Российской Федерации 2000 руб. расходов по госпошлине.

3.      Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано  в апелляционном порядке в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>) через Арбитражный суд республики Карелия.

 

Судья                                                                 Шалапаева И.В.