5/2018-81466(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-6929/2018

г. Владивосток

07 июня 2018 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного  учреждения "Обеспечения деятельности образовательных учреждений"  Спасского муниципального района (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Северстрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ 

 Руководствуясь статьями 167-170, 174 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Северстрой»  устранить недостатки работ, возникшие в период гарантийной  эксплуатации по муниципальному контракту № 188 от 10.09.2013 г. на  выполнение работ по объекту «Строительство детского сада на 120 мест на  земельном участке кадастровый номер 25:16:420101:1026, площадью 5000  кв.м, расположенном примерно в 40 м. от ориентира по направлению на  север. Ориентир 5-ти этажный жилой дом. Почтовый адрес ориентира:  

<

...>», а именно:  

 1. Выполнить заполнение оконных проемов ОК10 и ОК7 в осях Е-Ж  в соответствии с противопожарным исполнением (лист 16 и лист 17 проект  78-ОЮ! 13111-АР1 Том 3 Архитектурные решения);  

 2. Выполнить заполнение дверного проема в тамбур-шлюзе на  отметке -3.000(помещение № 14, поз. 7, лист 15 проект 78-01011-3111-АР;  Том 3 Архитектурные решения)в противопожарном исполнении;  

 3. Заменить входные двери на отметке - 3.000 (поз 23 и поз. 33, лист  15 проект 78-010113111-АР Том 3 Архитектурные решения) с  направлением открывания в сторону эвакуации;  

 4. Заменить дверь на отметке ± (помещение 49, лист 16 проект78010113111-АР1 Том 3 Архитектурные решения) с направлением  открывания в сторону эвакуации;  

 5. Привести в соответствие с проектом наружные электрические сети  (листы 1,2,3 проект 78-01011311 -ИОС 1.2 раздел 5, подраздел 1, часть 2  Система электроснабжения);  

 6. Заменить керамогранитную плитку и устранить провалы  основания на крыльце КЛ1 (тип пола 24, лист 16, лист 20 проект 78010113111-АР1 Том 3 Архитектурные решения);  

 7. Устранить нарушение кровельного пирога, некачественное  устройство гидроизоляции, нарушение разуклонки на эксплуатируемой  кровле (тип пола 22, состав 9 по оси Б-А, лист 9, лист 20 проект 78010113111-АР1 Том 3 Архитектурные решения);  

 8. Устранить нарушение кровельного пирога, некачественное  устройство гидроизоляции, нарушение разуклонки на эксплуатируемой  кровле (тип пола 23, состав 3 по оси Г-Д, лист 10, лист 20 проект 78010113111-АР1 Том 3 Архитектурные решения);  

 9. Провести монтаж аварийного освещения (листы 20.21.22 проект  78-010113111-ЭМ том 11 Силовое электрооборудование и освещение,  локальный сметный расчет № 02-01-08 Раздел 1 Электроснабжение раздел  

11 часть 2 смета на строительство объектов капитального строительства,  книга 2 (78-010113111-СМ2, стр.460, п.56);  

 10. Произвести ремонт штукатурного слоя потолков и стен в  помещениях 37,38,39,40,41 (лист 5 проект 78-010113111-АР1 Том 3  Архитектурные решения);  

 11.Заменить наружные водосточные трубы, желоба и воронки по  периметру здания (лист 7 раздел 5, подраздел 2.3 проект 78-010113111- ОИС 2(3) Система водоснабжения и водоотведения, лист 44 проект 78010113111-АР2 том4 Архитектурные решения);  

 12. Привести систему автоматической пожарной сигнализации и  радиомониторинга в рабочее состояние (проект 78-010113111-ИОС5  Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией,  раздел 11 часть 2 Смета на строительство объектов капитального  строительства, книга 2);  

 13. Выполнить замену электрических сетей пожарной автоматики  (системы противодымной защиты) в соответствии с требованиям  нормативных документов по пожарной безопасности (заключение от  10.01.2018 ОНД и ПР г.о. Спасск-Дальний и Спасского муниципального  района).  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Северстрой" в пользу муниципального казенного учреждения  "Обеспечения деятельности образовательных учреждений" Спасского  муниципального района 6000 рублей расходов по уплате государственной  пошлины по иску.  

 Выдать исполнительные листы после вступления решения в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  

округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

 Судья Плеханова Н.А.