АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело №

А55-14003/2021

21 июля 2021 года

г.Самара

Резолютивная часть    объявлена 15 июля 2021 года 

Решение в полном объеме изготовлено 21 июля 2021 года

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев 01.07.2021 в судебном заседании, в котором оглашена резолютивная часть решения, дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "ТЛТ-Дорстрой"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Самарастройальянс"

о взыскании 19 488 160,07 руб.

при участии в судебном заседании

от истца – ФИО2, доверенность от 26.04.2021

от ответчика – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ТЛТ-Дорстрой" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Самарастройальянс" (далее - ответчик) о взыскании 19 807 089 руб., в том числе 19 232 971,20 руб. основного долга, 255 188,87 руб. процентов за просрочку исполнения обязательств, 318 928,90 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Стороны извещены надлежащим образом о времени и месте  проведения судебного заседания, в ходе рассмотрения дела, получили судебную корреспонденцию, истец обеспечили явку своих представителей в судебное заседание, ответчик представил отзыв на иск.

В судебном заседании представитель истца уточнил исковые требования - требование о взыскании 318 928,90 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, не поддержал. Суд принял уточнение в порядке ст.49 АПК РФ.

Рассмотрев исковое требование суд считает его подлежащим удовлетворению.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключены два договора от 27.07.2020 № 1-П/ТЛТ-20  (далее - договор №1) и от 28.08.2020 № 02-П/СТВР-20 (далее = договор №2), на Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г.о. Тольятти и  Ремонт дорог местного значения м.р. Ставропольский Самарской обл. соответственно.

В соответствии с Договором № 1 в редакции дополнительного соглашения от 20.10.2020 г. между обществом с ограниченной ответственностью «СамараСтройАльянс» в лице заместителя директора по дорожному хозяйству ФИО3, именуемым в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, и обществом с ограниченной ответственностью «ТЛТ-ДОРСТРОЙ» в лице директора ФИО4, именуемым в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, Субподрядчик обязался выполнить работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти,, а Генподрядчик обязался принять и оплатить выполненные работы в установленном договором порядке.

Цена договора в соответствии с пунктом 3.1. договора № 1 (в редакции дополнительного соглашения от 20.10.2020 г.) составила. - 16 956 780 (Шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 24 коп.

Срок выполнения работ в соответствии с пунктом 2.1. договора № 1 (в редакции дополнительного соглашения от 20.10.2020 г.) - с «27» июля 2020 г. по «16» ноября 2020 г.

Субподрядчиком были выполнены работы в полном объеме в установленный договором срок, а Генподрядчиком были приняты работы в следующем порядке:

 

Дата

Номер акта о приемке выполненных работ по форме КС-2

Стоимость принятых работ

16.11.2020 г.

АКТ-134

8 451 117,32

16.11.2020 г.

АКТ-135

1 869 154,55

16.11.2020 г.

АКТ-136

3 769 462,60

16.11.2020 г.

АКТ-137

1 456 075,70

16.11.2020 г.

АКТ-138

545 826,61

16.11.2020 г.

АКТ-139

865 143,46

 

Всего в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ и затрат выполнено и принято работ на сумму 16 956 780, 24 (Шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 24 коп.

Согласно пункту 3.2.1. Договора № 1 платежи за выполненные работы производятся Генподрядчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней от даты представления Субподрядчиком оригиналов счета и счет-фактуры на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением комплекта исполнительной документации.

Первый платеж за выполненные работы в размере 5 000 000 рублей поступил на счет Субподрядчика 30.12.2020 г. не в полном объеме (аванс в размере 700 000 рублей потупил 31.08.2020 г.).

Таким образом, начиная с 31.12.2020 г. Генеральный подрядчик считается просрочившим исполнение обязательства по оплате выполненных работ.

Оплата по договору № 1 производилась Генеральным подрядчиком в следующем порядке:

 

Дата

Сумма

Примечание

31.08.2020 г.

700 000j)y6.

аванс

30.12.2020 г.

5 000 000 руб.

оплата

02.03.2021 г.

2 500 000 руб.

оплата

 

Пунктом 7.1. Договора № 1 предусмотрено, что стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

В соответствии с пунктом 7.2. договора №1 Генподрядчик за просрочку оплаты надлежащим образом выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ более, чем на 30 рабочих дней, уплачивает Субподрядчику по его письменному требованию неустойку 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от неоплаченной суммы.

Расчет суммы неустойки в соответствии с п. 7.2. договора № 1:

16 956 780, 24 руб. (стоимость принятых работ) - 5 700 000 руб. (размер оплаты за выполненные работы по состоянию на 30.12.2020 г.) = 11 256 780,20 руб. - размер неисполненного Генеральным подрядчиком обязательства.

11 256 780,20 / 100 * 5 = 562 839, 01 руб. - размер максимальной неустойки в соответствии с п. 7.2. договора № 1.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 31.12.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

11 256 780,20

31.12.2020

02,03.2021

62

11 256 780,20 * 62 * 0.01%

69 792,04 р.

-2 500 000,00

02.03.2021

Оплата задолженности

8 756 780,20

03.03.2021

29.03.2021

27

8 756 780,20 * 27 * 0.01%

23 643,31 р.

 

_________

 

Итого:

93 435,35 руб.

Сумма основного долга: 8 756 780,20 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 93 435,35 руб.

 

Кроме того, в соответствии с Договором № 2 между обществом с ограниченной ответственностью «СамараСтройАльянс» в лице заместителя директора по дорожному хозяйству ФИО3, именуемым в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, и обществом с ограниченной ответственностью «ТЛТ-ДОРСТРОИ» в лице директора ФИО4, именуемым в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, Субподрядчик обязался выполнить работы по ремонту дорог местного значения муниципального района Ставропольский Самарской области, а Генподрядчик обязался принять и оплатить выполненные работы в установленном договором порядке.

Цена договора № 2 в соответствии с пунктом 3.1. договора № 2 составила. - 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп.

Срок исполненни работ в соответствии с пунктом 2.1. договора № 2 - с «28» августа 2020 г. по «18» октября 2020 г.

Субподрядчиком были выполнены работы в полном объеме в установленный договором срок, а Генподрядчиком были приняты работы в следующем порядке:

Дата

Номер акта о приемке выполненных работ по форме КС-2

Стоимость принятых работ

18.10.2020 г.

№ 119

13 493 059, 08

 

Всего в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 119 от 18.10.2020 г. выполнено и принято работ на сумму 13 493 059,08 (Тринадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи пятьдесят девять) рублей 08 коп.

Согласно пункту 3.2.1. Договора № 2 платежи за выполненные работы производятся Генподрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты представления Субподрядчиком оригиналов счета и счет-фактуры на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением комплекта исполнительной документации.

Генеральный подрядчик должен был осуществить оплату за выполненные работы не позднее 10.11.2020 г.

Первый платеж за выполненные работы в размере 1 000 000 рублей поступил на счет Субподрядчика 19.02.2021 г. не в полном объеме.

Начиная с 11.11.2020 г. Генеральный подрядчик считается просрочившим исполнение обязательства по оплате выполненных работ.

Оплата по договору № 2 производилась Генеральным подрядчиком в следующем порядке:

Дата

Сумма

Примечание

19.02.2021 г.

1 000 000 руб.

оплата

09.03.2021 г.

2 000 000 руб.

оплата

 

Пунктом 7.1. Договора № 2 предусмотрено, что стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

В соответствии с пунктом 7.2. договора №2 Генподрядчик за просрочку оплаты надлежащим образом выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ более, чем на 30 рабочих дней, уплачивает Субподрядчику по его письменному требованию неустойку 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от неоплаченной суммы.

Расчет суммы неустойки в соответствии с п. 7.2. договора № 2:

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 11.11.2020

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

13 493 059,08

11.11.2020

09.12.2020

29

13 493 059,08 x 29 x 0.01%

39 129,87 р.

-2 000 000,00

09,12.2020

Оплата задолженности

11 493 059,08

10.12.2020

19.02.2021

72 | 11 493 059,08 x 72 x0.01%

82 750,03 р.

-1 000 000,00

19.02.2021

Оплата задолженности

10 493 059,08

20.02.2021

29.03.2021

38

10 493 059,08 х 38 * 0.01%

39 873,62 р.

 

 

Итого:

161 753,52 руб.

Сумма основного долга: 10 493 059,08 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 161 753,52 руб.

 

Ответчик представил отзыв на заявленное требование согласно которого ответчик возражал против начисления процентов за пользование чужими денежными средствами.

Истец признал данное возражение обоснованным и уточнил иск, исключив из него проценты за пользование чужими денежными средствами.

В остальной части ответчик возражений по существу не представил.

В соответствии со ст.ст. 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии со ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статья 746 ГК РФ устанавливает, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Ответчик факт выполнения работ не оспорил, доказательств оплаты долга не представил. 

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не оспоренные ответчиком обстоятельства, на которые сослался истец в обоснование своих требований, считаются ответчиком признанными. 

С учетом изложенного, уточненное требование истца обоснованно  и подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, истец при подаче иска госпошлину не оплачивал. Исходя из цены иска, ее размер составит 120 441,00 рубль. В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика, со взысканием госпошлины в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Самарастройальянс"  в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ТЛТ-Дорстрой" 19 488 160,07 рублей, в том числе:  19 232 971,20 рублей основного долга, 255 188,87 рублей неустойки.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Самарастройальянс"  в доход федерального бюджета госпошлину в размере 120 441,00 рубль.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья                                                                         Лукин А.Г.