354/2023-554422(2) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-88035/2023

28 декабря 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 26 декабря 2023 года. Полный текст решения изготовлен 28 декабря 2023 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Виноградовой Л.В.,  

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТСТРОЙ"  ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"  

о взыскании 2 056 011,96 руб. при участии - от истца: ФИО2, доверенность от 27.10.2023; - от ответчика: не явился, извещен, 

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТСТРОЙ"  обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с  исковым заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПОЧТА РОССИИ" о  взыскании 1 581 334,87 руб. задолженности, 474 674,09 руб. неустойки.  

В судебном заседании Истец поддержал заявленные требования. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился,  представителей не направил, в связи с чем, дело рассмотрено в его отсутствие в  соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ).  

 В соответствии с пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному  разбирательству», частью 4 статьи 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным к  судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл  судебное разбирательство.  

Изучив и оценив материалы дела, выслушав представителя Истца, суд установил  следующее.  

Между акционерным обществом «Почта России» (далее – Заказчик, Ответчик) и  обществом с ограниченной ответственностью «БалтСтрой» (далее – Подрядчик, Истец,  Общество) был заключен Договор № 314/22-МР78 на комплексный ремонт отделения  почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской  области (ОПС 187530) (идентификатор соглашения - 0000000007121PRQ0002) от  26.04.2022 (далее – Договор).  

Цена Договора на момент его заключения составила 9 430 620 руб. 10 коп.  

Договором предусмотрены промежуточные сроки (этапы) выполнения Работ: 

Цена этапа проектирования (этап 1) – 84 997,50 руб. Начало работ – в течение 3  рабочих дней с даты заключения Договора, окончание работ – в течение 30 рабочих  дней с даты начала выполнения работ.  

Цена этапа строительно-монтажных работ (этап 2) – 9 345 622,60 руб. Начало  работ – в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора, окончание работ –  15.06.2022.  

В соответствии с п. 1.12 Договора оплата выполненных работ производится  Заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Сводного акта  сдачи-приемки выполненных работ.  

Истцом в адрес Ответчика направлена претензия об оплате задолженности,  оставление претензий без ответа и удовлетворения послужило основанием для  обращения истца в суд с настоящим иском.  

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ  производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке,  которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии  соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в  соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

Согласно статье 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный  срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Факт выполнения и приемки подтверждается актами о приемке  выполненных работ.  

Оплата выполненных работ произведена Заказчиком с нарушением сроков  платежей и не в полном объеме, задолженность составляет 1 581 334,87 руб.  

Согласно п. 1.15 Договора в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты  выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в  размере 0,1% от стоимости обязательств по оплате за каждый день просрочки.   

Истец в соответствии с пунктом 1.15 Договора начислил ответчику неустойку в  сумме 474 674,09 руб.  

В нарушение статьи 65 и части 1 статьи 131 АПК РФ ответчик не представил  допустимые и достоверные доказательства, опровергающие исковые требования, а  также отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно  предъявленных к нему требований и доводов о несогласии с расчетами истца.  

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается  сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными  другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими  обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих  представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на  ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЧТА РОССИИ" (ИНН  

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"БАЛТСТРОЙ" (ИНН 7820316678) 1 581 334,87 руб. задолженности, 474 674,09 руб.  неустойки, 33 280 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Виноградова Л.В.