Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А02-2001/2016

31 мая 2017 года

город Горно-Алтайск

Резолютивная часть решения объявлена 24 мая 2017 года. Полный текст решения изготовлен 31 мая 2017 года.

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Якшимаевой Ф.Ю., при ведении протокола секретарем судебного заседания Малетиной А.Б., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Казенного учреждения Республики Алтай "Управление капитального строительства Республики Алтай" (ОГРН 1160400050469, ИНН 0411175222, ул.Чорос-Гуркина, 27, г.Горно-Алтайск) к Акционерному обществу "Сибмост" (ОГРН 1025403206300, ИНН 5407127899, пр-кт Димитрова, д.16, г.Новосибирск) об обязании ответчика исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту на выполнение строительных работ по объекту: строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, строительство РТП, ТП особой экономической зоны туристко-рекреационного типа на территории МО «Майминский район» Республики Алтай от 26.11.2012 г. № 2012.153557,

В судебном заседании участвуют представители:

от истца – ФИО2, представитель, доверенность в деле,

от ответчика – ФИО3, представитель, доверенность в деле,

установил:

Казенное учреждение Республики Алтай "Управление капитального строительства Республики Алтай" обратилось в Арбитражный суд Республики Алтай с исковым заявлением к  Акционерному обществу "Сибмост" с иском о понуждении выполнению подрядных  работ, стоимостью 30844859 руб. 03 коп. и обвязывании к обеспечению фактического наличия на строительной площадке работ, материалов, оборудования, принятых по акту на сумму 148086578 руб. 02 коп.

Основанием исковых требований указаны обстоятельства действия между сторонами Государственного контракта на выполнение строительных работ, одностороннего прекращения ответчиком выполнения своих обязательств подрядчика, выявления невыполненного всего объема работ и частичного отсутствия принятых и оплаченных работ, материалов и оборудования.

Иск принят определением суда от 13.12.2016 г.

Ответчик отзыва по иску в суд не направил, в предварительное судебное заседание его представитель не явился. 

В материалах дела имелись доказательства надлежащего извещения ответчика о месте и времени судебного заседания, в связи с чем, руководствуясь п. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд не усмотрел в его неявке препятствий к проведению предварительного судебного заседания.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме и представил дополнительные доказательства – переписку сторон по ходу действия Государственного контракта.

К судебному заседания по первой инстанции ответчик направил в суд отзыв, из которого следуют возражения со ссылкой на подписание 30.12.2016 г. сторонами Соглашения о расторжении государственного контракта с прекращением всех  обязательств обеих сторон. К отзыву ответчик приложил Соглашение от 30.12.2016 г.

В судебном заседании по первой инстанции представитель истца возражал по отзыву ответчика, ссылаясь на несостоятельность представленного Соглашения, так как документ не получен в оригинале, отосланном заказным письмом.

В судебном заседании по первой инстанции, состоявшемся 27.02.2017 г. представитель истца, подтверждая факт подписания Соглашения о расторжении государственного контракта, отказался от требований в части понуждения к выполнению строительных работ на 30844859 руб. 03 коп. и во изменение основания по требованию об обвязывании к обеспечению нахождения на строительной площадке принятых по акту и оплаченных работ, материалов и оборудования, стоимостью 148086578 руб. 02 коп. указывал возникновение после прекращения договора гарантийных обязательств подрядчика в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими строительный подряд и условиями действовавшего государственного контракта.

Судом вынесено на основании ст.ст. 49, 150, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мотивированное определение от 27.02.2017 г. о прекращении судопроизводства в части (с исправлением описки по определению от 31.05.2017 г.) и приняты к разрешению изменения основания по оставшимся требованиям, неизмененным по предмету.

В последующих судебных заседаниях представитель истца поддерживая исковые требования, приобщал к материалам дела акты о приемке-сдачи выполненных работ на сумму с НДС 148086578 руб. 02 коп, платежные документы по расчетам, сметную стоимость отсутствующих работ, материалов и оборудования в ценах 2012 г. и в ценах 2017 г.

Ответчик возражая по иску, поддерживал свою позицию, изложенную в отзыве на иск о прекращении всех обязательств  в связи с расторжением Государственного контракта.

Ответчик в судебном заседании дополнительно возражал, что гарантийные обязательства должны были возникнуть после сдачи объекта в целом, после принятия готового к эксплуатации объекта. Расторжение государственного контракта состоялось до выполнения всего объема работ, объект не запущен, что исключает возникновение гарантийных обязательств по п. 10 Государственного контракта.

Сбор и исследование доказательств окончено судом с учетом мнения представителей сторон об их достаточности.

Выслушав сторон, исследовав материалы дела, оценив доказательства по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд признает иск подлежащим удовлетворению.

Из материалов дела следует:

Между Министерством регионального развития Республики Алтай и Открытым акционерным обществом «Сибмост» на основании проведения процедуры аукциона был заключен государственный контракт на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ-10 кВ. KJI-0.4 кВ. строительство РТП. ТП особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории МО «Майминский район» РА от 26 ноября 2012 года № 2012.153557 (далее Контракт), согласно которому Заказчик - Министерство регионального развития Республики Алтай поручает, а Подрядчик - и Открытое акционерное общество «Сибмост» принимает на себя обязательства генерального подряда по выполнению строительных работ по объекту: «Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения KJ1 10 кВ. КЛ 0,4кВ строительство РТП, ТП особой экономической зоны туристе ко-рекреационного типа на территории муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай».

Цена контракта 178 931 437,05 рублей.

27 апреля 2016 года между Казенным учреждением Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай» - (Далее Истец), Министерством регионального развития Республики Алтай и Of крытым акционерным обществом «Сибмост» - Ответчик было заключено Соглашение о перемене стороны (заказчика) и приеме-передаче прав и обязанностей ПО государственному контракту на выполнение строительных работ по объекту: Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ-10 кВ. КЛ-0.4 кВ. строительство РТП. ТП особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории МО «Майминский район» РА от 26 ноября 2012 года № 2012.153557 от 27.04.2016 года, согласно которому произошла перемена стороны (заказчика) и прием-передача прав и обязанностей по государственному контракту на выполнение строительных работ по объекту: Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, строительство РТП. ТП особой экономической зоны туристе ко-рекреационного типа на территории МО «Майминский район» РА от 26 ноября 2012 года № 2012.153557.

В период действия Государственного контракта были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком и оплачены работы, материалы и оборудование, стоимостью 148086578 руб. 02 коп.

В полном объеме подрядные работы должны были быть выполнены до июля 2016 г., Государственный контракт действовал до 31.12.2016 г. До июля вновь подрядчик весь объем работ не выполнил, в сентябре 2016 г. в одностороннем порядке прекратил выполнение строительных работ и покинул строительную площадку.

07.09.2016 г. состоялся контрольный обмер фактически выполненных работ, материалов, оборудования на объекте, с участием представителей заказчика и подрядчика. В ходе контрольного обмера были выявлены отсутствие части принятых работ, материалов и оборудования, что было оформлено Ведомостью незавершенных объемов работ как Приложение № 1 к акту контрольного обмера от 07.09.2016 г.

Согласно данной Ведомости, на объекте отсутствуют:

По ГКТП № 6 2х630:

1. Монтаж ошиновки  трансформатора со стороны 10 кВ 2 комплекта. с приобретением материалов: Болт М8х45 24 шт.. Прокладка под шины 10 кВ 10 шт.. в наличие шины разного размера 20 шт.

2. Монтаж ошиновки трансформатора со стороны 0,4 кВ 2 комплекта. с приобретением материалов: Гайка МЮ с шайбой 8 шт.. Прокладки под шипы 0.4 кВ 5 шт.

3. Монтаж заземления трансформатора 2 шт.

4. Монтаж изолятора 10 кВ 1 шт.

5. Монтаж маслоприёмных емкостей   2 шт.

6. Монтаж верхних защитных панелей в ячейках шт.     5

7. Монтаж нижних защитных панелей в ячейках шт.     6

8. Установка электрических ламп в отсеки подсветки ячеек     шт.     6

9. Нанесение диспетчерских надписей на ячейках        шт.     6

10. Монтаж предохранителей 10 кВ       шт.     6        ПКН-001-10УЗ

11.Монтаж концевых муфт на кабелях 10 кВ     4 комплекта.

12. Расключение кабелей 10 кВ в ячейках 4 комплекта.

13. Монтаж дна в ячейках шт. 6 вместоКСО-366 "Щитмонгаж" (Новосибирск), заменить ни проекту КСО-СЭЩ (Самара). Ячейки не транзитные

14.Монтаж трансформаторов тока ТОЛ-СЭЩ-М- 200/5 шт. 6 Для ячеек КСО-СЭЩ

15.Монтаж амперметров шт.     6        Для ячеек КСО-СЭЩ

16. Монтаж болтов M12x35. гаек. гаек на шинах 10кВ шт.     6

17. Укомплектование индивидуальными средствами защиты      1 комплект

18. Замена (демонтаж/монтаж) амперметра Э8030-М1    шт.     1

19. Расключение кабелей собственных нужд в ячейках   шт.     2

20. Монтаж болтов М8х30. шайб, гаек на шинах заземления      20 комплектов

21. Монтаж болтов М 12x35. шайб, гаек на шипах 0.4 кВ комттл. 8

22. Нанесение диспетчерских надписей   шт.     5

23. Гос. поверка электросчетчиковшт.     2

24. Гос. поверка трансформаторов тока   шт.     6

25. Монтаж дна в ячейках шт.     5

26. Укомплектование индивидуальными средствами защиты     1 комплект

26 а. Пуско-наладочные работы на подстанции     шт.      1Применительно      ко всему оборудованию подстанции

27. Нанесение гидроизоляции цоколя     м2      23.02

28. Отделка цоколя профлистом  м2      23,02

29. Устройство отливов по периметру фундамента        м.п.     25.02   Ширина заделки 200 мм

30. Восстановление лакокрасочного покрытия с вмятинами на двух сендвич-панелях (общий размер панелей 2300x3000)        м2      0,1

31. Монтаж горизонтальных нательников 80x6000 нал дверьми шт.     2

32. Монтаж вертикальных нащельников 80x800 от конька        шт.     2

33. Затирка швов между блоками в подвале       м.п.     68

34. Выполнит, (планировку дна подвального помещения м2      30

35. Заделка раствором щелей между корпусом и фундаментом по периметру модуля м.п.    23,7

36. Утепление полов по всей площади модуля (сендвич-панель) м2      26

37. Покраска полов модуля со стороны подвального помещения м2      26

38. Заделка кабельных вводов     шт.     10

39. Устройство наружного контура защитного заземления ГКТП (круг ст. О 16мм 10шт по Зм. крун ст. О 10мм - 50м)       шт.      1

40. Заделка торцов коньков        шт.     2' 

ПО ГКТП №7 2x400:

41. Моннгаж ошиновки трансформатора со стороны 10кВ2 комплекта, с приобретением материалов: Волт М8х45 24 шт., В наличие шины разного размера 19 шт.

42. Монтаж ошиновки трансформатора со стороны 0.4 кВ 2 комплекта

43. Монтаж заземления трансформатора шт.     2

44. Монтаж маслоприемных емкостей    шт.     2

45. Монтаж болтов на аппаратные зажимы трансформатора Т-1 шт.     2

46. Монтаж аппаратного зажима на трансформатор Т-1   шт.      1

47. Замена (демонтаж/монтаж) изолятора со стороны 0.4 кВ      шт.  1    

48. Монтаж верхних защитных панелей в ячейкахшт.     5

49. Монтаж нижних защитных панелей в ячейкахшт.     4

50. Установка электрических ламп в отсеки подсветки ячеек     шт.     6

51. Нанесение диспетчерских надписей на ячейках        шт.     б

52. Монтаж концевых муфт на кабелях 10 кВ     2        комплекта

53. Расключение кабелей 10 кВ в ячейках 2 комплекта

54. Монтаж дна в ячейках шт. 6 Ячейки заменить на проектные вместо СО-366 "Щитмонтаж" (Новосибирск), на КСО-СЭЩ (Самара)

55. Монтаж трансформаторов тока ГОЛ-СЭЩ-10-200/5 шт. 6 Для ячеек КСО-СЭЩ

56. Монтаж амперметров шт.     6        Для ячеек КСО-СЭЩ

57. Монтаж болтов Ml2x35. шайб, гаек па шинах 10 кВ шт.     6

58. Укомплектование индивидуальными средствами зашиты     1 комплект

59. Расключение кабелей собственных нужд в ячейках   шт.     2

60. Монтаж болтов М8.х30. шайб, гаек на шинах заземления      18 комплектов

61. Монтаж болтов М12х35. шайб, гаек на шинах 0,4 кВ 8 комплектов

62. Нанесение диспетчерских надписей   шт.     5

63. Гос. поверка электросчетчиковшт.     2

64. Гос. поверка трансформаторов тока   шт.     6

65. Монтаж дна в ячейках шт.     5

66. Укомплектование индивидуальными средствами зашиты     1 комплект

67. Демонтаж автоматическою выключателя ВЛ88-37 (400 Л)   шт.     2

68. Демонтаж трансформаторов тока 300/5        шт.     6

68а. Пуско-наладочнные работы на подстанции шт. 1 Применительно ко всему оборудованию

69.Нанесение гидроизоляции цоколя     м2      25,02

70. Отделка цоколя профлистом  м2      25.02

71.Устройство отливов по периметру фундамента        м.п.     25.02   Ширина заделки 150 мм

72. Монтаж горизонтальных нащельников 80x6000 над дверьми шт.     2

73.Монтаж вертикальных нащельников 80x800 от конька        шт.     2

74.Затирка швов между блоками в подвале       м.п.     14.4

75.Вынолннить планировку дна подвального помещения м2      30

76.Заделка раствором щелей между корпусом и фундаментом но периметру модуля м.п.     23.7

77. Утепление полов по всей площади модуля (сендвич-панель) м2      26

78.Покраска полов модуля со стороны подвального помещения м2      26

79.Покраска полов модуля м2      26

80.Заделка кабельных вводов     шт.     16

81.Устройство наружного контура защитного заземления ГКТП (круг ст. О 16мм 10шт по Зм, круг ст, О 10мм - 50м)       шт.      1

82. Заделка торцов коньков        шт      2

83. В подвальном помещении разрушены блоки ФБС 300x600x2400 (трещины, сколы) шт. 3

84.Средний ряд блоков фундамента смещен относительно вертикали   мм      20 

По ГКТП №3.6 2x250

85. Монтаж ошиновки трансформатора со стороны 10 кВ2 комплекта, с приобретением материалов: Болт М8х45 24 шт.. Прокладка под шины 10 кВ 12 ннгг., В наличие шины ратного размера 20 шт.

86. Монтаж ошиновки трансформатора со стороны 0.4 кВ2 комплекта, с приобретением материалов: Гайка М10 с шайбой 8 шт.. Прокладки под шины 0.4 кВ

8 шт.

87. Монтаж заземления трансформатора шт.     2

88. Установка трансформаторов в рабочее положение    шт.     2

89. Монтаж маслоприемных емкостей    шт.     2

90. Моннтаж болтов на аппаратные зажимы трансформатора Т-1 шт.     4

91. Монтаж верхних защитных панелей в ячейкахшт.     5

92. Монтаж нижних защитных панелей в ячейкахшт.     4

93. Установка электрических ламп в отсеки подсветки ячеек     шт.     6

94. Нанесение диспетчерских надписей на ячейках        шт,     6

95. Монтаж концевых муфт на кабелях 10 кВ2 комплекта

96. Расключение кабелей 10 кВ в ячейках ком пл. 2

97. Монтаж дна в ячейках шт. 6 Ячейки заменить на проектные вместо КСО-366 "Щитмонтаж" (Новосибирск), поставить КСО-СЭЩ (Самара)

98. Монтаж трансформаторов тока ТОЛ-СЭЩ-10- 200/5 шт. 6  Для ячеек КСО-СЭЩ

99. Монтаж амперметров шт.     6        Для ячеек КСО-СЭЩ

100. Монтаж болтов М12x35. шайб, гаек на шинах 10 кВ шт.     6

101. Укомплектование индивидуальными Средствами защиты     1 комплект

102. В наличие ячейки секционирования шт. 2 Не предусмотрено проектом н сметой

ЮЗ 

103. Расключение кабелей собственных нужд в ячейках   шт.     2

104. Монтаж болтов М8х30. шайб, гаек на шинах заземления      20 комплектов

105. Монтаж болтов Ml2x35, шайб, гаек на шинах 0.4     8 комплектов 1061 

106. Нанесение диспетчерских надписей   шт.     5

107. Гос. поверка электросчетчиковшт.     2

108. Гос. поверка трансформаторов тока   шт.     6

109. Монтаж дна в ячейках шт.     5

110. Укомплектование индивидуальными средствами защиты     1 комплект

111. Демонтаж временного щита учета     шт.      1

111а. Пуско-наладочвяыс работы на подстанции     шт.      1   Применительно ко

всему оборудованию

112. Нанесение гидроизоляции цоколя     м2      22.52

113. Отделка цоколя профлистом м2      22.52

114. Устройство отливов по периметру фундамента        м.п.     25,02   Ширина заделки 170 мм

115. Монтаж горизонтальных нательников 80x6000 над дверьми шт.     2

116. Монтаж вертикальных нащельников 80x800 от конькашт.     2

117. Выполнить планировку дна подвального помещения с выборкой грунта      м 2 30      Объем извлекаемою грунта 1 мЗ

118. 3аделка раствором щелей между корпусом и фундаментом по периметру модуля м.п.    23,7

119. Утепление полов ню всей площади модуля (сендвич-панель) м2      26

120. Покраска полов модуля со стороны подвального помещения м2      26 

121. Покраска полов модулям2      13

122. Заделка кабельных вводов     шт.     1

123. Устройство наружного контура защитного заземления ГКТП (круг ст.016мм 10шт по Зм. крут ст. 010мм - 50м) шт. 1 В наличие имеются вертикальные электроды ЗУ крут ст.О16мм но Зм -12 шт.

124. Заделка торцов коньков        шт.     2

125. Монтаж уголка 90x90x2350 на углы здания подстанции       шт.     4

126. Восстановление замятого угла крыши

127. Монтаж нащельников 250x2200 у входных дверей в помещения трансформаторов шт.     4

128. Стяжка модулей подстанции шт.     2

129. Покраска потолка модуля      м2      6

130. Покраска металлоконструкции каркаса (швеллер №10)"       м.п.     22.4

131. Покраска металлоконструкции каркаса (швеллер №16)"      мл.     17.6

132. Монтаж конькам.п.    5.64    Конек имеется в наличие 

По ГКТП №3.5 2x250

133. Монтаж ошиновки трансформатора со стороны ! 0 кВ2 комннлекта. с приобретением материалов: Болт М 8x45 24 шт.. В наличие шины разного размера

20 шт.

134. Монгаж ошиновки трансформа юра со стороны 0.4 кВ2 комплекта, с приобретением материалов: Гайка М10 с шайбой 8 шт.,

135.Монтаж трансформатора ТМ-250/10/0,4 шт. 2. с последующим монтажом их заземления.

136. Монтаж маслоприемных емкостей    шт.     2 Раздел. Распределительное устройство 10 кВ

137. Монтаж верхних защитных панелей в ячейкахшт.     5

138.Монтаж нижних защитных панелей в ячейкахшт.     4

139.Установка электрических ламп в отсеки подсветки ячеек     шт.     6

140. Нанесение диспетчерских надписей на ячейках        шт.     6

141.Заведенние кабелей в подстанцию      компл. 2

142. Расключение кабелей 10 кВ в ячейках компл. 2

143. Монтаж дна в ячейках шт. 6 Ячейки заменить на проектные вместо КСО-366 "Щитмонтаж" (Новосибирск), поставить КСО-СЭЩ (Самара)

144. Монтаж трансформаторов тока ТОД-СЭЩ-Ю- 200/5 шт. 6 Для ячеек КСО-СЭЩ

145. Монтаж амперметров шт.     6        Для ячеек КСО-СЭЩ

146. Монтаж болтов Ml2\35, шайб, гаек на шинах 10 кВ  шт.      6

147. Укомплектование индивидуальными средствами защиты     1 комплект 

148. В наличие ячейки акционирования   шт.     2

149. Расключение кабелей собственных нужд в ячейках   шт.     2

150. Монтаж болтов М8х30. шайб, гаек на шинах заземления      20 комплекта

151. Монтаж бантов VI12x35. шайб, гаек на шинах 0.4 кВ компл. 8 

152. Нанесение диспетчерских надписей   шт.     5

153.Гос. поверка электросчетчиковшт.     2

154. Гос. поверка трансформаторов тока   шт.     6

155.Монгаж дна в ячейках шт.     5

156. Укомплектование индивидуальными средствами защиты     1        комплект

157. Монтаж шин в шкафу секционирования       шт.     3        Шины в наличие 

157а Пуско-наладочные работы на подстанции     шт.      1   Применительно ко всему оборудованию подстанции

158. Нанесение гидроизоляции цоколя     м2      20,02

159. Отделка цоколя профлистом  м2      20.02

160. Устройство отливов по периметру фундамента        м.п.     25,02   Ширина заделки 200 мм

161. Монтаж горизонтальных нащельников 80x6000 нал дверьми шт.     2

162. Монтаж вертикальных нательников 80x800 от конька        шт.     2

163. Выполнить планировку дна подвального помещения м 2       30

164. Заделка раствором щелей между корпусом и фундаментом ПО периметр) модуля м.п.     23.7

165. Утепление полов по всей площади модуля (сеидвич-нкшель) м2      26

166. Покраска полов модуля со стороны подвального помещения м2      26

167. Заделка кабельных вводов     шт.     1       Не предусмотрено проектом и сметой

168. Устройство наружного контура защитного заземлении ГКТП (круг ст.0!6мм 10шт по Зм. круг ст. ОЮмм - 50м)       шт.     1

169. Заделка торцов коньков        шт.     2 

По ГКТП №1.3 2x1000

170. Монтаж ошиновки трансформатора со стороны 10 кВ2 комплекта. с приобретением материалов: Прокладка под шины ЮкВ 12 шт.. В наличие шины ратного размера    14 шт.

171. Монтаж ошиновки трансформатора со стороны 0.4 кВ 2 комплекта, с приобретен тем материалов: ФИО4 с шайбой 8 шт.. Прокладки под шины 0.4 кВ

8 шт.

172. Монтаж заземления трансформатора шт.     2

173. Монтаж маслоприёмных емкостей    шт.     2 Раздел. Распределительное устройство 10 кВ

174. Монтаж верхних защитных панелей в ячейкахшт.     3

175. Монтаж нижних зашитых панелей в ячейкахшт.     2

176. Установка электрических ламп в отсеки подсветки ячеек     шт.     4

177. Нанесение диспетчерских надписей на ячейках        шт.     4

178. Расключение кабелей 10 кВ в ячейках компл. 2

179. Монтаж дна В ячейках шт. 4 Ячейки заменить на проектные вместо КСО-366 "Щитмононтаж" (Новосибирск), поставить (Самара)

180. Монтаж Трансформаторов тока ТОЛ-СЭЩ-10-80/5   шт.     6        Для       ячеек

ксо-сэщ

181. Монтаж амперметров шт.     6        Для ячеек КСО-СЭЩ

182. Монтаж болтов Ml2x35. шайб, гаек на шинах 10 кВ шт.     6

183. Укомплектование индивидуальными средствами зашиты1 комплект

184. Расключение кабелей собственных нужд в ячейках   шт.     2

185. Монтаж болтов М8х30. шайб гаек Hа шинах заземления      20 комплектов

186. Монтаж болтов Ml2x35. шайб, гаек на шинах 0.4 кВ8 комплектов

187. Нанесение диспетчерских надписей   шт.     5

188. Гос. поверка электросчетчиковшт.     2

189. Гос. поверка трансформаторов тока   шт.     6

190. Монтаж дна в ячейках шт.     5

191. Укомплектование индивидуальными средствами защиты     1 комитентов

191а Пусконаладочные работы на подстанции шт. 1 Применительно ко всему оборудованию подстанции

192. Нанесение гидроизоляции цоколя     м2      20.02

193. Отделка цоколя профлистом  м2      20.02

194. Устройство отливов по периметру фундамента        м.п.     25.02   Шнринна заделки 200 мм

195. Монтаж горизонтальных нащельников 80x6000 над дверьми шт..     2

196. Монтаж вертикальных нательников 80x800 от конька        шт.     2

197. Затирка швов между блоками в подвале       м.п.     25,2

198. Выполнить планировку дна подвальною помещения с выборкой грунта     м2 30      Объем извлекаемого грунта 1 мЗ

199. Заделка раствором щелей между корпусом и фундаментом ню периметру модуля м.п.     23.7

200. Утепление полов но всей площади модуля (сендвич-панель) м2       26

201. Покраска полов модуля со стороны подвального помещения м2      26

202. Устройство наружного контура защитного заземления ГКТП (крут ст.О!6мм 10шт по Зм. круг ст. 010мм - 50м)       шт.      1

203. Заделка торцов коньков        шт.     2

204. Монтаж нательников 250x2200 у входных дверей в помещения трансформаторов шт.     4        в  наличие 3 шт. но не смонтировано

205. Стяжка модулей подстанции шт.     2

206. В подвальном помещении разрушены блоки ФБС 300x600x2400      шт.      1

207. Стена фундамента со стороны 1 -1 имеет уклон внутрь подвального помещения

208. Подкладка пластин под углы модуля (зазоры до 30 мм)       шт.     4   

ПО РП №1 2x400

209. Монтаж гайки М14    шт.     1

210. Установка трансформаторов в рабочее положение    шт.     2

211. Монтаж заземления трансформатора 2 шт.

212. Поставить опорную конструкцию для ошиновки      шт. 2

213. Монтаж верхних защитных панелей в ячейкахшт. меньше проектного на 1 ячейку

214. Монтаж нижних защитных панелей в ячейкахшт. меньше проектного на 1 ячейку

215. Расключение кабелей 10 кВ в ячейках компл. 4

216. Гос. поверка электросчетчиковшт.     2        По 230AR-03R по факту: BEKTOP-3V3 ART 00 PNO

217. Гос. поверка трансформаторов тока   шт.     21

218. Гос. поверка трансформаторов напряжения   шт.     2 СЭЩ-10У2 по факту: ЗНОЛ0.6-ЮУЗ

219. Замена (демонтаж/монтаж) светильника над входной дверью РУ-10 к В шт.

220. Монтаж приборов учета (счетчики электроэнергии) шт.     4

220а. Монтаж шкафа ЛУОI шт.     I        Корпус шкафа сеть в наличие

220б. Монтаж шкафа ЛБ     шт.     1        Корпус шкафа есть в наличие

компл. 1

Пе

Ме

2

про

51.4

221.Укомплектование индивидуальными средствами защиты не предусмотрено проектом и сметой Раздел. Распределительное устройство 0.4 кВ

222. Расключение кабелей собственных нужд в ячейках   шт.2

223. Гос. поверка электросчетчиковшт.     2        По проекту Меркурий 230AR-03R по факту- BHKTOP-3V3 ART 03 N

224. Гос. поверка трансформаторов тока   шт.     6

225. Укомплектование индивидуальными средствами защиты не предусмотрено проектом и сметой Раздел. Строительная часть ГКТП

226. Нанесение гидроизоляции цоколя     м2      25,85

227. Отделка цоколя профлистом  м2      25.85

228. Выполнить планировку дна подвального помещения м2 

229. Заделка раствором щелей между корпусом и (фундаментом по периметр) модуля м.п. 34,5

230. Покраска полов модуля        м2     46

231.Покраска каркаса модуля      м2     5,2

232. Покраска маслоприемных емкостей м 2     6,22

233. Заделка кабельных вводов     шт. 4

234. Регулировка двери  шт. 2

235 Затирка швов между блоками в подвале       м.п. 

236. В подвальном помещении блоки ФВС 300x600x2400 висят   шт.

компл. 2

.

Не

-

237. Подкладка пластин под углы модуля шт.     1

238. Монтаж лестниц с площадками и перилами   шт.     4

239. Монтаж водоотводов 1 комплект

240. Поставить закладные летали для ввода кабеля РП №2 2x400 

ПО РП № 2 2x490

241. Подключение трасформаторов к шинам 10 кВ комп. 2

242.  Монтаж прокладок под шины 10 кВ   шт.     6 ошиновка

243. Установка трансформаторов в рабочее положение шт. 2

244. Монтаж заземления трансформатора шт.     2

245. Монтаж защитного ограждения        шт.     2

246. В наличие опорная конструкция для ошиновки 

247. Монтаж верхних защитных панелей в ячейках меньше проектного на 1 ячейку

248. Монтаж нижних защитных панелей в ячейках меньше проектного на 1 ячейку

249. Расключение кабелей 10 кВ в ячейках компл. 2

250. Замена амперметров (демонтаж/монтаж)      шт.     8 проекту (шкала)

251. Гос. поверка трансформаторов тока   шт.     11ъ

252. Гос. поверка трансформаторов напряжения   шт.     2 СЭЩ-10У2 но факту: ЗНОЛ0.6-10УЗ

253. . Монтаж трансформаторов тока ТОЛ-СЭЩ-10-50/5  шт. 2

254. . Монтаж приборов учета (счетчики электроэнергии) 10 шт.

255.  Монтаж трансформаторов тока нулевой последовательности 'ГЗЛМ-10 2 шт.

255а. Монтаж шкафа АУОТ 1 шт.  корпус есть в наличие

255б. Монтаж шкафа АБ 1 шт.  корпус есть в наличие 

256. Укомплектование индивидуальными средствами защиты

257. Монтаж и расключение щита собственных нужд      шт.1

258. Монтаж и расключение щита освещения      шт.   1

259. Монтаж вводной ячейки всборе        шт.     2

260. Монтаж секционной ячейки всборе    шт.    1

261. Укомплектование индивидуальными средствами защиты предусмотрено проектом и сметой

261а Пуско-наладочные работы на подстанции     шт. 1

Применительно ко всему оборудованию подстанции

262. Нанесение гидроизоляции цоколя      м2      31.17

263. Отделка цоколя профлистом  м2      31,17

264. Выполнить планировку дна подвального помещения ч2

265. Заделка раствором щелей между корпусом и фундаментом по периметру модуля м.п.     38,96

266. Покраска полов модулям2      60

267. Покраска каркаса модуля      м2      5,2

268. Покраска маслоприемных емкостей   м2

269. Заделка кабельных вводов     шт.     2

270. Затирка швов между блоками в подвале

271. Подкладка пластин под утлы модуля шт.

272. Монтаж водоотводов компл. 1

273. Монтаж ручек на люках        шт.     4

274. Монтаж лестниц с площадками и перилами

275. Отсутствуют закладные детали для ввода кабеля 

    ПО РП ЛУ 2x400

276. Монтаж ошиновки трансформатора со стороны 10 кВ 2 комп.

277. Монтаж ошиновки трансформатора со стороны 0,4 кВ 2 комп.

278. Установка трансформаторов в рабочее положение 2 шт.

279. Монтаж заземления трансформатора шт.     2

280. Монтаж защитного ограждения        шт.     2

281. Замена (демонтаж/монтаж) светильника в Г-1 шт.

282. В наличие опорная конструкция для ошиновки

283. Монтаж оборудования согласно проекту

284. Укомплектование индивидуальными средствами защиты 1 комп.

285. Монтаж оборудования согласно проекту

286. Укомплектование индивидуальными средствами защиты 

286аПуско-наладочные работы на подстанции 1 шт. применительно ко всему оборудованию подстанции

287.Нанесение гидроизоляции цоколя     м2     35,76

288.Отделка цоколя профлистом  м2      35.76

289. Выполнить планировку подвального о помещения м2

290. Заделка раствором щелей между корпусом и фундаментом по периметру модуля 44,7

291. Покраска полов модуля м2 73

292. Покраска каркаса модуля      м2 5,2

293. Покраска маслоприемных емкостей   м2 6,22

294. Заделка кабельных вводов     шт.     8

295. Затирка швов между блоками в подвале м.п. 42

296. Монпаж водоотводов компл. 1

297.Монтаж лестниц с площадками и перилами

298. Поставить закладные летали для ввода кабеля.

Всего 298 наименований работ, материалов, оборудования.

С подписанием акта контрольного обмера и Ведомости незавершенных работ подрядчик обязался устранить недостатки и обеспечить нахождение на объекте всего объема принятых работ, материалов, оборудования.

Неисполнение обязательств в добровольном порядке обусловлено обращением УКС РА в суд с настоящим иском.

В ходе судопроизводства по иску, с учетом финансовой несостоятельности подрядчика, стороны подписали 30.12.2016 г. Соглашение о расторжении Государственного контракта № 2012.153557 от 26.11.2012 г. с прекращением обязательств подрядчика выполнить строительные работы, а заказчика оплачивать эти работы.

Делая вывод о законности и обоснованности требований Казенного учреждения суд руководствуется нижеследующим.

Суд признает права КУ УКС РА - заказчика по Государственному контракту № 2012.153557 от 26.11.2012 г., возникшими в соответствие с Соглашением о перемене стороны от 27.04.2016 г.

Соглашение заключено на основании гл. 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 6 ст. 95 ФЗ РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства РА от 29.10.2015 г. № 355 «О реорганизации Государственного унитарного казенного предприятия «Управление капитального строительства Республики Алтай» путем преобразования в казенное учреждение», распоряжения министерства регионального развития Республики Алтай от 01.03.2016 г. № 10-р.

Подписанием Соглашения от 30.12.2016 г. о расторжении Государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту «Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения КЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ, строительство РТП, ТП Особой Экономической Зоны туристско-рекреационного типа на территории МО «Майминский район» РА от 26.11.2012 г. № 2012.153557 стороны досрочно прекратили действие Государственного контракта.

Согласно п. 3 ст. 407 ГК РФ…. «Стороны своим соглашением вправе прекратить обязательство и определить последствия его прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства».

Пунктом 2 вышеуказанного Соглашения стороны согласовали, что с момента подписания Соглашения заказчик и подрядчик не считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями. Заказчик не вправе требовать выполнение работ, подрядчик не вправе требовать оплаты за выполненные работы. Иных последствий стороны не предусмотрели.

Из разъяснений, данных в п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 06.06.2014 г. «О последствиях расторжения договора» следует….Разрешая споры, связанные с расторжением договора,  суды должны иметь в виду, что по смыслу п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например: выполнять работы по договору подряда).

Вместе с тем, условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения договора (например: гарантийные обязательства) сохраняют свое действие и после расторжения договора, иное может быть установлено соглашением сторон».

Соглашением от 30.12.2016 г. стороны не установили (не могли бы установить) условия прекращения гарантийных обязательств по Муниципальному контракту. Такое условие противоречило бы правовой природе гарантийных обязательств, предусмотренных законом и сущности Государственного контракта, как публичного договора.

Ст. 755 ГК РФ предусмотрены гарантийные обязательства подрядчика, срок их  действия.

Пунктом 10 Государственного контракта № 2012.153557 от 26.11.2012 г. стороны предусмотрели гарантийную обязанность подрядчика в пределах обязательств, предусмотренных законом… Гарантия качества распространяется на все конструкции и работы, выполненные подрядчиком   Подрядчик гарантирует достижение данным объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможности эксплуатации в течение гарантийного срока - 36 месяцев с даты подписания актов приемки готового к эксплуатации объекта.

В случае выявления  в период гарантийного срока дефектов, препятствующих его нормальной эксплуатации по вине подрядчика, последний устраняет их за свой счет, в сроки, согласованные с заказчиком…»

Соответственно вышеуказанным нормам закона и Государственного контракта – подрядчик должен за свой счет устранить выявленные недостатки, действительность которых он не оспаривает и подтвердил подписанием акта контрольного  обмера от 07.09.2016 г., Ведомостью незавершенных объемов работ. Отказ от добровольного исполнения своих обязательств по устранению недостатков, выполненных работ требует понуждения по решению суда.

Исковые требования КУ УКС РА подлежат удовлетворению.

Отказ ответчика со ссылкой на не возникновение гарантийных обязательств, суд признает не соответствующим закону и несостоятельным.

В силу положений п. 5 ст. 724 ГК РФ…гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был  быть принят.

Суд признает, что результат выполненных  работ окончательно принят 30.12.2016 г., когда сторонами подписывалось Соглашение о расторжении Государственного контракта. С указанного времени объект считался переданным заказчику, у подрядчика прекратились обязательства по дальнейшему строительству.

В таком случае, суд признает гарантийные обязательства подрядчика возникшими и заявленными к устранению в пределах гарантийного  срока.

Гарантийные обязательства не исключены Соглашением о расторжении Государственного контракта, а потому действуют в отношении ответчика с возложением обязанности по устранению недостатков.

С удовлетворением исковых требований, в соответствии с положениями ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик обязан возместить истцу судебные расходы по оплате государственной пошлины.

           Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Казенного учреждения Республики Алтай "Управление капитального строительства Республики Алтай" удовлетворить.

Обязать Акционерное общество "Сибмост" в сроки, установленные заказчиком, выполнить работы и обеспечить наличие материалов по ведомости незавершенных объемов работ (298 наименований), являющихся Приложением № 1 к Акту контрольного обмера фактически выполненных объемов работ от 07.09.2016г.

Взыскать с Акционерного общества "Сибмост" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-кт Димитрова, д.16, г.Новосибирск) в пользу Казенного учреждения Республики Алтай "Управление капитального строительства Республики Алтай" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.Чорос-Гуркина, 27, г.Горно-Алтайск) 6000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья

          Ф.Ю.Якшимаева