АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-9443/2023

г. Ставрополь

05 июня 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Соловьевой И.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мирошник А.В.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску государственного унитарного предприятия  Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал», г. Ставрополь, ОГРН 1022601934630,  ИНН 2635040105,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Системы», г. Химки, Московская  область, ОГРН 1085047003832, ИНН 5047093585,  

о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по договору № 1169 от 07.09.2020  об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту:  «Реконструкция ОСВ г. Ипатово Ставропольского края» за период с 09.03.2021 по 16.05.2023  в размере 1 434 756,83 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере  27 348 руб.,  

при участии представителя истца Самойловой А.А. по доверенности от 21.11.2022,  Чернышова М.Е. по доверенности от 23.04.2024, представителя ответчика Самигуллина  Ш.М. по доверенности от 24.05.202 № 24/05,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Система», г. Химки,  ОГРН 1085047003832, ИНН 5047093585, в пользу государственного унитарного предприятия  Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал», г. Ставрополь, ОГРН 1022601934630,  ИНН 2635040105, пени за неисполнение обязательств по договору № 1169 от 07.09.2020 об  оказании услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция  ОСВ г. Ипатово Ставропольского края» за период с 10.03.2021 по 31.03.2022, с 03.10.2022 по  16.05.2023 в размере 3 055 829,52 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины  в размере 38 279 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы в двухмесячный срок со дня вступления в законную силу.  

Судья И.В. Соловьева