АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: https://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98, 3-82-40, факс 2-11-23

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А16-744/2024

г. Биробиджан

09 июля 2024 года

Резолютивная часть объявлена 25 июня 2024 года.

 

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе:

судьи Кручинина А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Князь Т.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "РЕММЭС" (г. Хабаровск Хабаровского края, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к администрации Смидовичского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области (г. Биробиджан Еврейской автономной области, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

об обязании привести техническую документацию к муниципальному контракту № 0378300014320000005 от 19.06.2020 в соответствие с требованиями пункта 5.1.23 СП 28.13330.2012,

в отсутствие сторон,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РЕММЭС" (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Еврейской автономной области с иском к администрации Смидовичского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области (далее – Администрация) об обязании привести техническую документацию к муниципальному контракту № 0378300014320000005 от 19.06.2020 в соответствие с требованиями пункта 5.1.23 СП 28.13330.2012.

Ответчик отзыв на иск не представил.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, в связи с чем дело рассматривается в их отсутствие согласно статье 156 АПК РФ.

Суд, изучив представленные документы, установил следующее.

Сторонами 19.06.2020 заключен муниципальный контракт № 0378300014320000005 (далее – Контракт), в соответствии с которым Общество (подрядчик) обязалось выполнить работы по благоустройству общественной территории «Сквер Победы» в п. Смидович Смидовичского района Еврейской автономной области (реконструкция мемориального комплекса памяти погибших в Великой Отечественной войне) (далее - Работы), а Администрация (заказчик) принять их и оплатить.

Решением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 27.04.2023 в рамках дела № А16-551/2022 суд, удовлетворив частично требования Администрации, в том числе, обязал Общество устранить выявленные дефекты на мемориальном комплексе памяти погибших в годы Великой Отечественной Войны в «Сквере Победы», расположенном по улице Октябрьская 17 а-п поселка Смидович Смидовичского района Еврейской автономной области в части отслоения штукатурки, образования трещин на поверхности штукатурного слоя, некачественного устройства отделочных покрытий из плит гранитных, образовании пустот между отделочным покрытием из гранитных плиток и поверхностью элементов мемориала, образования высолов и потеков на поверхности гранитных плиток по направлению из межплитных швов, разрывов в укладке затирочного материала межплитных швов, восстановить целостность пилонов с гравировкой ФИО участников ВОВ.

В целях устранения указанных дефектов и исполнения решения суда Общество, направило Администрации уведомление о несоответствии технической документации требованиям пункта 5.1.23 СП 28.13330.2012 с предложением внести изменения в техническую документацию.

Поскольку ответа на указанное предложение от ответчика не поступило, а исполнение решения по делу № А16-551/2022 без указанных изменений по мнению истца невозможно, Общество обратилось в суд с настоящим иском.

Суд, рассмотрев доводы истца, оценив представленные доказательства, приходит к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В рамках дела № А16-551/2022 проведена экспертиза. В заключении экспертом указано на нарушение Обществом технологии производства строительных работ при выполнении обязательств по Контракту, в связи с чем суд обязал Общество устранить выявленные дефекты.

При этом какие-либо обязательства судом на Администрацию в связи с исполнением Обществом Контракта, либо решения суда, не возложены.

Отношения сторон по Контракту определяются нормами §§ 1, 3 и 5 главы 37 ГК РФ, а также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно статье 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Пунктом 3 указанной статьи определено, что если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

В силу пункта 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.

Статьей 719 ГК РФ предусмотрено право подрядчика не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно пункту 1 статьи 744 ГК РФ заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации (п. 4 ст. 744 ГК РФ).

Таким образом, действующее законодательство связывает не устранение заказчиком обстоятельств, препятствующих исполнению подрядчиком обязательств по договору подряда, наступлением соответствующих отрицательных последствий для заказчика, но не предоставляет подрядчику права обязать заказчика устранить такие обстоятельства.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

реШил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской автономной области.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru.  

 

Судья 

А.Н. Кручинин