АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-15480/2023

г. Владивосток

10 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  27 мая 2024 года. 

Полный текст решения изготовлен  10 июня 2024 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Зайцевой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём  Мадихоновым М.М.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Администрации Арсеньевского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

об обязании выполнить работы 

при участии

от истца - ФИО1, по доверенности от 09.01.2024, паспорт, диплом; после перерыва  - не явился, извещен;

от ответчика  в режиме веб-конференции - ФИО2, по доверенности  от 23.07.2021, паспорт, диплом; после перерыва  - не явился, извещен;

установил:

Администрация Арсеньевского городского округа (далее – истец, Администрации) обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края к обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл» (далее – ответчик, ООО «Кристалл») об обязании ответчика выполнить обязательства по ордерам:  

2022 год: № 10 от 27.01.2022 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Суличевского, 16/2» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 3 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м.; 

№ 13 от 17.02.22 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Сазыкина, 4» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 9 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 0,9 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 9 кв.м.;

№ 15 от 22.02.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Садовая (от ул. Щербакова до ул. ФИО3)» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 3 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м., асфальтирование 10 кв.м.; № 17 от 28.02.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская, 94» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 60 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 6 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 60 кв.м.;

№ 18 от 28.02.2022 «Устранение аварии на в/сети но ул. Октябрьская 78» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 6 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 0,6 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 6 кв.м., асфальтирование 6 кв.м.;

№ 20 от 09.03.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. ФИО4, 1» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 20 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 2,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 20 кв.м.;

№ 22 от 22.03.2022 « Устранение аварии на в/сети по ул. Щербакова 44 - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 20 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 20 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 20 кв.м., асфальтирование 10 кв.м.;

№ 29 от 07.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Пархоменко № 18» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 15 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,5 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 15 кв.м.;

№ 31 от 11.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по пер. Ирьяиова, 11» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 20 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 2,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 20 кв.м., асфальтирование 6 кв.м.;

№ 35 от 18.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Стахановская, 57»-планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 60 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 6,0 куб.м., планировка песко-1равийной смесью - 60 кв.м.;

№ 36 от 18.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская, 37» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м., асфальтирование 15 кв.м.;

№ 41 от 28.04.2022 «Ремонт водопроводного колодца по ул. Ленинская, 63 (Ленинская - ФИО3)» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 15 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,5 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 15 кв.м.;

№ 45 от 05.05.2022 «Замена ввода водопроводной сети по ул. Ленинская, 12а» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м., установка дорожного бордюрного камня - 2 шт., тратуарного бордюрного камня - 3 шт, ремонт отмостки МКД - 3 кв.м., асфальтирование 20 кв.м.;

№ 46 от 06.05.2022 «Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения по ул. ФИО3, 41» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 80 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 16 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 80 кв.м.;

№ 51 от 16.05.2022 «Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения жилого дома № 31 по ул. Ударная» - планировка места устранение аварии - (горизонтальное выравнивание поверхности) - 80 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 8,0 куб.м., планировка пескочравийной смесью - 80 кв.м., восстановление кювета - 3м.;

№ 54 от 19.05.2022 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Островского, 10а» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 40 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 4,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 40 кв.м.;

№ 64 от 31.05.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжепия по ул. Комсомольская, 44» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности)) - 80 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 8,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 80 кв.м.;

№ 67 от 31.05.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Победы, 41» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 120 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 12,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 120 кв.м.;

№ 85 от 09.05.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Чапаева, 8» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 50 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 5,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 50 кв.м.;

№ 86 от 09.06.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Сухановская, 38» планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м.;

№91 от 10.06.2022 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. ФИО4, 52» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м.;

№ 109 от 30.06.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Пограничная, 62» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 70 кв.м, отсыпка неско-гравийной смесью - 7,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 70 кв.м.;

2021 год: № 47 от 14.05.2021 «Замена ввода водопроводной сети в жилой дом № 61/2 по ул. Октябрьская» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 20 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 2,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 20 кв.м., ремонт отмостки МКД- 4 кв.м;

№ 6 от 15.01.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Калининская - ул. Новикова (в сквере) - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м.;

№ 31 от 09.04.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Ленинская (д/сад №12)» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 12 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 12 кв.м.;

№ 50 от 21.05.2021 «Замена ввода в жилой дома № 47 по ул. Октябрьская, 36» планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности)

- 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м., ремонт отмостки МКД - 4 кв.м;

№ 59 от 28.05.2021 «Устранение аварии на в/сети Садовая, 4» планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 10 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 10 кв.м., ремонт асфальтового покрытия проезжей части - 15 кв.м.;

№ 60 от 28.05.2021 «Устранение аварии по ул. Октябрьская 42 - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 5 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 0,5 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 5,0 кв.м., ремонт асфальтового покрытия проезжей части 3,0 кв.м, ремонт отмостки МКД-3 кв.м.;

№ 61 от 31.05.2021 «Замена ввода х/водоснабжения по ул. ФИО6, 14» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью -30 кв.м., ремонт асфальтового покрытия 30 кв.м, ремонт отмостки МКД - 3 кв.м.;

№ 63 от 31.05.2021 «Замена ввода в жилой дом № 84 по ул. Октябрьская» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 40 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 4,0 куб.м., планировка песко-гравийиой смесью - 40 кв.м., ремонт асфальтового покрытия 40 кв.м, ремонт отмостки МКД - 3 кв.м.;

№ 77 от 25.06.2021 «Замена ввода х/водоснабжения ФИО4, 52» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 25кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 2,5 куб.м.,    планировка песко-гравийной смесью -25 кв.м., ремонт асфальтового покрытия 25 кв.м, ремонт отмостки МКД -3 кв.м.;

№ 88 от 08.07.2021 «Замена ввода водопроводной сети по ул. Калининская, 3» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 15 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,5 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 15 кв.м., ремонт асфальтового покрытия виутриквартального проезда 15 кв.м, ремонт отмостки МКД - 3 кв.м.;

№ 89 от 08.07.2021 «Устранение аварии на в/сети но ул. Октябрьская 63/1» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 15 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,5 куб.м., планировка песко-гравийиой смесью -15 кв.м., ремонт асфальтового покрытия тротуара 15 кв.м, завоз растительного грунта 1 куб., планировка растительного грунта - 30 кв.м.;

№ 113 от 09.08.2021 «Ремонт в/колодца по ул. Мира, 10» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 4,0 кв.м, отсыпка иеско-гравийной смесью - 0,4 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 4,0 кв.м., ремонт асфальтового покрытия 4,0 кв.м.;

№ 115 от 10.08.2021 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская, 55/3» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30,0 кв.м.;

№ 120 от 12.08.2021 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения от ул. Советская по ул. Речная, ул. Тенистая» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 6000 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 600 куб.м., планировка песко-1равийной смесью - 6000 кв.м.;

№ 125 от 17.08.2021 «Замена участка в/сети по ул. Щербакова от д.2 до д.6» (восстановление асфальтового покрытия по ул. Щербакова от д.2 до д.6) - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 300 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 10 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 300 кв.м., ремонт асфальтового покрытия виутриквартального проезда 50 кв.м, установка бордюрного камня 30 шт.;

№ 129 от 24.08.2021 «Устранение аварии на в/сети по пр. Горького, 14» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м., ремонт асфальтового покрытия тратуара - 12 кв.м.; № 139 от 10.09.2021 «Технологическое присоединение к системе х/водоснабжения ж/дома № 16/2 по ул. Суличевского» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 40 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 4,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 40; № 156 от 29.09.2021 «Замена участка в/сети но ул. 25 лет ФИО5, 5» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 300 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 300 кв.м., ремонт асфальтового покрытия тратуара - 7 кв.м.;

№ 159 от 04.10.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по пр. ФИО6, 10» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 8 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 8 кв.м., ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда - 8 кв.м.;

№ 162 от 04.10.2021 «Замена участка в/сети по ул. Щербакова, 7/1» планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 80 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 4,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 80 кв.м., ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда- 10 кв.м.; № 163 от 07.10.2021 «Устранение аварии на в/сети по ул. Калининская, 20» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 20 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 2,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 20 кв.м., ремонт отмостки МКД - 3 кв.м.;.

№ 179 от 28.10.2021 «Замена ввода х/водоснабжения по ул. Щербакова, 7» планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 10 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 10 кв.м., восстановление асфальтового покрытия тротуара -10 кв.м.;

№ 182 от 09.11.2021 «Устранение аварии на в/сети но ул. Ленинская, 12» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 100 кв.м., завоз растительного грунта - 4 куб.м., планировка растительного грунта - 100 кв.м.;

№ 191 от 29.11.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Ленинская. 6 (у здания насосной)» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 100 кв.м, завоз растительного грунта - 4 куб.м., планировка растительного грунта - 100 кв.м.;

№ 195 от 07.12.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Жуковского, 74/2» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 10 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 10 кв.м., восстановление асфальтового покрытия - 10 кв.м.;

2019 год: № 1 от 06.01.2019 «Устранение аварии на в/сети по ул. Калининская, 3» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 16 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,6 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 16 кв.м., ремонт асфальтового покрытия- 16 кв.м.;

№ 94 от 26.06.2019 «Замена участка в/сети от ул. ФИО4, 6 до ул. ФИО4, 18» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 1350 кв.м, завоз растительного грунта - 68 куб.м., планировка растительного грунта - 1350 кв.м., восстановление асфальтового покрытия - 16 кв.м.;

2015 год: № 35 от 27.04.2015 «Замена участка водопроводной сети по ул. Победы от ул. Октябрьская до ул. Первомайская» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 388 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 20 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 388 кв.м., ремонт асфальтового покрытия - 388кв.м.;

2014 год: № 103 от 28.07.2014 «Замена водопровода на Комсомольскую площадь от проезда Гостиный, 1» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 150 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 15 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 150 кв.м., восстановление асфальтового покрытия парковки и проезда- 150 кв.м.(с учетом принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнений).

Ответчик представил письменный отзыв.

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв. Об объявлении перерыва лица, участвующие в деле, уведомлены в соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках» путём размещения на официальном сайте суда информации о времени и месте продолжения судебного заседания.

В соответствии со статьями 156, 163 АПК РФ судебное заседание после перерыва проведено и дело рассмотрено в отсутствие сторон, извещенных надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ.

Оценив доводы сторон и представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

В период с января 2019 г. по август 2022 г. ООО «Кристалл» администрацией Арсеньевского городского округа были открыты и выданы следующие разрешения (ордер) на проведение земляных работ (далее - Ордера): 

2022 год: № 10 от 27.01.2022 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Суличевского, 16/2». Сроки - 28.01.2022 - 30.07.2022; № 13 от 17.02.22 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Сазыкина, 4». Сроки - 17.02.2022 - 30.07.2022; № 15 от 22.02.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Садовая (от ул. Щербакова до ул. ФИО3)». Сроки - 22.02.2022 - 30.07.2022; № 17 от 28.02.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская, 94». Сроки - 01.03.2022 - 30.07.2022; № 20 от 09.03.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. ФИО4, 1». Сроки - 07.03.2022 - 30.07.2022; 7. № 22 от 22.03.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Щербакова, 44». Сроки - 18.03.2022 - 30.06.2022; № 18 от 28.02.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская 78» (с восстановлением асфальтового покрытия). Сроки - 27.02.2022 - 30.06.2022; № 22 от 22.03.2022 « Устранение аварии на в/сети по ул. Щербакова, 44 ( с восстановлением асфальтового покрытия). Сроки - 18.03.2022 - 30.06.2022; № 29 от 07.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Пархоменко № 18». Сроки - 06.04.2022 - 30.06.2022; № 31 от 11.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по пер. ФИО6, 11» (с восстановлением асфальтового покрытия). Сроки - 13.04.2022 - 30.07.2022;  № 35 от 18.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Стахановская, 57», Сроки - 20.04.2022 - 30.07.2022;  № 36 от 18.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская, 37» (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 21.04.2022 - 30.07.2022; № 41 от 28.04.2022 «Ремонт водопроводного колодца по ул. Ленинская, 63 (Ленинская - ФИО3)». Сроки - 04.05.2022 - 30.06.2022; № 45 от 05.05.2022 «Замена ввода водопроводной сети по ул. Ленинская, 12а» (восстановление асфальтового покрытия, бордюрного камня, отмостки МКД). Сроки - 11.05.2022 - 30.08.2022; № 46 от 06.05.2022 «Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения по ул. ФИО3, 41». Сроки - 11.05.2022 -30.07.2022; № 51 от 16.05.2022 «Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения жилого дома № 31 по ул. Ударная». Сроки - 18.05.2022 - 30.07.2022; № 54 от 19.05.2022 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Островского, 10а». Сроки - 19.05.2022 - 30.08.2022; № 64 от 31.05.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Комсомольская, 44». Сроки - 03.06.2022 - 30.08.2022; № 67 от 31.05.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Победы, 41». Сроки - 02.06.2022 - 30.08.2022; № 85 от 09.05.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Чапаева, 8». Сроки - 15.06.2022 - 30.09.2022; № 86 от 09.06.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Сухановская, 38» Сроки - 15.06.2022 - 30.09.2022; № 91 от 10.06.2022 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. ФИО4, 52» Сроки - 14.06.2022 - 30.07.2022; № 109 от 30.06.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Пограничная, 62». Сроки - 01.07.2022 - 30.09.2022;

2021 год: № 47 от 14.05.2021 «Замена ввода водопроводной сети в жилой дом № 61/2 по ул. Октябрьская» (восстановление отмостки). Сроки - 14.05.2021 - 30.07.2022; № 6 от 15.01.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Калининская - ул. Новикова (в сквере). Сроки - 18.01.2021 - 30.06.2022; № 31 от 09.04.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Ленинская (д/сад № 12)». Сроки - 07.04.2021 - 30.06.2022; № 50 от 21.05.2021 «Замена ввода в жилой дома № 47 по ул. Октябрьская, 36». Сроки - 24.05.2021 - 30.08.2022; № 59 от 28.05.2021 «Устранение аварии на в/сети Садовая, 4» (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 28.05.2021 - 30.06.2022; № 60 от 28.05.2021 «Устранение аварии по ул. Октябрьская 42 (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 28.05.2021 - 30.06.2022; № 61 от 31.05.2021 «Замена ввода х/водоснабжения по ул. ФИО6, 14». Сроки 01.06.2021 - 30.06.2022; № 63 от 31.05.2021 «Замена ввода в жилой дом № 84 по ул. Октябрьская» (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 01.06.2021 - 30.06.2022; № 77 от 25.06.2021 «Замена ввода х/водоснабжения ФИО4, 52» (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 28.06.2021 - 30.06.2022; № 88 от 08.07.2021 «Замена ввода водопроводной сети по ул. Калининская, 3» (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 12.07.2021 - 30.06.2022; № 89 от 08.07.2021 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская 63/1» (восстановление асфальтового покрытия тротуара). Сроки - 09.07.2021 - 30.06.2022; № 113 от 09.08.2021 «Ремонт в/колодца по ул. Мира, 10» (восстановление асфальтового покрытия вокруг колодца). Сроки - 09.08.2021 - 30.06.2022; № 115 от 10.08.2021 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская, 55/3». Сроки - 10.08.2021 - 30.05.2022; № 120 от 12.08.2021 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения от ул. Советская по ул. Речная, ул. Тенистая» (восстановление проезжей части улицы, водоотводных канав). Сроки 13.08.2021 -30.06.2022; № 125 от 17.08.2021 «Замена участка в/сети по ул. Щербакова от д.2 до д.6» (восстановление асфальтового покрытия по ул. Щербакова от д.2 до д.6). Сроки -23.08.2021 - 30.06.2022; № 129 от 24.08.2021 «Устранение аварии на в/сети по пр. Горького, 14» (восстановление асфальтового покрытия тротуара). Сроки - 12.08.2021 - 30.07.2022; № 139 от 10.09.2021 «Технологическое присоединение к системе х/водоснабжения ж/дома № 16/2 по ул. Суличевского». Сроки - 10.09.2021 - 30.06.2022; № 156 от 29.09.2021 «Замена участка в/сети по ул. 25 лет ФИО5, 5» (восстановление асфальтового покрытия заезда - 100 м/п). Сроки - 30.09.2021 -30.06.2022; № 159 от 04.10.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по пр. ФИО6, 10» (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 04.10.2021 -30.06.2022; № 162 от 04.10.2021 «Замена участка в/сети по ул. Щербакова, 7/1» (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 06.10.2021 - 30.06.2022; № 163 от 07.10.2021 «Устранение аварии на в/сети по ул. Калининская, 20» (восстановление отмостки). Сроки - 07.10.2021 - 30.07.2022; № 179 от 28.10.2021 «Замена ввода х/водоснабжения по ул. Щербакова, 7» (восстановление асфальтового покрытия тротуара). Сроки - 01.11.2021 - 30.06.2022; № 182 от 09.11.2021 «Устранение аварии на в/сети по ул. Ленинская, 12». Сроки - 11.11.2021 - 30.08.2022; № 191 от 29.11.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Ленинская. 6 (у здания насосной)» (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 01.12.2021 - 30.06.2022; № 195 от 07.12.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Жуковского, 74/2» (восстановление асфальтового покрытия тротуара). Сроки - 06.12.2021 -30.07.2022;

2019 год: № 1 от 06.01.2019 «Устранение аварии на в/сети по ул. Калининская, 3» (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 02.01.2019 - 30.06.2022; № 94 от 26.06.2019 «Замена участка в/сети от ул. ФИО4, 6 до ул. ФИО4, 18» (восстановление асфальтового покрытия, бордюрного камня и газона по ул. ФИО4). Сроки - 01.07.2019 - 30.07.2022.

Также ООО «Кристалл» приняло на себя обязательство по трём ордерам на производство земляных работ за период с апреля 2014 года по август 2015 года, открытым филиалу № 1 ООО «ТВС ФИО5» и ООО «Эванс» (далее - Организации), но из-за невыполненных работ по восстановлению асфальтового покрытия Организациями ордера не были закрыты администрацией городского округа. Данные ордера в 2016 году были переоформлены на ООО «Кристалл» (с согласия директора ФИО7) согласно письму от 03.03.2016 № 808 филиала № 1 ТВС «ФИО5». Гарантийными письмами (приложение к Ордеру) ООО «Кристалл» обязывались восстановить асфальтовое покрытие в местах устранения порыва на трубопроводе холодного водоснабжения: 2015 год: № 35 от 27.04.2015 «Замена участка водопроводной сети по ул. Победы от ул. Октябрьская до ул. Первомайская» (восстановление асфальтового покрытия). Сроки - 27.04.2015 - 30.06.2022; 2014 год: № 103 от 28.07.2014 «Замена водопровода на Комсомольскую площадь от проезда Гостиный, 1» (восстановление асфальтового покрытия парковки у гостиницы «Таёжная» и проезда на Комсомольскую площадь). Сроки - 29.07.2014 - 30.09.2021; Ордера: № 103 от 28.07.2014, № 35 от 27.04.2015, № 01 от 06.01.2019, № 94 от 26.06.2019, № 105 от 11.08.2020 продлевались неоднократно.

В установленный срок работы по ордерам и восстановительные работы по благоустройству территории выполнены не были.

19.07.2022, 02.12.2022, 27.07.2022 в адрес ООО «Кристалл» направлялись претензии о необходимости в установленный срок выполнить объем работ, предусмотренный графиками на производство работ (приложение № 2 к Ордеру) и закрыть ордера в управлении жизнеобеспечения администрации городского округа. Вместе с тем, работы по ордерам не выполнены, требования претензий не удовлетворены, что явилось основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также иными способами, предусмотренными в законе. Абзац 3 данной статьи предусматривает такой способ защиты гражданских прав, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Производство земляных работ, в том числе аварийно-восстановительные работы - земляные работы, обеспечивающие восстановление функционирования инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газификация, электроснабжение, сети связи), на территории Арсеньевского городского округа осуществляется в соответствии с Положением о порядке производства земляных работ на территории Арсеньевского городского округа Думы Арсеньевского городского округа от 01.06.2011 № 23-МПА (в ред. Муниципального правового акта Думы Арсеньевского городского округа от 29.04.2013 N 38-МПА) (далее - Положение).

Согласно пункту 2.2 Положения ордер на производство земляных работ - документ, выдаваемый управлением жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа (далее - Управление), разрешающий производство земляных, буровых работ при строительстве и ремонте подземных инженерных сооружений и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий, при ликвидации аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, разработке карьеров и проведении работ по обустройству территории Арсеньевского городского округа.

Заявитель - физическое или юридическое лицо, запрашивающее разрешение на производство земляных работ.

В соответствии с пунктом 1.2 выполнение указанного Положения обязательно для всех юридических и физических лиц (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности): а) проектирование и строительство подземных и надземных инженерных сооружений и коммуникаций; б) ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций; в) согласование проектной документации на производство земляных работ.

Таким образом, производство земляных работ на территории Арсеньевского городского округа осуществляется на основании выданного заявителю ордера производство земляных работ.

Пунктом 1.3 Положения установлено, что запрещается производство земляных работ без ордера или по ордеру, срок действия которого истек, а также производство плановых работ под видом аварийных.

При этом подпунктом «в» пункта 4.1 Положения закреплена обязанность лица в случае невыполнения земляных работ в установленные сроки, ордер на производство земляных работ необходимо продлить с предоставлением нового графика производства работ.

Согласно пункта 4.4 Положения восстановление покрытий дорог и тротуаров, земляного полотна осуществляется силами Организации. Траншеи засыпаются с уплотнением. В случае просадки грунта или деформации восстановленного покрытия, Организация обязана устранить все замечания за свой счет. При производстве земляных работ в зимнее время, окончательная планировка должна быть выполнена в весенний период.

В силу пункта 4.6 Положения  по окончании прокладки инженерных коммуникаций и сооружений, но до засыпки траншей и котлованов Организация выполняет исполнительную схему (план (схему) существующей трассы с указанием участка вскрытия) и предоставляет Управлению при закрытии Ордера.

После выполнения и сдачи работ Организацией должно быть выполнено комплексное восстановление нарушенного благоустройства территории, в том числе дорожного покрытия, бортового камня и элементов озеленения (пункт 4.10 Положения).

Порядок закрытия ордера предусмотрен в разделе 5 Положения, где указано, что  восстановленная территория принимается Управлением (пункт 5.1 Положения), заявитель обязан в течение трех лет за свой счет устранять просадки грунта, асфальтового покрытия и связанные с ними нарушения благоустройства территории в месте проведения работ, указанном в ордере (пункт .2 Положения).

Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что Администрацией выданы вышеперечисленные ордера на производство земляных работ. Заявителем выступает ООО «Кристалл», который также согласно ордерам является лицо, осуществляющим производство работ.

Вместе с тем, работы по ордерам не выполнены, что ответчиком не оспаривается, ордера в соответствии с разделом 5 Положения не закрыты, нарушенное благоустройство не восстановлено.

Письмом исх.№19 юр-22 от 28.12.2022 ответчик гарантировал  выполнить работы по благоустройству мест после устранения аварий на трубопроводах холодного водоснабжения до 30.06.2023.

Вместе с тем, доказательств выполнения работ по закрытию ордеров и восстановления благоустройства ответчиком в нарушение положений статей 9, 65 АПК РФ не представлено.

Оспаривая исковые требования, ответчик в том, числе заявил о пропуске срока исковой данности. 

Довод ответчика о пропуске срока исковой давности суд считает несостоятельным в силу следующего. 

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 названного Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

На основании пункта 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

Согласно статье 203 ГК РФ, течение срока исковой давности прерывается действием обязанного лица, свидетельствующим о признании долга. После перерыва срок исковой давности начинает исчисляться заново: время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок, (статья 203 ГК РФ).

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а так же совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце 2 пункта 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса российской Федерации об исковой давности» (далее - Постановление № 43), к действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.

В соответствии с пунктом 21 Постановления № 43 перерыв течения срока исковой давности в связи с совершением действий, свидетельствующих о признании долга, может иметь место лишь в пределах срока давности, а не после его истечения. Вместе с тем по истечении срока исковой давности течение исковой давности начинается заново, если должник или иное обязанное лицо признает свой долг в письменной форме (пункт 2 статьи 206 ГК РФ).

Согласно проставленных в ордерах отметок ответчика как лица, производившего работы, срок производства работ по благоустройству неоднократно последовательно продлевался,  в том числе по 2022 год, что согласуется с подпунктом «в» пункта 4.1 Положения, которым закреплена обязанность лица в случае невыполнения земляных работ в установленные сроки, ордер на производство земляных работ продлить с предоставлением нового графика производства работ.

Также из представленных в дело писем следует, что ответчик гарантировало выполнить благоустройство.

Из последовательного анализа записей о продлении срока действия ордеров, представленной переписки следует, что на момент подачи иска в суд срок исковой давности не пропущен. 

На основании выше изложенного требования истца по возложению на ответчика исполнить обязательства по выданным ордерам на проведение земляных работ являются обоснованными.

В соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

С учетом предоставленных в материалы дела документов, суд признает достаточным указанный истцом срок (30 дней) с момента вступления решения в законную силу для совершения действий по устранению недостатков. О том, что данный срок является недостаточным, с учетом объема и характера недостатков работ, ответчиком также не заявлено.

Иные доводы и возражения сторон судом не принимаются, как не имеющие правового значения для рассмотрения настоящего дела и не влияющие на вышеизложенные выводы суда по существу спора.

На основании вышеизложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме (с учётом принятых уточнений).

В силу статьи 110 АПК РФ по результатам рассмотрения спора и поскольку истцу при подаче иска, и поскольку истец в соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 333.37Налогового кодекса Российской Федерации при подаче иска освобожден от уплаты государственной пошлины, расходы по уплате государственной пошлины по относятся на ответчика и взыскиваются с него непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ, с учетом пункта 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах».

Руководствуясь статьями 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л :

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» (ИНН 

<

***>) выполнить обязательства по ордерам:

 2022 год: № 10 от 27.01.2022 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Суличевского, 16/2» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 3 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м.; 

№ 13 от 17.02.22 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Сазыкина, 4» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 9 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 0,9 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 9 кв.м.;

№ 15 от 22.02.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Садовая (от ул. Щербакова до ул. ФИО3)» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 3 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м., асфальтирование 10 кв.м.; № 17 от 28.02.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская, 94» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 60 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 6 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 60 кв.м.;

№ 18 от 28.02.2022 «Устранение аварии на в/сети но ул. Октябрьская 78» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 6 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 0,6 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 6 кв.м., асфальтирование 6 кв.м.;

№ 20 от 09.03.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. ФИО4, 1» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 20 кв.м., отсыпка песко-гравийной смесью - 2,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 20 кв.м.;

№ 22 от 22.03.2022 « Устранение аварии на в/сети по ул. Щербакова 44 - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 20 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 20 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 20 кв.м., асфальтирование 10 кв.м.;

№ 29 от 07.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Пархоменко № 18» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 15 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,5 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 15 кв.м.;

№ 31 от 11.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по пер. Ирьяиова, 11» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 20 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 2,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 20 кв.м., асфальтирование 6 кв.м.;

№ 35 от 18.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Стахановская, 57»-планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 60 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 6,0 куб.м., планировка песко-1равийной смесью - 60 кв.м.;

№ 36 от 18.04.2022 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская, 37» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м., асфальтирование 15 кв.м.;

№ 41 от 28.04.2022 «Ремонт водопроводного колодца по ул. Ленинская, 63 (Ленинская - ФИО3)» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 15 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,5 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 15 кв.м.;

№ 45 от 05.05.2022 «Замена ввода водопроводной сети по ул. Ленинская, 12а» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м., установка дорожного бордюрного камня - 2 шт., тратуарного бордюрного камня - 3 шт, ремонт отмостки МКД - 3 кв.м., асфальтирование 20 кв.м.;

№ 46 от 06.05.2022 «Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения по ул. ФИО3, 41» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 80 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 16 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 80 кв.м.;

№ 51 от 16.05.2022 «Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения жилого дома № 31 по ул. Ударная» - планировка места устранение аварии - (горизонтальное выравнивание поверхности) - 80 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 8,0 куб.м., планировка пескочравийной смесью - 80 кв.м., восстановление кювета - 3м.;

№ 54 от 19.05.2022 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Островского, 10а» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 40 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 4,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 40 кв.м.;

№ 64 от 31.05.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжепия по ул. Комсомольская, 44» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности)) - 80 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 8,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 80 кв.м.;

№ 67 от 31.05.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Победы, 41» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 120 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 12,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 120 кв.м.;

№ 85 от 09.05.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Чапаева, 8» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 50 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 5,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 50 кв.м.;

№ 86 от 09.06.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Сухановская, 38» планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м.;

№91 от 10.06.2022 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. ФИО4, 52» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м.;

№ 109 от 30.06.2022 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения по ул. Пограничная, 62» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 70 кв.м, отсыпка неско-гравийной смесью - 7,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 70 кв.м.;

2021 год: № 47 от 14.05.2021 «Замена ввода водопроводной сети в жилой дом № 61/2 по ул. Октябрьская» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 20 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 2,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 20 кв.м., ремонт отмостки МКД- 4 кв.м;

№ 6 от 15.01.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Калининская - ул. Новикова (в сквере) - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м.;

№ 31 от 09.04.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Ленинская (д/сад №12)» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 12 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 12 кв.м.;

№ 50 от 21.05.2021 «Замена ввода в жилой дома № 47 по ул. Октябрьская, 36» планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности)

- 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м., ремонт отмостки МКД - 4 кв.м;

№ 59 от 28.05.2021 «Устранение аварии на в/сети Садовая, 4» планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 10 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 10 кв.м., ремонт асфальтового покрытия проезжей части - 15 кв.м.;

№ 60 от 28.05.2021 «Устранение аварии по ул. Октябрьская 42 - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 5 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 0,5 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 5,0 кв.м., ремонт асфальтового покрытия проезжей части 3,0 кв.м, ремонт отмостки МКД-3 кв.м.;

№ 61 от 31.05.2021 «Замена ввода х/водоснабжения по ул. ФИО6, 14» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью -30 кв.м., ремонт асфальтового покрытия 30 кв.м, ремонт отмостки МКД - 3 кв.м.;

№ 63 от 31.05.2021 «Замена ввода в жилой дом № 84 по ул. Октябрьская» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 40 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 4,0 куб.м., планировка песко-гравийиой смесью - 40 кв.м., ремонт асфальтового покрытия 40 кв.м, ремонт отмостки МКД - 3 кв.м.;

№ 77 от 25.06.2021 «Замена ввода х/водоснабжения ФИО4, 52» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 25кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 2,5 куб.м.,    планировка песко-гравийной смесью -25 кв.м., ремонт асфальтового покрытия 25 кв.м, ремонт отмостки МКД -3 кв.м.;

№ 88 от 08.07.2021 «Замена ввода водопроводной сети по ул. Калининская, 3» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 15 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,5 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 15 кв.м., ремонт асфальтового покрытия виутриквартального проезда 15 кв.м, ремонт отмостки МКД - 3 кв.м.;

№ 89 от 08.07.2021 «Устранение аварии на в/сети но ул. Октябрьская 63/1» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 15 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,5 куб.м., планировка песко-гравийиой смесью -15 кв.м., ремонт асфальтового покрытия тротуара 15 кв.м, завоз растительного грунта 1 куб., планировка растительного грунта - 30 кв.м.;

№ 113 от 09.08.2021 «Ремонт в/колодца по ул. Мира, 10» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 4,0 кв.м, отсыпка иеско-гравийной смесью - 0,4 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 4,0 кв.м., ремонт асфальтового покрытия 4,0 кв.м.;

№ 115 от 10.08.2021 «Устранение аварии на в/сети по ул. Октябрьская, 55/3» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30,0 кв.м.;

№ 120 от 12.08.2021 «Технологическое присоединение к центральной системе х/водоснабжения от ул. Советская по ул. Речная, ул. Тенистая» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 6000 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 600 куб.м., планировка песко-1равийной смесью - 6000 кв.м.;

№ 125 от 17.08.2021 «Замена участка в/сети по ул. Щербакова от д.2 до д.6» (восстановление асфальтового покрытия по ул. Щербакова от д.2 до д.6) - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 300 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 10 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 300 кв.м., ремонт асфальтового покрытия виутриквартального проезда 50 кв.м, установка бордюрного камня 30 шт.;

№ 129 от 24.08.2021 «Устранение аварии на в/сети по пр. Горького, 14» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 30 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 30 кв.м., ремонт асфальтового покрытия тратуара - 12 кв.м.; № 139 от 10.09.2021 «Технологическое присоединение к системе х/водоснабжения ж/дома № 16/2 по ул. Суличевского» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 40 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 4,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 40; № 156 от 29.09.2021 «Замена участка в/сети но ул. 25 лет ФИО5, 5» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 300 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 3,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 300 кв.м., ремонт асфальтового покрытия тратуара - 7 кв.м.;

№ 159 от 04.10.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по пр. ФИО6, 10» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 8 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 8 кв.м., ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда - 8 кв.м.;

№ 162 от 04.10.2021 «Замена участка в/сети по ул. Щербакова, 7/1» планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 80 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 4,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 80 кв.м., ремонт асфальтового покрытия внутриквартального проезда- 10 кв.м.; № 163 от 07.10.2021 «Устранение аварии на в/сети по ул. Калининская, 20» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 20 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 2,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 20 кв.м., ремонт отмостки МКД - 3 кв.м.;.

№ 179 от 28.10.2021 «Замена ввода х/водоснабжения по ул. Щербакова, 7» планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 10 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 10 кв.м., восстановление асфальтового покрытия тротуара -10 кв.м.;

№ 182 от 09.11.2021 «Устранение аварии на в/сети но ул. Ленинская, 12» -планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 100 кв.м., завоз растительного грунта - 4 куб.м., планировка растительного грунта - 100 кв.м.;

№ 191 от 29.11.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Ленинская. 6 (у здания насосной)» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 100 кв.м, завоз растительного грунта - 4 куб.м., планировка растительного грунта - 100 кв.м.;

№ 195 от 07.12.2021 «Устранение аварии на водопроводной сети по ул. Жуковского, 74/2» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 10 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,0 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 10 кв.м., восстановление асфальтового покрытия - 10 кв.м.;

2019 год: № 1 от 06.01.2019 «Устранение аварии на в/сети по ул. Калининская, 3» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 16 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 1,6 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 16 кв.м., ремонт асфальтового покрытия- 16 кв.м.;

№ 94 от 26.06.2019 «Замена участка в/сети от ул. ФИО4, 6 до ул. ФИО4, 18» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 1350 кв.м, завоз растительного грунта - 68 куб.м., планировка растительного грунта - 1350 кв.м., восстановление асфальтового покрытия - 16 кв.м.;

2015 год: № 35 от 27.04.2015 «Замена участка водопроводной сети по ул. Победы от ул. Октябрьская до ул. Первомайская» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 388 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 20 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 388 кв.м., ремонт асфальтового покрытия - 388кв.м.;

2014 год: № 103 от 28.07.2014 «Замена водопровода на Комсомольскую площадь от проезда Гостиный, 1» - планировка места устранение аварии (горизонтальное выравнивание поверхности) - 150 кв.м, отсыпка песко-гравийной смесью - 15 куб.м., планировка песко-гравийной смесью - 150 кв.м., восстановление асфальтового покрытия парковки и проезда- 150 кв.м.

Срок выполнения работ в течение 30 дней  с момента вступления решения суда в законную силу.

            Исполнительный лист выдается по после вступления решения в законную силу ходатайству взыскателя.

            Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» (ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины. 

            Исполнительный лист на взыскание в федеральный бюджет государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу.

            Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

 

Судья                                                                                      Зайцева Л.В.