Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-7774/20

02 июня 2020 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2020 года

Полный текст решения изготовлен 02 июня 2020 года

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Е.В. Моисеева ,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ромазановым А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ОАО "МОСОБЛЭНЕРГО"

к АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ

об обязании совершить определенные действия, о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании - согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ОАО "МОСОБЛЭНЕРГО" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ (далее – ответчик) об обязании выполнить технические условия, взыскании неустойки по договору № 1804296/ЦА от 11.07.2018г. в размере 33 262 руб. 08 коп. 

Представитель истца в судебное заседание явился.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения спора извещен надлежащим образом.

Ответчик документально мотивированный отзыв в материалы дела не представил, возражений по существу исковых требований не заявил.

От истца поступило ходатайство об изменении исковых требований, просил суд взыскать с ответчика неустойку (пени) за период с 13.11.2018г. по 12.11.2019г. в размере        33 262 руб. 08 коп, заявил отказ  от исковых требований в части обязания ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями № 1804296/1/ЦА.

Ходатайство удовлетворено судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

В части требований, от которых истец отказался, производство по делу подлежит прекращению на основании  п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив в совокупности все представленные в материалы дела доказательства и доводы иска, суд установил следующее.

11.07.2018г. между ОАО "МОСОБЛЭНЕРГО" и АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ заключён договор № 1804296/ЦА об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Техническими условиями № 1804296/1/ЦА, являющимися неотъемлемой частью спорного договора, определён перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределению обязанностей между сторонами.

Техническими условиями № 1804296/1/ЦА предусмотрен следующий перечень мероприятий, выполняемых АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ и необходимых для осуществления технологического присоединения по договору:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 220 кВт;

- категория надежности: II (вторая);

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения пристройки на 200 мест к зданию МБОУ Гимназия № 5, 50:45:0050201:0061 по адресу Московская обл., ФИО1 г., мкр-н Юбилейный, ФИО2 ул., дом № 3, 50:45:0050201:0039.

Заявитель обязуется оплачивать расходы (плату) на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. 1).

Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между сторонами по их выполнению определены в Технических условиях.

Срок действия Технических условий составляет 4 года со дня заключения настоящего договора (п. 5).

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору составляет 4 месяца со дня заключения договора.

Сетевая организация обязана своевременно и надлежащим образом исполнить обязательства настоящего договора (п. 6).

В соответствии с п. 10.1 договора размер платы за технологическое присоединение  составляет 36 451 руб. 73 коп.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 10 процентов в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора; 30 процентов в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора; 20 процентов в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора; 30 процентов в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10 процентов в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Истец надлежащим образом исполнил свои обязательства возложенные договором.

Ответчиком не выполнены мероприятия по технологическому присоединению, указанные в технических условиях для присоединения к электрическим сетям ОАО "МОСОБЛЭНЕРГО" по договору. 

В судебном заседании истец пояснил, что 08.05.2020г. сторонами подписано дополнительное соглашение к договору № 1804296/ЦА от 11.07.2018г. о расторжении договора. В связи с чем, обязательства ответчика по выполнению мероприятий по технологическому присоединению прекращены.

Инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком не принес положительного результата, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств регламентируется Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Закона № 35-ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Пунктом 7 Правил № 861 предусмотрено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающейся фактической подачей напряжения и составлением акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акта об осуществлении технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Данный договор представляет собой двусторонний возмездный консенсуальный синаллагматический (взаимный) договор, регулирование отношений по которому производится как специальным энергетическим законодательством (Правила № 861), так и нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общими положениями об обязательствах и о договоре (раздел третий ГК РФ).

Исходя из содержания п. 16 Правил N 861 одной из составляющих мероприятий по технологическому присоединению, которые должны быть осуществлены в установленный срок, являются фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающего устройства в электрической сети, кроме того технические условия представляют собой перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю (подпункт "а"). 

При этом, как следует из п. 18 Правил № 861, мероприятия по выполнению заявителем технических условий предшествуют процедуре осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

Согласно п. п. 1, 3 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Согласно подпункту "в" п. 16 Правил № 861 к существенным условиям договора технологического присоединения относится положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, при этом односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойка является способом обеспечения исполнения обязательства и мерой имущественной ответственности и представляет собой денежную сумму, которую обязан уплатить должник за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 17 Договора предусмотрена ответственность сторон за нарушения сроков исполнения обязательств, согласно которой сторона, нарушившая обязательства уплачивает другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Из материалов дела усматривается, что ответчик возложенные на него договором работы по технологическому присоединению не осуществил. 

В связи с невыполнением ответчиком мероприятий по технологическому присоединению истцом за период с 13.11.2018г. по 12.11.2019г. начислена неустойка в размере 33 262 руб. 08 коп. 

Расчет истца проверен судом и признан обоснованным.

Ответчик требования истца о взыскании неустойки также не оспорил. 

Поскольку факт просрочки выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению до момента расторжения договора имел место, суд, изучив и оценив в совокупности все представленные в материалах дела доказательства, проверив расчет, находит требование истца о взыскания неустойки подлежащим удовлетворению, как заявленное обоснованно, основанное на нормах действующего законодательства и не оспоренное ответчиком.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ и ст. 333.21 НК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, в связи с чем расходы по оплате госпошлины по иску от удовлетворенной суммы исковых требований подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 2 000 руб.

Государственная пошлина в размере 6 000 руб., уплаченная платежным поручением №49 от 15.01.2020г., подлежит возврату ОАО "МОСОБЛЭНЕРГО" из федерального бюджета Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 65, 70, 71, 110, 137, 156, 167-170, 171,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ в пользу ОАО "МОСОБЛЭНЕРГО" неустойку в размере 33 262 руб. 08 коп., расходы на оплату государственной пошлины в размере 2 000 руб. 

В остальной части исковых требований производство по делу прекратить. 

Возвратить ОАО "МОСОБЛЭНЕРГО" из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня его принятия.

Судья                                                                                            Е.В. Моисеева