Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040 

факс (84012)530484

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-15109/2018

«18»

февраля

2019 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«11»

февраля

2019 года

Решение изготовлено в полном объеме   

«18»

февраля

2019 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "СПН ИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ЗАРЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 105 858 235,09 рубля

третье лицо: ООО "СПН МЕТАЛЛ" (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>)

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2. по доверенности; 

от ответчика – н/я;

от третьего лица – н/я;

установил.

Общество с ограниченной ответственностью "СПН ИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЗАРЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании основного долга в сумме 105 858 235,09 рубля.

Определением суда от 11.12.2018 к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО "СПН МЕТАЛЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.

Судом установлено.

Между ответчиком (заказчик) и третьим лицом (подрядчик) был заключен договор подряда с использованием материалов подрядчика от 18.03.2011 № 1, по условиям которого подрядчик обязался по поручению заказчика выполнить работу по ремонту крыш зернохранилища № 3, монтаж галереи между зернохранилищами № 3 и № 4 с редлером, монтаж галереи между зернохранилищем № 4 и мельницей с редлером, реконструкцию здания мельницы, монтаж галереи между зернохранилищами № 1 и № 2 с редлером, принадлежащих заказчику на праве собственности и расположенных по адресу: г. Черняховск, Калининградская область, ул. Элеваторная, 46 (объекты), согласно локальным сметам № 1 - № 5 (приложение № 1 - № 5), используя собственное сырье и материалы (стоимость которых включается в цену работ), в срок не позднее 31.12.2012. Пунктом 3.1 договора установлено, что стоимость работ составляет 54 485 253,8 рубля. В соответствии с п. 3.2 договора заказчик оплачивает работу подрядчика в течение пятидесяти дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ.   

Согласно подписанным сторонами актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (т.д. 1 л.д. 27-48) ответчиком были приняты выполненные третьим лицом работы по договору от 18.03.2011 № 1 на общую сумму 54 485 253,8 рубля.

Между ответчиком (заказчик) и третьим лицом (подрядчик) был заключен договор подряда с использованием материалов подрядчика от 28.05.2013 № 7, по условиям которого подрядчик обязался по поручению заказчика выполнить работу по ремонту крыш зернохранилища № 4, по замене покрытия складов № 5, № 6, ремонту и техническому обслуживанию клапанов и редлеров зернохранилищ № 1 - № 4, принадлежащих заказчику на праве собственности и расположенных по адресу: г. Черняховск, Калининградская область, ул. Элеваторная, 46 (объекты), согласно локальным сметам № 1 - № 11 (приложение № 1 - № 11), используя собственное сырье и материалы (стоимость которых включается в цену работ), в срок не позднее 31.12.2015. Пунктом 3.1 договора установлено, что стоимость работ составляет 29 653 906,35 рубля. В соответствии с п. 3.2 договора заказчик оплачивает работу подрядчика в течение пятидесяти дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ.   

Согласно подписанным сторонами актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (т.д. 1 л.д. 66-48) ответчиком были приняты выполненные третьим лицом работы по договору от 28.05.2013 № 7 на общую сумму 29 653 906,35 рубля.

Между ответчиком (заказчик) и третьим лицом (подрядчик) был заключен договор подряда с использованием материалов подрядчика от 27.02.2016 № 2, по условиям которого подрядчик обязался по поручению заказчика выполнить работу по замене покрытия складов № 7, № 11, № 12, ремонту НОРИЙ № 1 - № 4, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКЛАДА СУХАРЕЙ, принадлежащих заказчику на праве собственности и расположенных по адресу: г. Черняховск, Калининградская область, ул. Элеваторная, 46 (объекты), согласно локальным сметам № 1 - № 8 (приложение № 1 - № 8), используя собственное сырье и материалы (стоимость которых включается в цену работ), в срок не позднее 31.12.2018. Пунктом 3.1 договора установлено, что стоимость работ составляет 23 494 074,94 рубля. В соответствии с п. 3.2 договора заказчик оплачивает работу подрядчика в течение пятидесяти дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ.   

Согласно подписанным сторонами актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (т.д. 2 л.д. 19-46) ответчиком были приняты выполненные третьим лицом работы по договору от 27.02.2016 № 2 на общую сумму 23 494 074,94 рубля.

Гарантийным письмом от 02.09.2013 ответчик гарантировал третьему лицу оплату задолженности по договору от 18.03.2011 № 1 в сумме 54 485 253,8 рубля в срок до 31.12.2013.

Гарантийным письмом от 30.06.2015 ответчик гарантировал третьему лицу оплату задолженности по договору от 18.03.2011 № 1 в сумме 54 485 253,8 рубля и по договору от 28.05.2013 № 7 в сумме 29 653 906,35 рубля в срок до 30.06.2015.

Гарантийным письмом от 20.08.2017 ответчик гарантировал третьему лицу оплату задолженности по договору от 18.03.2011 № 1 в сумме 54 485 253,8 рубля и по договору от 28.05.2013 № 7 в сумме 29 653 906,35 рубля в срок до 31.12.2017.

В претензиях, полученных ответчиком 13.11.2018, третье лицо просило ответчика оплатить задолженность  по договорам от 18.03.2011 № 1, от 28.05.2013 № 7 и от 27.02.2016 № 2 в общей сумме 107 633 235,09 рубля.

Платежными поручениями (т.д. 2 л.д. 50-54) истец перечислил третьему лицу в общей сумме 1 775 000 рублей в качестве оплаты по договорам от 18.03.2011 № 1, от 28.05.2013 № 7 и от 27.02.2016 № 2.

Между третьим лицом (первоначальный кредитор) и истцом (новый кредитор) было заключено соглашение об уступке права (требования) от 27.11.2018. По условиям соглашения первоначальный кредитор уступил в пользу нового кредитора право (требование) на взыскание с ответчика задолженности в размере 105 858 235,09 рубля по договорам  от 18.03.2011 № 1, от 28.05.2013 № 7 и от 27.02.2016 № 2.

Ответчик  требования не оспорил, доказательств оплаты основного долга не представил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они прямо не оспорены.

Требования истца подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 382, 711 ГК РФ, положений договоров от 18.03.2011 № 1, от 28.05.2013 № 7 и от 27.02.2016 № 2.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СПН ИНВЕСТ» (ОГРН 

<

***>) основной долг в сумме 105 858 235,09 рублей, расходы по госпошлине в сумме 200 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья          О.Н. Шкутко