РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-16577/24-91-152

г. Москва

25 апреля 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2024года

Полный текст решения изготовлен 25 апреля 2024 года

 

Арбитражный суд в составе судьи Попова А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Баймановым А.Х., рассмотрев в судебном заседании дело № А40-16577/24-91-152 по иску ОАО "РЖД" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ответчику: АО "РПМ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 1 769 286,57 руб., при участии: согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ:

ОАО "РЖД" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО "РПМ" о взыскании 1 769 286 руб. 57 коп. неустойки за нарушение срока гарантийного ремонта по договору № 4794999 на выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава от 21.04.2022.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме по доводам ранее представленных возражений на отзыв, против применения ст. 333 ГК РФ возражал.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по мотивам ранее представленного отзыв на иск, отзыва на возражения истца, просил применить ст. 333 ГК РФ.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, доводы отзыва на иск, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств, выслушав в судебном заседании полномочных представителей сторон, которые поддержали и изложили свои позиции по делу, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор № 4794999 на выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава от 21.04.2022, в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту и модернизации локомотивов (далее по тексту – ТПС) для нужд ОАО «РЖД» в 2021 – 2023 годах в объеме, определенном в Плановом объеме заказа, а также, в случае необходимости, выполнить дополнительные работы.

Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированного ТПС и его оборудования требованиям руководств по ремонту ТПС, проектов модернизаций, ремонтной документацией и работоспособность в период гарантийного срока при условии соблюдения заказчиком руководства по эксплуатации и обслуживанию ТПС (пункт 8.1 договора).

В пункте 8.3 закреплена обязанность подрядчика за свой счет устранять неисправности ТПС, произошедшие по его вине и отраженные в акте – рекламации. Расходы подрядчика, в том числе транспортные, связанные с осуществлением гарантийного ремонта, заказчиком не возмещаются.

В свою очередь пунктами раздела 12 договора предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков устранения недостатков в период гарантийного срока (после ранее выполненного заводского ремонта) в виде неустойки за каждый день просрочки выполнения работ.

Со стороны АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» допущено нарушение срока выполнения работ по устранению недостатков (дефектов) в период гарантийного срока в отношении локомотива серии ТЭМ18ДМ № 581 после ранее выполненного ремонта. АО «Ремпутьмаш» в условиях филиала АО «Верещагинский ПРМЗ» от 29.06.2022 был выполнен ремонт локомотива серии ТЭМ18ДМ № 581, что подтверждается актом приемки ТПС из ремонта формы ТУ-31 от 29.06.2022 №1.

Однако 07.04.2023 у данного локомотива выявлены неисправности, а именно: сильная вибрация шкива на валу главного генератора ГП-321 зав. №2343; сильная вибрация промежуточной опоры вала привода ВСТ 26-3300 зав. №3043.

На момент выявления неисправностей локомотив находился на гарантийном сроке эксплуатации, предоставленном АО «Ремпутьмаш» после среднего ремонта.

Согласно пункту 8.4 договора рекламационная работа производится в порядке, изложенном в приложении №25 к договору.

В соответствии с пунктом 1 приложения № 25 к договору при обнаружении каких – либо дефектов ТПС, узлов, деталей, агрегатов в пределах гарантийного срока из-за ненадлежащего качества ремонта, заказчик направляет телеграфное уведомление о вызове представителя подрядчика для определения причин возникновения дефектов и участия в составлении акта – рекламации.

07.04.2023 ОАО «РЖД» направлено телеграфное уведомление от 07.04.2023 №ИСХ-216/СВРД ТЧЭ-13 о вызове представителя АО «Ремпутьмаш» для проведения рекламационной работы.

В ответ Верещагинский ПРМЗ письмом от 14.04.2023 №644 просил провести расследование появления причин неисправностей в одностороннем порядке.

17.04.2023 по данному факту составлен акт – рекламация №019, согласно которому виновность отнесена за АО «Калужским заводом «Ремпутьмаш» (п. 14).

Местом устранения дефектов определено СЛД-34 Артемовский, силами и за счет АО «Калужского завода «Ремпутьмаш» (п. 16).

Для устранения выявленных дефектов локомотив передан подрядчику по акту передачи локомотива ремонтному предприятию (сервисной компании) формы ТУ-162 от 10.04.2023 №162-7613-230407151400.

В соответствии с пунктом 3.2 приложения № 25 к договору устранение дефектов работ подрядчиком или работниками сервисного локомотивного депо на территории сервисного локомотивного депо производятся в срок не более 15 (пятнадцать) календарных дней, исчисляемых со дня отправки телеграфного уведомления в адрес подрядчика.

Как было указано ранее, телеграфное уведомление № ИСХ-216/СВРД ТЧЭ13 в адрес причастного завода  направлено 07.04.2023.

Соответственно, срок устранения дефектов локомотива, предусмотренный пунктом 3.2 приложения № 25 к договору, истекал 22.04.2023 (дата направления уведомления+15 календарных дней).

Однако выявленный дефект локомотива устранен только 12.10.2023, что подтверждается актом приемки локомотива от ремонтного предприятия (сервисной компании) по форме ТУ-31 №31-7634-231012164645.

Таким образом, просрочка устранения дефектов локомотива составила 173 календарных дня в период с 22.04.2023 по 12.10.2023.

Период просрочки рассчитан с учетом абз.4 п.65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» – день фактического исполнения нарушенного обязательства включается в период расчета неустойки.

Пунктом 12.4 договора предусмотрено, что в случае, если по вине подрядчика нарушаются определенные согласно пункту 5.1 договора сроки выполнения работ, а также сроки устранения дефектов, определенные пунктами 16 и 18 приложения № 25 к договору, подрядчик уплачивает заказчику неустойку за каждый день просрочки по ТПС, размер которой рассчитывается по приведенной в договоре формуле:

NS1дн=1/365*Z*Iактуализации.

где: Z – условные расходы на замещение одного выбывающего из работы локомотива в соответствии со значением, указанным во второй колонке таблицы в приложении 27 к договору (в соответствии с уровнем цен на 2021 год) без учета НДС. Для локомотива серии ТЭМ18ДМ значение Z = 2 485 809,00 руб. без НДС;

Iактуализации – показатель, характеризующий изменение цен в году, в котором нарушен срок выполнения работ по сравнению с уровнем цен 2021 года, и определяемый по формуле:

Iактуализации=Im/m-1*Im-1/m-2*…*I2022/2021

где m - год за который осуществляется расчет суммы штрафа (для m=2022 I2022/2021 - индекс цен производителей «Продукция машиностроения (26,27,28,29,30,33)» определяемый Министерством экономического развития Российской Федерации и размещенный в частности на Интернет сайте (www.economy.gov.m) за соответствующий период. Если на момент расчета неустойки формирование данного индекса Министерством экономического развития Российской Федерации не осуществляется, то Стороны применяют в расчетах индекс ИЦП промышленной продукции, определяемый Министерством экономического развития Российской Федерации.

Iактуализации = I2022/2021  ? I2023/2022 = 1,163 ? 1,076 = 1,2514.

Iактуализации = 1,163 * 1,076 = 1,2514.

Таким образом, размер неустойки (с учетом увеличения значения Z на НДС 20% в соответствии с пунктом 12.11 договора) за один день просрочки устранения дефектов составляет:

NS1дн =1/365 *2 485 809,00 * 1,2 * 1,2514 = 10 227,09 руб.

C учетом вышеуказанного размер неустойки за несвоевременное устранение неисправностей локомотива серии ТЭМ18ДМ № 581 за 173 календарных дня просрочки исполнения составляет: 10 227,09  * 173 = 1 769 286,57 руб.

Размер предъявленной неустойки является соразмерным, экономически обоснованным и отвечающим степени нарушения ответчиком своего обязательства по своевременному ремонту локомотива.

Указанные доводы подтверждены документально.

Предъявленный размер неустойки определен по формуле. Формула предусмотрена п. 12.4 договора.

Значения формулы (для определения размера неустойки) используют убытки ОАО «РЖД», возникшие в результате нахождения локомотива в ремонте сверх оговоренного в договоре срока, и рост цен на отраслевом рынке «производство машин и оборудования, транспортных средств», определяемый Минэкономразвития РФ.

Все значения формулы (убытки от необоснованной просрочки ремонта и рост цен) также подтверждены документально и согласованы сторонами. Неустойка учитывает расходы истца на замещение ремонтируемого локомотива другим локомотивом.

Размер этих расходов для локомотива серии ТЭМ18ДМ составляет 2 485 809,00 руб. Эта сумма определена в Приложении № 27.

Стороны в договоре специально определили сумму расходов (на замещение ремонтируемого локомотива другим локомотивом), которые ОАО «РЖД» несет при нахождении локомотива в ремонте.

Стороны договорились, что сумма этих расходов будет учтена при определении размера неустойки за просрочку ремонта, если будет допущено нарушение срока ремонта. Договоренность о том, что сумма расходов на замещение ремонтируемого локомотива другим локомотивом, будет учтена при определении неустойки, содержится в п. 12.4 договора.

В п. 12.4 договора предусмотрена формула расчета неустойки, а в формуле использовано значение «Z» - сумма расходов на замещение локомотива.

Неустойка учитывает индексы повышения цен в период с 2021 года (год заключения договора) до 2023 год (год завершения ремонта).

При определении размера неустойки также использованы показатели о повышении цен на рынке «производство машин и оборудования, транспортных средств», определяемый Минэкономразвития РФ.

Использование для расчета неустойки показателя о повышении цен предусмотрено в п. 12.4 договора. В п. 12.4 договора предусмотрена формула расчета неустойки, а в формуле использовано значение «I актуализация» - показатель повышения цен. Показатель повышения цен берется «не с потолка», а используются данные Минэкономразвития РФ. Использовались данные о повышении цен на протяжении трех лет – с 2021 года по 2023 (завершение ремонта). Использование данных Минэкономразвития РФ для целей определения размера неустойки согласовано сторонами – об этом буквально предусмотрено в п. 12.4 договора.

Таким образом, размер неустойки является полностью обоснованным, соответствует степени нарушения обязательства, учитывает понесенные расходы истца, подтверждается объективными данными о повышении цен.

АО «Ремпутьмаш» был свободен при заключении договора (ст. 421 ГК РФ). Являясь субъектом предпринимательской деятельности, заключив договор, добровольно принял на себя обязательства и нес риск их неисполнения в соответствии с условиями обязательства, в том числе в виде неустойки за ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Размер взыскиваемой неустойки полностью соответствует условиям договора № 4794999 и основан на таком показателе, как Z – условные расходы на замещение одного выбывающего из работы локомотива в соответствии со значением, указанным в приложении № 27 к договору.

В данном случае предъявляемые к АО «Ремпутьмаш» требования экономически обоснованы и исходят из макроэкономических показателей по территории РФ определенные Минэкономразвития РФ за использование ОАО «РЖД» замещающего локомотива.

Неустойка основана именно на размере ущерба заказчика от невозможности пользования локомотивом, а не на абстрактных величинах.

При заключении договора АО «Ремпутьмаш» согласилось с тем, что размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства экономически обоснован и соответствует последствиям ненадлежащего исполнения обязательства.

В целях досудебного урегулирования спора ОАО «РЖД» направило в адрес АО «Ремпутьмаш» претензию от 28.11.2023 № ИСХ-25854/СВЕРДТ с просьбой в добровольном порядке оплатить сумму неустойки, предусмотренную пунктом 12.4 договора, за нарушение срока устранения недостатков локомотива серии ТЭМ18ДМ №581.

В соответствии с пунктом 3.8 приложения № 25 к договору претензии заказчика, вытекающие из нарушения сроков гарантийного ремонта, подлежат рассмотрению подрядчиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты поступления претензии и прилагаемых ему документов. Указанная претензия была оставлена АО «Ремпутьмаш» без ответа.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Ответчик не оспаривает по существу нарушение им срока гарантийного ремонта тепловоза. Как следует из отзыва, ответчиком не оспаривается факт просрочки устранения недостатков в отношении тепловозов серии ТЭМ18ДМ № 581.

Согласно ч.3.1 ст.70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Соответственно, на основании ст.70 Арбитражного процессуального кодекса РФ необходимо считать признанными ответчиком факт нарушения срока ремонта тепловоза. Довод ответчика о нарушении истцом установленного порядка проведения рекламационной работы несостоятелен.

Согласно п. 7.2.1 Договора подрядчик (АО «Калужский завод «Ремпутьмаш») вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) (АО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш»). При этом подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков, как за свои собственные действия.

Учитывая, что АО «Верещагинский завод Ремпутьмаш» является субподрядной организацией ответчика (как сам признает ответчик в отзыве на иск), АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» несет ответственность за действия субподрядчика.

Помимо указанного АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» входит в группу «Ремпутьмаш» холдинга «Синара – Транспортные Машины» (СТМ), АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» является головной организацией (материнская компания) группы «Ремпутьмаш». СЛД «Артемовский», куда направлялась телеграмма, является частью ООО «СТМ-Сервис», входящий в холдинг СТМ. Уведомление АО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» и ООО «СТМ-Сервис» в лице СЛД «Артемовский» не нарушает установленный рекламационный порядок.

Довод ответчика признаются судом несостоятельными и опровергаются материалами дела.

Телеграмма от 07.04.2023 № ИСХ-216/СВРД ТЧЭ13 направлена ответчику посредством единой автоматизированной системой документооборота (ЕАСД).

Уполномоченным представителем истца дан ответ о проведении расследования появления причин неисправностей в одностороннем порядке, силами СЛД «Артемовский».

В свою очередь акт-рекламация от 17.04.2023 №019, подписанный СЛД Артемовский без замечаний, направлен уполномоченному  представителю истца.

Таким образом, можно сделать вывод, что и сервисная компания, и субподрядчик ответчика и ответчик знали о наличии выявленных неисправностей.

Акт передачи локомотива № 162-7613-230407151400 ремонтному предприятию подписан представителем СЛД «Артемовский» ФИО1 Данное сервисное локомотивное депо является частью ремонтного предприятия ООО «СТМ-Сервис». И его использование в ремонте не оспаривалось представителем ответчика при составлении акта рекламации от 07.04.2023.

Акт приемки локомотива от ремонтного предприятия (сервисной компании) подписан также представителем СЛД «Артемовский».

Таким образом, предъявление требований к АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» правомерно, произведено в соответствие с договором и фактическими обстоятельствами.

Срок для производства ремонтных работ установлен договором (15 дней с момента направления телеграфного уведомления о выявлении неисправностей), а субподрядчик в лице АО «Верещагинский завод «Ремпутьмаш» силами СЛД «Артемовский» исполнил эти работы, только за рамками установленного договором срока.

Согласно формуле расчета неустойки, предусмотренной в п.9.2 договора, для определения размера неустойки учитываются убытки ОАО «РЖД», возникшие в результате нахождения локомотива в ремонте сверх оговоренного в договоре срока, а также рост цен на отраслевом рынке «производство машин и оборудования, транспортных средств», определяемый Минэкономразвития РФ.

Так, неустойка учитывает расходы ОАО «РЖД» на замещение ремонтируемого локомотива другим локомотивом.

В формуле использовано значение «Zj» – условные расходы на замещение одного выбывающего из работы локомотива в соответствии со значением, указанным в приложении №34 к договору.

Таким образом, стороны в договоре специально оговорили и согласовали сумму расходов, которую ОАО «РЖД» несет при нахождении локомотива серии ТЭМ18ДМ в ремонте, если исполнителем будет допущено такое нарушение. Сумма данных расходов составляет 2 485 809,00 руб. без НДС.

Также, неустойка учитывает индексы повышения цен в период с 2018 года (год заключения договора) до 2023 года (года завершения ремонта).

Кроме этого, в формуле использовано значение «I актуализации» – показателя повышения цен.

Для определения показателя повышения цен в целях расчета размера неустойки используются данные Минэкономразвития РФ, что прямо согласовано сторонами в п.9.2 договора.

Таким образом, неустойка основана именно на размере убытков заказчика (истца) от отсутствия возможности использовать локомотив, а не на абстрактных величинах.

Таким образом, ОАО «РЖД» не только не получает прибыль при неиспользовании локомотивов по назначению ввиду их перепростоя в ремонте, но и несет убытки в виде штрафов (пени) за несвоевременную доставку грузов (порожних вагонов) в адрес клиентов.

В данном случае, при заключении договора стороны совместно обеспечили своевременное выполнение гарантийного ремонта неустойкой за каждый день просрочки, в связи с чем размер неустойки добровольно согласован сторонами в договоре (ст. 421 ГК РФ).

Факт нарушения ответчиком сроков выполнения ремонта по договору подтвержден материалами дела, не оспаривается ответчиком, следовательно, требование о взыскании неустойки правомерно.

Генеральный директор АО «Калужский завод Ремпутьмаш» при подписании договора возражений в отношении его условий не заявлял, в период действия договора их законность не оспаривал. Доказательства, свидетельствующие о несоразмерности либо чрезмерности неустойки, в материалы дела не представлены. Принятый сторонами размер неустойки является обычным в деловом обороте, соответствует сложившейся практике договорных отношений хозяйствующих субъектов, отвечает принципам разумности и соразмерности ответственности за нарушение обязательства, не считается чрезмерно высоким.

Помимо указанного, взыскиваемая сумма для ответчика не является чрезмерной, учитывая что согласно данным информационного портала СБИС (данные взяты из Росстата), находящимся в открытом доступе, выручка Ответчика начиная с 2021 года составляет более 10 миллиардов рублей.

Расчет суммы неустойки произведен истцом строго в соответствии с условиями договора, согласованными обеими сторонами, и установленная в договоре ответственность за нарушение сроков гарантийного ремонта в виде неустойки не противоречит действующему законодательству (статьям 330, 421, 431 ГК РФ). При этом следует отметить, что ОАО «РЖД», обратившись в суд с требованием о взыскании договорной неустойки, реализовало предусмотренное законом право на судебную защиту, не имея намерений причинить кому-либо вред или добиться иных не правовых последствий.

ОАО «РЖД» не начисляет НДС на сумму неустойки. ОАО «РЖД» учитывает НДС в составе условных расходов на замещение одного выбывающего из работы локомотива согласно формуле расчета неустойки.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, методологически и арифметически выполнен верно.

Ответчик, возражая против удовлетворения заявленных исковых требований, в отзыве на исковое заявление заявил о несоразмерности взыскиваемой истцом суммы неустойки последствиям ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств, просил суд применить ст. 333 ГК РФ и снизить взыскиваемую истцом неустойку.

В силу ст. 333 Гражданского кодекса РФ суд наделен правом уменьшения неустойки в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Пунктом 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке.

Как разъяснено в пункте 73 указанного постановления, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период (п.75 Постановления).

При этом степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд, рассматривающий дело, вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, с учетом периода просрочки исполнения обязательства, величины ненадлежащим образом исполненного обязательства, приходит к выводу о чрезмерности заявленной истцом ко взысканию неустойки и полагает, что неустойка подлежит уменьшению до 1 061 572,98 руб.

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, 330, 331, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 4, 27, 65, 67-68, 71, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с АО "РПМ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ОАО "РЖД" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 1 061 572,98 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 30 693 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

А.В. Попов