Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-10322/2020

15 июля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  11 июня 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  15 июля 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи  О.Н. Сергеевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

Истец: общество с ограниченной ответственностью "ПСК ЭНЕРГО" (адрес:  Россия 191144, Санкт-Петербург, а/я 383 (в лице конкурсного управляющего Мощонского И.Н.); Россия 196191, Санкт-Петербург, пр. Ленинский д.168, лиетр А, пом. 20Н №11-13, ОГРН:  1147847104173);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" (адрес:  Россия 196135, Санкт-Петербург, а/я 29, ОГРН:  1117847392662);

третье лицо: 

о взыскании 29 908 935 руб. 47 коп.

при участии

- от истца: ФИО3 по доверенности от 09.06.20

- от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом

установил:

ООО «ПСК Энерго» предъявило иск о взыскании с ООО «Электрострой» 29 908 935 руб. 47 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора № 14/12-ПП от 14.12.16.

Ответчик отзыв не представил, извещен надлежащим образом.

Дело рассматривается без участия ответчика на основании ст. 156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между ООО «ПСК Энерго» (далее - Истец, Субподрядчик) и ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) (далее - Ответчик, Подрядчик) был заключен Договор №14/12-ГШ от 14.12.2016 г.

Согласно п. 1.1 договора подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Технологическое присоединение электроустановок заявителя: ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по адресу: 

<

...> участок №105.

На основании п.3.1. договора общая стоимость работ и используемых при этом материалов по настоящему договору, определенная сводной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет 38 915 830 руб. 00 коп.

В силу п. 3.3 оплата выполненных работ по настоящему договору производится подрядчиком в течение 5 дней с даты получения денежных средств за выполнение работ по объекту от заказчика - ПАО «Ленэнерго».

Работы по указанному договору выполнены субподрядчиком в полном объеме, претензий от подрядчика не поступало, что подтверждается Актом выполненных работ №10 от 13.03.2017 г., Актом выполненных работ №2 от 13.03.2017 г., Справкой о стоимости выполненных работ №1 от 13.03.2017 г., Актом о приемке выполненных работ №1 от 13.03.2017 г., Актом выполненных работ №9 от 13.03.2017 г.. Актом выполненных работ №8 от 13.03.2017 г., Актом выполненных работ №7 от 13.03.2017 г., Актом выполненных работ №6 от 13.03.2017 г., Актом выполненных работ №5 от 13.03.2017 г., Актом выполненных работ №4 от 13.03.2017 г., Актом выполненных работ №10 от 13.03.2017 г., подписанными с обеих сторон. В настоящее время задолженность по оплате работ составляет 29 908 935 руб. 47 коп.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательств и односторонне изменение условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 Гражданского кодекса РФ).

ООО «ПСК Энерго» была направлена претензия в адрес ООО «Электрострой» с просьбой оплатить выполненные работы, однако на письменное требование истца от 04 июня 2019 о добровольном исполнении обязательств по уплате долга ответчик не ответил, до настоящего момента долг не погашен.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПСК ЭНЕРГО" 29 908 935 руб. 47 коп. задолженности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСТРОЙ" в доход федерального бюджета 172 545 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья           Сергеева О.Н.