АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-14920/2019

28 февраля 2020 года

г. Абакан

Резолютивная часть решения объявлена 20.02.2020

Решение в полном объеме подготовлено 28.02.2020

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №10» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 57 163  руб. 59 коп.,

в отсутствие представителей сторон. 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии» обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с исковым заявлением к  муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №10» о взыскании о взыскании 57 223 руб. 95 коп., в том числе 55 715 руб. задолженности, 1508 руб. 95 коп. неустойки за период с 11.08.2019 по 18.12.2019.

В материалы дела истец представил заявление об уменьшении исковых требований, просил взыскать с ответчика 55 715 руб. задолженности и 1448 руб. 59 коп. неустойки за период с 11.08.2019 по 18.12.2019, а также рассмотреть дело в отсутствие представителя. 

Арбитражный суд, руководствуясь статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял уменьшение исковых требований.

Ответчик представил в материалы дела отзыв на исковое заявление, в котором признал исковые требования в полном объеме и заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Стороны своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Хакасия: http://khakasia.arbitr.ru, а также в общедоступном информационном сервисе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При изложенных обстоятельствах в силу статей 121 – 123, частей 1, 3, статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд признал   лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещёнными о дате, времени и месте судебного разбирательства и проводит судебное заседание в отсутствие лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении настоящего спора арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №10» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии» (подрядчик) 09.07.2019 заключен государственный контракт на замену электропроводки № 09/07/2019, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по замене электропроводки.

Объем и стоимость работ, составляющих предмет контракта, определяются в спецификации (Приложение № 1), являющейся его неотъемлемой частью (пункт 1.3 контракта).

Пунктом 3.1.5 государственного контракта сторонами установлен срок выполнения работ: 40 дней с момента подписания контракта.

Согласно пункту 2.1 цена контракта согласно спецификации составляет 55 715 руб.

Пунктом 2.3 контракта установлено, что оплата производится в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ (форма КС-2). 

Согласно подписанному акту о приемке выполненных работ от 11.07.2019,  истцом выполнены работы на сумму 55 715 руб. 

Ненадлежащее исполнение обязательств по оплате выполненных работ по государственному контракту послужило основанием для обращения общества с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии» с претензией исх. № 168 от 29.11.2019.

Неоплата задолженности за выполненные по государственному контракту работы и не получение ответа на претензию послужило основанием для обращения общества с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии» в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив доводы искового заявления, а также представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришёл к следующим выводам.

Отношения сторон основаны на государственном контракте № № 09/07/2019, которые регулируются, действующими на момент его заключения, положениями статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

По своей правовой природе договор является договором подряда, предусмотренным статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик исковые требования не оспорил, доказательств исполнения своих обязательств по договору в материалы дела не представил, следовательно, требование истца о взыскании 55 715 руб. задолженности за выполненные работы подлежит удовлетворению в заявленной сумме.

Истец также предъявил ко взысканию неустойку в размере 1448 руб. 59 коп. неустойки за период с 11.08.2019 по 18.12.2019 в соответствии с пунктом 5.2 государственного контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательства по контракту. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

В ходе рассмотрения дела ответчик признал исковые требования о взыскании задолженности в сумме 55 715 руб. и 1508 руб. 95 коп. неустойки за спорный период, о чем представил письменное заявление.  

Согласно частям 3 и 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. В части 4 статьи 170 названного Кодекса предусмотрено, что в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Принимая во внимание, что заявление о признании иска подписано уполномоченным лицом, директором учреждения, признание иска ответчиком не противоречит закону и не нарушает права других лиц, а равно публичные интересы, арбитражный суд посчитал возможным принять признание иска. 

Государственная пошлина по настоящему делу составляет 2287 руб., уплачена истцом при подаче иска в сумме 2289 рублей платежным поручением от 19.12.2019 № 693. 

В соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 198-ФЗ), возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины,  что составляет 1602 руб. 90 коп. Остальная часть государственной пошлины в размере 686 руб. 10 коп. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 166-171, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск:

взыскать с муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №10» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии» 57 163 (пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят три) руб. 59 коп.: в том числе 55 715 руб. долга, и 1448 руб. 59 коп. неустойки, а также 686 (шестьсот восемьдесят шесть) руб. 10 коп. расходов по государственной пошлине, уплаченной платежным поручением от 19.12.2019 № 693.

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Информационные технологии» из федерального бюджета 1602 (одна тысяча шестьсот два) руб. 90 коп. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от 19.12.2019 № 693.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

СудьяС.М. Тропина