АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

432017, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14 

Тел.(8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail:info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет:www.ulyanovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 г. Ульяновск Дело № А72-1906/2017  

 14.09.2017г.  

Резолютивная часть решения объявлена 7.09.2017 Решение в полном объеме изготовлено 14.09.2017 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Овсяниковой Ю.А., при  

ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев дело по  

исковому заявлению 

Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской  

области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Акционерному обществу «Гипростроймост» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

7325069417), г.Ульяновск 

третье лицо: Правительство Ульяновской области, АО «Ульяновская областная  

корпорация ипотеки и строительства» о взыскании ущерба 307 522 руб. 62 коп. 

при участии:  

от истца – до и после перерыва - не явился, извещен; 

от ответчика – до и после перерыва - ФИО2, паспорт, доверенность от  

03.03.2016; 

от третьего лица Правительства Ульяновской области – до перерыва ФИО3  

Ю.Е., паспорт, доверенность от 09.08.2017; до и после перерыва - ФИО4,  

паспорт, доверенность от 09.08.2017; от третьего лица АО «УОКИС» - до и после перерыва - не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ:

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской  области обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к  Акционерному обществу «Гипростроймост» о взыскании ущерба, причиненного в связи  с невыполнением государственного контракта и нецелевым использованием средств  областного бюджета Ульяновской области в размере 307 522 руб. 62 коп.  

Определением от 22.02.2017 дело назначено к рассмотрению в порядке  упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

13.04.2017 для выяснения дополнительных обстоятельств суд определил перейти к  рассмотрению дела по общим правилам искового производства.  

Определением от 11.05.2017 к участию в деле качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечен Департамент  внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской области, который  определением от 15.08.2017 был заменен на Правительство Ульяновской области в  порядке ст.48 АПК РФ в связи с реорганизацией.  

Определением от 15.08.2017 к участию в деле качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено АО  «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства».  

Протокольным определением от 31.08.2017 в судебном заседании объявлен  перерыв до 7.09.2017.  

Сведения о месте и времени продолжения судебного заседания были размещены на  официальном сайте Арбитражного суда Ульяновской области в сети Интернет по  адресу: www.ulyanovsk.arbitr.ru.  

В продолженное после перерыва судебное заседание истец, третье лицо АО  «УОКИС» явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. Судебное  заседание на основании ст. 156 АПК РФ проводится в отсутствие указанных лиц.  

Представитель ответчика исковые требования не признает.  

Представитель третьего лица Правительства Ульяновской области исковые  требования поддерживает в полном объеме.  

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства,  заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела, 24.11.2014 по результатам проведенного аукциона  в электронной форме на основании протокола № 0168200002414005958 от 10.11.2014  истец (Государственный заказчик) и ответчик (Подрядчик) заключили государственный  контракт № 31, согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы по  осуществлению капитального ремонта гидротехнического сооружения на р.Тагайка с.  Подлесное МО «Майнский район» Ульяновской области в соответствии с условиями  контракта, техническим заданием (Приложение № 3) и сметной документацией  (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, а  заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  

В п. 3.1 контракта стороны согласовали сроки выполнения работ: в 2014 году –  начало работ с момента заключения контракта, окончание работ – 20.12.2014; в 2015  году – начало работ с 1.04.2015, окончание работ – до 1.12.2015.  

Согласно п. 5.1 цена контракта составляет 3 095 170 руб. 14 коп. 

Согласно статье 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную  работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

Согласно представленным в дело документам, работы выполнены подрядчиком и  приняты заказчиком по актам, подписанным без возражений. На момент рассмотрения  спора оплата по контракту произведена в полном объеме.  

31.12.2015 стороны заключили соглашение о расторжении государственного  контракта № 31 от 24.11.2014, руководствуясь при этом ч. 1 ст. 450, ч.1 ст. 452  Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 5.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд»; основание расторжения – соглашение  сторон; на момент заключения соглашения работы по контракту выполнены на сумму  3 051 033 руб. 90 коп.; выполненные работы оплачены Государственным заказчиком.  

Как указывает истец, в соответствии с планом контрольных мероприятий  Департаментом внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской  области была проведена проверка в отношении расходов, связанных с осуществлением  закупок для обеспечения нужд Ульяновской области.  

По результатам проверки 18.08.2016 составлен акт № 16-06-01/6 и 3.11.2016  вынесено предписание № 11 в п. 5 которого указано, что недостоверное отражение в  документах учета работ, которые фактически не были выполнены, повлекло за собой  нецелевое использование средств областного бюджета Ульяновской области,  выразившееся в оплате неподтвержденных объемов работ, неиспользованных  материалов, в результате чего Ульяновской области был причинен ущерб по  государственному контракту № 31 на сумму 307 522 руб. 62 коп.  

С целью исполнения требований предписания истец направил в адрес ответчика  письмо от 3.11.2016 № 73-ИОГВ-07-01/9409 с просьбой в досудебном порядке  устранить в кратчайшие сроки все выявленные нарушения.  

Письмом от 7.12.2016 № 73-ИОГВ-07-02/10618 истец потребовал от ответчика  возвратить сумму оплаченных неподтвержденных работ в размере 307 522 руб. 62 коп.  

Поскольку ответчик требования истца оставил без удовлетворения, добровольно  не вернул указанные выше денежные средства, истец обратился в суд с исковым  заявлением о возмещении убытков в связи с невыполнением государственного  контракта в размере 307 522 руб. 62 коп.  

В судебных заседаниях истцом было уточнено, что данную сумму он просит  взыскать как стоимость частично невыполненных и частично выполненных с  недостатками работ, а именно:  

1. посев многолетних трав вручную площадью 783 кв.м. по низовому откосу насыпи  плотины визуально не наблюдается, таким образом, завышение объёмов работ по посеву  травы «Пырей» (весом 9,396 кг) оставило 783 кв.м.; Всего по позициям "посев  многолетних трав" на сумму 37 707,38 руб.;  

2. крепление верхнего откоса ивовыми хлыстами в количестве 0,401 км | визуально  не наблюдаются, таким образом, завышение объёмов составило 0,401 км и  использованных материалов (ивовый хлыст) 267 шт. на сумму 61 766,47 руб.;  

3. по акту приняты работы по установке столбиков сигнальных  железобетонных С-14 в количестве 51 шт., фактически в наличии 46 столбиков,  завышение объёмов составило 5 столбиков на сумму 2 769,38 руб.  

4. работы по устройству зуба из камня диаметром 150-200 мм толщиной 50 см в  объеме 1,5 куб. м, принятые по акту, фактически не выполнены, завышение |объёмов  составило 1,5 куб. м на сумму 1 135,49 руб.;  

5. работы по креплению откосов монолитным железобетоном марки B30, F300, W6  толщиной 10 см с применением армосеток и армокаркасов объёмом 1 куб.м, принятые  по акту, фактически не выполнены, завышение объёмов составило 1 куб., в том числе и  учтённых материалов, на сумму 10 965,47 руб.;  

6. работы по устройству опоры служебного мостика из монолитного бетона марки  B3D, F300, W6 в объёме 0,57 куб.м, принятые по акту, фактически не выполнены,  завышение объёмов составило 0,57 куб.м. , на сумму 7 414,33 руб.;  

7. работы по устройству зуба из камня диаметром 150-200 мм толщиной 150 см в  объёме 16 куб. м, принятые по акту, фактически не выполнены, завышение объемов  составило 16 куб.м. на сумму 12 064 руб.  

8. посев многолетних трав вручную площадью 843 кв.м. по бортам отводящего  канала визуально не наблюдается, таким образом, завышение объемов работ по посеву  травы «Пырей» (весом 10,116 кг) составило 843 кв.м. на сумму 124 595,13 руб.  

9. установка водоохранного знака-2 шт. (акт о приёмке выполненных работ от  30.11.2015 № 20): работы фактически не выполнены на сумму 49 104, 97 руб.  

В соответствии с п. 1 ст. 723 ГК в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с  отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными  недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре  использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия  непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено  законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного  устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за  работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право  заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.  

При этом, в силу положений статей 711, 746 Гражданского кодекса РФ заказчик  работ вправе отказаться от оплаты работ, если работы выполнены с нарушениями  требований и условий договора относительно качества, когда такие недостатки не  позволяют использовать их результат по назначению.  

Согласно п. 1. ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник  обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим  исполнением обязательства.  

Ответчик исковые требования не признает, в отзыве пояснил, что претензии истца  являются требованиями об устранении недостатков, которые могли быть установлены  при обычном способе приемки; акты о приемке выполненных работ были подписаны  истцом без замечаний, в связи с чем, в силу прямого указания закона истец лишается  права ссылаться на недостатки, которые могли быть устранимы при обычном способе  приемки (явные недостатки); представленные в обоснование наличия заявленных  недостатков доказательства (акт проверки № 16-06-01/16 от 18.08.2016, предписание   № 11 от 3.11.2016) не могут быть приняты во внимание, поскольку все осмотры  проводились в отсутствие представителей ответчика.  

В соответствии с п. 4.1 государственного контракта сдача результатов как  промежуточных, так и окончательно выполненных работ Подрядчиком и принятие их  Государственным заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта о  приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ  и затрат (форма № КС-3) и акта сдачи-приемки работ.  

Ответчиком в материалы дела представлены справки о стоимости выполненных  работ и затрат, акты приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3 на выполненные по  государственному контракту № 31 работы на общую сумму 3 051 033 руб. 97 коп.  Данные акты подписаны со стороны заказчика (истца) без замечаний.  

Представленные суду акты подтверждают выполнение работ подрядчиком  (ответчиком) и сдачу работ заказчику (истцу) на сумму 3 051 033 руб. 97 коп.  

Департамент внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской  области (впоследствии замененный на Правительство Ульяновской области),  привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, требования истца  поддерживает, пояснил, что в результате проверки соблюдения требований  Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в  период с 27.06.2016 по 15.07.2016 были выявлены нарушения исполнения  государственного контракта № 31, которые выразились в приемке неподтвержденных  объемов работ и материалов. Стоимость работ по контракту составляет 3 095 170 руб. 14  коп. Дополнительным соглашением от 31.12.2015 цена контракта уменьшена до 3 051  033 руб. 91 коп., которые были оплачены заказчиком, из них завышение объема работ по  контракту составило сумму 307 522 руб. 62 коп.  

Определением от 15.06.2017 суд назначил сторонам проведение совместного  осмотра выполненных ответчиком работ по капитальному ремонту гидротехнического  сооружения на р.Тагайка с. Подлесное в МО «Майнский район» Ульяновской области.  

Согласно акту совместного осмотра от 29.06.2017: 1) трава «пырей» визуально не наблюдается; 

2) при раскопках части верхнего слоя земельного участка на глубину 0,6 м  верхнего откоса укладка ивовых хлыстов не подтвердилась;  

3) столбики в количестве 5 шт. отсутствуют; 

4) устройство зуба из камня d=150-200мм., h=150см. объёмом 16 куб.м. не  подтвердилась, на месте зуба лежит железобетонная плита;  

5) крепление откосов монолитным железобетоном марки B30,F300, W6 толщиной  10 см с применением армосеток и армокаркасов объёмом 1 куб. м, визуально не  

наблюдается; 6) при раскопках земельного покрова в районе металлических опор служебного 

мостика определены опоры служебного мостика, но фактически металлические опоры  не укреплены к металлическим закладным на бетонных опорах, переходный мостик  

опустился примерно на 10 см; 7) охранные знаки в количестве 2 шт. не установлены. 

Ответчик акт осмотра не подписал, в представленных возражениях на акт осмотра  от 29.06.2017 и дополнительных пояснениях указал:  

1) При выполнении работ для крепления откосов был произведен посев  многолетних трав разных сортов (разнотравие). Согласно проекта (лист 4) для крепления  верхнего откоса в проекте принят посев многолетних трав; в сметной документации  принята расценка травы «пырей» как самая низкая расценка из стоимости многолетних  трав - 54,45 руб. за кг, таким образом, по условиям проекта и сметной документации  предусматривается посев не только травы «пырея», но и иных видов многолетних трав.  

Данные работы были приняты заказчиком по акту приемки выполненных работ от  30.11.2015 № 17 .  

2) Крепление откосов производилось, что подтверждается актом приемки  выполненных работ от 31.07.2015 № 14, пунктом 1 акта № 3 осмотра объекта от  30.07.2015.  

3) Установка сигнальных столбиков производилась, данные работы были приняты  заказчиком по акту приемки выполненных работ от 30.11.2015 № 17 в количестве 51 шт.  

4) Работы по устройству зуба из камня были выполнены и приняты заказчиком по  актам приемки выполненных работ от 01.07.2015 № 6, от 31.07.2015 № 15,  подтверждаются актом осмотра № 2 от 26.05.2015. Сверху закрыты железобетонной  плитой.  

5) Крепление откосов монолитным железобетоном ответчиком производились и  были приняты заказчиком, что помимо актов по форме № КС-2 от 13.07.2015 № 13, от  31.07.2015 № 15, подтверждается также пунктом 4 акта № 3 осмотра объекта  капитального строительства от 30.07.2015.  

6) Работы по укреплению опор были выполнены, что подтверждается актом  приемки выполненных работ от 31.07.2015 № 15. Фактическое их выполнение  подтверждается и актом совместного осмотра от 29.06.2017.  

7) Охранные знаки устанавливались и были приняты заказчиком в количестве 2  шт. по акту приемки № 20 от 30.11.2015.  

Третьим лицом представлено экспертное заключение кандидата биологических  наук ФИО5, который 29.09.2017 изучил флору растительного покрова  плотины пруда на реке Тагайка у села Подлесное и определил, что наиболее массовыми  видами являются хвощ полевой, бодяк полевой, латук компасный, что свидетельствует о  преобладании на плотине сорных трав.  

Данное экспертное заключение не может быть принято судом во внимание,  поскольку не назначалось судом, проведено в отсутствие ответчика и через 2 года после  фактического выполнения работ по посадке трав, что не исключает правомерности  доводов ответчика о возможном переопылении трав, уничтожении посевов ввиду  отсутствия доказательств проведения работ по надлежащему содержанию объекта.  

Таким образом, материалами дела подтверждается, что все работы, выполнение  которых при проверке путем визуального осмотра в 2016 году поставлено  контролирующими органами под сомнение, были согласно подписанным без замечания  актам проверки и осмотра в 2014-2015 годах выполнены подрядчиком и приняты  комиссией заказчика без замечаний.  

Согласно п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно  соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий  договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если  иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат  выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами,  указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в  пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором  использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного  использования результата работы такого рода.  

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с  участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при  

обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных  недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (п.1 ст. 720 ГК РФ).  

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на  них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были  оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования  об их устранении (п.2 ст. 720 ГК РФ).  

Согласно п. 3 ст. 720 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда,  заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки  работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные  недостатки).  

Перечисленные в иске недостатки – отсутствие посевов травы, укрепления откосов,  сигнальных столбиков и охранных знаков – относятся к явным недостаткам, о которых,  при их наличии, заказчиком в процессе приемки работ не заявлено.  

Посев многолетних трав вместо травы "Пырей", укладка железобетонной плиты  было предусмотрено проектной документацией, копии листов которой представлены  ответчиком в материалы дела. То обстоятельство, что в приложенном третьим лицом  разделе проекта (том 3) данные изменения не отражены, не свидетельствуют об их  неправомерности: согласно письму проектанта АО "УОКИС" данные изменения имели  место и обоснованы с технической точки зрения.  

Отсутствие надлежащего крепления опор моста было также выявлено  проверяющими лишь визуально.  

Судом, в ходе рассмотрения дела, было предложено сторонам рассмотреть вопрос  о проведении по делу судебной экспертизы для определения качества проведенного  капитального ремонта гидротехнического сооружения на р.Тагайка с. Подлесное в МО  «Майнский район» Ульяновской области.  

Стороны не изъявили согласия на проведение экспертизы, при этом суд  поддерживает позицию ответчика, что, поскольку все работы были приняты заказчиком,  и исходя из характера заявленных недостатков, бремя доказывания невыполнения работ  или ненадлежащего (с использованием иных материалов и качества) их выполнения  должно быть возложено на истца, поскольку никаких претензий по качеству работ истец  ответчику до проведения третьим лицом проверки не предъявлял, во время и после  проверки подрядчика на осмотр с составлением дефектного акта и установления сроков  устранения недостатков не вызывал.  

Контракт № 31 был выполнен сторонами и расторгнут по соглашению сторон, при  этом правом на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов,  экспертных организаций по правилам Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд», заказчик не воспользовался.  

Объект эксплуатируется с момента приемки в ноябре 2015 по настоящее время,  доказательств наличия дефектов, препятствующих эксплуатации объекта, предъявления  претензий в соответствии с условиями раздела 6 договора, в материалы дела не  представлено. Наличие таких дефектов не выявлено и Департаментом при проверке. При  этом при проведении осмотра объекта по определению суда выводы контролирующего  органа не были подтверждены.  

В силу ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрена обязанность каждого лица,  участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на  основание своих требований и возражений.  

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства в  их совокупности, суд полагает, что истцом не доказано не соответствие объемов  выполненных работ объему, отраженному в актах приемки, не доказана  некачественность выполненных работ (в том числе путем проведения судебной  экспертизы, ходатайств о проведении которой суду не заявлено) или факт того, что  

выявленные при проверке несоответствия локальной смете не позволяют использовать  результат работ по назначению в пределах разумного срока, и не представил  доказательства направления истцу требований об устранении недостатков, а также  соблюдения иных положений статьи 723 Гражданского кодекса РФ.  

С учетом изложенного исковые требования удовлетворению не подлежат. 

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального  кодекса РФ следует возложить на истца, но не взыскивать в силу ст.333.37 НК РФ,  поскольку истец освобожден от ее уплаты.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований отказать. Решение вступает в силу по истечении месяца с момента его принятия. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Ю.А. Овсяникова