Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

г. Москва Дело № А41-16161/24  «18» сентября 2024 года  

 Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Абрамовой А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ к ООО "ФИБРОБЕТОН" об  обязании устранить недостатки работ и взыскании 965260 руб. 60 коп., третье лицо -  временный управляющий ООО "ФИБРОБЕТОН" ФИО1,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2 по дов. № 290 от 18.12.2023 г., от ответчика от третьего лица 

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ФИБРОБЕТОН" в месячный срок со дня вступления решения суда в  законную силу безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты) в работах,  выполненных по договору от 03.08.2018 г. № 1504-К, указанные в рекламационном акте от  14.09.2022, на объекте по адресу: 

<

...>, а  именно: не герметично примыкание к вентшахте (1 место); нарушена штукатурка на  вентшахте (1 место).  

Взыскать с ООО "ФИБРОБЕТОН" в пользу ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  965260 руб. 60 коп. неустойки и 28305 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины.  

Взыскать с ООО "ФИБРОБЕТОН" в пользу ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  неустойку, начисленную на сумму в размере 1559193 руб. 32 коп. с 16.02.2024 г. по дату  фактического исполнения обязательства по устранению недостатков (дефектов)  капитального ремонта исходя из 1/130 действующей на день уплаты неустойки ставки  рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки.  

В случае неисполнения решения суда взыскать с ООО "ФИБРОБЕТОН" в пользу  ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА неустойку в размере 500 руб. 00 коп. за каждый  календарный день неисполнения обязанности по устранению недостатков по дату  фактического исполнения судебного акта.  

В остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. 

Судья И. В. Быковских