АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-1588/2024

г. Ярославль

18 января 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена 19 декабря 2024 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Коншиной А.Д. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Безбородовой А.Г., 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Стройтайм" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к муниципальному учреждению управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании715143.94 руб., 

о признании одностороннего отказа от выполнения муниципального контракта недействительным

Третье лицо: Управление федеральной антимонопольной службы по Ярославской области,

при участии:

от истца – ФИО1, паспорт, директор по выписке ЕГРЮЛ,

от ответчика – не явились,

от третьего лица – не явились,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Стройтайм" обратилось с исковым заявлением к Муниципальному учреждению управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района о взыскании 715143.94 руб., о признании одностороннего отказа от выполнения муниципального контракта недействительным.

Ответчик направил отзыв на иск, исковые требования не признает.

Третье лицо направило отзыв на иск. Оставляет разрешение требований на усмотрение суда.

Истец представил дополнительные пояснения по делу.

Дело подлежит рассмотрению в порядке ст. 156 АПК РФ без участия ответчика, третьего лица.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

08.11.2023 между Муниципальным учреждением Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации Некрасовского муниципального района /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙТАЙМ» /Подрядчик/ заключен Муниципальный контракт № 2023.103999 на ремонт дорожного покрытия ул. Луговая, п. Некрасовское, Ярославской области Идентификационный код закупки: 23 37627057601762701001 0029 001 4211 244, согласно п. 1.1. которого Подрядчик принимает на себя обязательство по ремонту дорожного покрытия ул. Луговая, п. Некрасовское, Ярославской области (далее – работы, объект, строительная площадка) в соответствии с условиями Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (Приложение № 1 к Техническому заданию), графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их.

В соответствии с п. 4.1. муниципального контракта цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет 924 000 рублей 00 копеек (девятьсот двадцать четыре тысячи рублей ноль копеек) с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии с графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 6 к Контракту). Цена Контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

В соответствии с п. 6.1. муниципального контракта сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта по 15.11.2023, начало производства работ — 09.11.2023. 

В соответствии с п. 10.3, 10.3.1. муниципального контракта сдача и приемка работ в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий: 10.3.1. Осуществляет приемку выполненной работы (ее результатов) в части соответствия объема требованиям, установленным Контрактом, и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

В соответствии с п. 10.3.2. муниципального контракта при принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

ООО «Стройтайм» 15.11.2023 выполнило работы по муниципальному контракту. 

В течение регламентированного срока ответа на акты выполненных работ не поступало.

20.11.2023 исполнительная документация, а именно акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет и счет-фактура были размещены в ЕИС. Мотивированного отказа от подписания актов в адрес ООО «Стройтам» не поступало. 

В связи с тем, что нарушений существенных условий контракта не выявлено, истец просит признать односторонний отказ МУ «Управление ЖКХ и сельского хозяйства Администрации Некрасовского муниципального района» от выполнения контракта недействительным, взыскать стоимость выполненных работ в размере 715 143,94 руб.

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В  силу п.1 ст.702 ГК РФ  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Таким образом, основанием для оплаты работ является факт сдачи результата работ заказчику.

Согласно пункту 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Сторона, которой ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ).

Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа его стороны от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом (части 8 и 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).

В соответствии со статьями 65, 66 АПК РФ каждый участник процесса обязан представлять суду доказательства в обоснование своей позиции. При разрешении спора суд оценивает имеющиеся в деле доказательства.

Оспаривая односторонний отказ ответчика от исполнения контракта, истец по общему правилу статьи 65 АПК РФ обязан доказать необоснованность такого отказа со стороны ответчика, а именно: отсутствие оснований для принятия ответчиком решения об одностороннем отказе от дальнейшего исполнения договора.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В подтверждение заявленных требований истец указывает и представляет доказательства сдачи результатов работ заказчику в 20.11.2023.

Факт исполнения принятых на себя договорных обязательств истец подтверждает односторонними актами выполненных работ, направленными ответчику.

Согласно положениям пункта 1 и пункта 4 статьи 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Мотивированного отказа от подписания актов в адрес ООО «Стройтам» в материалы дела ответчиком в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не представлено.

Из материалов дела следует, что решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 2023.103999 на ремонт дорожного покрытия ул. Луговая, п. Некрасовское, Ярославской области от 08.11.2023 принято муниципальным учреждением Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района 11.12.2023, т.е. после фактического выполнения работ подрядчиком.

Исполненный договор не может быть расторгнут по основаниям ст. 450, 450.1 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, исковые требования судом признаются обоснованными, подлежат удовлетворению.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца по оплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Признать недействительным решение муниципального учреждения Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района от 11.12.2023 об одностороннем отказе от исполнения контракта № 2023.103999 на ремонт дорожного покрытия ул. Луговая, п. Некрасовское, Ярославской области от 08.11.2023.

Взыскать с муниципального учреждения Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стройтайм" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 715 143,94 руб. основного долга, 17 303 руб. в возмещение расходов на оплату государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

А.Д. Коншина