63/2022-25728(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

(р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-17114/2021

город Вологда

09 марта 2022 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л :

внести в контракт от 26.07.2021 № СТ-3/2021 «Капитальный ремонт  школьного стадиона БОУ СМР «СОШ № 5» в г. Сокол Вологодской области, 1  этап», заключенный между обществом с ограниченной ответственностью  «ТехКомСервис Теплоэнерго» и бюджетным общеобразовательным  учреждением Сокольского муниципального района «Средняя  общеобразовательная школа № 5», следующие изменения:  

пункт 3.1 контракта изложить в следующей редакции: «Сроки  выполнения работ: с момента подписания контракта по 01 июля 2022 года»;  

пункт 4 Технического задания «Описание Объекта закупки» приложение   № 1 к контракту изложить в следующей редакции: «Сроки выполнения работ: с  момента подписания контракта по 01 июля 2022 года».  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в  Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Е.В. Дегтярева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.08.2021 4:11:55

 Кому выдана Дегтярева Елена Викторовна