130/2023-25290(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А81-13441/2022

г. Салехард

06 июня 2023 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Е.В. Антоновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем И.А. Севли,  рассмотрев в открытом судебном заседании, с использованием системы веб- конференции, дело по исковому заявлению акционерного общества  «Ямалкоммунэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Производственная изоляционная компания»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 44 040 104 рублей 77 копеек и  по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Производственная изоляционная компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  к акционерному обществу «Ямалкоммунэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 6 075 980 рублей 18 копеек,  

при участии в судебном заседании: от АО «Ямалкоммунэнерго» – ФИО1, доверенность б/н от 14.12.2022 (диплом); 

от ООО «Производственная изоляционная компания» – ФИО2, доверенность б/н  от 15.01.2023 (диплом);  

установил:

акционерное общество «Ямалкоммунэнерго» обратилось в арбитражный суд с исковым  заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Производственная  изоляционная компания» о взыскании неустойки за просрочку поставки товара в размере  44 040 104 рублей 77 копеек.  

В рамках дела общество с ограниченной ответственностью «Производственная  изоляционная компания» обратилось в суд с встречным исковым заявлением к  

акционерному обществу 

Для доступа к материалам дела А81-13441/2022в режиме ограниченного доступа на 

 

«Ямалкоммунэнерго» о взыскании долга по договору поставки в размере 6 075 980  рублей 18 копеек.  

В отзыве на исковое заявление ООО «Производственная изоляционная компания»  сообщило, что истцом по первоначальному иску неправильно определен период  просрочки. Считает штрафные санкции несоразмерными допущенному нарушению,  заявил о злоупотреблении правом со стороны АО «Ямалкоммунэнерго». Представил  коррасчет неустойки согласно которому исходя из расчета «зеркальной» неустойки в  размере 0,01% штраф составляет – 286 785,31 руб.; исходя из двукратной учетной ставки  (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения, штраф составляет 1  661 000,71 руб., исходя из однократной учетной ставки (ставок) Банка России,  существовавшей в период такого нарушения, штраф составляет 830 500,36 руб. Исходя  из обстоятельств заключения и исполнения договора поставки, учитывая небольшой  период просрочки, считает, что имеется наличие несоразмерности начисленной  неустойки последствиям нарушения обязательства и подлежащей снижению до 61 687,  76 рублей, согласно представленному расчету. В удовлетворении требований АО  «Ямалкоммунэнерго» о взыскании штрафа за нарушение сроков поставки в части,  превышающей 61 687,76 руб. просит отказать; снизить штраф за несвоевременную  поставку товара, исходя из однократной учетной ставки Банка России, существовавшей в  период такого нарушения в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения  обязательства и значительным превышением величины, достаточной для компенсации  потерь кредитора.  

В рамках встречного искового заявления ООО «Производственная изоляционная  компания» просит взыскать с АО «Ямалкоммунэнерго» задолженность по договору  поставки от 24.06.2022 № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 в размере 6 075 980 руб. 18 коп.  

В возражениях на встречное исковое заявление АО «Ямалкоммунэнерго» заявило,  что акт сверки взаимных расчетов и товарные накладные не подтверждают факт  задолженности без первичной бухгалтерской документации хозяйственных операций.  Считает, что ООО «Производственная изоляционная компания» не представлены  доказательства, подтверждающие наступления обязательства по оплате со стороны АО  «Ямалкоммунэнерго». Уточнило исковые требования, просило взыскать с  ООО «Производственная изоляционная компания» неустойку в общем размере  42 178 815,94 руб., в том числе:  

- 4 617 958,77 руб. по договору поставки № ЯКЭ-ЯМР-11-22-64664 от 20.05.2022,  - 23 925 064,37 руб. по договору поставки № ЯКЭ-ИД-24-22/59828 от 25.03.2022,  - 13 635 792,80 руб. по договор поставки № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 от 24.03.2022.  

Уточненные исковые требования были приняты судом к рассмотрению. 

До начала судебного заседания от ООО «Производственная изоляционная  компания» в суд поступили возражения на консолидированную позицию  АО «Ямалкоммунэнерго». Исходя из двукратной учетной ставки по расчетам  ООО «Производственная изоляционная компания» неустойка составила  1 661 000 руб. 71 коп.; исходя из однократной учетной ставки (ставок) Банка России,  существовавшей в период такого нарушения, штраф составляет 830 500,36 руб.; исходя  из расчета «зеркальной» неустойки в размере 0,01% штраф составляет – 286 785,31 руб.  

От АО «Ямалкоммунэнерго» поступил отзыв на возражения  ООО «Производственная изоляционная компания». Считает, что дополнительными  соглашениями к договорам сроки поставки не изменялись. Указал, что  ООО «Производственная изоляционная компания» не представило доказательств  несоразмерности неустойки.  

ООО «Производственная изоляционная компания» заявило ходатайство о  приобщении конррасчета. Просило снизить размер неустойки до двойной ставки  рефинасирования (7,5 х 2 = 15% годовых), которая, исходя составит:  

- по всем договорам без учета дополнительных соглашений, исходя из ставки 15%  годовых - 2 222 261,56 руб. (5 407 503,14 руб. /36,5% х 15%)  

- по всем договорам без учета дополнительных соглашений, исходя из ставки 15%  годовых - 566 701,33 руб. (1 378 973,26 руб. /36,5% х 15%).  

Оценив представленные доказательства, суд считает, что первоначальные  исковые требования подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.  

Из материалов дела следует, что между АО «Ямалкоммунэнерго» (покупатель),  ООО «Производственная изоляционная компания» (поставщик) были заключены  следующие договоры поставки:  

- Договор поставки № ЯКЭ-ЯМР-11-22-64664 от 20.05.2022; 

- Договор поставки № ЯКЭ-ИД-24-22/59828 от 25.03.2022;  - Договор поставки № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 от 24.03.2022.  

В соответствии с условиями договора № ЯКЭ-ЯМР-11-22-64664 поставщик  принял на себя обязательства поставить продукцию производственно-технического  назначения (товар) по наименованию, в количестве и сроки согласно условиям договора,  а покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар в установленном  договором порядке и размере.  

Наименование, ассортимент, количество, комплектность, цена и сроки, условия и  порядок поставки товара, форма расчетов, грузополучатель, и иные условия согласованы  сторонами в спецификациях к договору.  

По условиям приложения № 1 поставщик -должен поставить товар на общую  сумму 30 000 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 20%.  

В соответствии с условиями договора поставка товара должна быть осуществлена  в срок не позднее 30.06.2022.  

Адрес поставки - г. Лабытнанги, территория ООО «Сервис-Транспорт». 

Поставка товара осуществляется путем его доставки в адрес грузополучателя,  указанного в приложениях, на станцию назначения, водным транспортном,  автомобильным либо авиатранспортом в порт/пункт/аэропорт назначения, или на  условиях выборки Товара (пункт 5.1 договора).  

В соответствии с п. 5.3 договора обязательство поставщика по поставке  (передаче) товара покупателю (грузополучателю) считается исполненным с момента  передачи всей партии товара в полном комплекте (если товар поставляется в комплекте),  предусмотренной приложениями, в пункте назначения (на железнодорожной станции, в  аэропорту, в порту, на пристани и т.д.), указанном в реквизитах покупателя  (грузополучателя) в приложениях.  

Дата поставки и момент перехода правя, собственности на товар от поставщика к  покупателю (грузополучателю) определяется моментом передачи товара покупателю  (грузополучателю) и подписания уполномоченными представителями сторон  транспортного (товарно-транспортного) документа.  

Все риски утраты или порчи (повреждения) товара переходят от поставщика к  покупателю с даты передачи товара покупателю (грузополучателю), которая  определяется по календарному штемпелю, проставленному перевозчиком на  транспортном (товарно-транспортном) документе (автонакладной, железнодорожной  накладной, авианакладной и т.д.) при прибытии товара в пункт назначения (на  железнодорожную станцию, в аэропортов порту, на пристани и т.д.), при условии, что  поставщиком (грузоотправителем) надлежащим образом выполнены все обязанности  перед перевозчиком в отношении товара и платежей/сборов, связанных с его перевозкой,  в связи с чем покупатель (грузополучатель) получил фактическую возможность принять  товар от перевозчика согласно действующему законодательству РФ.  

Под партией товара понимается все позиции товара, указанные в каждом  отдельном приложении к договору.  

Товар в адрес покупателя поставлен поставщиком частями с нарушением сроков  поставки, а именно:  

- 04.07.2022, согласно товарной накладной формы ТОРГ-12 № 484 от 29.06.2022;  

- 06.07.2022, согласно товарным накладным формы ТОРГ-12 № 483 от 29.06.2022,   № 486 от 01.07.2022;  

- 08.07.2022, согласно товарной накладной формы ТОРГ-12 № 498 от 04.07.2022;  - 11.07.2022, согласно товарной накладной формы ТОРГ-12 № 504 от 05.07.2022;  

- 12.07.2022, согласно товарным накладным формы ТОРГ-12 № 524 от 08.07.2022,   № 532 от 09.07.2022;  

- 26.07.2022, согласно товарным накладным формы ТОРГ-12 № 631 от 22.07.2022,   № 635 от 23.07.2022;  

- 27.07.2022, согласно товарной накладной формы ТОРГ-12 № 634 от 23.07.2022.  

Партия товара, предусмотренная Спецификацией № 1 к договору, в соответствии  с товарно-транспортными накладными поставлена в адрес покупателя 27.07.2022.  

По расчетам АО «Ямалкоммунэнерго», нарушение срока поставки товара  составляет 27 календарных дней.  

В соответствии с п. 7.1 договора в случае просрочки поставки (недопоставки, не  поставки) товара, устранения дефектов, замены и доукомплектации товара, поставщик  обязан уплатить пени в размере 1% от общей цены товара за каждый календарный день  просрочки, но не более 10% от общей цены товара.  

В случае, если просрочка в поставке (недопоставке) товара, устранении дефектов  товара, замене и доукомплектации товара превысит 20 (двадцать) календарных дней,  поставщик уплачивает покупателю штраф в размере 15% от общей цены товара (без  уплаты пени за просрочку поставки), а также возмещает все понесенные покупателем  убытки.  

В соответствии с условиями договора № ЯКЭ-ЯМР-11-22-64664,  АО «Ямалкоммунэнерго» начислило неустойку в размере 4 617 958 руб. 77 коп.  

В соответствии с условиями договора № ЯКЭ-ИД-24-22/59828 поставщик принял  на себя обязательства поставить продукцию производственно-технического назначения  (далее — товар) по наименованию, в количестве и сроки согласно условиям договора, а  покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар в установленном  договором порядке и размере. Наименование, ассортимент, количество, комплектность,  цена и сроки, условия и порядок поставки товара, форма расчетов и иные условия  согласованы сторонами договора в спецификации.  

Общая цена товара, согласно спецификациям, составляет 166 073 623 руб. 03 коп.  

(с НДС 20%). 

В соответствии с согласованными спецификациями поставка товара произведена  

в следующие филиалы АО «Ямалкоммунэнерго»: Спецификация № 1. 

Грузополучатель - филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкинский.  Общая цена товара по Спецификации № 1 - 51 123 104 руб. 20 коп. (с НДС 20%).  

Срок поставки в течение 20 календарных дней с даты подписания договора (не  

позднее 14.04.2022). Спецификация № 2. 

Грузополучатель - филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Муравленко.  

Общая цена товара по спецификации № 2 - 74 307 606 руб. 22 коп., с учетом  

дополнительного соглашения № 1 к договору от 20.04.2022, в соответствии с которым  

сторонами уточнен объем и номенклатура поставляемого товара по настоящей  

спецификации. 

Срок поставки в течение 90 календарных дней с даты подписания Договора (не  

позднее 23.06.2022). Спецификация № 3. 

Грузополучатель - филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе.  Общая цена товара по спецификации № 3 - 6 573 193 руб. 87 коп.  

Срок поставки в течение 90 календарных дней с даты подписная договора (не  

позднее 23.06.2022). Спецификация № 4. 

Грузополучатель - филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе.  Общая цена товара по спецификации № 4 - 34 069 718 руб. 74 коп.  

Срок поставки в течение 90 календарных дней с даты подписная договора (не  

позднее 23.06.2022). 

Поставка товара осуществляется путем его доставки в адрес грузополучателя,  

указанного, в приложениях, на станцию назначения, водным транспортном,  

автомобильным либо авиатранспортом в порт/пункт/аэропорт назначения, или на  

условиях выборки товара (пункт 5.1 договора № ЯКЭ-ИД-24-22/59828).  

В соответствии с п. 5.3 договора № ЯКЭ-ИД-24-22/59828 обязательство  

поставщика по поставке (передаче) товара покупателю (грузополучателю) считается  

исполненным с момента передачи всей партии товара в полном комплекте (если товар  

поставляется в комплекте), предусмотренной приложениями, в пункте назначения (на  

железнодорожной станции, в аэропорту, в порту, на пристани и т.д.), указанном в  реквизитах покупателя (грузополучателя) в приложениях.  

Дата поставки и момент перехода права собственности на товар от поставщика к  покупателю (грузополучателю) определяется моментом передачи товара покупателю  (грузополучателю) и подписания уполномоченными представителями сторон  транспортного (товарно-транспортного) документа.  

Под партией товара понимается все позиции товара, указанные в каждом  отдельном приложении к договору.  

Поставщиком нарушены обязательства, предусмотренные Договором № ЯКЭ-ИД24-22/59828, в части сроков поставки товара:  

1. Партия товара, предусмотренная спецификацией № 1 к договору № ЯКЭ-ИД24-22/59828, в соответствии с товарно-транспортными накладными поставлена в адрес  покупателя 29.07.2022.  

Просрочка поставки товара по спецификации № 1 к договору № ЯКЭ-ИД-2422/59828 составляет 106 календарных дней (с 15.04.2022 по 29.07.2022).  

2. Партия товара, предусмотренная спецификацией № 2 к договору № ЯКЭ-ИД24-22/59828, в соответствии с товарно-транспортными накладными поставлена в адрес  покупателя.01.08.2022.  

Просрочка поставки товара по спецификации № 2 к договору № ЯКЭ-ИД-2422/59828 составляет 39 календарных дней (с 24.06.2022 по 01.08.2022).  

3. Партия товара, предусмотренная спецификацией № 4 к договору № ЯКЭ-ИД24-22/59828, в соответствии с товарно-транспортными накладными поставлена в адрес  покупателя 01.08.2022.  

Просрочка поставки товара по спецификации № 4 к договору составляет 39  календарных дней (с 24.06.2022 по 01.08.2022).  

В соответствии с условиями договора № ЯКЭ-ИД-24-22/59828,  АО «Ямалкоммунэнерго» начислена неустойка в размере 23 925 064 руб. 37 коп.  

В соответствии с условиями договора № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 поставщик принял  на себя обязательства поставить продукцию производственно-технического назначения  (товар) по наименованию, в количестве и сроки согласно условиям договора, а  покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар в установленном  договором порядке и размере.  

Наименование, ассортимент, количество, комплектность, цена и сроки, условия и  порядок поставки товара, форма расчетов и иные условия согласованы сторонами  договора в спецификациях к договору № ЯКЭ-ИД-25-22/61882.  

Общая цена товара, составляет 103 313 8,78 руб. 59 коп. (с НДС 20%) (с учетом  

заключенных дополнительных соглашений № 1 от 20.04.2022, № 2 от 24.06.2022, № 3 от  

02.09.2022). 

В соответствии с согласованными спецификациями поставка товара произведена  

в следующие филиалы АО «Ямалкоммунэнерго»: Спецификация № 1. 

Грузополучатель - филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкинский.  Общая цена товара по спецификации № 1 - 7 710 970 руб. 52 коп. (с НДС 20%).  

Срок поставки в течение 20 календарных дней с даты подписания договора (не  

позднее 13.04.2022). Спецификация № 2. 

Грузополучатель - филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе.  Общая цена товара по спецификации № 3 - 7 494 693 руб. 27 коп. (с НДС 20%).  

Срок поставки в течение 90 календарных дней с даты подписная договора (не  

позднее 22.06.2022). Спецификация № 3. 

Грузополучатель - филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Муравленко.  Общая цена товара по спецификации № 2 - 51 699 592 руб. 89 коп. (с НДС 20%).  

Срок поставки в течение 90 календарных дней с даты подписания договора (не  

.позднее 22.06.2022) Спецификация № 4. 

Грузополучатель - филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе.  Общая цена товара по спецификации № 4 - 36 408 621 руб. 91 коп. (с НДС 20%).  

Срок поставки в течение 90 календарных дней с даты подписная договора (не  

позднее 22.06.2022. 

Поставка товара осуществляется путем его доставки в адрес грузополучателя,  

указанного в приложениях, на станцию назначения, водным транспортном,  

автомобильным либо авиатранспортом в порт/пункт/аэропорт назначения, или на  

условиях выборки товара (пункт 5.1 договора № ЯКЭ-ИД-25-22/61882). 

В соответствии с п. 5.3 договора № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 обязательство  

поставщика по поставке (передаче) товара покупателю (грузополучателю) считается  

исполненным с момента передачи всей партии товара в полном комплекте (если товар  

поставляется в комплекте), предусмотренной приложениями, в пункте назначения (на  

железнодорожной станции, в аэропорту, в порту, на пристани и т.д.), указанном в  

реквизитах покупателя (грузополучателя) в приложениях. 

Дата поставки и момент перехода права собственности на товар от поставщика к  покупателю (грузополучателю) определяется моментом передачи товара покупателю  (грузополучателю) и подписания уполномоченными представителями сторон  транспортного (товарно-транспортного) документа.  

Под партией товара понимается все позиции товара, указанные в каждом  отдельном приложении к договору.  

Поставщиком нарушены обязательства, предусмотренные договором № ЯКЭ-ИД25-22/61882, в пасти сроков поставки товара:  

1. Партия товара, предусмотренная спецификацией № 1 к договору № ЯКЭ-ИД25-22/61882, в соответствии с товарно-транспортными накладными поставлена в адрес  покупателя 26.07.2022.  

Следовательно, просрочка поставки товара по спецификации № 1 к договору   № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 составляет 104 календарных дня (с 14.04.2022 по 26.07.2022).  

2. Партия товара, предусмотренная спецификацией № 2 к договору № ЯКЭ-ИД25-22/61882, в соответствии с товарно-транспортными накладными поставлена в адрес- покупателя 08.08.2022.  

Следовательно, просрочка поставки товара по спецификации № 2 к договору  составляет 47 календарных дней (с 23.06.2022 по 08.08.2022).  

3. Партия товара, предусмотренная спецификацией № 3 к договору № ЯКЭ-ИД25-22/61882, в соответствии с товарно-транспортными накладными поставлена в адрес  Покупателя 30.09.2022.  

Следовательно, просрочка поставки товара по спецификации № 3 к договору   № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 составляет 100 календарных дней (с 23.06.2022 по 30.09.2022).  

4. Партия товара, предусмотренная спецификацией № 4 к договору № ЯКЭ-ИД25-22/61882 в соответствии с товарно-транспортными накладными поставлена в адрес  покупателя 09.09.2022.  

Следовательно, просрочка поставки товара по спецификации № 4 к договору  составляет 79 календарных дней (с 23.06.2022 по 09.09.2022).  

В соответствии с условиями договора № ЯКЭ-ИД-24-22/61882,  АО «Ямалкоммунэнерго» начислена неустойка в размере 13 635 792 руб. 80 коп.  

Общий размер неустойки по трем договорам составил 42 178 815 руб. 94 коп. 

АО «Ямалкоммунэнерго», с целью урегулирования спора в досудебном порядке, в  адрес ООО «ПИК» 03.11.2022 была направлена претензия исх.1.01-05.1-2022/2850, с  предложением в добровольном порядке произвести выплату неустойки.  

В ответе (исх. № 295/11 от 10.11.2022) на указанную претензию ООО «ПИК»  выразило несогласие, в части правомерности начисленной неустойки по спорным  договорам поставки.  

Поскольку ООО «ПИК» не исполнило требования по оплате неустойки просрочку  поставки товара, АО «Ямалкоммунэнерго» обратилось в суд с настоящим иском.  

Обращаясь в суд с встречным исковым заявлением ООО «Производственная  изоляционная компания» указало на наличие задолженности по договору поставки от  24.06.2022 № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 в размере 6 075 980 руб. 18 коп., в подтверждение  чего представило акты сверки взаимных расчетов и товарные накладные.  

ООО «ПИК» сообщило, что до настоящего времени обязательства по договору  поставки от 24.06.2022 № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 не выполнены, что послужило  основанием для обращения в суд с встречным исковым заявлением о взыскании в  принудительном порядке задолженности.  

Разрешая спор по существу, суд руководствуется следующим.  

В силу части 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из  оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий  граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими  актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают  гражданские права и обязанности.  

В связи с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из  договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных  сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.  

Статьей 506 ГК РФ предусмотрено, что по договору поставки поставщик- продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в  обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю  для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных  с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

АО «Ямалкоммунэнерго» заявлено требование о взыскании с ООО «ПИК», с  учетом уточнения, неустойки в размере 42 178 815 руб. 94 коп.  

В соответствии с частью 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней)  признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник  обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Условиями п. 7.2 договоров №№ ЯКЭ-ИД-25-22/61882, № ЯКЭ-ИД-24-22/59828  предусмотрено, что в случае просрочки поставки (недопоставки, непоставки) товара,  

устранению дефектов, замене и доукомлектации товара, передаче документации,  указанной в п. 5.5 договора, поставщик обязан уплатить пени в размере 1% от общей  цены товара, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей цены  товара.  

В случае, если просрочка в поставке (недопоставке) товара, устранении дефектов  товара, замене и доукомплектации товара превысит 20 календарных дней с момента  уведомления, поставщик уплачивает покупателю штраф в размере 15% от общей цены  товара (без уплаты пени за просрочку поставки), а также возмещения всех понесенных  покупателем убытков.  

В силу ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во  внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.  

Учитывая, что сторонами не согласовано условие о том, с какого уведомления  начинается отсчет 20 календарных дней, суд считает, что указанное условие сторонами  не согласовано, в связи с чем, подлежат применению условия об уплате пеней в размере  1% от общей цены товара, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от  общей цены товара.  

Учитывая, заявленное ООО «Производственная изоляционная компания»  ходатайство о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ, принимая во  внимание размер ответственности покупателя по договорам (0,01 % от суммы  несвоевременно перечисленного платежа) суд считает необходимым снизить размер  ответственности поставщика до 0,1 % от цены товара за каждый день просрочки, но не  более 10 %.  

Исходя из вышеизложенного, судом произведен собственный расчет неустойки по  договорам № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 и № ЯКЭ-ИД-24-22/59828.  

По договору № ЯКЭ-ИД-24-22/59828 уменьшению подлежит неустойка,  начисленная по спецификации № 1 до 5 112 310 руб. 42 коп., по спецификации № 2 до  2 897 996 руб. 64 коп., по спецификации № 3 до 1 328 719 руб. 03 коп. Всего по  указанному договору неустойка составляет 9 339 026 руб. 09 коп.  

По договору № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 уменьшению подлежит неустойка по  спецификации № 1 до 771 097 руб. 05 коп., по спецификации № 2 до 4 678 569 руб.  29 коп., по спецификации № 3 до 2 876 281 руб. 13 коп. Всего по указанному договору  неустойка составляет 8 325 947 руб. 47 коп.  

По договору № ЯКЭ-ЯМР-11-22-64664 неустойка с учетом ее уменьшения до  0,1 % составляет 810 000 руб.  

При этом, суд соглашается с доводами АО «Ямалкоммунэнерго» о том, что  дополнительными соглашениями к договорам сроки поставки товара не изменялись,  следовательно просрочку поставки следует считать с момента заключения договоров,  согласно п. 1 спецификаций, а также п. 5.3 договоров.  

Сроки начисления неустойки определены покупателем верно. 

Принимая во внимание вышеизложенное, суд удовлетворят требования  АО «Ямалкоммунэнерго» о взыскании с ООО «Производственная изоляционная  компания» неустойки в размере 18 474 973 руб. 56 коп.  

Встречные исковые требования ООО «Производственная изоляционная  компания» о взыскании с АО «Ямалкоммунэнерго» подлежат удовлетворению в полном  объеме исходя из следующего.  

В соответствии со статьей 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые  товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором  поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется  получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не  оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты  поставленных товаров от покупателя.  

Условиями договоров предусмотрено, что оплата товара производится в течение 7  рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарной  накладной (Торг-12) или универсального передаточного документа (УПД) и при условии  получения покупателем (грузополучателем) документов, указанных в п. 5.5 договора,  если иное не указано в приложениях.  

Пунктом 5.5 договоров предусмотрено, что не позднее 5 рабочих дней с даты  отгрузки товара поставщик обязан выслать в адрес грузополучателя, указанного в  приложениях, следующие документы:  

- оригинал счета на оплату на отгруженный Товар, оформленный в соответствии с  действующим законодательством РФ;  

- товаросопроводительные (товарно-транспортные) документы (включая ж/д  накладную, квитанции о приеме груза к перевозке) с указанием наименования,  ассортимента и объемов Товара, числа мест, номеров вагонов или контейнеров, иных  транспортных средств;  

- первичные документы, подтверждающие отпуск Товара Поставщиком  (товарную накладную (ТОРГ-12);  

- (технический) паспорт изделия (если предусмотрен для данного вида Товара); 

- сертификат качества (паспорт качества) (если предусмотрен для данного вида  Товара);  

- сертификат соответствия (сертификат соответствия российским стандартам на  комплектующие к Товару импортного производства, технический паспорт) (для Товара  иностранного происхождения, если предусмотрен для данного вида Товара;  

- оригинал сертификата происхождения Товара с официально заверенным  надлежащим образом переводом на русский язык сертификата (для Товара иностранного  происхождения);  

- инструкции (правила) по хранению, обслуживанию, ремонту и эксплуатации  (применению) Товара (если это требуется исходя из особенностей Товара);  

- разрешение Федеральной службы России по технологическому, экологическому  и атомному надзору на применение Товара;  

- иные документы, если действующее законодательство РФ предусматривает их  оформление на данный вид Товара;  

- иные документы, указанные в Приложениях. 

В обоснование встречных исковых требований ООО «Производственная  изоляционная компания» представило в суд товарные накладные и акт сверки взаимных  расчетов № 811 от 09.11.2022.  

АО «Ямалкоммунэнерго» по существу требования ООО «Производственная  изоляционная компания» не оспорило.  

Доводы АО «Ямалкоммунэнерго» о том, что ООО «Производственная  изоляционная компания» не представлены доказательства, подтверждающие  наступления обязательства по оплате со стороны АО «Ямалкоммунэнерго» не может  быть принят во внимание в связи со следующим.  

В силу пункта 1 статьи 464 Гражданского кодекса, если продавец не передает или  отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или  документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми  актами или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 456), покупатель вправе назначить  ему разумный срок для их передачи.  

Пунктом 2 статьи 464 Гражданского кодекса предусмотрено, что в случае, когда  принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в  указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено  договором.  

Таким образом, действующим законодательством установлены конкретные права  покупателя, которыми он может воспользоваться при непредставлении сопутствующей  товару технической документации.  

Между тем, доказательств, свидетельствующих об установлении покупателем  разумного срока для передачи документов, относящихся к товару,  АО «Ямалкоммунэнерго» в материалы дела не представлено.  

Кроме того, не предоставление документации не может быть основанием для  неоплаты поставленного и принятого товара.  

Учитывая изложенное, суд удовлетворяет требование ООО «Производственная  изоляционная компания» о взыскании с АО «Ямалкоммунэнерго» задолженности за  поставленный товар в размере 6 075 980 руб. 18 коп.  

С учетом зачет взаимных требований с общества с ограниченной  ответственностью «Производственная изоляционная компания» подлежат взысканию в  пользу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» денежные средства в размере  12 433 216 рублей 37 копеек.  

Статьёй 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь требованиями статей 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

уточненные исковые требования акционерного общества «Ямалкоммунэнерго»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственная  изоляционная компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу  акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  неустойку за просрочку поставки товара по договорам поставки № ЯКЭ-ЯМР-11-2264664 от 20.05.2022, № ЯКЭ-ИД-24-22/59828 от 25.03.2022, № ЯКЭ-ИД-25-22/61882 от  24.03.2022 в размере 18 474 973 рублей 56 копеек, расходы по уплате государственной  пошлины в размере 87 603 рублей 00 копеек. Всего взыскать  18 562 576 рублей 56 копеек.  

В остальной части иска отказать. 

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Производственная изоляционная компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  удовлетворить.  

Взыскать с акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Производственная изоляционная компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  задолженность в размере 6 075 980 рублей 18 копеек, расходы по уплате  государственной пошлины в размере 53 380 рублей. Всего взыскать  6 129 360 рублей 18 копеек.  

С учетом зачет взаимных требований взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Производственная изоляционная компания» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежные средства в размере  12 433 216 рублей 37 копеек.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии  со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение,  выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в  деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в  арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Е.В. Антонова

 

Судья 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Ка значейство РоссииДата 27.10.2022 9:31:00

Кому выдана Антонова Елена Викторовна