Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-276250/24-96-1892

17 марта 2025 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 24.02.2025

Полный текст решения изготовлен 17.03.2025

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАРТСТРОЙ" Московская область, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 504801001, 142306, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФИО1, Г ФИО1, УЛ САДОВНИКИ, Д. 12А 

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ" Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.11.2017, ИНН: 

<

***>, КПП: 771401001, 125167, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 37, К. 3, ПОМ. КОМН X, 35 

о взыскании 3 718 215,55 р. 

при участии: 

от истца: ФИО2 по дов. от 01.11.24г.; диплом; 

от ответчика: ФИО3 по дов. от 09.01.25г.; диплом,

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАРТСТРОЙ" (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании задолженности по Договору подряда №4/СМР от 17.10.2018 г. в сумме 3528066 (Три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 49 коп.; неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ по состоянию на 17.09.2024 г. в сумме 190149 (Сто девяноста тысяч сто сорок девять рублей 06 коп.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика по иску возражал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав представителей сторон спора, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Частью 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

17.10.2018 г. между ООО "ФОРУМ" (Заказчик) и ООО "ПРОМАРТСТРОЙ" (Подрядчик) заключен Договор подряда №4/СМР (далее – «Договор»).

Во исполнение обязательств из указанного Договора, ООО "ПРОМАРТСТРОЙ", как Подрядчик, выполнил по заданию Заказчика комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ в объёме и сроки, предусмотренные Договором и дополнительными соглашениями к нему.

Выполненные работы приняты ООО "ФОРУМ", как Заказчиком, без замечаний, в подтверждение чего сторонами подписаны Акты о приёмке выполненных работ (Ф. КС-2) и справки о стоимости работ (Ф. КС-3).

Дополнительным соглашением №4 от 15.09.2023 г. к Договору, сторонами установлен график финансирования работ, выполненных подрядчиком и не оплаченных заказчиком в сумме 6228066 (Шесть миллионов двести двадцать восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 50 коп., на период с 30.09.2023 г. по 31.08.2024 г.

В нарушение указанного графика ООО "ФОРУМ" с 29.02.2024 г. оплату не производило, в связи с чем у ООО "ФОРУМ" по состоянию на 01.09.2024 г. в пользу ООО "ПРОМАРТСТРОЙ" образовалась задолженность в общей сумме 3528066 (Три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 49 коп.

ООО "ФОРУМ", как Заказчик, свои обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ выполнило не в полном объёме.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве не исключают правомерности требований истца, опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами, сделаны при не правильном и не верном применении норм материального и процессуального права, регулирующих спорные правоотношения.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком. 

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

Кроме того, ответчик не воспользовался правом на отказ от договора на основании ст. 717 ГК РФ. 

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

В свою очередь иных доказательств, подтверждающих наличие недостатков в выполненных истцом работах, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Поскольку доказательств погашения спорной задолженности по оплате выполненных истцом работ в предусмотренный договором срок ответчиком не представлено, требования иска о взыскании 3 528 066 руб. 49 коп. основного долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ по состоянию на 17.09.2024 г. в сумме 190149 (Сто девяноста тысяч сто сорок девять рублей 06 коп.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

П.п.18.4. Договора предусмотрено, что в случае несвоевременной опты Заказчиком счетов, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости просроченного платежа. Оплата неустойки будет уплачиваться Заказчиком согласно счёту Подрядчика в течении 20 (двадцати) рабочих дней с даты его получения.

По состоянию на 17.09.2024 г., размер неустойки, подлежащей уплате заказчиком в соответствии с вышеуказанными положениями Договора составляет 190149 (Сто девяноста тысяч сто сорок девять рублей 06 коп., исходя из следующего расчёта:

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 01.03.2024

Задолженность

Период просрочки

Формула

Проценты

с

по

дней

100 000,00

01.03.2024

17.09.2024

201

100 000,00 × 201 × 0.1%

20 100,00 р.

Итого:

20 100,00 р.

но не более 10%

10 000,00 р.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 01.04.2024

100 000,00

01.04.2024

17.09.2024

170

100 000,00 × 170 × 0.1%

17 000,00 р.

Итого:

17 000,00 р.

но не более 10%

10 000,00 р.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 02.05.2024

100 000,00

02.05.2024

17.09.2024

139

100 000,00 × 139 × 0.1%

13 900,00 р.

Итого:

13 900,00 р.

но не более 10%

10 000,00 р.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 03.06.2024

500 000,00

03.06.2024

17.09.2024

107

500 000,00 × 107 × 0.1%

53 500,00 р.

Итого:

53 500,00 р.

но не более 10%

50 000,00 р.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 01.07.2024

700 000,00

01.07.2024

17.09.2024

79

700 000,00 × 79 × 0.1%

55 300,00 р.

Итого:

55 300,00 р.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 01.08.2024

700 000,00

01.08.2024

17.09.2024

48

700 000,00 × 48 × 0.1%

33 600,00 р.

Итого:

33 600,00 р.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 02.09.2024

1 328 066,50

02.09.2024

17.09.2024

16

1 328 066,50 × 16 × 0.1%

21 249,06 р.

Итого:

21 249,06 р.

Сумма основного долга: 3 528 066,50 р.

Сумма неустойки по всем задолженностям: 190 149,06 р.

Ответчик заявил ходатайство о применении положений ст. 333 ГК РФ и снижении суммы начисленной неустойки.

Суд пришел к выводу, что оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ и уменьшения ее размера не имеется.

Пунктом 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 г. "О применения судами положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

При рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании ст. 333 ГК РФ следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" от 22.12.2011 г. N 81).

В соответствии с пунктами 71, 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств" если должником является коммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме. Также снижение неустойки допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.

Согласно пункту 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 7 от 24.03.2016 г. бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентам, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами сами по себе не могут служить основанием для снижения размера неустойки.

Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, содержащимся в определении N 277-0 от 21.12.2000 г., именно законодатель устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод конкретного лица в целях защиты прав и законных интересов других лиц (часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации). Это касается и свободы договора.

В определениях Конституционного суда РФ от 22.03.2012 N 424-0-0 и от 26.05.2011 г. N 683-0-0 указано, что п. 1 ст. 333 ГК РФ закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в статье 333 ГК РФ идет речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

При разрешении вопроса о снижение неустойки судом учтены фактические обстоятельства данного дела и не соразмерность не установлена.

При таких обстоятельствах заявленный размер неустойки подлежит удовлетворению в полном объеме.

Расчет неустойки судом проверен, произведён в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, требованиями действующего законодательства, ответчиком контррасчет не представлен. Учитывая установленные судом обстоятельства ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, требования истца в указанной части подлежат удовлетворению.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАРТСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 3 528 066 руб. 49 коп., неустойку в размере 190 149 руб. 06 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 136 546 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья П.С. Гутник