Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-32573/2022

18 июля 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с.з. ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ" (ОГРН: 

<

***>) 

 ответчик: общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ-2" (ОГРН: 

<

***>) 

при участии

- от истца: ФИО2; 

- от ответчика: не явился (извещен);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ" (далее – ООО "ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ-2" (далее – ООО "МОНОЛИТСТРОЙ-2") о взыскании 6420232,03 руб. задолженности, 758165,03 руб. неустойки по договору субподряда от 06.04.2021 № УШ/8,7,6/ВК/06-04-21 (далее – Договор).

Представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ" (субподрядчиком) и ООО  "МОНОЛИТСТРОЙ-2" (генсубподрядчиком) заключен Договор, по условиям которого  Субподрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Генсубподрядчика выполнить полный комплекс работ «под ключ» по монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации спальных корпусов №/№3,4,5 Объекта «завершение строительства здания детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...> литера Е)»(далее - объект), в соответствии с технической, рабочей документацией, Сводным расчетом цены договора (Приложением № 1) (далее - работы), а Генсубподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить оплату по настоящему договору в пределах договорной цены.     

Цена договора составляет: 16163576,32 руб. (п. 3.1.). 

Согласно п. 3.4. Договора оплата выполненных по договору работ производится ежемесячно, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ по договору, исходя из объема таких работ и цены договора в соответствии Расчетом цены договора при условии соблюдения положений настоящего пункта, а также п. 3.6, 3.7 настоящего договора.

В соответствии с п. 3.5. договора в целях проведения промежуточного финансирования по Договору, в срок до 16 числа каждого месяца Субподрядчик обязан представлять Генсубподрядчику по работам, выполненным в отчетном месяце Генсубподрядчиком и принятым без претензий начальником участка и руководителем проекта Генсубподрядчика, документацию в следующем составе:

По п. 3.5.1. Договора: справка по выполненным в отчетном месяце работам с визой Службой строительного контроля и представителя Генсубподрядчика (начальник участка и руководитель проекта); Исполнительная документация по законченным в отчетном месяце видам работ предъявляются представителю Генсубподрядчика на Объекте (в 5-ти экз. с реестрами для передачи) до 05 числа, следующего за отчетным месяцем, согласно п. 2.8. Договора.

После сдачи Генсубподрядчику и подписания выполненных работ за отчетный месяц Службой строительного контроля и Заказчиком, Субподрядчик предоставляет на проверку в отдел ПОиСДГ Генсубподрядчика следующие документы.

Согласно п. 3.5.2.1. Договора: Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в 3-х экземплярах с визами:

• начальника участка Генсубподрядчика;

• руководителя проекта Генсубподрядчика;

• ответственного специалиста Генсубподрядчика по Исполнительной документации.

По п. 3.5.2.2. Договора Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а (в 3 экз.) с визой руководителя проекта Генсубподрядчика;

В силу пункта 3.5.2.3. Договора Справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 в 3-х экземплярах.

В п. 2 дополнительного соглашения от 08.07.2021 № 2 к Договору стороны согласовали суму аванса в размере 5000000 руб. 

В соответствии с п. 3.14. Договора окончательный расчет по Договору (включая выплату «сумм резервирования» размере 5%) производится Генсубподрядчиком в течение шести календарных месяцев после получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Акта приемки объекта капитального строительства и подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, а также передачи результата выполненных работ организациям, выполняющих работы по устройству инженерных разделов, при условии предоставления следующей документации:

- Счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства;

- Сертификатов и другой документации, удостоверяющей качество использованных при проведении работ Материалов;

- Исполнительной документации по выполненным работам в полном объеме в соответствии со СНиП и электронную версию исполнительной документации, записанной на CD диск в формате PDF; 

- Предварительный Акт сдачи-приемки работ по Договору, согласно Приложению № 4, подписанный представителями обеих сторон;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору, согласно Приложению №5, подписанный представителями обеих сторон.

По п. 3.15. Договора Стороны согласовали стоимость генподрядных услуг в размере 4% от стоимости выполненных Субподрядчиком работ, указанных в форме КС-3.

В силу п. 5.13. Договора в случае просрочки исполнения Генсубподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается равным одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Стороны Договора заключили дополнительное соглашение от 03.08.2021 № 3 к Договору, по условиям которого Субподрядчик принял на себя обязательство выполнить на объекте дополнительные работы по монтажу системы водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления и теплоснабжения калориферов Изолятора (здание №15) (согласно проекта шифр 75/16-15-ВК, 75/16-15-ОВ) ориентировочной стоимостью 11437432,48 руб. 

Стороны Договора подписали акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

ООО "ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ" обратилось в претензии от 06.12.2021 к ООО "МОНОЛИТСТРОЙ-2" с требованием оплаты задолженности. 

Отказ ООО "МОНОЛИТСТРОЙ-2" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ" в суд с настоящим иском. 

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт сдачи-приемки работ стоимостью 18 623 613,30 руб. подтверждается подписанными ООО "МОНОЛИТСТРОЙ-2" без возражений по объему и качеству актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат.

В материалы дела от ответчика отзыв на исковое заявление. 

Поскольку ответчик не представил доказательства оплаты принятых работ, суд удовлетворяет требование о взыскании 6420232,03 руб. задолженности.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец начислил 758165,03 руб. неустойки за период с 01.12.2021 по 28.03.2022 по пункту 5.13. Договора. 

Суд приходит к выводу о том, что при расчете неустойки, подлежащей взысканию в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по договору, подлежит применению размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения судебного решения (9,5%), что по расчету суда составляет 360128,39 руб. 

Требование о взыскании процентов подлежит удовлетворению в размере 360128,39 руб., в остальной части суд отказывает в иске.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ-2" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТЕРМОЛАЙН ИНЖИНИРИНГ" 6420232,03 руб. задолженности, 360128,39 руб. неустойки и 55626 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.