АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-8797/2019

г. Ярославль

29 июля 2019 года

Резолютивная часть решения оглашена  04 июля 2019 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Лапочкиной И.М.

при ведении протокола судебного заседания серктретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Виннер" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  муниципальному казенному учреждению "Агентство по строительству" города Ярославля (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   3085425.18  руб.,

при участии:

от истца – ФИО2 по доверенности от 03.07.2019

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 25.12.2018 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Виннер" обратилось в суд с иском к муниципальному казенному учреждению "Агентство по строительству" города Ярославля о взыскании 3 085 425,18  руб.,

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признавал по мотивам, изложенным в отзыве на иск, сумму задолженности не оспаривал, привел контррасчет неустойки.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Взаимоотношения сторон возникли на основании муниципальных контрактов №№ 348-18Д – 367-18Д, №№ 369-18Д от 22.08.2018.  

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 348-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабеля огнестойкого низкотоксичного для систем пожарной безопасности КСРВНГ(А)-FRLSLTx2*0,97 и трубы гофрированной ПВХ Ø=16 мм (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 348-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/1 (Приложение № 3) и составляет 99 949,54 руб. (Девяносто девять тысяч девятьсот сорок девять рублей 54 копейки), в том числе НДС (18%) - 15 246,54 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 349-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабеля огнестойкого низкотоксичного для систем пожарной безопасности 4x0,5мм КСВВНГ(А)-LSLTx4*0,5 и труб гофрированных ПВХ Ø=16 мм и Ø =25 мм (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 349-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/2 (Приложение № 3) и составляет 99 063,36 руб. (Девяносто девять тысяч шестьдесят три рубля 36 копеек), в том числе НДС (18%) - 15 111,36 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 350-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабелей огнестойких низкотоксичных для систем пожарной безопасности 4x0,5мм КСВВНГ(А)-LSLTx4*0,5., KBBГнг(A)-FRLSLTx7*0,75., труб гофрированных ПВХ Ø=16 мм, Ø=20 мм., Ø=25 мм (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 350-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/3 (Приложение № 3) и составляет 98 652,72 руб. (Девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 72 копейки), в том числе НДС (18%) - 15 048,72 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 351-18Д предметом является выполнение дополнительных работ но прокладке кабеля огнестойкого низкотоксичного для систем пожарной безопасности 4x0,5мм КСВВНГ(А)-LSLTx4*0,5., труб гофрированных ПВХ Ø=16 мм и Ø=20 мм (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 351-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/4 (Приложение № 3) и составляет 99 005,54 руб. (Девяносто девять тысяч пять рублей 54 копейки), в том числе НДС (18%) - 15 102,54 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 352-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабелей огнестойких низкотоксичиых для систем пожарной безопасности 4x0,5мм КСВВНГ(А)-LSLTx4*0,5„ KCPBНГ(A)-FRLSLTx2*0,97, труб гофрированных ПВХ Ø=16 мм и Ø=20 мм (далее -Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 352-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/5 (Приложение № 3) и составляет 99 966,06 руб. (Девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 06 копеек), в гам числе НДС (18%) - 15 249,06 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 353-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабелей огнестойких низкотоксичных для систем пожарной безопасности 2x0,5мм КСРВНГ(А)-FRXSLTx2*0,5., 4x0,5мм KCBBHГ(A)-LSLTx4*0,5., KCBBHГ(A)-LSLTx2*0,8., КСРВНГ(А)-FRLSLTx2*0,97 трубы гофрированной ПВХ Ø=16 мм (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее -Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 353-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/6 (Приложение №. 3) и составляет 99 200,24 руб. (Девяносто девять тысяч двести рублей 24 копенки), в том числе НДС (18%) -15 132.24 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 354-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабелей огнестойких низкотоксичпых для систем пожарной безопасности 2x0,5мм КСРВНГ(А)-FRLSLTx2*0,5., 4x0,5мм KCBBHГ(A)-LSLTx4*0,5 трубы гофрированной ПВХ Ø=16 мм (далее -Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 354-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/7 (Приложение № 3) и составляет 99 011,44 руб. (Девяносто девять тысяч одиннадцать рублей 44 копейки), в том числе НДС (18%) - 15 103,44 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 355-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабелей огнестойких низкотоксичных для систем пожарной безопасности 2x0,5мм КСРВНГ(А)-FRLSLTx2*0,5., 4x0,5мм KCBBHГ(A)-LSLTx4*0,5., KCBBHГ(A)-LSLTx2*0,8„ KCBBHГ(A)-LSLTx2*l,13, KCBBHГ(A)-FRLSLTx2*0,97, KCBBHГ(A)-FRLSLTx2*2*0,8 трубы гофрированной ПВХ Ø=16 мм (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64з (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 355-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/8 (Приложение № 3) и составляет 96 828,44 руб. (Девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 44 копейки), в том числе НДС (18%) - 14 770,44 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 356-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по монтажу шкафов контрольно-пусковых., источников вторичного питания и аккумуляторов (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 356-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/9 (Приложение № 3) и составляет 93 242,42 руб. (Девяносто три тысячи двести сорок два рубля 42 копейки), в том числе НДС (18%) - 14 223,42 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 357-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по монтажу шкафа контрольно-пускового., шкафа управления вентиляторами противодымной защиты зон безопасности для МГН., шкафов с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики, аккумуляторов (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 357-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/10 (Приложение № 3) и составляет 95 777,06 руб. (Девяносто пять тысяч семьсот семьдесят семь 06 копеек), в том числе НДС (18%) - 14 610,06 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 358-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по монтажу контроллеров двухпроводной линии связи, блоков сигнально-пусковых адресных, извещателей охранных магнитоконтактных, шкафа контрольно-пускового (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 358-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/11 (Приложение № 3) и составляет 89 983,26 руб. (Восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 26 копеек), в том числе НДС (18%) - 13 726,26 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 359-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по монтажу извещателей охранных оптико-электронных, извещателей охранно-точечных, извещателей низкопрофильных дымовых оптико-электронных, вызывной панели системы обратной связи, контрольно-пусковых блоков, адресных расширителей на 2 зоны, адресных расширителей на 8 зон, извещателей охранных магнитоконтактных (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 359-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-29ки2/12 (Приложение № 3) и составляет 77 568,48 руб. (Семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 48 копеек), в том числе НДС (18%) - 11 832,48 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 360-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по устройству подвесного потолка типа «Armstrong» с классом пожароопасности КМ 0 в помещении актового зала (участок № 1) (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль. Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 360-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-12ки1/1 (Приложение № 3) и составляет 85 004,84 руб. (Восемьдесят пять тысяч четыре рубля 84 копейки), в том числе НДС (18%) - 12 966,84 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 361-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по устройству подвесного потолка типа «Armstrong» с классом пожароопасности КМ 0 в помещении актового зала (участок № 2) (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 361-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-12ки1/2 (Приложение № 3) и составляет 85 352,94 руб. (Восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят два рубля 94 копейки), в том числе НДС (18%) - 13 019,94 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 362-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по устройству подвесного потолка типа «Armstrong» с классом пожароопасности КМ 0 в помещении актового зала (участок № 3) (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 362-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-12ки1/3 (Приложение № 3) и составляет 85 352,94 руб. (Восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят два рубля 94 копейки), в том числе НДС (18%) — 13 019,94 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 363-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по устройству подвесного потолка типа «Armstrong» с классом пожароопаснсти КМ 0 в помещении актового зала (участок № 4) (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 363-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-12ки1/4 (Приложение № 3) и составляет 85 639,68 руб. (Восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать девять рублей 68 копеек), в том числе НДС (18%) - 13 063,68 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 364-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по устройству подвесного потолка типа «Armstrong» с классом пожароопасности КМ 0 в помещении актового зала (участок № 5) (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 364-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-12ки1/5 (Приложение № 3) и составляет 85 771,84 руб. (Восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят одни рубль 84 копейки), в том числе НДС (18%)- 13 083,84 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 365-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по устройству подвесного потолка типа «Armstrong» с классом пожароопасности КМ 0 в помещении актового зала (участок № 6) (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 365-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-12ки1/6 (Приложение № 3) и составляет 85 639,68 руб. (Восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать девять рублей 68 копеек), в том числе НДС (18%) - 13 063,68 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 366-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по устройству подвесного потолка типа «Armstrong» с классом пожароопасности КМ 0 в помещении актового зала (участок № 7) (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 366-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-12ки1/7 (Приложение № 3) и составляет 84 811,32 руб. (Восемьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать рублей 32 копейки), в том числе НДС (18%) - 12 937,32 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 367-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по устройству подвесного потолка типа «Armstrong» с классом пожароопасности КМ 0 в помещении актового зала (участок № 8) (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 367-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-12ки1/8 (Приложение № 3) и составляет 84 200,08 руб. (Восемьдесят четыре тысячи двести рублей 08 копеек), в том числе НДС (18%) - 12 844,08 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 369-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабеля parlan U/UTP cat5e 4x2x0.52 PVCLSнг(A)-LSLTx, трубы гофрированной ПВХ Ø=16 мм, трубы гладкой ПВХ Ø=50 мм сетей связи (далее — Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 369-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-1 (Приложение № 3) и составляет 99 149,50 руб. (Девяносто девять тысяч сто сорок девять рублей 50 копеек), в том числе НДС (18%) - 15 124,50 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 370-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабеля parlan U/UTP cat5e 4x2x0.52 PVCLSнг(A)-LSLTx, трубы гофрированной ПВХ Ø=16 мм сетей связи (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 370-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-2 (Приложение № 3) и составляет 99 699,38 руб. (Девяносто девять тысяч шестьсот девяносто девять рублей 38 копеек), в том числе НДС (18%)- 15 208,38 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 371-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабеля parlan U/UTP cat5e 4x2x0.52 PVCLSнг(A)-LSLTx, кабеля FO-DF-IN-9-8-LSZN-YL, трубы гофрированной ПВХ Ø=16 мм и монтажа кабель-канала размером 20x10 мм сетей связи (далее -Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 371-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-3 (Приложение № 3) и составляет 99 328,86 руб. (Девяносто девять тысяч триста двадцать восемь рублей 86 копеек), в том числе 11ДС (18%) - 15 151,86 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 372-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабеля parlan U/UTP cat5e 4x2x0.52 PVCLSнг(A)-LSLTx, кабеля FO-DF-IN-9-8-LSZN-YL монтажа короба размером 100x80 мм и кабель-канала размером 20x10 мм сетей связи (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 372-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-4 (Приложение № 3) и составляет 99 999,10 руб. (Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 10 копеек), в том числе НДС (18%) - 15 254,10 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 373-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по прокладке кабеля parlan U/UTP cat5e 4x2x0.52 PVCLSнг(A)-LSLTx и монтажа короба размером 100x80 мм сетей связи (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 373-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-5 (Приложение № 3) и составляет 99 461,02 руб. (Девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят один рубль 02 копейки), в том числе НДС (18%) - 15 172,02 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 374-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по установке розеток сетей связи (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 374-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-6 (Приложение № 3) и составляет 91 937,34 руб. (Девяносто одна тысяча девятьсот тридцать семь рублей 34 копейки), в том числе НДС (18%) - 14 024,34 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 375-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по установке конвертера коммутационного шкафа ШТК-1 сетей связи (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 375-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-7 (Приложение № 3) и составляет 99 957,80 руб. (Девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 80 копеек), в том числе НДС (18%) - 15 247,80 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 376-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по монтажу патч-кордов, модулей вентиляторных оптического кросса, управляемых стекируемых коммутаторов, 4-х парных модулей сетей связи (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 376-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-8 (Приложение № 3) и составляет 99 988,48 руб. (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 48 копеек), в том числе НДС (18%)- 15 252,48 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 377-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по настройке оборудования коммутационного шкафа ШТК-1 и установка оборудования сетей связи (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 377-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-9 (Приложение № 3) и составляет 91 570,36 руб. (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят рублей 36 копеек), в том числе НДС (18%) - 13 968,36 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 378-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по установке конвертера в коммутационный шкаф ШТК-1 и установка оборудования сетей связи (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 378-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-10 (Приложение № 3) и составляет 96 365,88 руб. (Девяносто шесть тысяч триста шестьдесят пять рублей 88 копеек), в том числе НДС (18%)- 14 699,88 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 379-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по установке оборудования в коммутационный шкаф ШТК-1 и установка коммутационного шкафа ШТК-2 сетей связи (далее -Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее - Объект).

Согласно п. 6.1 Контракта № 379-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-11 (Приложение № 3) и составляет 98 968,96 руб. (Девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 96 копеек), в том числе НДС (18%) - 15 096,96 руб.

В соответствии с п. 1.1 Контракта № 380-18Д предметом является выполнение дополнительных работ по установке оборудования в коммутационный шкаф ШТК-2 сетей связи (далее - Работы) в здании школы с инженерными коммуникациями, по адресу: г. Ярославль, Кировский район, ул. Б. Октябрьская, д.64а (далее -Объект),

Согласно п. 6.1 Контракта № 380-18Д цена определяется на основании Локального сметного расчета № 02-01-33ки2-12 (Приложение № 3) и составляет 39 697,56 руб. (Тридцать девять тысяч шестьсот девяносто семь рублей 56 копеек), в том числе НДС (18%) - 6 055,56 руб.

Сроки выполнения работ определены в разделе 3 Контрактов.

В соответствии с п.6.4. Контрактов оплата Подрядчику за выполненные работы перечисляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и на основании выставленного Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

Работы подрядчиком выполнены и приняты заказчиком на общую сумму 2 946 146,12 руб. 

Претензии подрядчика с требованиями об оплате задолженности за выполненные работы и пени за просрочку оплаты получены заказчиком 22.04.2019 и 24.04.2019, согласно входящему штампу № 1026.

Неисполнение ответчиком обязанности по оплате за выполненные работы послужило поводом для обращения в  арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд считает заявленные требования подлежащими   частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст.ст. 309, 310, 314 Гражданского кодекса РФ обязательство должно исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании ст. 702, 711 Гражданского кодекса РФ основанием для оплаты работ является факт сдачи результата работ заказчику.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений.

Факт сдачи результата работ подтверждается документами, представленными истцом в материалы дела: актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, имеющими печати и подписи представителей сторон, и не оспаривается ответчиком.

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 2 946 146,12 руб.

Размер задолженности ответчиком не оспорен.

Доказательств оплаты задолженности либо наличия ее в меньшем размере ответчиком суду не представлено.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены представленными в материалы дела документами, требования истца в части основного долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

Также, истцом заявлено требования о взыскании с ответчика 139 729,06 руб.  пени по контракту  за период с 06.11.2018 по 07.05.2019, продолжении начисления пени по день фактической оплаты долга.

В соответствии с п. 10.5 Контрактов в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

При неисполненном денежном обязательстве требование о взыскании неустойки соответствует ст.330 Гражданского кодекса РФ и условиям п. 10.5 Контракта.

По расчету истца неустойка за период с 06.11.2018 по 07.05.2019 с применением ключевой ставки ЦБ РФ - 7,75% составляет 139 729,06 руб. 

Ответчик привел контррасчет неустойки, согласно которому сумма пени за период с 06.11.2018 по 07.05.2019 с применением ключевой ставки ЦБ РФ - 7,75% составила 139 279,08 руб.

По условиям контрактов к расчету неустойки применяется ставка рефинансирования Центрального банка РФ (ключевая ставка), действующая на дату уплаты пени.

Следовательно, при добровольной уплате названной неустойки ее размер по общему правилу подлежит исчислению по ставке, действующей на дату фактического платежа. При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания неустойки в судебном порядке.

Вместе с тем по смыслу данной нормы, закрепляющей механизм возмещения возникших у кредитора убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате выполненных работ, при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения.

Указанный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), а также Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017.

Судом установлено, что на день вынесения решения ключевая ставка Центрального банка РФ составляет 7,5 %.

По расчету суда за период с 06.11.2018 по 07.05.2019 размер неустойки, исходя из ключевой ставки 7,5%, составит 134 786,20 руб.

Оснований для применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда не имеется.

Требования истца подлежат удовлетворению в размере 134 786,20 руб.

Требование о продолжении начисления пени с 08.05.2019 по день фактической оплаты долга признается судом соответствующим разъяснениям, данным в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", подлежащим удовлетворению.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ госпошлина за подачу искового заявления относится на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, на истца - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано, в излишне уплаченной части госпошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  муниципального казенного учреждения "Агентство по строительству" города Ярославля  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Виннер"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 2 946 146,12 руб. долга, 134 786,20 руб. пени, 38 371,00 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Продолжить начисление пени с 08.05.2019 по день фактической оплаты долга в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской федерации от не уплаченной в срок суммы.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Лапочкина И.М.