﻿

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-180/2020

02 февраля 2021 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     27 января 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме  02 февраля 2021 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Поповой Н.М.

судей  Жуковой Т.В., Смирновой Я.Г.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания Шалагиновой Д.С. 

при участии:  

от истца: Виноградов Н.А. (доверенность от 07.08.2020);

от ответчика: не явился, извещен; 

от 3-го лица: не явился, извещен; 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело №А56-180/2020 по правилам, установленным для рассмотрения иска в суде первой инстанции, принятое по иску публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" 

к  акционерному обществу нефтепромышленная компания "Р.О.С.Промнефть"

3-е лицо:  акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"

о взыскании

установил:

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" (далее – ПАО "Ленэнерго") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с акционерного общества нефтепромышленная компания "Р.О.С.Промнефть" (далее – АО НПК "Р.О.С.Промнефть") 554 822 руб. 68 коп. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 21.12.2016 №ОД-ГтЭС-24735-16/38096-Э-16, 16 318 руб. 31 коп. неустойки по внесению первого платежа по договору за период с 06.01.2017 по 10.01.2017, 1 191 236 руб. 90 коп. неустойки по внесению второго платежа по договору за период с 20.02.2017 по 20.02.2018. 

Решением от 04.08.2020 с ответчика взыскано 554 822 руб. 68 коп. задолженности, 238 247 руб. 38 коп. неустойки за период с 22.09.2017 по 22.09.2018, 30 461 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска, в остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обратился с апелляционной жалобой. 

Определением от 16.12.2020 апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения иска в суде первой инстанции, поскольку суд первой инстанции фактически не рассмотрел требование о взыскании 16 318 руб. 31 коп. неустойки по внесению первого платежа по договору за период с 06.01.2017 по 10.01.2017. 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, просил иск удовлетворить. 

Информация о времени и месте рассмотрения искового заявления опубликована на Интернет-сайте «Картотека арбитражных дел». Надлежащим образом извещённые о времени и месте судебного заседания иные лица, участвующие в деле, явку представителей не обеспечили, что в силу статьи 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Из материалов дела следует, что 21.12.2016 ПАО "Ленэнерго" (сетевая организация) и АО НПК "Р.О.С.Промнефть" (заявитель) заключили договор № ОД-ГтЭС-24735-16/38096-Э-16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор).

Согласно пункту 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «склад», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, гор. Любань, Московское шоссе, д. 90, лит. Б, кадастровый номер 47:26:0916013:62. 

Согласно пунктам 4, 5 Договора срок действия Технических условий – 2 года со дня заключения Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 6 месяцев со дня заключения Договора.

Размер платы за технологическое присоединение составляет 652 732 руб. 57 коп. (пункт 10 Договора).

Пунктом 11 Договора предусмотрен порядок внесения авансовых платежей: 

- 15% платы за технологическое присоединение в сумме 97 909 руб. 89 коп. в течение 15 дней со дня заключения договора;

- 30% платы за технологическое присоединение в сумме 195 819 руб. 77 коп. в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

- 45% платы за технологическое присоединение в сумме 293 729 руб. 66 коп. в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10% платы за технологическое присоединение в сумме 65 273 руб. 25 коп. в течение 15 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

Акт о технологическом присоединении подписан сторонами 06.09.2017. 

ПАО "Ленэнерго", указав, что АО НПК "Р.О.С.Промнефть" не в полном объеме произвел оплату технологического присоединения, допустил просрочку внесения авансовых платежей, а также нарушил срок оплаты по Договору, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании 554 822 руб. 68 коп. задолженности, 16 318 руб. 31 коп. неустойки по внесению первого платежа,               1 191 236 руб. 90 коп. неустойки по внесению второго платежа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ), пункта 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861).

Поскольку материалами дела подтверждается факт технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ответчика, а доказательств оплаты услуг последний не представил, требования истца о взыскании задолженности на сумму 554 822 руб. 68 коп. задолженности являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 17 Договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. Совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзаце порядке за год просрочки. 

Истец просит взыскать неустойку:

за нарушение срока по внесению первого платежа - 16 318 руб. 31 коп., 

за нарушение срока по внесению второго платежа - 1 191 236 руб. 90 коп. 

В договоре от 21.12.2016 отсутствует условие о согласованности сторонами начисления неустойки за просрочку внесения авансовых платежей. В иске в части взыскания неустойки на сумму 16 318 руб. 31 коп. и на сумму 1 191 236 руб. 90 коп. следует отказать.

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 04.08.2020 подлежит отмене.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по иску и по апелляционной жалобе распределена пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 04.08.2020 по делу №  А56-180/2020  отменить.

Принять новый судебный акт. 

Взыскать с акционерного общества нефтепромышленная компания "Р.О.С.Промнефть" в пользу публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" 554 822 руб. 68 коп. задолженности, 9 641 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

В остальной части в иске отказать.

Взыскать с акционерного общества нефтепромышленная компания "Р.О.С.Промнефть" в пользу публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" 930 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе. 

Постановление  может быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

Н.М. Попова

Судьи

Т.В. Жукова

 Я.Г. Смирнова