43/2023-52590(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Климова, 62, Курган, 640021, https://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А34-15227/2022

г. Курган

16 мая 2023 года

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Желейко Т.Ю.,  при ведении протокола судебного заседания в письменном виде помощником судьи  Борисовой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развитие»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании совершить действия, о взыскании денежных средств,  

при участии: данные в протоколе, 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

«Развитие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение месяца с момента  

вступления настоящего решения в законную силу устранить недостатки выполненных  

по договору от 02.12.2019 № КР-165/19 работ на объекте: многоквартирный дом по  

адресу: 

<

...>, а именно:  

- выполнить соединение трубы водоснабжения в приямке под подъездом № 4 с  

изменением переходной муфты; 

- устранить подтекание на узле учета тепловой энергии на трубопроводе  

отопления; - огрунтовать и окрасить трубопроводы отопления в полном объеме; 

- установить противопожарные муфты на трубопроводах водоотведения в  

подвале надлежащим образом в соответствии с проектно - сметной документацией. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  

компания «Развитие» в пользу Некоммерческой организации «Региональный фонд  

капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»: 68 440 руб. 25 коп. штрафа; 8 738 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Возвратить некоммерческой организации «Региональный фонд капитального  ремонта многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 134 руб. 00 коп. излишне уплаченной государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия  решения (изготовления решения в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской  области.  

Судья Т.Ю. Желейко  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 6:00:00

Кому выдана Желейко Татьяна Юрьевна