1037/2017-105905(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4  

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-8517/2017

г. Чебоксары

19 октября 2017 года

Резолютивная часть решения оглашена 12.10.2017.  

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Новожениной О.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "Монтажлифтторг", г.Чебоксары  ОГРН:1122130007735 ИНН:2130105135,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Алза", г. Чебоксары  ОГРН:1022100974433 ИНН:2127311850,  

о взыскании 2133937 руб., 

при участии от истца: ФИО2 по доверенности от 10.11.2014,  установил:  

общество с ограниченной ответственностью "Монтажлифтторг" обратилось в  арбитражный суд с иском о взыскании с общества с ограниченной  ответственностью "Алза" 2066266 руб. 76 коп. долга по оплате работ, выполненных  в рамках договора подряда на монтаж и пуско-наладочные работы лифтов № 08-0215 от 29.04.2016, 67670 руб. 24 коп. пени за период с 10.04.2017 по 24.07.2017 и  далее по день фактического исполнения обязательства, но не более 206626 руб. 68  коп.  

В заседании суда представитель истца исковые требования поддержал по  изложенным в исковом заявлении основаниям.  

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного заседания надлежащим  образом, явку представителя не обеспечил; отзыв на исковое заявление не  представил.  

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика.  

Заслушав представителя истца и изучив материалы дела, суд установил  следующее.  

Обществом с ограниченной ответственностью "Алза" (заказчик) и  обществом с ограниченной ответственностью "Монтажлифтторг" (подрядчик)  заключен договор подряда № 08-02-15 на монтаж и пусконаладочные работы  лифтов от 29.04.2016, по условиям которого подрядчик, по заданию заказчика,  выполняет на объекте: "Многоэтажный жилой дом по Эгерскому бульвару,  расположенный в г.Чебоксары", следующие этапы (виды) работ:  

- работы по монтажу 4 (четырех) пассажирских лифтов г/п 630 кг. на 10 остановок;  - пусконаладочные работы 4 (четырех) пассажирских лифтов г/п 630 кг. на 10  остановок;  

- монтаж обрамления дверей шахты 4 (четырех) пассажирских лифтов г/п 630 кг. на  10 остановок;  

- монтаж комплекса диспетчерского контроля (проводная связь 190 м.) четырех  лифтов, оборудование диспетчерского пульта не предусмотрено;  

- монтаж дополнительного оборудования для диспетчерского пульта; 

- организация проведения работ по оценке соответствия в форме полного  технического освидетельствования 4 (четырех) лифтов, согласно TP ТС 011/2011 и  регистрации декларации соответствия лифтов в Едином реестре Росаккредитации  согласно решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013   № 76, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для  выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену согласно  пункту 6.1 договора.  

Стоимость выполняемых работ с учетом понижающего коэффициента 0,89  составляет 2575209 руб. 90 коп., НДС не облагается. Подрядчик не является  плательщиком НДС. Сумма договора остается фиксированной и не подлежит  изменению до выполнения всех обязательств по данному договору за исключением  условий, предусмотренных пунктами 4.2, 4.7, 4.8 (пункт 6.1 договора).  

Сроки начала и окончания работ стороны согласовали в разделе 3 договора.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской  Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в  установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный  объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать  подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и  уплатить обусловленную цену.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком  оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Во исполнение условий договора истец выполнил работы на общую сумму  2512916 руб. 30 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ   № 1 от 31.05.2016, № 2 от 31.05.2016, № 3 от 30.06.2016, № 4 от 30.06.2016, № 5 от  29.07.2016, № 6 от 29.07.2016, № 7 от 31.08.2016, № 8 от 31.08.2016, № 9 от  31.08.2016, № 10 от 30.09.2016, № 11 от 30.11.2016, № 12 от 31.03.2017, № 13 от  31.03.2017, № 14 от 31.03.2017, № 15 от 31.03.2017, № 16 от 31.03.2017, № 17 от  31.03.2017, и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от  31.05.2016, № 2 от 30.06.2016, № 71 от 29.07.2016, № 77 от 31.08.2016, № 85 от  30.09.2016, № 94 от 30.11.2016, № 16 от 31.03.2016.  

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в  размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены  законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих  

указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со  статьей 711 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 746 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

Пунктом 6.6 договора предусмотрено, что настоящий договор  предусматривает предоплату за стоимость материалов и оборудования для  выполнения работ по установке обрамлений дверей шахты лифтов, монтажу  комплекса диспетчерского контроля лифтов, монтажу дополнительного  оборудования для диспетчерского пульта в размере 322438 руб. 67 коп., НДС не  облагается.  

Оплата по настоящему договору будет произведена всеми незапрещенными  законодательством способами в течение 5 банковских дней со дня подписания  каждой справки о стоимости выполненных работ КС-3 (пункт 6.10 договора).  

Как указал истец в исковом заявлении и следует из материалов дела, оплата  работ ответчиком произведена частично, в результате чего образовалась  задолженность в размере 2066266 руб. 76 коп.  

Наличие задолженности ответчик не оспорил, доказательств оплаты, как  того требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, не представил.  

Согласно пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в  обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой  стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими  обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих  представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании суммы долга  подлежит удовлетворению в заявленном размере.  

Также истцом заявлено требование о взыскании 67670 руб. 24 коп. пени за  период с 10.04.2017 по 24.07.2017 и далее по день фактического исполнения  обязательства, но не более 206626 руб. 68 коп.  

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения.  

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 65 постановления  Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 7 от 24 марта  2016 года "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу  статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день  фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты  кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).  

Пунктом 7.2 договора предусмотрено, что в случае нарушения сроков  оплаты заказчиком за выполненные работы заказчик выплачивает подрядчику пени  в размере 1/300 ставки рефинансирования от неуплаченной суммы задолженности  за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.  

Сумма пени за период с 10.04.2017 по 12.10.2017 составляет 116399 руб. 70  коп., исходя из следующего расчета:  

- с 10.04.2017 по 01.05.2017 (22 дня): 206626,68 * 9,75% / 300 * 22 = 14773 руб. 81  

коп.;  

- с 02.05.2017 по 18.06.2017 (48 дней): 206626,68 * 9,25% / 300 * 48 = 30580 руб. 75  коп.;  

- с 19.06.2017 по 17.09.2017 (91 день): 206626,68 * 9% / 300 * 91 = 56409 руб. 08  коп.;  

- с 18.09.2017 по 12.10.2017 (25 дней): 206626,68 * 8,5% / 300 * 25 = 14636 руб. 06  коп.  

С 13.10.2017 пени подлежат взысканию по день фактической уплаты долга  исходя из одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей в  соответствующие периоды, но не более 10% от суммы задолженности.  

Понесенные истцом расходы по оплате государственной пошлины суд в  соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации взыскивает с ответчика в пользу истца.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алза" в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Монтажлифтторг" 2066266 (два миллиона  шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 76 коп. долга, 116399 (сто  шестнадцать тысяч триста девяносто девять) руб. 70 коп. пени за период с  10.04.2017 по 12.10.2017, а также пени, начисленные на сумму основного долга,  исходя из одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей в  соответствующие периоды, начиная с 13.10.2017 по день фактической уплаты  долга, но не более 10% от суммы задолженности, 33670 (тридцать три тысячи  шестьсот семьдесят) руб. в возмещение расходов по оплате государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.А. Новоженина