61/2024-11377(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-13465/2023

г. Ярославль

25 января 2024 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шадриновой Л.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Столеровой А.А.  

рассмотрев в судебном заседании заявление государственного казённого учреждения  Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Северный поток"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 70000.00 руб., обязании устранить недостатки, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Северный поток" в течение 30  календарных дней со дня вступления решения в законную силу устранить недостатки  выполненных по Государственному контракту № 19-28/1 от 03.06.2019 г. работ:  

- на объекте Ремонт автомобильной дороги Пречистое - Любим - Буй, км 16+855  - км 21+228, км 21+840 - км 22+538, в Любимском муниципальном районе Ярославской  области (2 этап) устранить следующие дефекты, недостатки:  

1) Продольные трещины по оси проезжей части 3 км (км 17+000; км 21+000).  2) Локальные разрушения асфальтобетонного покрытия (в районе остановки) - 1 м2.  

3) Отклонение бортового камня от покрытия на тротуаре - 20 п.м.  

4) Поперечные трещины на асфальтобетонном покрытии проезжей части, па  локальных участках (100 п.м.) - км 21+855; км 22+000;  

- на объекте Ремонт автомобильной дороги Северный подход к г. Данилову, км  335+903 - км 337+0-21 в Даниловском муниципальном районе Ярославской области  устранить следующие дефекты, недостатки:  

1) Продольные трещины по оси проезжей части, на локальных участках (700 п.м.).  2) Размыв земляного полотна на локальных участках - 0,5 м2 (336+000).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Северный поток" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу государственного казённого учреждения  Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 30 000 руб. штрафа. Исполнительный лист выдать по ходатайству  взыскателя после вступления решения в законную силу.  

В остальной части иска отказать. 

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Северный поток" в доход  федерального бюджета 7 200 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать  по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  

полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской  области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Л.А. Шадринова