АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Климова, 62, Курган, 640021, https://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А34-4257/2024

г. Курган

22 октября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 14 октября 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 22 октября 2024 года.

 

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Самсонова В.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарём Томашевской Н.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску государственного бюджетного учреждения «Межрайонная больница №8» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Уралремотделстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств,

 

при участии: 

от истца: явки нет, извещён надлежащим образом;

от ответчика: явки нет, извещён надлежащим образом; 

 

установил:

государственное бюджетное учреждение «Межрайонная больница №8» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Уралремотделстрой» (далее - ответчик) о взыскании пени в размере 62400 рублей.

Определением суда от 04.07.2024 указанное исковое заявление принято к производству в порядке упрощённого производства и сторонам предложено в установленные сроки представить определённые документы и доказательства.

Определением от 04.09.2024 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам административного производства.

Лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания с соблюдением требований статей 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

    На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей сторон.

В соответствии с пунктом 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» в связи с неявкой лиц, участвующих в деле, в судебном заседании средства аудиозаписи не применялись.

    Исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

    Как следует из материалов дела, 05.06.2024 между Государственным бюджетным учреждением «Межрайонная больница №8», (далее - «Заказчик»), в лице главного врача ФИО1, действующего на основании Устава, с одной стороны, и обществом с ограниченной ответственностью «УралРемОтделСтрой», (далее -«Подрядчик»), в лице директора Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключн Государственный контракт  в соответствии с протоколом №ИЭА1 от «24» мая 2023 электронного аукциона.

    Первой главой контракта установлен предмет. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием (Приложение №1) и в объемах, предусмотренных проектно-сметной документацией, осуществить выполнение работ в целях Капитального ремонта здания ФАП ГБУ «Межрайонная больница №8» в с. Мансурово Сафакулевского муниципального округа Подрядчик обязуется выполнить и передать Заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом и действующим законодательством РФ. Сданный результат выполненных работ по настоящему контракту должен соответствовать техническому заданию, проектно-сметной документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении создаваемого объекта. Заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. Все предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются с поставкой Подрядчиком материалов и оборудования, необходимых для производства работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение№1).Идентификационный код закупки: 2324525002044452501001007 90014399243 (пункты 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5 контракта).

    Второй главой контракта установлена цена контракта и порядок расчетов. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с итогами электронного аукциона. Расчет за результат фактически выполненного и принятого объема работ по предмету настоящего Контракта осуществляется в пределах цены Контракта, путем безналичного перечисления Заказчиком выделенных из бюджета Курганской области денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Цена контракта, установленная по итогам электронного аукциона может быть изменена по соглашению сторон в следующих случаях: 1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 2) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта Оплата за выполненные работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п. 3.5. Контракта. Оплата работ производится Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения ГБУ "Межрайонная больница №8". КБК 000.0000.081N953650.243.225(2353650X135970000000.5) Оплата непредвиденных затрат производится за фактически выполненные непредвиденные работы и затраты, отражаемые в формах КС-2 и КС-3 (являющиеся неотъемлемой частью документа о приемке), в пределах установленных нормативов в сметном расчете. В случае сокращения указанных затрат, стоимость контракта может быть снижена по соглашению сторон с тем же индексом к базовой стоимости, с которым эти затраты рассчитывались в цене контракта. Работы, выполненные Подрядчиком и не принятые Заказчиком, в связи с несоответствием требованиям технического задания, проектно-сметной документации, техническим регламентам, а также условиям настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения указанных нарушений. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, являющемуся Подрядчиком по настоящему Контракту, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику, в размере 20% (двадцати процентов) от цены Контракта, указанной в п.2.3. Контракта, что составляет 300 000 рублей 00 копеек без НДС. Оплата аванса производится в течение 15 (пятнадцати) дней со дня выставления Подрядчиком счета на перечисление аванса. В целях погашения авансового платежа Заказчик удерживает из каждой суммы, предъявленной Подрядчиком к оплате за выполненные работы по Актам, КС-3 (являющиеся неотъемлемой частью документа о приемке), сумму аванса, равную 20% от предъявляемой к оплате стоимости, до его полного погашения. В случае досрочного расторжения Контракта по любому из оснований, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством, при наличии непогашенного аванса – сумма такого аванса подлежит возврату Подрядчиком Заказчику. 2.10. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 2 статьи 37 ФЗ-44, не допускается (пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 контракта).

    Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ установлены 3 главой контракта. Подрядчик приступает к выполнению работ после заключения контракта. Окончание работ – по 10 сентября 2023 (допускается досрочное выполнение работ по контракту). Календарные сроки выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ определяются Графиком производства работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком в течение пяти календарных дней с даты заключения контракта. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ. При выполнении работ Подрядчик письменно извещает Заказчика, о готовности выполненных работ. Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала промежуточной приемки выполненных работ передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 являющаяся неотъемлемой частью документа о приемке), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 являющаяся неотъемлемой частью документа о приемке) и счета/счетафактуры с приложением документации, подтверждающей объем выполненных работ. Исполнительная документация, предоставленная Подрядчиком по формам КС-2 и КС-3 (являющиеся неотъемлемой частью документа о приемке) должна быть оформлена в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такая исполнительная документация юридической силы не имеет (пункты 3.1, 3.2, 3.3 контракта).

    Седьмой главой контракта установлена ответственность сторон. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта (пункт 7.1 контракта). В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (пункты 7.3.1, 7.3.3, 7.4 контракта). 

    При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьим лицам. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. Стороне, допустившей нарушение условий Контракта, направляется письменная претензия (сформированная с использованием единой информационной системы). В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующую норму права, условие Контракта или его приложений, а также действия, которые должны быть совершены для устранения нарушений. Претензия направляется с приложением документов (в надлежащем виде заверенных копий), подтверждающих требования. В отношении всех претензий направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензий в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты ее получения. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Курганской области пункты (11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 контракта).

На 27.11.2023 работы по контракту были не выполнены. Истцом в адрес ответчика была направлена претензия №2802 от 27.11.2023 с просьбой оплаты пени за просрочку исполнения контракта в размере 58 500 рублей. Пени за период с 11.09.2023 по 27.11.2023, выставленные претензией № 2802 от 27.11.2023 были оплачены, что подтверждается платежным поручением № 79 от 28.11.2023 на сумму 58 500 руб.

    Как следует из материалов дела, выполненные ответчиком работы по Контракту были приняты истцом, что подтверждается двусторонне подписанными актами о приемке выполненных работ № б/н от 14.02.2024. Акты подписаны обеими сторонам без возражений и замечаний.

    Работы по Контракту выполнены ответчиком в полном объеме.

    Заказчиком работы оплачены, что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями № 61700 от 27.06.2023 на сумму 300 000 руб., №14278 от 15.02.2024 на сумму 1 200 000 руб.

Полагая, что ответчиком допущено нарушение сроков выполнения работ, истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 389 от 16.02.2024, с требованием о выплате пени за период с 28.11.2024 по 13.02.2024 в соответствии с пунктом 7.3.3. контракта.

Отсутствие ответа на претензию, оплаты послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о необходимости отказа в удовлетворении искового заявления в силу следующего.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а последний обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из пункта 1 статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

    Согласно статье 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе и путем взыскания неустойки.

    Согласно части 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться также неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 указанного Кодекса).

    В соответствии со статьей 330 Кодекса в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пени).

    Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (часть 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (пункты 7.3.1, 7.3.3, 7.4 контракта).

    В то же время, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

    В Контракте стороны согласовали, что за нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком Заказчик начисляет пени за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом, и фактически исполненных Подрядчиком (пункт 7.3.3 контракта).

    Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

    В силу пункта 3.12 Контракта датой принятия выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

    Акты о приемке выполненных работ № б/н от 14.02.2024. Акты подписаны обеими сторонам без возражений и замечаний.

    В силу подпункта «б» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта.

    30.09.2024 от ответчика поступил отзыв на заявление, согласно которому, не согласен с требованиями истца, так как по подпункту «б» пункту 3 Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 №783 от общей суммы начисленной неустойки 120 900 руб. было плачено более 50% на сумму 60 500 руб. Факт уплаты ответчиком указанных денежных средств подтверждается платежными поручениями №79 от 28.11.2023 на сумму 58 500 руб., №9 от 26.09.2024 на сумму 2000 руб.

    Определением суда от 30.09.2024 суд предложил истцу обосновать требования о взыскании неустойки, с учетом подпункта «б» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, с учетом того, что ответчиком оплачено 50 % неустойки.

Истец определение суда от 30.09.2024 не исполнил.

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, при наличии предусмотренных правилами условий является именно обязанностью, а не правом государственного (муниципального) заказчика. (Определение ВС РФ от 26.02.2024 № 305-ЭС23-20353).

Ответчик платежными поручениями №9 от 26.09.2024, №79 от 28.11.2023 оплатил 50, 04% начисленной истцом неустойки. 

    Таким образом, к данным правоотношениям подлежит применению положение подпункта «б» пункта 3 Правил № 783 о списании оставшихся 50% неустойки. 

    Однако в нарушение приведенных правовых норм и разъяснений, заказчик не рассмотрел возможность списания 50% неустойки за просрочку исполнения обязательства исполнителем.

    Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, суд не находит оснований для взыскания с ответчика денежных средств в размере 62 400 рублей, составляющих сумму неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту, в связи с чем исковое заявление удовлетворению не подлежит. 

Частью 1 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истцом при обращении в суд иском уплачена государственная пошлина в размере 2496 руб. по платёжному поручению №1849 от 11.06.2024.

Согласно пункту 26 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации №1 от 21.01.2016 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»  при прекращении производства по делу ввиду отказа истца от иска в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком после обращения истца в суд судебные издержки взыскиваются с ответчика (часть 1 статьи 101 ГПК РФ, часть 1 статьи 113 КАС РФ, статья 110 АПК РФ). При этом следует иметь в виду, что отказ от иска является правом, а не обязанностью истца, поэтому возмещение судебных издержек истцу при указанных обстоятельствах не может быть поставлено в зависимость от заявления им отказа от иска. Следовательно, в случае добровольного удовлетворения исковых требований ответчиком после обращения истца в суд и принятия судебного решения по такому делу судебные издержки также подлежат взысканию с ответчика.

Поскольку истцом заявлены правомерные требования, а в удовлетворении исковых требований отказано, ввиду оплаты ответчиком правомерно начисленной истцом недостающей части неустойки 1950 руб. (после оплаты данной суммы, размер оплаченных пени достиг 50%), уже после возбуждения настоящего дела и наличия в связи с этим основания для списания неустойки, возникшего уже после возбуждения производства по делу в ходе судебного разбирательства, государственная пошлина, с учетом вышеизложенного относится на ответчика и подлежит частичному взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально размеру обоснованно заявленных требований, в размере 78 руб.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Уралремотделстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного бюджетного учреждения «Межрайонная больница №8» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) государственную пошлину в размере 78 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объёме).

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Курганской области.

 

Судья

В.Е. Самсонов