Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Дело № А12-27065/2024

20 января 2025 года

город Волгоград

Резолютивная часть решения объявлена 20.01.2025 года.

Полный текст решения изготовлен 20.01.2025 года.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лобенко Е.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Еременко А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) к Публичному акционерному обществу «Россети Юг» (344002, 

<

...>, ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить обязательства по договору и взыскании неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен,

от ответчика – ФИО2 по доверенности № 307-24 от 25.10.2024г.; 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу «Россети Юг» об обязании ответчика в пятнадцатидневный срок с момента вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору №34-1-24-00737681 от 10.01.2024г. об осуществлении технологического присоединения объекта сельскохозяйственного производства по адресу: 

<

...>, а именно выполнить:

- запроектировать и построить трансформаторную подстанцию КТП-10/0,4 кВ, тип и мощность определить проектом;

- запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от опоры № 4-1 ВЛ-10кВ № 2ПС 110/10 кВ «Степная» до проектируемой KTII-10/0,4 кВ. протяженность, марку и сечение провода(кабеля) ЛЭП-10 кВ определить проектом; 

- запроектировать и выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП- 10/0,4 кВ с установкой на границе земельного участка Заявителя шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом. Протяженность линии, марку и сечение провода линии определить при проектировании;

- релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ;

- выполнить учет электрической энергии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Установку приборов учета электроэнергии выполнить в соответствии с пунктом №16 типовых технических решений, утвержденных приказом ПАО «Россети Юг» от 27.08.2020г. №485 «Об утверждении Типовых технических решений по организации учета электроэнергии».

 Кроме того, истец просит взыскать судебную неустойку в случае неисполнения судебного акта в части возложения обязанности по выполнению технологического подключения энергопринимающих устройств заявителя по Условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №34-1-24-00737681 от 10.01.2024г. в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки с момента вступления решения суда в законную силу и до момента фактическою исполнения судебного акта, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб.

            Определением от 05.11.2024 года принято к рассмотрению уточнение исковых требований, согласно которого истец просил обязать Публичное акционерное обществе «Россети Юг»в пятнадцатидневный срок с момента вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору №34-1-24-00737681 от 10.01.2024г. об осуществлении технологического присоединения объекта сельскохозяйственного производства по адресу: 

<

...>, а именно выполнить:

- запроектировать и построить трансформаторную подстанцию КТП-10/0,4 кВ, тип и мощность определить проектом;

- запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от опоры № 4-1 ВЛ-10кВ № 2ПС 110/10 кВ «Степная» до проектируемой KTII-10/0,4 кВ. протяженность, марку и сечение провода(кабеля) ЛЭП-10 кВ определить проектом; 

- запроектировать и выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП- 10/0,4 кВ с установкой на границе земельного участка Заявителя шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом. Протяженность линии, марку и сечение провода линии определить при проектировании;

- релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ;

- выполнить учет электрической энергии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Установку приборов учета электроэнергии выполнить в соответствии с пунктом №16 типовых технических решений, утвержденных приказом ПАО «Россети Юг» от 27.08.2020г. №485 «Об утверждении Типовых технических решений по организации учета электроэнергии».

Кроме того, истец просит взыскать судебную неустойку в случае неисполнения судебного акта в части возложения обязанности по выполнению технологического подключения энергопринимающих устройств заявителя по Условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №34-1-24-00737681 от 10.01.2024г. в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки с момента вступления решения суда в законную силу и до момента фактическою исполнения судебного акта, неустойку по Условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-24-00737681 от 10.01.2024г. за период просрочки исполнения обязательств с 11.07.2023г. по 05.11.2024г. в размере 13 389,68 руб., неустойку по Условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 34-1-24-00737681 от 10.01.2024г. в размере 0,25% за каждый день просрочки за период с 06.11.2024г. по день исполнения обязательства также расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 23.12.2024 года исковые требования удовлетворены, на Публичное акционерное общество «Россети Юг» возложена обязанность в пятнадцатидневный срок с момента вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору №34-1-24-00737681 от 10.01.2024г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- запроектировать и построить трансформаторную подстанцию КТП-10/0,4 кВ, тип и мощность определить проектом;

- запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ от опоры № 4-1 ВЛ-10кВ № 2ПС 110/10 кВ «Степная» до проектируемой KTII-10/0,4 кВ. протяженность, марку и сечение провода(кабеля) ЛЭП-10 кВ определить проектом; 

- запроектировать и выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП- 10/0,4 кВ с установкой на границе земельного участка Заявителя шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом. Протяженность линии, марку и сечение провода линии определить при проектировании;

- релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ;

- выполнить учет электрической энергии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Установку приборов учета электроэнергии выполнить в соответствии с пунктом №16 типовых технических решений, утвержденных приказом ПАО «Россети Юг» от 27.08.2020г. №485 «Об утверждении Типовых технических решений по организации учета электроэнергии».

С Публичного акционерного общества «Россети Юг» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 взысканы неустойка в размере 13 389,68 руб., неустойка в размере 0,25% за каждый день просрочки, начисленную на сумму 45 388,76 руб., начиная с  06.11.2024 года по день фактического исполнения обязательства,   расходы по оплате услуг представителя в размере 30 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.

В случае неисполнения решения в пятнадцатидневный срок со дня его вступления в законную силу с Публичного акционерного общества «Россети Юг» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 взыскана судебная неустойка в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки по день фактического исполнения решения. В иске в остальной части отказано.

При принятии указанного решения судом не разрешен вопрос о расходах по государственной пошлине.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

Согласно ч. 2 ст. 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о принятии арбитражным судом дополнительного решения разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению вопроса о принятии дополнительного решения.

Истец явку представителя в судебное заседание не обеспечил, извещен надлежащим образом, в соответствии с требованиями статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика указала, что не согласна с распределением государственной пошлины. 

Исследовав материалы дела, суд считает необходимым разрешить вопрос о судебных расходах.

Согласно ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указано, что вопросы о судебных расходах решаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте,  которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина по делу (с учетом уточнения исковых требований) составляет 25 000 руб., в т.ч.: 15 000 руб. -  за рассмотрение требования неимущественного характера, 10 000 руб. – за рассмотрение требования в части взыскания договорной неустойки.

При подаче иска истец оплатил государственную пошлину в размере 15 000 руб., которые взысканы с ответчика в пользу истца.

Государственная пошлина за рассмотрение требования в части взыскания договорной неустойки в размере 10 000 руб. не распределена при объявлении резолютивной части решения. 

В связи с чем, учитывая удовлетворение исковых требований в части неустойки, государственная пошлина в размере 10 000 руб. относится на ответчика и подлежит взысканию в доход бюджета.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 178, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Юг» (344002, 

<

...>, ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере                     10 000 руб.

Дополнительное решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                                         Е.А. Лобенко