Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-65310/2017

16 апреля 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  06 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  16 апреля 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП-М", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП-М" (адрес:  Россия 196084, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТ. А/ПОМ. 3-Н; Россия 190068, Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова д.39, ОГРН:  

<

***>; 

<

***>);

ответчик: :Общество с ограниченной ответственностью "А Плюс Девелопмент" (адрес:  Россия 196158, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/Д, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 25.07.2017), ФИО3 (паспорт)  

- от ответчика: ФИО4 (доверенность от 28.03.2018) 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп-М» (далее – ООО «Олимп-М») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «А Плюс Девелопмент» (далее – ООО «А Плюс Девелопмент») о взыскании 531 102,75 руб. задолженности и 142 371,91 руб. пеней по договору субподряда от 26.01.2016 № 90/2016.

Истец поддержал заявленные исковые требования. Ответчик исковые требования не признал.

Заслушав пояснения представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ООО «А Плюс Девелопмент» (заказчик) и ООО «Олимп-М» (подрядчик) заключили договор субподряда от 26.01.2016 № 90/2016, по условиям которого подрядчик обязался выполнить разработку рабочей документации на выполнение работ (если это предусмотрено приложением «техническое задание»); выполнить комплекс работ, перечисленных в приложении «техническое задание» (в объем работ включены все работы, необходимые для надлежащего завершения и последующей эксплуатации результата работ в соответствии с его назначением, в том числе прямо не перечисленные в договоре или приложениях к нему); получить необходимые согласования и разрешения, необходимые для выполнения работ или эксплуатации результата работ как определено в приложении «Техническое задание»; составить и передать заказчику соответствующие исполнительную документацию по выполненным работам, оформленную в соответствии с приложением «регламент оформления и сдачи исполнительной документации»; если это предусмотрено для работ данного вида. выполнить пуско-наладочные работы, совместно с заказчиком провести испытания, тесты, подтверждающие работоспособность смонтированных систем и оборудования; сдать выполненные работы заказчику в сроки, определенные настоящим договором.

По пункту 3.2.1 договора срок начала работ – 05.02.2016; по пункту 3.2.2 договора срок окончания работ – 25.03.2016.

Согласно пункту 3.2.3 договора промежуточные сроки выполнения работ, наличие этапов выполнения работ, а также сроки сдачи этапов работ могут быть предусмотрены приложением «График производства работ» (при его наличии).

В пункте 3.3 договора определено, что датой фактического окончания работ считается день подписания сторонами закрывающего Акта КС-2.

Изменение срока выполнения работ по пункту 3.4 договора возможно только на основании соответствующего дополнительного соглашения к договору.

При этом в пункте 3.5 договора указано, что сроки выполнения работ по письменному требованию подрядчика автоматически проявляются на период нарушения заказчиком срока выплаты предусмотренного договором первого авансового платежа.

По пункту 4.1 договора стоимость работ по настоящему договору указана в приложении «расчет стоимости работ и затрат» и является фиксированной (твердой). 

В пункте 4.3.1 договора предусмотрено, что заказчик производит авансовый платеж/ авансовые платежи по основаниям и в сроки, указанные в приложении «порядок оплаты», являющемся приложением к договору.

По пункту 4.4 договора оплата выполненных работ производится заказчиком в порядке и по основаниям, согласованным в приложении «порядок оплаты». до предоставления всего комплекта документов, указанных в приложении «порядок оплаты» и пунктах 8.2 и 8.3 договора, заказчик вправе не оплачивать выполнение работ. Если согласно Приложению «Порядок оплаты» оплата работ производится после подписания актов выполненных работ, то оплата производится в срок, установленный таким приложением, после наступления последнего из указанных в Приложении условий. 

По пункту 4.5 договора, если приложением «Порядок оплаты» не предусмотрено иное, такими условиями для платежа являются: подписание акта выполненных работ сторонами и получение заказчиком счета на оплату. Сумма, подлежащая оплате подрядчику за выполненные работ и подлежащая указанию в счете на оплату, рассчитывается с учетом всех удержаний, предусмотренных договором.

Если иное не предусмотрено Приложением «Порядок оплаты», из любых подлежащих оплате сумм, кроме суммы авансового платежа (если он предусмотрен Договором), в целях обеспечения исполнения обязательств подрядчика по договору подлежит удержанию сумма, размер которой согласован сторонами в приложении «Порядок оплаты». Сумма такого гарантийного удержания указывается в справке по форме КС-З и подлежит удержанию из подлежащих оплате сумм. Сумма такого гарантийного удержания выплачивается подрядчику в сроки, предусмотренные в приложении «Порядок оплаты».

При досрочном прекращении договора оплата суммы гарантийного удержания осуществляется в порядке, установленном пунктом 9.5 договора.

Согласно пункту 8.1 договора приемка работ осуществляется путем подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-З в следующем порядке: акты КС-2 могут подписываться в порядке, предусмотренном пунктами 8.4 - 8.6 договора, если договором предусмотрена промежуточная, частичная приёмка работ, и только после получения заказчиком документов, указанных в пункте 8.2 договора.

Закрывающий Акт КС-2 подлежит обязательному подписанию после завершения всего объема работ по договору, который подписывается в порядке, предусмотренном пунктами 8.4 - 8.6 договора и при условии предоставления документов, указанных в пункте 8.3 договора.

В пункте 8.2 договора, в случае если договором предусмотрена поэтапная, частичная приемка работ, по окончании отчетного периода подрядчик передает заказчику по накладной: исполнительную документацию на выполненные работы, отчет об использовании давальческих материалов за отчетный период (если такие материалы ранее передавались подрядчику), два экземпляра подписанных со своей стороны акта приемки работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-З, на которых имеется отметка представителя технадзора о соответствии объемов и качестве работ, счет на оплату и счет-фактуру.

Факт подписания заказчиком документов, предусмотренных настоящим пунктом, означает приемку работ но не лишает заказчик, заказчика права выставлять замечания относительно всего комплекса работ на момент подписания закрывающего Акта КС-2.

Исходя из пункта 8.3 договора, по окончании выполнения всех работ, предусмотренных договором, подрядчик передает заказчику по накладной следующие документы: исполнительную документацию на выполненные работы (если она не была ранее передана в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 договора), результаты проведения всех необходимых пуско-наладочных работ, испытаний, отчет об использовании всего объема давальческих материалов (если такие материалы ранее передавались подрядчику), два экземпляра подписанного со своей стороны закрывающего Акта КС-2 и справку КС-3, на которых имеется отметка представителя технадзора о соответствии объемов и качестве работ, счет-фактуру, иные документы, предусмотренные Приложением «Техническое задание».

За нарушение подрядчиком сроков производства работ в пункте 11.2 договора, а также иных сроков, указанных в договоре или приложениях к нему, подрядчик уплачивает заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки. 

Стороны определили в пункте 11.8 договора, что суммы предусмотренных договором неустоек, сумм возмещения, удержаний, убытков, заказчик вправе удержать из любых сумм, подлежащих выплате подрядчику, в безакцептном порядке, уведомив подрядчика о факте и основаниях такого удержания.

Согласно приложению № 3 к договору авансовый платеж в размере 2 515 000 руб. заказчик перечисляет в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора и получения заказчиком счета на оплату авансового платежа.

Исходя из расчета стоимости работ и затрат (Приложение № 2 к договору) стоимость работ по договору составляет 5 033 279,34 руб.

Стороны заключили дополнительное соглашение от 04.05.2016 № 1 к договору, по условиям которого подрядчик обязался выполнить дополнительные внутренние отделочные работы в помещениях АБК на отм. +9000 м в осях А-В/1-17 на объекте

Заказчика «Многофункциональный комплекс оптовой торговли. Корпус № 2, 5 этап строительства», расположенном по строительному адресу: Санкт-Петербург, 

<

...> участок 1 (южнее дома 17/‚ литера А).

Сроки выполнения Дополнительных работ: начало выполнения работ – О4.05.2016;  окончание выполнения работ — 25.05.2016.

Стоимость дополнительных работ составляет 241 806,49 руб.

Расчеты по настоящему дополнительному соглашению производятся в соответствии с порядком оплаты дополнительных работ (приложение м 3 к настоящему дополнительному соглашению).

Авансирование работ по дополнительному соглашению № 1 не предусмотрено.

Стороны заключили дополнительное соглашение от 06.06.2016 № 2 к договору, по условиям которого подрядчик обязался выполнить дополнительные работы по установке перегородок ГКЛ в помещении венткамеры на отм. +9000 м в осях А—В/1-17 на Объекте Заказчика «Многофункциональный комплекс оптовой торговли. Корпус № 2, 5 этап строительства», расположенном по строительному адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

<

...> участок 1 (южнее дома 177. литера А).

Сроки выполнения дополнительных работ: начало выполнения работ — 07.06.2016;  окончание выполнения работ — 25.06.2016.

стоимость дополнительных работ определена на основании расчета стоимости дополнительных работ и затрат (приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению) и составляет 225 792 руб.

Согласно приложению № 3 к дополнительному соглашению № 2 авансовый платеж в размере 110 000 руб. заказчик перечисляет в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора и получения заказчиком счета на оплату авансового платежа.

По пункту 8 дополнительных соглашений № 1 и 2 во всем остальном, что не предусмотрено в настоящих соглашениях, стороны руководствуются условиями договора.

Стороны подписали акты формы КС-2 от 05.04.2016 на сумму 1 963 551,02 руб., от 05.05.2016 На сумму 1 056 887,18 руб., от 20.06.2016 на сумму 241 806,49 руб., от 03.07.2016 на сумму 225 792 руб., от 03.07.2016 на сумму 2 000 518,63 руб., от 07.07.2016 на сумму 12 321,49 руб.

Всего работ произведено на общую сумму 5 500 877,83 руб.

ООО «Олимп-М», ссылаясь на неоплату в полном объеме ООО «А Плюс Девелопмент» выполненных работ по спорному договору, направило претензионное письмо от 21.03.2017 с требованием оплатить задолженность.

Отказ ООО «А Плюс Девелопмент» удовлетворить названную претензию послужил основанием для обращения ООО «Олимп-М» в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд считает, что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 746 ГК РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Как следует из содержания пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Выполнение подрядчиком работ по договору на сумму 5 500 877,83 руб. подтверждено представленными в материалы дела актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными заказчиком без возражений по объему и качеству. 

В письме от 24.10.2016 № 832/10/2016 заказчик гарантировал подрядчику оплату задолженности в размере 1 205 059,24 руб.

Доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме ООО «А Плюс Девелопмент» не представило.

Между тем ООО «А Плюс Девелопмент» в письме от 14.04.2017 № 162/4/2017, отказываясь от оплаты 531 102,75 руб. задолженности, указало, что заказчик начислил штрафную неустойку по пункту 11.2 договора в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по договору на 104 дня (с 25.03.2016 по 07.07.2016) в сумме 523 461,03 руб., по дополнительному соглашению № 1 на 26 дней в сумме 6286,97 руб. и по дополнительному соглашению № 2 на 6 дней в сумме 1354,75 руб.

На основании пункта 11.8 договора заказчик произвел удержание начисленной штрафной неустойки, в связи с чем задолженность перед подрядчиком составляет 24 198,08 руб.

ООО «Олимп-М» нарушения срока выполнения работ не оспаривает, однако ссылается на то, что просрочка выполнения работ допущена в связи с несвоевременной уплатой заказчиком аванса и промежуточных платежей за выполненные работы, а также несогласование дополнительных работ в связи с изменением проекта и невозможности выполнения работ в связи с проведением работ иными организациями на спорном объекте.

В соответствии со статьей 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 статьи 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии - разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении соответствующих требований к нему или им к заказчику ссылаться на указанные обстоятельства.

Суд установил, что подрядчик в нарушение статьи 716 ГК РФ не приостанавливал выполнение работ.

Как установлено в пункте 3.5 договора, сроки выполнения работ подлежат продлению на срок нарушения Заказчиком срока выплаты предусмотренного Договором первого авансового по письменному требованию подрядчика.

ООО «А Плюс Девелопмент» не представило доказательств направления заказчику письменных требований о пролонгации сроков работ в связи с нарушением сроков уплаты авансов по договору и дополнительному соглашению № 2. 

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в дело сторонами доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает, что отсутствуют основания как для полного освобождения от ответственности, так и уменьшения ответственности подрядчика.

Поскольку ООО «Олимп-М» Платежным поручением от 18.05.2017 № 2162 перечислило подрядчику по спорному договору 24 198,08 руб., суд не находит оснований для удовлетворения требований истца.

В связи с отказом истцу в удовлетворении исковых требований государственная пошлина по иску в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ остается на истце.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Косенко Т.А.