АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 76, тел.: (3852)29-88-01

http://www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Барнаул                                                                                              Дело № А03-17446/2019

 

Резолютивная часть решения объявлена 2 марта 2020 года

Решение изготовлено в полном объеме 4 марта 2020 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Хворова А.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая компания», г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СПК», г. Барнаул (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании неустойки в размере 25 410,79 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО2, доверенность № 3-юр от 20.12.2019, паспорт; 

 

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Барнаульская сетевая компания» (далее – АО «БСК») обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СПК» (далее – ООО «СПК»)  о взыскании неустойки в размере 25 410,79 руб.

Исковое требование мотивировано нарушением срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, что привело к начислению неустойки в размере, согласованном сторонами в договоре.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил. Явку представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, в связи с чем на основании части 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

03.10.2018 на основании заявки ответчика между АО «БСК» и ООО «СПК» заключен договор № 03-01.18.0680 об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор).

По условиям договора АО «БСК» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СПК» для электроснабжения объекта: «Стройплощадка многоквартирного жилого дома», расположенного по адресу: 

<

...>. ООО «СПК» обязалось оплатить технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение составляет 98 959 руб. 52 коп. (пункт 3.1 договора).

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

Согласно пункту 1.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 15 рабочих дней со дня заключения договора.

Учитывая срок, установленный пунктом 1.5 договора, мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены в срок до 08.11.2018.

Согласно подпункту а пункта 16(6) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным, если заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

Суд установил, что мероприятия по технологическому присоединению, указанные в технических условиях, ответчиком выполнены, уведомление в адрес АО «БСК» было представлено 15.02.2019.

25.02.2019 АО «БСК» путем осмотра электроустановок установлено выполнение мероприятий, указанных в технических условиях.

Под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (часть 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5.4. договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзаце порядке за год просрочки.

На основании пункта 5.4. договора истец начислил неустойку в размере 25 410 руб. 79 коп. за период с 16.11.2018 по 25.02.2019. Расчет представлен в материалы дела.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению ответчиком нарушен. Между тем, суд полагает, что истцом неверно определен период, за который подлежит начислению  неустойка.

У истца отсутствовали основания для начисления неустойки по 25.02.2019, поскольку ООО «СПК» направило уведомление АО «БСК» 15.02.2019. Учитывая, что уведомление было направлено с нарушением срока, за период с 16.11.2018 по 15.02.2019 (по день направления уведомления) подлежит начислению неустойка в соответствии с  пунктом 5.4. договора.

Ссылка истца на то, что АО «БСК» установила факт осуществления мероприятий по технологическому присоединению 25.02.2019, судом отклоняется, поскольку неустойка подлежит начислению за период допущенного ответчиком нарушения. По состоянию на 25.02.2019 уведомление было получено истцом, нарушение устранено.

Учитывая изложенное, суд находит требование истца о взыскании неустойки подлежащим удовлетворению в размере 22 894 руб. 87 коп. за период с 16.11.2018 по 15.02.2019, в остальной части требований отказывает.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины суд относит на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 27, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «СПК» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая компания» 22 894 руб. 87 коп. неустойки и 1 800 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 

Судья                                                                                                        А.В. Хворов