Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-19982/2019

21 августа 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  15 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  21 августа 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем П.Е. Голушко

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Администрация муниципального образования Смольнинское (адрес:  Россия 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр. д.60, ОГРН: 1037843095047);

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРОНСТРОЙ" (адрес:  Россия 190020, Санкт-Петербург, УЛИЦА ЛИФЛЯНДСКАЯ, ДОМ 6, ЛИТЕР "Е", ПОМЕЩЕНИЕ 311/1, ОГРН:  1127847340830);

об обязании и взыскании 4423493.04 штрафа

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 22.04.2019,

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

Администрация муниципального образования Смольнинское предъявила иск к ООО "ИНВЕСТ+" об обязании безвозмездно устранить недостатки (дефекты) работ, выполненных по муниципальному контракту №20к/15 от 12.05.15, а именно: устранить по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 5-7 провалы плитки на площади 8 кв. м и отсутствие примыкания плитки к асфальту, а также просит взыскать с ответчика 4 423 493  руб. 04 коп. штрафа.

Ответчик отзыв не представил, в заседание не явился. Дело рассматривается без участия ответчика на основании ст. 156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между Администрацией муниципального образования Смольнинское – заказчиком и ООО "ИНВЕСТ+"- подрядчиком был заключен контракт №20к/15 от 12.05.15 на выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования Смольнинское.

05.09.18 "ИНВЕСТ+"- изменило свое наименование на ООО "ИРОНСТРОЙ".

По акту приема-передачи выполненных работ от 27.07.2015 результат работы сдан Заказчику без претензий к качеству. Выполненные работы оплачены истцом.

Скрытые недостатки но спорному объекту по адресу: ул. Радищева, д.5-7 были выявлены проверкой, состоявшейся 19,07.2018 г. в присутствии представителей ответчика, в результате которой был составлен акт обследования на гарантийный ремонт с перечислением выявленных недостатков: провал плитки около люка, площадью 8 кв. м . отсутствует примыкание плитки к асфальту на въезде в арку.

Гарантийный срок согласован сторонами и установлен З6 (тридцать шесть) месяцев со дна сдачи работ. Окончание работ по Контракту   20.10.2015 года (п.3.1 Контракта).

Предарбитражным уведомлением №01-13-2805/18 от 31.10.2018 г. истец предложил ответчику приступить к исправлению выявленных недостатков и дефектов и устранить их в 30-ти дневной срок. Ответ на претензию не получен.

В соответствии с пунктом 8.1 Контракта и Технического задания (Приложение №1 к Контракту) Подрядчик в течение гарантийного срока, устраняет дефекты результатов работ и свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, в соответствии с условиями Контракта.

Недостатки (дефекты) проведенных работ выявлены в пределах гарантийного срока, установленного Контрактом.

Согласно п.9.3.2 Контракта за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в виде фиксированной суммы в размере 5% цены Контракта в размере 4 423 493 (четыре миллиона четыреста двадцать три тысячи четыреста девяносто три) руб. 04 коп.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 724, 754, 756 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ИРОНСТРОЙ" безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты) работ, выполненных по муниципальному контракту №20к/15 от 12.05.15, а именно: устранить по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 5-7 провалы плитки на площади 8 кв. м и отсутствие примыкания плитки к асфальту.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИРОНСТРОЙ" в пользу Администрации муниципального образования Смольнинское 4 423 493 руб. 04 коп. штрафа.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИРОНСТРОЙ" в доход федерального бюджета 51 117 руб. 47 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.