22/2017-65965(1) 

Арбитражный суд Амурской области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-10090/2017

г. Благовещенск

05 декабря 2017 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи В.В. Китаева,  при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявлениеобщества с ограниченной  ответственностью «СМУ-22» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  государственному казенному учреждению управление автомобильных дорог Амурской  области «Амурупрадор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о внесении изменений  в государственный контракт  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

Иск удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт № Ф.2017.84821 от 03 апреля 2017 года,  заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «СМУ-22» и  государственным казенным учреждением управление автомобильных дорог Амурской  области «Амурупрадор», изложив пункт 1.2 контракта в следующей редакции: «Сроки  выполнения работ: начало - 14.04.2017 г., окончание - 15 сентября 2018 года».  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья В.В. Китаев