АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, http://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

20 июля 2017 года

Дело № А33-8770/2017

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СовТехноСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации – 12.03.2008, место нахождения: 660075, 

<

...>/2)  в пользу краевого государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации – 06.11.2008, место нахождения: 660099, 

<

...>) 229 751,76 руб. неустойки по  государственному контракту  от 26.10.2015 №866-09-15 за период с 27.10.2015 по 01.09.2016, рассчитанной  по следующей формуле: 

Цена контракта (Ц) = 32 191 559 руб.

Стоимость фактически исполненного (В) = 29 713 115 руб.

Срок исполнения обязательств по контракту (ДК) = 311 дней.

Количество дней просрочки (ДП) = 103 дня.

Ставка Центрального Банка Российской Федерации = 9%.

Формула К = ДП / ДК х 100% = 103 / 311 х 100% = 33,11%, следовательно К = 0,01.

С = СЦБ х ДП = 0,01 х 9% х 103 = 0,0927.

П = (Ц - В) х С = 2 478 444 руб. (32 191 559 – 29 713 115) х 0,0927 = 229 751,76 руб.

В удовлетворении требований в оставшейся части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СовТехноСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации – 12.03.2008, место нахождения: 660075, 

<

...>/2)  в доход федерального бюджета 7 595 руб. государственной пошлины. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что они вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя. 

Судья

О.С. Щелокова