Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-2434/2020

19 июня 2020 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г. Л. рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению федерального государственного бюджетного учреждения "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Новая строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 361,26 руб. пени за нарушение срока выполнения работ по договору № 18-34-94 от 15.10.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту здания Метеостанции по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, Чапчылганский наслег, 

<

...> (часть 2), а также 2000 руб. расходов по уплате государственной пошлины,

без вызова сторон.

Суд, проверив расчет пени, находит неверным, поскольку в период просрочки не действовала ставка рефинансирования ЦБ РФ - 7,75%, в связи с чем судом самостоятельно произведен расчет пени:

 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

199 777,00

01.12.2018

Новая задолженность на 199 777,00 руб.

199 777,00

01.12.2018

07.12.2018

7

7.5

199 777,00 ? 7 ? 1/300 ? 7.5%

349,61 р.

Сумма основного долга: 199 777,00 руб.

Сумма неустойки: 349,61 руб.

 

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в части.

С учетом результата  рассмотрения дела, расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат возмещению ответчиком пропорционально удовлетворённым требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новая строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу федерального государственного бюджетного учреждения "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 349,61 руб. пени за нарушение срока выполнения работ по договору № 18-34-94 от 15.10.2018, а также 1 935,60 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

 

Судья

Г.Л. Николаева