Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-18831/2019

20 мая 2021 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе  судьи Гавриш С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации  Сургутского района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной  регистрации в качестве юридического лица 20.12.2002, место нахождения: 628408, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>), Департамента  управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации  Сургутского района, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной  регистрации в качестве юридического лица 01.06.2004, место нахождения: 628433, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр,  ул. Маяковского, д. 1А) к обществу с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Багира» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной  регистрации в качестве юридического лица 23.01.2015, место нахождения: 628414,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>) об устранении строительных недостатков,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Багира» в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения в законную  силу за свой счет устранить строительные недостатки, допущенные при строительстве  дома № 8а о улице Новоселов д.Русскинская с.п. Русскинская Сургутского района Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, выявленные в рамках муниципального  контракта на приобретение жилых помещений для муниципальных нужд от 21.12.2017   № Ф.217.566388, а именно:  

 - в кв. № 4:  

устранить в санузле обрушение покрытие стен - облицовочной плитки; восстановить техническое вентиляционное отверстие в натяжном потолке; 

устранить следы протечек на поверхности, окрашенной водоэмульсионным  составом в месте прохода канализационного стояка через перекрытие;  

устранить следы протечек у вентиляционной решетки на стене, оклеенной обоями;  

устранить на кухне отсутствие технического вентиляционного отверстия в  натяжном потолке;  

устранить обнаруженные участки ограждающих конструкций, температура  внутренней поверхности которых ниже допустимой;  

устранить нарушение тепловой защиты в области примыкания оконных блоков;  устранить дефектные (промерзающие) зоны в местах выявленных нарушений по перепаду  температур, нарушение тепловой защиты ограждающих конструкций (наружные стены);  

- в кв. № 6: 

устранить на покрытии стен облицовочной плиткой сетку из мелких волосяных  трещин; устранить скопление конденсата на оконных блоках;  

на кухне устранить вздутие линолеума и образование «волн», визуально  зафиксированные вмятины на покрытии пола (линолеуме) и тактильно на основании пола  (стяжке);  

устранить следы протечек на поверхности, окрашенной водоэмульсионным  составом в месте прохода канализационного стояка через перекрытие;  

устранить обнаруженные участки ограждающих конструкций, температура  внутренней поверхности которых ниже допустимой;  

устранить дефектные (промерзающие) зоны в местах выявленных нарушений по  перепаду температур, нарушение тепловой защиты ограждающих конструкций (наружные  стены);  

устранить нарушение тепловой защиты в области примыкания оконных блоков;  - в кв. № 7: 

устранить следы от протечек на поверхности стен, оклеенных обоями в комнатах -  под потолком, под подоконниками, в углах, в коридоре - под потолком, в углах, на кухне -  в углу;  

устранить на покрытии стен облицовочной плиткой сетку из мелких волосяных  трещин;  

устранить следы протечек на поверхности, окрашенной водоэмульсионным  составом в месте прохода канализационного стояка через перекрытие;  

устранить обнаруженные участки ограждающих конструкций, температура  внутренней поверхности которых ниже допустимой;  

устранить нарушение тепловой защиты в области примыкания оконных блоков;  устранить дефектные (промерзающие) зоны в местах выявленных нарушений по перепаду  температур;  

устранить нарушение тепловой защиты ограждающих конструкций (наружные  стены);  

- в кв. № 12:  

устранить следы протечек на поверхности, окрашенной водоэмульсионным  

составом в месте прохода канализационного стояка через перекрытие; 

устранить вздутие линолеума и образование «волн»; визуально зафиксированные 

вмятины на покрытии пола (линолеума) и тактильно на основании пола (стяжке) 

устранить скопление конденсата на оконных блоках; 

восстановить техническое отверстие для вентиляции в натяжном потолке;  

устранить провисание инженерных коммуникаций (электропровода) между  

полотном натяжного потолка и бетонным основанием; 

устранить недостатки в средней створке оконного блока при открытии в двух  

режимах (поворотным и откидном);   - в кв. № 16: 

устранить следы протечек на поверхности, окрашенной водоэмульсионным  

составом в месте прохода канализационного стояка через перекрытие;   - в кв. № 22:  

устранить недостатки не плотно закрывающихся дверей в комнату и в санузел; устранить адгезию между облицовочным покрытием - плиткой и стеной; 

устранить вздутие линолеума и образование «волн», визуально зафиксированные  

вмятины на покрытии пола (линолеуме) и тактильно на основании пола (стяжке);  

на оклеенной обоями поверхности, в месте устройства выключателя в санузел  

устранить отверстие; 

устранить недостатки обнаруженных участков ограждающих конструкций,  

температура внутренней поверхности которых ниже допустимой; 

устранить дефектные (промерзающие) зоны в местах выявленных нарушений по  

перепаду температур; 

устранить нарушение тепловой защиты ограждающих конструкций (наружные  

стены);  - в кв. № 28: 

устранить следы протечек на поверхности, окрашенной водоэмульсионным  

составом в месте прохода канализационного стояка через перекрытие; 

восстановить техническое вентиляционное отверстие в натяжном потолке;  

устранить обнаруженные участки ограждающих конструкций, температура  

внутренней поверхности которых ниже допустимой; 

устранить дефектные (промерзающие) зоны в местах выявленных нарушений по  

перепаду температур; 

устранить нарушение тепловой защиты ограждающих конструкций (наружные  

стены); - в подъездах № 1, № 2, № 3: 

устранить темные пятна на стенах с облицовкой из улучшенной штукатурки с  

последующей окраской; 

в местах сопряжения конструкций плит перекрытия и стен устранить волосяные  трещины;  

восстановить отсутствие гильз в коммуникационных отверстиях, проходящие через  стену;  

устранить на потолке продольные волосяные трещины вдоль стыков плит  перекрытия; устранить скопление конденсата на окнах, сырость и разрушение  отделочного покрытия в углах оконных откосов;  

устранить волосяные трещины на стыке конструкций лестничных маршей и стен;  устранить волосяные трещины на отделке улучшенной штукатуркой вдоль торцевой части  лестничного марша;  

у входных металлических дверей у входных групп устранить деформацию;  устранить имеющиеся зазоры в местах примыкания отделочного материалов фасадов  (металлосайдинга) к конструкциям крыльца и отмостки;  

устранить выкрашивание бетонного основания конструкций крылец входных групп  подъезда, а также отмостки;  

в подъезде № 3 на 3 этаже устранить сквозное отверстие в стене неизвестного  назначения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Багира» в пользу администрации Сургутского района судебные издержки по оплате  судебной экспертизы в размере 280 000 руб. 00 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «Багира» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  00 коп.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

В силу статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Судья С.А. Гавриш 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 20.10.2020 10:12:33

Кому выдана Гавриш Светлана Александровна