АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Резолютивная часть решения объявлена 02.04.24г. Полный текст решения изготовлен 04.04.24г. 04 апреля 2024 года Дело № А55-35743/2023 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Рысаевой С.Г. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Орешкиной Н.А. рассмотрев в судебном заседании 02 апреля 2024 года дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Монтажтехстрой" к Обществу с ограниченной ответственностью "Премиум" 

с участием в деле временного управляющего ООО «МонтажТехСтрой» ФИО1 (125195, г. Москва, а/я 19)) в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора  

о взыскании 3 840 272 руб. 19 коп. 

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Премиум" к Обществу  с ограниченной ответственностью "Монтажтехстрой"  

о взыскании 1 600 000 руб при участии в заседании: от истца – ФИО2 по дов. от 27.03.24г. от ответчика – ФИО3 по дов. от 25.07.2023 от третьего лица – не явилось, извещено установил: 

 Общество с ограниченной ответственностью "Монтажтехстрой" обратилось в  арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Премиум" о  взыскании 3 840 272 руб. 19 коп. задолженности по контракту № 415518ТДС/201801146/2-МТС от 06 сентября 2018 года, в том числе: 3 657 402 руб. 09 коп. –  основной долг, 182 870 руб. 10 коп. неустойка.  

 Определением от 29.01.2024 к участию в деле привлечен временный управляющий  ООО «МонтажТехСтрой» ФИО1 (125195, г. Москва, а/я 19)) в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора.  

 Третье лицо, извещенное о времени и месте судебного заседания в судебное заседание  не явилось, отзыв на иск не представило. Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в  отсутствие третьего лица.  

 Определением от 13.02.2024 суд в соответствии со ст. 49 АПК РФ принял уточнения  исковых требований. Сумму иска считать равной 3 089 409 руб. 03 коп., в том числе: 2 942  294 руб. 37 коп. основной долг по контракту № 4155-18ТДС/201801146/2-МТС от 06  сентября 2018 года, 147 114 руб. 66 коп. неустойка за период с 04.10.2022 по 27.07.2023  

 Определением от 27.02.2024 суд принял встречное исковое заявление Общества с  ограниченной ответственностью "Премиум" к Обществу с ограниченной  ответственностью "Монтажтехстрой" о взыскании 1 600 000 руб. неустойку за нарушение  

устранения дефектов по контракту № 4155-18ТДС/201801146/2-МТС от 06 сентября 2018  года.  

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет  исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит,  что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть  рассмотрено в деле о банкротстве.  

 В пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с  рассмотрением дел о банкротстве" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что в, силу  абзаца второго пункта 1 статьи 63, абзаца второго пункта 1 статьи 81, абзаца восьмого  пункта 1 статьи 94 и абзаца седьмого пункта 1 статьи 126 Федерального закона от  26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты введения наблюдения,  финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства требования  кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за  исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о  банкротстве в порядке статей 71 и 100 Закона. В связи с этим все исковые заявления о  взыскании с должника долга по денежным обязательствам и обязательным платежам, за  исключением текущих платежей и неразрывно связанных с личностью кредитора  обязательств должника-гражданина, поданные в день введения наблюдения или позднее  во время любой процедуры банкротства, подлежат оставлению без рассмотрения на  основании пункта 4 части 1 статьи 148 АПК РФ.  

 Определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-3469/20234/15-Б от 08 февраля 2023 года в отношении ООО «МонтажТехСтрой» введена процедура  наблюдения.  

 Из материалов дела следует, что истцом по встречному иску предъявлены требования о  взыскании неустойки за просрочку устранения дефектов гарантийного периода по  Контракту № 4155-18ТДС/201801146/2-МТС от 06 сентября 2018 года (далее - Контракт)  за период с 13.11.2020 г. по 28.11.2020 г. день устранения дефектов 28.11.20г.  Соответственно требования об оплате неустойки возникли до даты введения процедуры  наблюдения и подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве в порядке статей 71 и  100 Закона. В соответствии с ст.148 АПК РФ суд оставляет встречное исковое заявление  без рассмотрения.  

 Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов,  изложенных в исковом заявлении, отзыве на иск, заслушав объяснения и доводы  присутствовавших в заседании представителей сторон, суд считает первоначальные  исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:  

 Между ООО «МонтажТехСтрой» (далее - Субподрядчик, Истец) и ООО " ПРЕМИУМ"  (далее - Подрядчик, Ответчик) был заключен контракт № 4155-18ТСД/201801146/2-МТС  от 06 сентября 2018 г. (далее - Контракт).  

 Согласно п. 3.1 Контракта Субподрядчик в установленные Контрактом сроки и в счет  Контрактной цены выполнит за свой риск, своими силами и силами согласованных  Подрядчиком СубСубподрядных организаций, все Работы и услуги в объеме,  определенном настоящим Контрактом и Рабочей документацией и выполнит все иные  требования, установленные Контрактом. В рамках выполнения Работ и услуг по  Объектам:  

- 01-ТПР-001-009004 «МН Куйбышев - Тихорецк, Зензеватка - Караичево 767,1 км - 802,0  км. Реконструкция»;  

- 01-ТПР-001-009001 «МН «Куйбышев - Тихорецк», участок «Зензеватка - Караичево»,  674,9км - 694,9км. Волгоградское РНУ. Реконструкция» Подрядчик поручает, а  субподрядчик в счет Контрактной цены в соответствии с требованиями Контракта,  Рабочей документацией и Регламентов Заказчика (в том числе с учетом их изменений в  

период Срока действия Контракта) обязуется осуществить следующее (включая, но не  ограничиваясь): получение всех необходимых разрешений и допусков к производству  Работ в соответствии с условиями Контракта, требованиями Регламентов Заказчика и  нормативных правовых актов Российской Федерации; выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений;  поставку всех Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ и услуг  по Контракту (за исключением Материалов и Оборудования, входящих в поставку  Заказчика и указанных в Приложении 6), а также выполнить иные обязательства,  предусмотренные п. 3.2 Контракта в сроки предусмотренные контрактом.  

 Истец обосновывает свои требования тем, что в рамках исполнения принятых на себя  по Контракту обязательств Субподрядчик выполнил работы на общую сумму 766 909  056,14 руб., что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).  

 На основании п. 6.5.2. Контракта из оплаты (с каждой приемки выполненных Работ) в  качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту удерживается  обеспечительный платеж денежных средств в размере 5% (пять процентов) от стоимости  выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ.  

 При этом должны соблюдаться условия по обеспечению оплаты последнего платежа  по Контракту в порядке и размере установленном подпунктом 6.5.6 Контракта.  

 Согласно п. 6.5.6. Подрядчик оплачивает последний платеж за выполненные  Субподрядчиком Работы по Контракту в размере 5 % (пять процентов) от стоимости  выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком объемов Работ на дату  подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной  комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию  законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36, Приложение 46) в течение 80  (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки  законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение  36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта  (форма Ф-36. Приложение 46).  

 В соответствии с п. 6.5.3. Контракта оплата выполненных Подрядчиком и принятых  Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных  дней следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры,  оформленных Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными  представителями Сторон:  

 Подрядчик, в нарушение условий Контракта, произвел оплату выполненных  Субподрядчиком работ не в полном объеме, на общую сумму 763 251 654,05 руб.  

 Согласно расчета истца сумма основной задолженности Ответчика перед Истцом по  Контракту составляет: 766 909 056,14 - 763 251 654,05 = 3 657 402,09 руб.  

 Согласно п. 28.3 Контракта Субподрядчик в течение Срока действия Контракта, в том  числе в течение Гарантийного срока (а также Гарантийного срока на результат Работ по  окраске металлоконструкций резервуаров), обязан по письменному требованию  Подрядчика, в том числе в Гарантийный срок согласно порядку, установленному  Приложением 35 Контракта, в срок, установленный Подрядчиком, своими силами и за  свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов/Недостатков,  являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения  Субподрядчиком обязательств по Контракту, действий третьих лиц (за исключением  действий третьих лиц, возникших в Гарантийный срок), включая замену дефектного  Оборудования и Материалов поставки Субподрядчика либо их частей, а также, в случае  необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.  

 Согласно п. 29.15 Контракта в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты,  оговоренные в Статье 6 Контракта, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней,  Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/360 двойной  

ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от  суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 %  (пяти процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа.  

 Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется  Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения  документов. Последний Акт приемки выполненных работ за № 19 был подписан  сторонами 15.10.2020 г. таким образом, работы должны быть оплачены не позднее  29.11.2020 г. (15.10.2020 + 45 календарных дней).  

 Истцом ответчику начислена неустойка за период с 01.12.20г. по 27.07.23г. в размере  1 673 566 руб. 24 коп. Поскольку неустойка не может быть более 5 % от суммы  неоплаченного платежа неустойка составляет 182 870 руб. 10 коп. (3 657 402 руб. 09 коп. х  5%).  

 Истцом в адрес Ответчика было направлено претензионное требование № МТС/ПРТ- 71/2023 от 18.04.2023 г. об уплате задолженности в сумме 3 657 402,09 руб., последнее  оставлено без удовлетворения, задолженность не погашена по настоящее время.  

 Ответчик исковые требования истца не признает, при этом указывает на то, что  подрядчиком в гарантийный период были выявлены дефекты результатов выполненных  работ. Подрядчик своими силами и средствами устранил выявленные дефекты.  

 В соответствии с п.28.14 Контракта Субподрядчику были предъявлены требования об  оплате затрат Подрядчика по устранению дефектов (Исх. № 0212/07 от 02.12.2020г.,   № 2312/08 от 23.12.2020г., № 2903/01 от 29.03.2022г.). В связи с невыполнением  обязательств по оплате затрат в тридцатидневный срок, сумма затрат по устранению  дефектов в размере 715 108 рублей 72 копейки удержаны из оплаты выполненных и  принятых работ по Контракту из общей суммы последнего платежа, сформированного в  соответствии с п.6.5.6. Контракта. Ответчик указывает на то, что сумма оставшегося  платежа составляет 2 942 294,37 рублей, что подтверждается Актом сверки за период с  января 2018 по декабрь 2023г, также просит снизить неустойку в соответствии с ст.333 ГК  РФ.  

 С учетом доводов ответчика об удержании суммы 715 107 руб. 72 коп. в счет  устранения недостатков гарантийного периода истец уточнил исковые требования и  просит взыскать с ответчика 2 942 294 руб. 37 коп. (766 909 056 руб. 14 коп. – 763 251 654  руб. 05 коп. – 715 107 руб. 72 коп.), также уточнил исковые требования в части взыскания  неустойки с учетом Постановления Правительства РФ № 497 от 28.03.22г. "О введении  моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами"  просит взыскать с ответчика с учетом ограничения размера неустойки установленного  п.29.15 договора 147 114 руб. 66 коп. (2 942 294 руб. 37 коп. х 5%).  

 Между ООО «Премиум» (Подрядчик) и ООО «МонтажТехСтрой» (Субподрядчик)  заключен контракт № 4155-18ТСД/201801146/2-МТС от 06.09.2018г. (далее по тексту- Контракт), по условиям которого Субподрядчик обязуется выполнить работы по  объектам:  

- 01-ТПР-001-009004 «МН Куйбышев - Тихорецк, Зензеватка - Караичево 767,1 км802,0 км. Реконструкция»;  

- 01-ТПР-001 -009001 «МН «Куйбышев - Тихорецк», участок «Зензеватка -  Караичево», 674,9км - 694,9км. Волгоградское РНУ. Реконструкция»; «Обустройство  Восточного участка ОНГКМ. Система внешнего транспорта газа».  

 В соответствии с п.3.2.Контракта выполняемые работы включают в себя: получение 

всех необходимых разрешений и допусков к производству Работ в  соответствии с условиями Контракта, требованиями Регламентов Подрядчика и Заказчика  и нормативно-правовых актов Российской Федерации;  

выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж  Временных зданий и сооружений;  

 поставку всех Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ и  услуг по Контракту (за исключением Материалов и Оборудования, входящих в поставку  Подрядчика);  

 приемку, вывоз до мест складирования Материалов и Оборудования поставки  Заказчика/Подрядчика согласно проекту организации строительства, хранение  Материалов и Оборудования поставки Подрядчика на собственных и/или арендованных  складах и площадках складирования, вывоз на Объект Материалов и Оборудования  поставки Подрядчика;  

 проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних  организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной  организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения  промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам  заключения (в соответствии с ТУ на пересечения владельца коммуникаций);  

 проведение испытаний и участие (совместно с Подрядчиком) в пропуске  диагностических приборов;  

 выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное  опробование согласно Рабочей документации;  

 участие (совместно с Подрядчиком) в комплексном опробовании систем и  оборудования;  

 формирование и предоставление Подрядчику исполнительной документации;  устранение Дефектов/Недостатков, допущенных Субподрядчиком в ходе производства  

Работ; 

 выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым  назначением на всей площади представленных Подрядчиком участков с оформлением по  установленной форме документов (справок), подтверждающих проведение рекультивации  в соответствии с Рабочей документацией;  

 передачу Субподрядчиком рекультивированных на всей площади проведения Работ  участков стороне, предоставившей данные участки во временное пользование, с  оформлением Акта приема-передачи в порядке, установленном Основными положениями  о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании  плодородного слоя почвы;  

 сдачу Объекта Подрядчику по Акту приемки законченного строительством объекта  (форма КС-11, Приложение 37);  

 получение совместно с Подрядчиком в Федеральной службе по экологическому,  технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Заключения о соответствии  построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального  строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных  правовых актов и проектной документации (ЗОС) в соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации;  

 сдачу Объекта (совместно с Подрядчиком) Приемочной комиссии по Акту приемки  законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (форма КС-14) или Акту  приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36) и  выполнение обязательств в течение Гарантийного срока;  

- охрану и содержание Объекта (строительной площадки производства Работ, в том числе  площадок Временных зданий и сооружений);  

выполнение иных Работ неразрывно связанных со строящимся (реконструируемым,  ремонтируемым) Объектом.  

 В соответствии с п.5.1 договора работы, предусмотренные контрактом по объекту  должны быть начаты субподрядчиком в сроки согласно Приложению 2 «График  выполнения работ» полностью завершены не позднее:  

 - 01-ТПР-001-009004 «МН Куйбышев - Тихорецк, Зензеватка - Караичево 767,1 км - 802,0  км. Реконструкция» - 17.05.20г.  

- 01-ТПР-001 -009001 «МН «Куйбышев - Тихорецк», участок «Зензеватка - Караичево»,  674,9км - 694,9км. Волгоградское РНУ. Реконструкция»; «Обустройство Восточного  участка ОНГКМ. Система внешнего транспорта газа» - 17.05.20г.  

 В соответствии с п.6.5.2 из оплаты (с каждой приемки работ) в качестве обеспечения  исполнения обязательств по контракту удерживается обеспечительный платеж денежных  средств в размере 5% от стоимости выполненных субпорядчиком работ и принятых  Подрядчиком.  

 При этом должны соблюдаться условия по обеспечению оплаты последнего платежа  по Контракту в порядке и размере установленном подпунктом 6.5.6 Контракта.  

 Указанный 5% пяти процентный обеспечительный платеж - это резерв денежных  средств, гарантия должного исполнения Субподрядчиком договорных обязательств. В  случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Субподрядчиком своих  обязательств (невыполнение определенного настоящим Договором объема работ;  производство Работ с ненадлежащим качеством, нарушение сроков выполнения работ и  пр., нарушение обязательств гарантийного периода) и может быть использована для  возмещения понесенных расходов и убытков Подрядчика вследствие ненадлежащего  исполнения условий договора Субподрядчиком; является гарантией соблюдения  интересов Подрядчика при необходимости удержания неустоек, штрафных сумм либо  возмещения причиненного субподрядчиком Подрядчику ущерба.  

 Согласно п. 6.5.6. Подрядчик оплачивает последний платеж за выполненные  Субподрядчиком Работы по Контракту в размере 5 % (пять процентов) от стоимости  выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком объемов Работ на дату  подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной  комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию  законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36, Приложение 46) в течение 80  (восьмидесяти4) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки  законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение  36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта  (форма Ф-36. Приложение 46).  

 В соответствии с п. 6.5.3. Контракта оплата выполненных Подрядчиком и принятых  Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных  дней следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры,  оформленных Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными  представителями Сторон:  

Журнала учета выполненных работ (форма КС-ба, Приложение 16); 

Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39), при этом,  выполненные работы должны быть подтверждены Организацией по строительному  контролю, а Акт о приемке выполненных работ должен быть принят (подписан)  полномочным Представителем Заказчика;  

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3, Приложение 40);  Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика за отчетный месяц  (Приложение 9);  

Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и  демонтаже зданий и сооружений (форма М-35, Приложение 15);  

Реестра смонтированного Оборудования поставки Заказчика (Приложение 10);  Реестра смонтированного Оборудования поставки Подрядчика (Приложение 11);  

Ведомости Оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Приложение 12).  

 Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата  выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном  сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного  подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ  производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

 В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или  отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим  образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

 В соответствии с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации  сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом,  подписанным обеими сторонами.  

 Как следует из материалов дела, сторонами были подписаны акты о приемки  выполненных работ КС2, справки о стоимости выполненных работ КС3, акт зачета  взаимных требований.  

 В соответствии с договором были выполнены работы на общую сумму 766 909 056,14  рублей. Оплата по договору произведена в размере 763 251 654,05 рублей. Удержание в  размере 3 657 402,09 рублей было произведено на основании п.6.5.2. Контракта, в  соответствии с которым из оплаты в качестве обеспечения исполнения обязательств по  Контракту удерживается обеспечительный платеж денежных средств в размере 5% (пять  процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ.   По условиям статьи 28 Контракта, Субподрядчик в течение Срока действия  Контракта, в том числе в течение Гарантийного срока (а также Гарантийного срока на  результат Работ по окраске металлоконструкций резервуаров), обязан по письменному  требованию Подрядчика, в том числе в Гарантийный срок согласно порядку,  установленному Приложением 35 Контракта, в срок, установленный Подрядчиком,  своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению  Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего  исполнения Субподрядчиком обязательств по Контракту, действий третьих лиц (за  исключением действий третьих лиц, возникших в Гарантийный срок), включая замену  дефектного Оборудования и Материалов поставки Субподрядчика либо их частей, а  также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.  

 Если отступления в работе от условий Контракта, выявленные дефекты/недостатки  результата Работ или иные недостатки результатов Работы не были устранены  Субподрядчиком в установленный Заказчиком/Подрядчиком срок, либо являются  существенными и неустранимыми, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта  и/или потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций,  оговоренных в статье 29 Контракта (п.28.14 Контракта).  

 По вышеуказанным объектам, Подрядчиком в гарантийный период были выявлены  дефекты результатов выполненных работ. Подрядчик своими силами и средствами  устранил выявленные дефекты. В соответствии с п.28.14 Контракта Субподрядчику были  предъявлены требования об оплате затрат Подрядчика по устранению дефектов  (Исх. № 0212/07 от 02.12.2020г., № 2312/08 от 23.12.2020г., № 2903/01 от 29.03.2022г.-  Приложение № 2,3,4). В связи с невыполнением обязательств по оплате затрат в  тридцатидневный срок, сумма затрат по устранению дефектов в размере 715 108 рублей  72 копейки удержаны из оплаты выполненных и принятых работ по Контракту из общей  суммы последнего платежа, сформированного в соответствии с п.6.5.6. Контракта.  

 Задолженность на сумму 2 942 294 руб. 37 коп. по контракту № 415518ТДС/201801146/2-МТС от 06 сентября 2018 года подтверждается актом сверки расчетов  подписанным сторонами и ответчиком не отрицается.  

 В нарушении ст. 65 АПК РФ заказчиком не представлено доказательств не  качественности выполненных работ, доказательств выполнения работ в меньшем объеме  чем указанно в актах доказательств того, что выполненные работы не соответствуют  заявленным и их результат не представляет для ответчика потребительской ценности и не  может быть использован по назначению, не предоставил.  

 Учитывая вышеизложенное и в соответствии с ст.ст.309,310,711,740,746,753 ГК РФ суд  считает исковые требования истца подлежащими удовлетворению в размере 2 942 294  руб. 37 коп. основной долг по контракту № 4155-18ТДС/201801146/2-МТС от 06 сентября  2018 года  

 Истец уточнил исковые требования в части взыскания неустойки с учетом  Постановления Правительства РФ № 497 от 28.03.22г. "О введении моратория на  возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" просит  взыскать с ответчика за период с 04.10.22г. по 27.07.23г.неустойку в размере 359 121 руб.  13 коп., с учетом ограничения размера неустойки установленного п.29.15 договора, что  составляет 147 114 руб. 66 коп. (2 942 294 руб. 37 коп. х 5%).  

 Ответчиком по первоначальному иску заявлено ходатайство о снижении неустойки в  соответствии с ст.333 ГК РФ.  

 Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.  (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 Статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства,  суд вправе уменьшить неустойку.  

 Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях  неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки  в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется  ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила  применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.  

 Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям  нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить  предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя  из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи (пункт 6 статьи 395 Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

 В абзаце третьем пункта 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского  кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств"  разъяснено, что суд кассационной инстанции может отменить обжалуемый судебный акт в  части, касающейся уменьшения неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации, лишь в случае нарушения или неправильного применения норм  материального права, к которым, в частности, относятся нарушение требований пункта 6  статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, когда сумма неустойки за  просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, установленного  пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, или уменьшение  неустойки в отсутствие заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 387 Гражданского процессуального  кодекса Российской Федерации).  

 Таким образом, размер подлежащей уплате неустойки может быть снижен судом по  ходатайству ответчика, но не ниже предела, установленного пунктом 1 статьи 395  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 Суд учитывает, что ответственность ответчика ограничена п.29.15 договора неустойка  не может быть более 5 % от суммы неоплаченного платежа, данный пункт договора  подписан ответчиком без замечаний и разногласий относительно ограничения размера  неустойки.  

 Истец по первоначальному иску начислил ответчику неустойку в размере 147 114 руб.  66 коп. (2 942 294 руб. 37 коп. х 5%) то есть с учетом ограничения нижнего порога размера  неустойки предусмотренной п.29.15 договора, в связи с чем суд не находит оснований  

для применения ст. 333 ГК РФ.  

 Учитывая вышеизложенное и в соответствии с ст.ст.309,310,330 ГК РФ суд считает  требования истца подлежащими удовлетворению в размере 147 114 руб. 66 коп. неустойка  за период с 04.10.2022г. по 27.07.2023г.  

 В соответствии с ст.110 АПК РФ расходы по госпошлине в сумме 38 447 руб. по  первоначальному иску относятся на ответчика и подлежат взысканию в доход  федерального бюджета.  

 Расходы по госпошлине в сумме 34 576 руб. в соответствии с ст.104 АПК РФ подлежат  возврату истцу по встречному иску из федерального бюджета.  

Руководствуясь ст.ст.110,156,167-171,176,259 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Премиум" в пользу  

Общества с ограниченной ответственностью "Монтажтехстрой" 3 089 409 руб. 03 коп., в  том числе: 2 942 294 руб. 37 коп. основной долг по контракту № 4155-18ТДС/201801146/2- МТС от 06 сентября 2018 года, 147 114 руб. 66 коп. неустойка за период с 04.10.2022г.  

 по 27.07.2023г. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Премиум" в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 38 447 руб.  

 Встречный иск оставить без рассмотрения. 

 Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Премиум" из федерального  бюджета госпошлину в сумме 34 576 руб. и выдать справку на ее возврат.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской  области.  

Судья / С.Г. Рысаева