АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-13579/2020

05 мая 2022 года

город  Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску НО «Региональный фонд капительного ремонта многоквартирных домов Республики Крым» к ООО «Инвест-Строй» о взыскании,

при участии:

от истца –  ФИО2, представитель по доверенности № 104 от 10.012022;

Обстоятельства дела: Истец обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании  неустойки в сумме 169 509,12 руб.

От истца поступило ходатайство об отказе от исковых требований в части взыскания пени в размере 118 656,39 руб.

Определением суда производство по делу в части взыскания пени в размере 118 656,39 руб. прекращено.

Таким образом, в настоящее время рассматриваются уточненные исковые требования о взыскании пени в сумме 50 852,73 руб.

Исковые требования обосновываются несвоевременным выполнением работ.

Ответчик уточненные исковые требования признает в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Между некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым», именуемой в дальнейшем «Заказчик», и обществом с ограниченной ответственностью «Инвест-Строй», именуемым в дальнейшем «Генподрядчик», по итогам проведения электронного аукциона заключен договор               № FKR14061700011 от 07.08.2017г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (ремонт кровли, ремонт фасада) Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д. 7А. (далее по тексту -Договор).

В соответствии с п. 4.1. Договора Генподрядчик обязуется выполнить Работы по Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому Объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к Договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для. требования Генподрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ.

По п. 4.2.2 Договора определяет конечный срок выполнения работ, который является последним днём установленного срока выполнения работ согласно Графику производства и стоимости работ (Приложение № 1 к Договору).

Согласно Дополнительного соглашения № 3 от 09.01.2018г. сумма Договора составляет 4 237 728,10 руб.

Согласно Дополнительного соглашения № 1 от 30.11.2017г. (п. 1.1) и Г рафика производства работ (Приложение № 1 к Договору) был установлен новый срок выполнения работ - 28.12.2017 года.

Однако Генподрядчиком работы в установленный срок сданы не были.

Работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с Договором Генподрядчиком были сданы 09.01.2018 г. (согласно Акта по форме КС-2 от 09.01.2018г.). Просрочка составила: с 29.12.2017г. по 09.01.2018г. (включительно) - 12 календарных дней.

Заказчик, согласно Справке о стоимости работ и затрат (КС-3) произвел оплату за выполненные работы в полном объеме на сумму 4 237 728, 10 рублей.

Согласно п. 12.4.10. Договора в случае задержки Генподрядчиком срока начала и/или завершения работ по Объекту в соответствии с Графиком производства и стоимости Работ (начальный и конечный сроки выполнения Работ) Генподрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Объекту за каждый день просрочки.

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии с ост. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Ответчиком исковые требования не оспариваются.

Более того, Ответчик иск признает, что согласно абз. 3 п. 3 ч. 4 ст. 170 АПК РФ является основанием для удовлетворения иска. Указанное признание  в части взыскания основной задолженности и процентов суд принимает.

Таким образом, исковые требования законны и подлежат удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина возмещается  ответчиком  истцу.

Согласно ч. 3 ст. 333.40 НК РФ при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «Инвест-Строй»  (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) в пользу НО «Региональный фонд капительного ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) пеню в сумме                              50 852,73  руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 610,00 руб.

Вернуть НО «Региональный фонд капительного ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) госпошлину из бюджета в размере 5475,00 руб., уплаченную по платежному поручению № 0498 от 03.08.2020.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                  В.И. Гайворонский