АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

(Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-82051/24-150-624

г. Москва

17 октября 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи Михайловой А.Э., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мироваровым М.Х.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (394065, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД  ВОРОНЕЖ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ГЕРОЕВ СИБИРЯКОВ, Д. 46, ОГРН: 1153668023740, Дата  присвоения ОГРН: 29.04.2015, ИНН: 3666199056)  

к ФГУП "ДИРЕКЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (107113, Г.МОСКВА,  ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛЬНИКИ, ПЕР ПЕСОЧНЫЙ, Д. 2,  ОГРН: 1037851047431, Дата присвоения ОГРН: 06.03.2003, ИНН: 5032034971)  

об обязании исполнить обязательства в области сохранения, использования и  государственной охраны объекта культурного наследия,  

третье лицо: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  в заседании приняли участие: согласно протоколу судебного заседания,  

РЕШИЛ:

Обязать ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  "ДИРЕКЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) исполнить обязательства в области сохранения, использования и  государственной охраны объекта культурного наследия в натуре, а именно:  

- в течение трех месяцев с даты вступления судебного решения по настоящему делу в  законную силу разработать и согласовать в установленном порядке с Управлением научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного  наследия регионального значения "Здание пожарной части" (

<

...>);  

- в течение двенадцати месяцев с даты согласования Управлением научно-проектной  документации выполнить в порядке, предусмотренном ст. 45 Федерального закона N 73-ФЗ,  работы по сохранению указанного объекта культурного наследия регионального значения  

"Здание пожарной части" (

<

...>) в  соответствии с согласованной проектной документацией.  

В случае неисполнения вступившего в законную силу решения суда по данному делу  взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  "ДИРЕКЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) в пользу УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  судебную неустойку в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый случай неисполнения  решения суда в установленный решением срок до момента фактического исполнения  решения суда.  

В удовлетворении остальной части заявления об установлении судебной неустойки  отказать.  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья А.Э. Михайлова