1043/2023-244231(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 226-56-17, (846) 207-55-15  

http://www.samara.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А55-34371/2022

25 июля 2023 года

г. Самара

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 июля 2023 года  

Полный текст решения изготовлен 25 июля 2023 года Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Михайловой М.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания –  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании 18 июля 2023 года дело по иску Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального района  Кошкинский Самарской области  

к Обществу с ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания  "Стройдор"  

о взыскании 3 110 007 руб. 36 коп. 

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью Производственная  Строительная Компания "Стройдор"  

к Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации  муниципального района Кошкинский Самарской области  

о взыскании 71 644 руб. 03 коп. третьи лица: 1. ООО «Транспортная Средневолжская Компания»; 

2. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.  при участии в заседании  

от истца – ФИО2, доверенность от 16.12.2022, диплом,  от ответчика – ФИО3, доверенность от 01.10.2021, диплом,  

от третьего лица 1 – ФИО4, доверенность от 25.03.2020, удостоверение,  от третьего лица 2 – не явился, извещен,  

установил:

Комитет по Жилищно-Коммунальному Хозяйству и Строительству Администрации  Муниципального Района Кошкинский Самарской Области обратился в арбитражный суд  с иском к Обществу с ограниченной ответственностью Производственная Строительная  Компания "Стройдор" о взыскании убытков в сумме 3110007 руб. 36 коп.  

Общество с ограниченной ответственностью Производственная Строительная  Компания "Стройдор" обратилось с встречным иском к Комитета по Жилищно-Коммунальному Хозяйству и Строительству Администрации Муниципального Района  Кошкинский Самарской Области о взыскании неустойки в сумме 71644 руб. 03 коп.  

Истец по первоначальному иску поддержал заявленные требования, встречные  исковые требования не признал.  

Ответчик по первоначальному иску исковые требования не признал, представил  возражения на отзыв истца на встречное исковое заявление.  

Третье лицо 1 ходатайствовало об отложении судебного заседания.  

Суд, в порядке ст. 158 АПК РФ не находит оснований для удовлетворения  ходатайства третьего лица 1.  

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов,  изложенных в исковом заявлении, встречном исковом заявлении, заслушав пояснения  представителей сторон, суд считает подлежащими удовлетворению встречные исковые  требования, в первоначальных исковых требованиях следует отказать по следующим  основаниям.  

Как следует из материалов дела, в соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам электронного аукциона   № 0842200002120000183 между Комитетом по Жилищно-Коммунальному Хозяйству и  Строительству Администрации Муниципального Района Кошкинский Самарской области,  в лице ФИО5 (далее - Муниципальный Заказчик, Истец) и Обществом с  ограниченной ответственностью Производственная Строительная Компания  «СТРОЙДОР», в лице директора ФИО6 (далее - Подрядчик, Ответчик) был  заключен муниципальный контракт от 18.08.2020 № 0183 на выполнение работ по ремонту  дорог местного значения сельских поселений муниципального района Кошкинский  Самарской области, цена контракта по итогам вышеуказанного аукциона составила  18 066 201 (восемнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч двести один) рубль 96  копеек.  

 Также, по итогам еще одного электронного аукциона № 0842200002121000032  между Истцом и Ответчиком был заключен муниципальный контракт от 14.05.2021   № 0032 на выполнение работ по ремонту дорог местного значения сельских поселений  муниципального района Кошкинский Самарской области, цена контракта по итогам  вышеуказанного аукциона составила 18 818 076 (восемнадцать миллионов восемьсот  восемнадцать тысяч семьдесят шесть) рублей 80 копеек.  

В обосновании своих исковых требований истец ссылается на Акт проверки  соблюдения условий соглашений от 15.04.2020 № 706-01/2020-067 и от 11.05.2021 № 70606/2021-064 о предоставлении субсидий бюджету сельского поселения Кошки Самарской  области от 20.05.2022.  

Главой 3 Проверки соглашения от 15.04.2020 № 706-01/2020-067, Акта проверки  соблюдений условий соглашений от 15.04.2020 № 706-01/2020-067 и от 11.05.2021 № 70606/2021-064 о предоставлении субсидий бюджету сельского поселения Кошки Самарской  области в ходе проверки ремонта дорог по соглашению от 15.04.2020 № 706-01/2020-067  рассмотрена информация с официального сайта единой информационной системы в сфере  закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт ЕИС). В  обоснование исполнения муниципальных заказов заказчиком представлены  муниципальные контракты (далее - МК), справки стоимости выполненных работ и затрат  по форме № КС-3 (далее - КС-3), акты о выполненных работ по форме № КС-2 (далее - КС-2), платежные поручения, исполнительная документация.  

В соответствии с пунктом 3.1 Акта, Подрядная организация определена в рамках  объединённой закупки № 0842200002120000183 (далее - закупка). Помимо ремонта дорог  на территории сельского поселения Кошки закупка предусматривает работы на  территориях сельских поселений в границах муниципального района Кошкинский  Самарской области: Большая Константиновка, Русская Васильевка, Большое Ермаково,  Старое Максимкино, Степная Шентала, Четыровка, Шпановка.  

Закупка проведена в форме электронного аукциона, наименование закупки  «Выполнение работ по ремонту дорог местного значения о поселений муниципального  района Кошкинский Самарской область». Наименования объектов ремонта дорог  конкретного сельского поселения указаны в техническом задании (дефектных ведомостях,  сметах), Перечне объектов по соглашению от 15.04.2020 № 706-01/2020-067. Начальная  (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с положениями ст. 22.  

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных (далее - Закон   № 44-Ф3) в сумме 25 445 354,68 руб. Финансовое обеспечение закупки предусматривает  оплату в 2020 году в сумме 17 017 511,04 руб. 2021 году в сумме 8 427 843,64 руб.  НМЦК была рассчитана на основании дефектных ведомостей локальными ресурсными  сметными расчётами (номера смет указаны в Таблице № 9 Приложения к акту проверки)  по территориальным сметам и нормативам Самарской области в редакции 2014 года,  включены в федеральный реестр сметных нормативов.  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных  нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок  товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких  закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в  части, касающейся планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков  (подрядчиков, исполнителей); заключения гражданско-правового договора, предметом  которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе  приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской  Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также  бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и  5 статьи 15 настоящего Федерального закона; особенностей исполнения контрактов;  мониторинга закупок товаров, работ, услуг; аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;  контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных  правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд (статья 1).  

Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  предусмотрено, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского  кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из  настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих  отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права,  содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения,  должны соответствовать настоящему Федеральному закону.  

Требования к содержанию контракта изложены в статье 34 Федерального закона от 5  апреля 2013 года № 44-ФЗ.  

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях,  предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять  участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке,  заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается  контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным  законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в  определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка,  окончательное предложение не предусмотрены.  

 В соответствии со статьей 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» он применяется к отношениям, связанным с  осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или  муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой  информационной системе или на официальном сайте Российской Федерации в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг либо  приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу  настоящего Федерального закона. К отношениям, возникшим до дня вступления в силу  настоящего Федерального закона, он применяется в части прав и обязанностей, которые  возникнут после дня его вступления в силу, если иное не предусмотрено настоящей  статьей. Государственные и муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры  бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,  сохраняют свою силу.  

В вышеуказанном Акте содержится вывод что, при определении НМЦК пересчёт  базисной стоимости в текущий уровень цен выполнен ресурсным методом, на две  текущие даты – 2019 год и на II квартал 2020 года.  

Материалами дела опровергаются утверждения истца по первоначальному иску о  завышенной стоимости материала (асфальтобетонной смеси) для устройства ИДН,  завышении ответчиком по первоначальному иску стоимости работ по укладке переливных  труб (к осмотру не предъявлено 18 м труб Д 325мм), так как стоимость контракта  определялась в рамках подготовки и размещения истцом по первоначальному иску заявки  по заключению муниципальных контрактов, а также при подписании актов (КС-2)  выполненных работ и справок (КС-3) о стоимости выполненных работ и затрат,  составленных на основании соответствующих сметных расчетов, являвшихся  неотъемлемым приложением к аукционной документации с применением установленных  по итогам проведенных электронных аукционов соответствующих понижающих  коэффициентов. Все дополнительные работы были оформлены сторонами  соответствующими дополнительными соглашениями к муниципальным контрактам в  строгом соответствии с положениями Закона № 44-Ф3. Факт укладки труб подтвержден  соответствующим протоколом урегулирования замечаний, подписанным между истцом по  первоначальному иску и третьим лицом – Министерством транспорта и автомобильных  дорог Самарской области.  

Согласно пункта 7.3.4. муниципальных контрактов, Подрядчик обязан, при  осуществлении производства работ вести исполнительную документацию в соответствии  с требованиями сборника форм исполнительной производственно-технической  документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных  сооружений на них, утверждённого распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478- р, приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие требований к  составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,  реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований,  предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей  инженерно-технического обеспечения», СП48.13330.2011 и сдать исполнительную  документацию Заказчику до подписания Акта сдачи-приемки законченных работ по  Объекту.  

В соответствии с п. 8.5 муниципального контракта № 0183 от 18.08.2020 года,  муниципального контракта № 0032 от 14.05.2021 года при обнаружении недостатков,  выявленных при сдаче –приемке работ (этапов), Заказчик предоставляет Подрядчику  письменное предписание с перечнем недостатков с указанием видов и объемов  некачественно выполненных работ (Дефектов), подлежащих исправлению, а также с  указанием соразмерного срока для устранения недостатков.  

Согласно п. 8.6 вышеуказанных контрактов предусмотрено, что работы (этапы),  выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с условиями настоящего  Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного устранения  недостатков Подрядчиком.  

Судом установлено, что никаких замечаний со стороны первоначального истца  данные акты КС-2, КС-3 не содержат, из чего следует, что исполнительная документация  была передана ответчиком истцу в полном объеме до подписания указанных актов, а  выполненные работы приняты истцом по первоначальному иску без каких-либо замечаний  и нарушений.  

Кроме того, судом установлено, что 04.07.2018 года между ООО ПСК «Стройдор» и  ООО «Транспортная Средневолжская Компания» был заключен Договор поставки № 26.  В соответствии с п. 11. данного Договора, Поставщик обязуется передать товар в  соответствии со Спецификацией (Приложением), а Заказчик принять и оплатить Товар в  соответствии с условиями Договора. В силу п. 8.2. Договора поставки он вступает в силу  со дня его подписания сторонами и действует до 31.12.2018г. Если за 10 дней до  окончания срока действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о  расторжении договора, то договор считается пролонгированным на следующий  календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций неограниченно.  

Также, 23.08.2019 года между ООО ПСК «Стройдор» и ООО «Транспортная  Средневолжская Компания» был заключен договор на оказание услуг спецтехники. В  соответствии с пунктом 1.1. «Исполнитель» в лице ООО «Транспортная Средневолжская  Компания» обязуется оказать услуги по работе спецтехники (Согласно Приложению № 01  к данному договору), а Заказчик в лице ООО ПСК «СТРОЙДОР» оплатить эти услуги. В  соответствии с п. 3.1 вышеуказанного договора он вступает в силу с момента подписания  и действует до 31.12.2019 года. Если за 10 дней до окончания срока действия договора ни  одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении договора, то договор считается  пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. Количество  пролонгаций неограниченно.  

Таким образом, судом установлено, что, на момент исполнения Истцом и  Ответчиком вышеуказанных муниципальных контрактов, данные Договоры между  Ответчиком и Третьим лицом расторгнуты не были и являлись действующими.  

Согласно Протокола № 01 от 31.08.2020г. согласования стоимости работ, который  является Приложением № 01 к Договору № 27 от 23.08.2019 года, Исполнитель и  Заказчик согласовали стоимость и вид работ, местом оказания услуг была определена  Самарская область, Кошкинский район, с. Четыровка.  

Из данных документов суд усматривает, что вышеуказанные услуги ООО  «Транспортная Средневолжская Компания» оказывались в рамках исполнения  обязательств ООО ПСК «Стройдор» по муниципальным контрактам от 18.08.2020 № 0183,  от 14.05.2021 № 0032. Обязательства по исполнению вышеуказанных договоров были  исполнены ООО «Транспортная Средневолжская Компания» в полном объёме, что  подтверждается соответствующими актами оказания услуг, подписанными обеими  сторонами, претензий качеству и объему выполненных работ ООО ПСК «Стройдор» не  предъявляло.  

Имеющиеся в материалах дела транспортные накладные на перевозку грунта,  составленные ООО «Транспортная Средневолжская Компания» и подписанные со  стороны ООО ПСК «СТРОЙДОР» в течении срока исполнения муниципальных  контрактов, а именно: от 21.08.2020 года, от 24.08.2020 года, 22.08.2020 года, 07.10.2020  года, от 24.08.2020 года, от 25.08.2020 года, от 25.08.2020 года, 22.08.2020 года, от  21.08.2020 года, 22.08.2020 года, от 07.10.2020 года, от 07.10.2020 года, 07.10.2020 года,  23.08.2020 года, 21.08.2020 года, прямо доказывают факт выполнения работ по перевозке  грунта на объекты истца по первоначальному иску с целью надлежащего исполнения  ответчиком по первоначальному иску своих обязательств по вышеуказанным  муниципальным контрактам.  

Кроме того, согласно приобщенным к материалам дела материалам проверки по  сообщению о факте мошеннических действий из числа сотрудников ООО ПСК  "Стройдор", зарегистрированного в Книге регистрации сообщений о преступлениях  

ОМВД России по Кошкинскому району Самарской области под № 1304 от 01.11.2022,  сотрудниками полиции были опрошены все причастные к этому лица – глава сельского  поселения Четыровка муниципального района Кошкинский Самарской области, директор  ООО «Политотдел», водители и сотрудники ООО «Транспортная Средневолжская  Компания» и ООО ПСК «СТРОЙДОР», которые также подтвердили факт вывоза ООО  «Транспортная Средневолжская Компания» грунта из карьера в с. Четыровка  Кошкинского района Самарской области в объемах, установленных муниципальными  контрактами.  

Суд принимает во внимание, что муниципальными контрактами и техническими  заданиями к ним не было предусмотрено обязанности подрядчика изготовить (составить)  транспортную схему о дальности перевозки грунта, и приходит к выводу о том, что  имеющиеся в материалах дела путевые листы и транспортные накладные, в совокупности  с другими доказательствами, являются надлежащим подтверждением добросовестного  исполнения ответчиком по первоначальному иску своих обязательств в данной части по  указанным муниципальным контрактам.  

Таким образом, суд приходит к выводу о несостоятельности доводов истца  относительно отсутствия у ответчика по первоначальному иску документального  подтверждения выполнения работ по перевозке грунта на расстояние до 30 км, а также  иных, указанных в первоначальном исковом заявлении, недостатков выполненных работ  со стороны ответчика по первоначальному иску.  

Относительно обоснованности встречного иска судом установлено следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд», по итогам электронного аукциона № 0842200002121000032 между  истцом по встречному иску и ответчиком по встречному иску был заключен  муниципальный контракт от 14.05.2021 № 0032 на выполнение работ по ремонту дорог  местного значения сельских поселений муниципального района Кошкинский Самарской  области (далее - Контракт), в соответствии с которым Подрядчик обязался выполнить  собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по ремонту дорог  местного значения сельских поселений муниципального района Кошкинский Самарской  области и сдать Заказчику выполненные работы, а Заказчик обязался принять и оплатить  выполненные работы.  

Согласно п. 4.2 Контракта обязательство по оплате фактически выполненных  Подрядчиком работ должно быть исполнено в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после  предъявления Подрядчиком к оплате подписанных Сторонами актов выполненных работ  по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  

В п. 9.2 Контракта стороны установили, что в случае просрочки исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,  пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере  одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Факт допущенной ответчиком по встречному иску просрочки оплаты выполненных  истцом по встречному иску работ достоверно подтверждается имеющимися материалами  дела, в том числе актом сверки.  

Истцом по встречному иску начислена ответчику по встречному иску неустойка в  сумме 71 644 руб. 03 коп.  

Судом проверен и признан правильным расчет размера неустойки, приведенный  

истцом во встречном исковом заявлении.  

Суд доводы ответчика считает необоснованными. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований  - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В соответствии с частью 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должник обязан  возместить кредитору соответствующие убытки, которые определяются по правилам  статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации под убытками  понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет  произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его  имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило  бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено  (упущенная выгода). Лицо, право которого нарушено, может требовать полного  возмещения причиненных убытков, если законом или договором не предусмотрено  возмещение убытков в меньшем размере.  

По смыслу статей 15 и 393 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску о  взыскании убытков кредитор (истец) обязан представить суду доказательства,  подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью  достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим  исполнением обязательства должником и названными убытками.  

В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не  допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить  вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное  заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).  В случае несоблюдения указанных требований суд с учетом характера и последствий  допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права  полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.  Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий  предполагаются.  

При указанных обстоятельствах основания для удовлетворения первоначальных  исковых требований отсутствуют . В первоначальном иске следует отказать.  

Встречные исковые требования о взыскании с Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации муниципального района  Кошкинский Самарской области в пользу Общества с ограниченной ответственностью  Производственная Строительная Компания "Стройдор" неустойки в сумме 71 644 руб. 03  коп., являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины  относятся на ответчика по встречному иску и подлежат взысканию в пользу истца по  встречному иску в сумме 2866 руб.  

Руководствуясь ст. 110,167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.  

 Встречные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  

Производственная Строительная Компания "Стройдор" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) неустойку в сумме 71 644 руб. 03 коп., а также расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 2866 руб.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный  апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный  суд Самарской области.  

Судья / М.В. Михайлова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 21.02.2023 2:12:00

Кому выдана Михайлова Мария Владимировна