Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Пермь 

30.08.2021 года Дело № А50-2320/21

Резолютивная часть решения объявлена 26.08.2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 30.08.2021 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи катаевой-Гатиатуллиной Л.Р., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПЕРВОЕ ПЕРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН: 1145958033715, Дата присвоения ОГРН: 30.06.2014, ИНН: 5904640701, КПП: 590401001, ДИРЕКТОР: Куликов Артем Александрович)

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «ГСИ-ПЕРМНЕФТЕГАЗСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.08.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 590501001, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ФИО2)

третьи лица: ООО «ЛУКОЙЛ-ЛИНК», 

ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» 

о взыскании долга и процентов.

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО3, паспорт, доверенность 01.03.2021г., 

от ответчика: ФИО4, паспорт, доверенность №17 от 01.01.21г., ФИО5, паспорт, доверенность от 01.01.2021г,

от третьих лиц: не явились, извещены,

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВОЕ ПЕРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (далее - Истец, Субподрядчик) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ГСИ-ПЕРМНЕФТЕГАЗСТРОЙ» (далее - Ответчик, Подрядчик) о взыскании задолженности в размере 7 045 988 руб. 09 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 245 173 руб. 64 коп.

Определением суда от 18.03.2021 г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» (603006, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (614055, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

12.08.2021 г. в материалы дела поступило заявление от ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепродукт» об изменении наименования. В обосновании данного заявления Общество ссылается на тот факт, что 14.07.2021 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, по наименованию юридического лица на ООО «ЛУКОЙЛ – Инженерные Навыки и Компетенции» (ООО «ЛУКОЙЛ – ЛИНК).

Протокольным определением суда от 26.08.2021 г. в порядке со ст. 124 АПК РФ произведена смена наименования третьего лица ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепродукт»  на ООО «ЛУКОЙЛ – Инженерные Навыки и Компетенции» (ООО «ЛУКОЙЛ – ЛИНК).

В судебном заседании 08.06.2021 г. Ответчиком заявлено ходатайство о проведении по делу судебной строительно-технической экспертизы.

Истец возражает относительно удовлетворения ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы. Считает ее нецелесообразной, поскольку представил в материалы дела флэш-носитель, на котором содержится вся документация, подтверждающая поручение подрядчику спорных работ. Кроме того, обращает внимание суда на тот факт, что каждая передаваемая подрядчику рабочая документация на выполнение работ имела штамп «В производство работ». Также выполнение работ подтверждается Актами скрытых работ, подписанными Ответчиком и иной исполнительной документацией, переданной Ответчику. Более того, работы на объекте продолжаются, в связи с чем не представляется возможным определить объем работ, выполненных именно Истцом.

Ходатайство Ответчика о назначении судебной экспертизы судом рассмотрено, в его удовлетворении отказано в связи с отсутствием оснований, установленных ст. 82 АПК РФ. Заявленные обстоятельства, подлежащие установлению в ходе экспертного исследования, могут быть установлены и подлежат установлению вне рамок экспертного исследования посредством анализа представленных доказательств.

Истец на иске настаивает в полном объеме. В обоснование своих требований ссылается на отправку ответчику актов выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, передачу исполнительной документации на выполненные работы. Ответчик, в свою очередь, представленные документы не подписал и до настоящего момента не оплатил выполненные истцом работы. 

Ответчик с иском не согласен, в обоснование своей позиции представил письменный отзыв. Полагает, что предъявленные к оплате работы являются дополнительными, с Ответчиком в установленном законом порядке не согласовывались. Кроме того указывает, что стоимость спорных объемов работ не согласовывалась, а проектная документация на выполнение указанных работ Ответчиком Истцу не передавалась. 

Третье лицо - ООО «ЛУКОЙЛ-ЛИНК» в судебное заседание не явилось, представило отзыв. Поясняет, что договор между Истцом и Ответчиком заключен во исполнение договора №УП-6-16 от 22.04.2016 между ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на выполнение комплекса работ и услуг по строительству объекта «под ключ». Общая стоимость работ по указанному договору с учетом дополнительных объемов составляет 1 311 079 233 руб. 28 коп. (в редакции дополнительного соглашения №5 от 15.12.2017). Данная сумма включает в себя все возможные затраты подрядчика (Ответчика) на выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе и стоимость дополнительных и непредвиденных работ. Также ссылается на то, что документы, подтверждающие заблаговременное уведомление Ответчиком о необходимости выполнения дополнительных работ, в адрес ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегородниинефтепроект» не направлялись.

Третье лицо - ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в судебное заседание не явилось, отзыв не представило.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил.

Как следует из материалов дела, 30.03.2017 г. между ООО «ПЕРВОЕ ПЕРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (Субподрядчик) и ООО «ГСИ-ПЕРМНЕФТЕГАЗСТРОЙ» (Подрядчик) заключен договор строительного подряда (субподряда) №9492 (далее - Договор).

Согласно п. 2.1 Договора предметом Договора являются электромонтажные работы по проекту «Строительство железнодорожной эстакады слива нефтепродуктов для дальнейшей переработки в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в соответствии с Графиком строительно-монтажных работ. Субподрядчик обязался производить работы в полном соответствии с выданной Подрядчиком в производство работ рабочей документацией, строительными нормами и правилами (п. 6.1.2 Договора). Заказчиком по Договору является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Генподрядчиком – ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегородниинефтепроект» (ст. 1 Договора).

Предельная максимальная стоимость всех работ по Договору составляет 80 000 000 рублей (п. 3.1 Договора) и определяется в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в течение 100 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика на основании представленных Субподрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 НКЛ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 НКЛ на основании выставленного Субподрядчиком счета-фактуры (п. 7.7 Договора). Оплата по Договору Подрядчиком произведена с нарушением условий, предусмотренных п. 7.7 Договора.

12.05.2017 истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-73-301-ЭМ, 0148636-6-16-73-301-ЭМ.СО с отметками «В производство работ» со стороны ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «Лукойл-Пернефтеоргсинтез», ООО «ГСИ-ПНГС». Истец, получив измененную проектную документацию по накладной №255 от 14.08.2017, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документацией шифр проекта 0148636-6-16-73-301-ЭМ. изм. 1 и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не последовало.

Локальные сметные расчеты №0148636-6-16-73-301-ЭМ.СД/Э-16422, №0148636-6-16-73-301-ЭМ.СД/Э-17012 доп. к Э-16422, №0148636-6-16-73-301-ЭО.СД/Э-17011 доп. к Э-16359 были подготовлены ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлены истцу по электронной почте в соответствии с п. 3.1, п. 3.3. договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Замечаний к содержанию и составу, видам, объемам работ и их стоимости со стороны ООО «ГСИ-ПНГС», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» не последовало.

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации шифр 0148636-6-16-73-301-ЭМ, 0148636-6-16-73-301-ЭМ.СО истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-301-ЭМ.СД/Э-16422, Электрооборудование, основание - 0148636-6-16-73-301-ЭМ.СО на сумму 71 620 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-301 -ЭМ.СД/Э-16422, Электрооборудование, основание - 0148636-6-16-73-301-ЭМ.СО на сумму 215 436,81 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-301-ЭМ.СД/Э-17012 доп. к Э-16422, Электрооборудование, основание - 0148636-6-16-73-301-ЭМ изм.1 на сумму 140 820 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-301-ЭМ.СД/Э-17012 доп. к Э-16422, Электрооборудование, основание - 0148636-6-16-73-301-ЭМ изм.1 на сумму 176 784,2 руб.

27.04.2017 истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-73-301-ЭО.СО  с отметкой «В производство работ» со стороны ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС». 

Истец, получив измененную проектную документацию, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п.3.1., п.3.3. договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). 

Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-73-301-ЭО изм. 1. и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации у ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не имеется.

Локальный сметный расчет №0148636-6-16-73-301-ЭО.СД/Э-17011 доп. к Э-16359 был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п.3.1., п.3.3. договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Замечаний к содержанию и составу, видам, объемам работ и их стоимости у ООО «ГСИ-ПНГС», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» не возникло.

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации 0148636-6-16-73-301-ЭО.СО изм.1 истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-301-ЭО.СД/Э-17011 доп. к Э-16359, Электроосвещение, основание - 0148636-6-16-73-301-ЭО.СО изм.1 на сумму 16 180 рублей, Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №о 0148636-6-16-73-301-ЭО.СД/Э-17011 доп. к Э-16359, Электроосвещение, основание - 0148636-6-16-73-301-ЭО.СО изм.1 на сумму 77 516,45 руб.

19.01.2017 истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-703-303-A3M. СО с отметкой «В производство работ» со стороны ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС». Истец, получив измененную проектную документацию, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п.3.1, п.3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документацией шифр проекта 0148636-6-16-73-303-АЭМ и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации у ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не возникло.

Локальный сметный расчет №К-7374 на основании проектной документации 0148636-6-16-73-303-АЭМ.СО был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п.3.1, п.3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Замечаний к содержанию и составу, видам, объемам работ и их стоимости у ООО «ГСИ-ПНГС», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» не имеется.

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации 0148636-6-16-73-303-АЭМ.СО истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете № К-7374, основание - 0148636-6-16-73-303-АЭМ.СО на сумму 67 059,04 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете № К-7374, основание - 0148636-6-16-73-303-АЭМ.СО на сумму 62 536,37 руб.

Истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-73-303-ЭМ.СО.АН. Истец, получив измененную проектную документацию по накладной №286 от 18.09.2017, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). 

Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-73-303-ЭМ и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не последовало. Кроме того, 24.10.2017 между истцом и ответчиком был подписан Протокол согласования материалов №163-2017, на основании которого истцу было поручено произвести монтажные работы по устройству шкафа для хранения СИЗ в электроустановках габаритные размеры 434x2200x1232. Маркировочная надпись 73-303 ЩИЗ, 73-306ЩИЗ Арг.ГСО1-2-434x2200x1232-ЛДСП в количестве 2 шт.

Локальный сметный расчет №0148636-6-16-73-303-ЭМ.СД/Э-17544 доп. к Э-16505 на основании изменений в проектной документации 0148636-6-16-73-303-ЭМ.СО.АН был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п.3.1, п.3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Замечаний к содержанию и составу, видам, объемам работ и их стоимости у ООО «ГСИ-ПНГС», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» не возникло.

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации 0148636-6-16-73-303-АЭМ.СО истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете № 0148636-6-16-73-303-ЭМ.СД/Э-17267 доп. к Э-16505 на сумму 66 599,51 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете № 0148636-6-16-73-303-ЭМ.СД/Э-17544 доп. к Э-16505 на сумму 549 руб.

14.08.2017 истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-73-304-ЭМ.СО. Истец, получив измененную проектную документацию, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). 

Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-73-304-ЭМ изм.1 и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не имеется.

Локальный сметный расчет №Э-16315 на электрооборудование 523, Дренажная емкость тит. 73-304 на основании изменений в проектной документации 0148636-6-16-73-304-ЭМ.СО был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п.3.1, п.3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Замечаний к содержанию и составу, видам, объемам работ и их стоимости у ООО «ГСИ-ПНГС», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» не имеется.

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации 0148636-6-16-73-304-ЭМ.СО истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №Э-16315 на сумму 13 466 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №Э-16315 на сумму 24 910,60 руб. 

Истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-73-305-ЭМ.СО. Истец, получив измененную проектную документацию по накладной №299 от 10.10.2017, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-73-305-ЭМ и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не имеется.

Локальный сметный расчет №0148636-6-16-73-305-ЭМ.СД/Э-17065 на электрооборудование, пункт хранения и дозирования пенообразователя тит. 73-305 на основании изменений в проектной документации 0148636-6-16-73-305-ЭМ.СО был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п.3.1, п.3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). 

 В отношении выполненных работ по измененной проектной документации 0148636-6-16-73-305-ЭМ.СО истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-305-ЭМ.СД/Э-17065, Электрооборудование на сумму 9 951 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете № 0148636-6-16-73-305-ЭМ.СД/Э-17065, Электрооборудование на сумму 21 900,28 руб.

06.10.2017 истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-73-306-ЭМ с отметками «В производство работ» со стороны ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «Лукойл-Пернефтеоргсинтез», ООО «ГСИ-ПНГС». Истец, получив измененную проектную документацию по накладной №299 от 10.10.2017, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-73-306-ЭМ и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не имеется.

Локальный сметный расчет №0148636-6-16-73-306-ЭМ.СД/Э-17279 доп. к Э-16465 на электрооборудование, МПУ тит. 73-306 на основании изменений в проектной документации 0148636-6-16-73-306-ЭМ, изм.1 был подготовлен ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п.3.1, п.3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). 

 В отношении выполненных работ по измененной проектной документации 0148636-6-16-73-306-ЭМ, изм.1 истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-306-ЭМ.СД/Э-17279 доп. к Э-16465, электрооборудование на сумму 1 002 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-306-ЭМ.СД/Э-17279 доп. к Э-16465, электрооборудование на сумму 3 768,51 руб.

18.01.2017 истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-703-306-A3M.C0 с отметками «В производство работ» со стороны ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС». Истец, получив измененную проектную документацию, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-73-306-АЭМ и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не имеется.

Локальный сметный расчет №0148636-6-16-73-306-ЭМ.СД/Э-17299 доп. к Э-16465 на электрооборудование, МПУ тит. 73-306 на основании изменений в проектной документации 0148636-6-16-73-306-ЭМ изм.1, а также сметный расчет №К-7369 на К-7369 контроль и автоматика АЭМ (6307,64), МПУ тит.73-306 в связи с внесением изменений в проектную документацию 0148636-6-16-73-306-АЭМ.СО были подготовлены ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлены  истцу по электронной почте в соответствии с п.3.1, п.3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору).

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации 0148636-6-16-73-306-АЭМ.СО истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №К-7369 контроль и автоматика АЭМ (6307,64) на сумму 16 249,97 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №К-7369, материалы. К-7369 контроль и автоматика АЭМ (6307,64) на сумму 32 281,04 руб.

06.10.2017 истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-73-306-ЭМ с отметками «В производство работ» со стороны ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС». Истец, получив измененную проектную документацию по накладной №299 от 10.10.2017, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-73-306-ЭМ и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не имеется.

Локальный сметный расчет № 0148636-6-16-73-306-ЭМ.СД/Э-17299 доп. к Э-16465 электрооборудование, МПУ тит. 73-306_на основании изменений в проектной документации 0148636-6-16-73-306-ЭМ изм.1 (сл. записка №453 от 20.09.2017), был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п.3.1, п.3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору).

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации 0148636-6-16-73-306-ЭМ изм.1 истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-306-ЭМ.СД/Э-17299 доп. к Э-16465, электрооборудование на сумму 12 372 руб. и Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-306-ЭМ.СД/Э-17299 доп. к Э-16465, электрооборудование на сумму 40 989,47 руб.

06.08.2017 истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-73-306-АК, 0148636-6-16-73-306-АК.СО. 

Локальный сметный расчет №Э-16365 на электроосвещение, ресивер воздуха КИП тит.73-307 на основании изменений в проектной документации 0148636-6-16-73-307-ЭО.СО, а также сметный расчет №0148636-6-16-73-306-АК.СД/К-7406 на контроль и автоматику МПУ тит.73-306 на основании изменений в проектной документации 0148636-6-16-73-306-АК был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п.3.1, п.3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору).

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации 0148636-6-16-73-306-АК были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-306-АК.СД/К-7406, контроль и автоматика на сумму 2 511 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-306-АК.СД/К-7406, контроль и автоматика на сумму 1 047,91 руб.

Истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-73-307-ЭО.СО с отметками от 17.11.2016 «В производство работ» со стороны ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ГСИ-ПНГС». Истец, получив измененную проектную документацию, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-73-307-ЭО и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не имеется.

Локальный сметный расчет №Э-16365 на электроосвещение, ресивер воздуха КИП тит.73-307 на основании изменений в проектной документации 0148636-6-16-73-307-ЭО.СО был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п.3.1, п.3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору).

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации 0148636-6-16-73-307-ЭО.СО были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-307-ЭО.СД/Э-16365, электроосвещение на сумму 16 186 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-307-ЭО.СД/Э-16365, электроосвещение на сумму 125 412,53 рублей.

18.09.2017 истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр №0148636-6-16-73-313-ЭМ, №0148636-6-16-73-313-ЗМ.АН, №0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО1, №0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО1.АН. Истец, получив измененную проектную документацию по накладной №253 от 11.08.2017, №286 от 18.09.2017, №288 от 21.09.2017 приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-73-313-ЭМ изм.1 и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не имеется.

Локальные сметные расчеты №0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО.СД/Э-17199 доп. к Э-16339 на электрооборудование, кабельные сети высокого и низкого напряжения тит 73-313, №0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО1.СД/Э-17270 доп. к Э-16772 на электрооборудование, кабельные сети высокого и низкого напряжения тит 73-313, №Э-17056 доп. к Э-16339 на электрооборудование, кабельные сети высокого и низкого напряжения тит 73-313 были подготовлены ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлены истцу по электронной почте в соответствии с п. 3.1, п. 3.3. договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Замечаний к содержанию и составу, видам, объемам работ и их стоимости со стороны ООО «ГСИ-ПНГС», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» не имеется.

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации шифр 0148636-6-16-73-313-ЭМ изм.1 истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №Э-17056 доп. к Э-16339, электрооборудование, основание - 0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО.АН1 на сумму 13 043 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №Э-17056 доп. к Э-16339, электрооборудование, основание - 0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО.АН1 на сумму 12 962,27 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО1 .СД/Э-17270 доп. к Э-16772, электрооборудование, основание - 0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО1 изм. 2 на сумму 573 911,26 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО1.СД/Э-17270 доп. к Э-16772, электрооборудование, основание - 0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО1 изм.2 на сумму 617 006,29 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО.СД/Э-17199 доп. к Э-16339, электрооборудование, снование - 0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО изм.2 на сумму 57 373,09 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО.СД/Э-17199 доп. к Э-16339, электрооборудование, основание - 0148636-6-16-73-313-ЭМ.СО изм.2 на сумму 1 702 077,32 руб.

Истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр 0148636-6-16-73-314-ЭН, 0148636-6-16-73-314-ЭН.СО, 0148636-6-16-73-314-ЭН.ТЗ 1.1, 0148636-6-16-73-314-ЭН, 0148636-6-16-73-314-ЭН.МЭЗ. Истец, получив измененную проектную документацию по накладной №279, №281 от 05.09.2017, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-73-314-ЭН изм.3 и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не имеется.

Локальный сметный расчет №0148636-6-16-73-314-ЭН2.СД/Э-16415 доп. к Э-16293, а также локальный сметный расчет №0148636-6-16-73-314-ЭН.СД/Э-16798 доп. к Э-16293 был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Замечаний к содержанию и составу, видам, объемам работ и их стоимости со стороны ООО «ГСИ-ПНГС», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» не имеется. 

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации шифр №0148636-6-16-73-314-ЭН.СО изм.2 истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-73-314-ЭН2.СД/Э-16415 доп. к Э-16293, электроосвещение наружное, основание - 0148636-6-16-73-314-ЭН.СО изм.2 на сумму 255 157 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете по смете №0148636-6-16-73-314-ЭН2.СД/Э-16415 доп. к Э-16293, Электроосвещение наружное, основание - 0148636-6-16-73-314-ЭН.СО изм.2 на сумму 1 128 589,94 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете по смете № 0148636-6-16-73-314-ЭН.СД/Э-16798 доп. к Э-16293, Электроосвещение наружное, основание - 0148636-6-16-73-314-ЭН.СО на сумму 1 152 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете по смете № 0148636-6-16-73-314-ЭН.СД/Э-16798 доп. к Э-16293, Электроосвещение наружное, основание - 0148636-6-16-73-314-ЭН.СО на сумму 4 146,21 руб.

Истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр №0148636-6-16-60-60-ЭМ, №0148636-6-16-60-60-ЭМ.МЭЗ, №0148636-6-16-60-60-ЭМ.СО. Истец, получив измененную проектную документацию по накладной №299 от 10.10.2017, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Порученный истцу объем работ был выполнен в полном объеме, что подтверждается реестром исполнительной документации шифр проекта 0148636-6-16-60-60-ЭМ и приложенной к реестру исполнительной документацией. Исполнительную документацию принял и проверил представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ФИО6 и технический надзор заказчика - ФИО7 Замечаний к содержанию и составу исполнительной документации со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «ГСИ-ПНГС» не имеется.

Локальный сметный расчет №0148636-6-16-60-60-ЭМ.СД/Э-14389 был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п. 3.1, п. 3.3. договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Замечаний к содержанию и составу, видам, объемам работ и их стоимости со стороны ООО «ГСИ-ПНГС», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» не имеется.

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации шифр №0148636-6-16-60-ЭМ.СО истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-60-60-ЭМ.СД/Э-14389, электрооборудование, основание - 0148636-6-16-60-ЭМ.СО на сумму 76 424 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете по смете №0148636-6-16-60-60-ЭМ.СД/Э-14389, электрооборудование, основание - 0148636-6-16-60-ЭМ.СО на сумму 208 223,69 руб.

04.10.2017 и 06.10.2017 истцу была выдана в производство работ измененная ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» проектная документация шифр №0148636-6-16-60-60-ЭМ.Изм.1, №0148636-6-16-60-60-ЭМ.СО с отметками «В производство работ» со стороны ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект», ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ГСИ-ПНГС». Истец, получив измененную проектную документацию, приступил к исполнению порученного объема работ на условиях, предусмотренных п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 в соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). 

Локальный сметный расчет №0148636-6-16-60-60-ЭМ.СД/Э-14389, №0148636-6-16-60-60-ЭМ.СД/Э-17301 доп. к Э-14389 был подготовлен ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» и направлен истцу по электронной почте в соответствии с п. 3.1, п. 3.3 договора субподряда №9492 от 30.03.2017, Порядком определения стоимости работ (Приложение №2 к договору). Замечаний к содержанию и составу, видам, объемам работ и их стоимости со стороны ООО «ГСИ-ПНГС», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» не имеется.

В отношении выполненных работ по измененной проектной документации шифр 0148636-6-16-60-60-ЭМ.СО изм.1 истцом были подготовлены Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по смете №0148636-6-16-60-60-ЭМ.СД/Э-17301 доп. к Э-14389, Электрооборудование, основание - 0148636-6-16-60-60-ЭМ.СО изм.1 на сумму 1 476 руб., Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г. по основанию - 0148636-6-16-60-60-ЭМ.СО изм.1 на сумму 2 964,98 руб.

Вместе с тем, Подрядчик оплату выполненных работ Субподрядчику не произвел.

21.12.2020 г. Истец обратился к Ответчику с претензией  (исх. № 1195) с требованием погасить задолженность. Данная претензия оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Статья 310 ГК РФ предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств и одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

 Правовая природа анализируемых правоотношений сторон квалифицируется как отношения, регулируемые нормами ГК РФ о подряде (глава 37 Кодекса).

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации.

Согласно п. 2 ст. 744 ГК РФ внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

Из материалов дела следует, что ООО «Лукойл-Нижегородниинефтепроект» выдавал в «производство работ» измененную проектную документацию, а также подготавливал и направлял по электронной почте локальные сметные расчеты ООО «ГСИ «ПНГС», что подтверждается копией электронных писем между ответчиком и ООО "Лукойл-Нижегородниинефтепроект". Ответчик в свою очередь выдавал в производство работ, полученные от ООО "Лукойл-Нижегородниинефтепроект", измененную проектную документацию и локальные сметные расчеты на дополнительный объем работ. 

Суд, расценивает направленные изменения в проектную документацию с отметкой в «производство работ» ООО "Лукойл-Нижегородниинефтепроект", ООО "ГСИ-ПНГС", ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», а также подготовленные и направленные ООО "Лукойл-Нижегородниинефтепроект" локальные сметные расчеты как предложение (оферту) истцу выполнить дополнительный объем работ. Истец, приступив к выполнению порученного дополнительного объема работ, акцептовал ее на условиях, указанных в локальных сметных расчетах и проектной документации, путем выполнения дополнительного объема работ.

Порученный истцу дополнительный объем работ выполнен надлежащим образом, что подтверждается исполнительной документацией.

Письмами от 04.09.2019 №265, от 30.09.2019 №281 Истец требовал от Ответчика подписать акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, принять выполненный объем работ и оплатить фактически выполненные работы.

Письмом от 12.09.2019 №2662 Ответчик сообщил, что полученные им акты не могут быть приняты и оплачены ввиду предоставления неполного комплекта необходимых документов. Далее, письмом от 30.10.2019 №3093 Ответчик потребовал предоставить исполнительную документацию на выполненные работы.

После предоставления Истцом запрашиваемой исполнительной документации письмом от 18.12.2019 №307 Ответчик по спорным объемам работ замечаний не предъявлял. При этом срок их оплаты, предусмотренный п. 7.7 Договора, нарушил. Мотивированного отказа в подписании актов выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Ответчиком не представлено.

В силу пункта 7.4 Договора Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения документов (КС2, КС-3) подписать их либо в тот же срок предоставить в письменном виде мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок.

Согласно п. 3.1 договора субподряда №9492 от 30.03.2017 общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору соответствии с Порядком определения стоимости работ (Приложения № 2) ориентировочно составляет 80 000 000 руб., а кроме того НДС (18%) 14 400 000 руб., всего с НДС 94 400 000 руб.

Условие договора подряда об «ориентировочной цене» является указанием на приблизительную стоимости подлежащих выполнению работ по смыслу ст. 709 ГК РФ.

Субподрядчик известил Подрядчика о необходимости приемки работ, направив акты по формы КС-2 и Справки по форме КС-3 письмами от 04.09.2019 №265, от 30.09.2019 №281.

Факт направления, а также получения актов по форме КС-2 от 04.09.2019 подтверждается письмом Подрядчика от 12.09.2019 №2662, а актов по форме КС-2 от 30.09.2019 – подписью представителя Подрядчика о получении на указанном документе и письмом Подрядчика от 30.10.2019 №3093.

Указанное обстоятельство подтверждает исполнение Субподрядчиком обязанности по уведомлению Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ по Договору.

Подрядчик по существу устранился от приемки работ и подписания документов, мотивированное возражение об отказе от подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Ответчиком не представлено.

Согласно представленной сводной таблице по сдаче исполнительной документации по объектам «Железнодорожная эстакада, ЖД пути» на 08.11.2017, исполнительная документация Субподрядчика подписана Заказчиком в размере 20 папок, 16 папок принято эксплуатацией.      Выполнение работ также подтверждается Актом о потреблении электроэнергии на объектах Заказчика за октябрь 2017г., предъявленным Подрядчиком Субподрядчику. Кроме того, к выполнению работ было привлечено 24 работника Субподрядчика, что подтверждается табелем за октябрь 2017г.

В письме №2989 от 26.10.2017г. Подрядчик просил представить акты выполненных работ в связи с завершением реализации проекта и вводом объекта в эксплуатацию.

Акты о выполнении спорных работ были проверены 28.02.2018 представителем Заказчика (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»), замечания к выполненным работам отсутствовали и касались исключительно использования материалов (скриншоты писем от 28.02.2018 с электронной почты Svetlana.Bogdanova2@pnos.lukoil.com).

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 6 ст. 753 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

По смыслу указанных норм обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от подписания актов о приемке выполненных работ возложена на заказчика.

При оценке мотивов отказа от подписания актов выполненных работ суд исходит из следующего. 

Обоснованными мотивами для отказа от подписания акта могут быть: отрицательные результаты испытаний при приемке; нарушение процедуры приемки работ, предусмотренной договором или установленной нормативно-правовыми актами для отдельных объектов строительства; обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования объекта строительства для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком и др. (существенные недостатки). 

По смыслу указанных норм права с учетом п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51, оплате подлежат фактически выполненные и принятые заказчиком работы в соответствии с условиями договора.

Определяющим элементом подрядных правоотношений является результат выполненных работ, который непосредственно и оплачивается заказчиком.

Таким образом, при отсутствии мотивированного отказа от приемки выполненных работ работы считаются принятыми заказчиком, а потому подлежат оплате, а требование Истца о взыскании задолженности в размере 7 045 988,09 руб. заявлены правомерно и подлежат удовлетворению.

Исковых требований о применении к Субподрядчику мер ответственности, установленных ст. 723 ГК РФ, ответчиком, в том числе путем предъявления встречного иска, не заявлено. 

При этом доказательств невозможности использования результата работ, выполненных истцом, ответчиком в материалы дела не представлено (ст. ст. 9, 65 АПК РФ). 

Ответчик не оспорил ни факт выполнения работ на сумму 7 045 988,09 руб.,  не представил суду доказательств оплаты работ в полном объеме, а суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по правилам ст. 71 АПК РФ, находит исковые требования о взыскании задолженности обоснованными, подтверждёнными материалами дела и подлежащими удовлетворению в заявленном размере на основании ст. 307, 309, 408, 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 245 173,64 руб.

Согласно п. 1 ст.395 ГК РФ В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет судом проверен, признан арифметически верным. Ответчик расчет процентов, в том числе период начисления не оспорил, контррасчет не представил. 

Поскольку ответчиком допущена просрочка по оплате выполненных работ, Истцом правомерно заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 22.04.2020 по 25.01.2021 в сумме 245 173 руб. 64 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ПЕРВОЕ ПЕРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГСИ-ПЕРМНЕФТЕГАЗСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПЕРВОЕ ПЕРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 7 045 988 (семь миллионов сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) руб. 09 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 245 173 (двести сорок пять тысяч сто семьдесят три) руб. 64 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 59 456 (пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят шесть) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Е.Ю. Дрондина